АРБИТРАЖНЫЙ СУД  САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

г. Южно-Сахалинск                     

«24» сентября 2019 года                                              Дело № А59-4508/2019

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Ким С.И. в соответствии с п. 4 ст. 18 АПК РФ,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Масстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 693000, 

<

...>)

о взыскании неустойки по договору подряда № КТ-Схбк 043 от 07.12.2017 в размере 112 684 руб. 50 коп.,  

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Масстрой» обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 07.12.2017 № КТ-Схбк 043 на выполнение работ на объекте «Многофункциональный центр с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в г. Южно-Сахалинске» в размере в размере 112 684 руб. 50 коп.

В обоснование иска указано на нарушение ответчиком сроков выполнения работ по договору подряда.

Определением суда от 25.07.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, в соответствии со статьей 228 АПК РФ. 

12 сентября  2019 года судом принята резолютивная часть решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

17.09.2019 от ответчика поступило заявление об изготовлении мотивированного решения суда по делу. 

Поскольку ответчиком соблюден пятидневный срок, предусмотренный частью 2 статьи 229 АПК РФ для подачи заявления о составлении мотивированного решения, заявление ООО «Контек-Сервис» подлежит удовлетворению.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства, имеющиеся в деле, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, 07 декабря 2017 года между обществом с ограниченной ответственностью «МасСтрой» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» (подрядчик) заключен договор подряда № КТ-Схбк 043 на выполнение работ на объекте «Многофункциональный центр с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в г. Южно-Сахалинске» (далее – договор).

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что общая стоимость работ, подлежащих выполнению в соответствии с п. 1.1 договора, определяется приложением № 1 и составляет 8 868 412 руб. 72 коп., включая НДС 18% в сумме 1 352 808 руб. 72 коп.

В соответствии с п. 2.3.1 договора заказчик в течение 5 календарных дней с момента (дня) подписания настоящего договора, на основании выставленного подрядчиком счета, осуществляет оплату аванса в размере 50 %, что составляет 4 434 206 руб. 36 коп., включая НДС 18% 676 404 руб. 36 коп.

Согласно пункту 3.1 договора, календарные сроки выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяются сторонами в соответствии с графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

Дополнительным соглашением № 1 от 02 июля 2018 года к договору подряда от 07.12.2017 № КТ-Схбк 043 стороны согласовали продлить срок выполнения работ по договору до 30 августа 2018 года включительно.

04 сентября 2018 года стороны заключили дополнительное соглашение № 2 к договору подряда от 07.12.2017 № КТ-Схбк 043, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить, в соответствие с условиями настоящего дополнительного соглашения, работы по хозяйственно-бытовой канализации, возникшие в связи с корректировкой проекта на объекте строительства: «Многофункциональный центр с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в г. Южно-Сахалинске», а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их (пункт 1.1 дополнительного соглашения).

Согласно пункту 2.1 дополнительного соглашения, стоимость работ составляет 753 191 руб. 64 коп., включая НДС 18% в размере 114 893 руб. 64 коп.

Дополнительным соглашением № 3 от 31 октября 2018 года к договору подряда от 07.12.2017 № КТ-Схбк 043 стороны определили, что общая стоимость работ, подлежащих выполнению в соответствии с п. 1.1 настоящего договора, определяется приложением № 1 к дополнительному соглашению № 1 и составляет 8 721 073 руб. 20 коп., включая НДС 18% в сумме 1 330 333 руб. 20 коп.

31.08.2018 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ № 5 и справка о стоимости выполненных работ на сумму 1 606 926 руб. 36 коп. 

30.09.2018 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ № 6 и справка о стоимости выполненных работ на сумму 76 315 руб. 32 коп. 

31.10.2018 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ № 7 и справка о стоимости выполненных работ на сумму 387 199 руб. 30 коп. 

05.11.2018 сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ № 8 и № 9, и справка о стоимости выполненных работ на сумму 1 264 260 руб. 26 коп.

Поскольку ответчиком работы по договору подряда выполнены с просрочкой, истец направил в адрес ООО «Контек-Сервис» претензию № 25ПД от 26.04.2019 с требованием уплатить неустойку в размере 112 684 руб. 50 коп., которая оставлена без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Из условий договора правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде, а также общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о способах обеспечения исполнения обязательств. 

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами, или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного срока, так и промежуточных сроков выполнения работ.

Таким образом, срок выполнения работ является существенным условием договора подряда. 

Факт просрочки выполнения работ по договору подряда подтверждается материалами дела – договор, дополнительное соглашение, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

Согласно ст.ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

  В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с п. 8.4 договора подряда,  в случае если подрядчик не выполнит надлежащим образом свои обязательства в срок, предусмотренный договором, то заказчик вправе взыскать с него пени в размере 0,1 процента от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы настоящего договора.

При таких обстоятельствах суд считает требования истца о взыскании пени за просрочку выполнения работ по договору подряда за спорный период правомерными.

Расчет неустойки, подготовленный истцом, судом проверен и признан верным.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из положений ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик в порядке ст. 65 АПК РФ возражений относительно заявленных требований не заявил, о применении ст. 333 ГК РФ не ходатайствовал.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании неустойки по договору подряда в сумме 112 684 руб. 50 коп. подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст.ст.  110, 167-171 и 229 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Масстрой» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Масстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 112 684 руб. 50 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 381 руб., всего взыскать 117 065 (сто семнадцать тысяч шестьдесят пять) руб. 50 коп.

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (часть 2 статьи 229 АПК РФ).

Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                         С.И. Ким