АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-873/24

06 августа 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   23 июля 2024 г.

Полный текст решения изготовлен            06 августа 2024 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе  судьи Абдулиной С.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Гриценко Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Судостроительный-судоремонтный завод "Мидель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Росттрестстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 466377  руб.

третье лицо: ООО "Аксай-Стандарт"

при участии:

от истца: представители ФИО1 по доверенности от 15.01.2024, ФИО2 по доверенности от17.11.2023

от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 19.04.2024

от третьего лица: не явился, извещен 

 

установил:

акционерное общество "Судостроительный-судоремонтный завод "Мидель" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Росттрестстрой" о взыскании неосновательного обогащения  по договору строительного подряда от 25.09.2023 в размере 360000 руб., убытков в размере 106377 руб.

Истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования, уменьшив сумму неосновательного обогащения до 166745,7 руб., уточнения приняты судом.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования.

Ответчик возражал против иска, представил отзыв.

Третье лицо не явилось, ранее представило отзыв, который приобщен к материалам дела.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца и ответчика, суд установил следующее.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда от 25.09.2023 № Лифт-Мидель №1, по условиям которого подрядчик обязуется из материала Заказчика выполнить работы по монтажу фундаментов и металлоконструкций, согласно рабочей документации Архитектурно-строительные решения 11-23-СКП-АС «Шахта лифта» по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется, в случае их надлежащего выполнения принять результат выполненных работ по акту и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 3.1 договора, стоимость работ составляет 1200000 руб. Заказчик на основании счета, предоставленного подрядчиком, перечисляет на расчетный счет подрядчика оплату поэтапно первый этап аванс в размере 360 000, 00 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20% после подписания договора; второй этап аванс в размере 360 000, 00 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20% после монтажа металлоконструкций на уровне 3 этажа, согласно промежуточного акта, подписание которого не свидетельствует о стопроцентном выполнении работ, и который не влияет на исчисление гарантийного срока (п. 7.2); третий этап, окончательный расчет в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, передачи Заказчику всей необходимой исполнительной документации, после получения Заказчиком счета на оплату от Подрядчика.

Подрядчик обязуется приступить к работам не позднее 7 (семь) рабочих дней с даты поступления аванса на расчетный счет подрядчика и выполнить работы в течении 40 календарных дней. Подрядчик вправе сдать работы досрочно заблаговременно уведомив Заказчика о планируемой дате окончания работ.

Как следует из материалов дела, заказчиком произведена оплата первого этапа аванса в размере 360 000 рублей платежным поручением №1661 от 27.09.2023.

Вместе с тем, работы в установленный срок надлежащим образом не исполнены.

Истец предложил ответчику, с целью расторжения договора, обеспечить 20.11.2023 комиссионную приёмку качества и объёма работ, которые подлежали выполнению подрядчиком согласно сметному расчету №1 к договору. По результатам совместного обследования ответчиком подтверждено, что работы, которые ООО «РостТрестСтрой» обязалось выполнить по договору, в срок до 15.11.2023, в установленный срок не выполнены в объеме, предусмотренном сметным расчетом (Приложение №1) на общую сумму 1200000 рублей. Кроме того, сторонами зафиксированы замечания относительно качества выполненных подрядчиком работ, перечень которых указан в акте от 20.11.2023, подписанном сторонами в двухстороннем порядке.

Истец направлял ответчику требования об устранении недостатков письмом от 21.11.2023.

С учётом отсутствия выполнения результатов работ, истец указывает, что на стороне ответчика образовалось неосновательное обогащение в сумме 166745,7 руб. в виде неотработанного аванса, а также убытки в сумме 106377 руб. в виде стоимости устранения недостатков (уточненные требования).

Истец направил в адрес ответчика претензию, которая оставлена без финансового удовлетворения.

Неисполнение указанных требований послужило причиной для обращения в суд с первоначальным иском о взыскании убытков, суммы аванса по договору.

Рассмотрев исковое заявление, суд приходит к выводу о необходимости его удовлетворения в силу следующего.

Правовая природа анализируемых правоотношений сторон квалифицируется как отношения, регулируемые нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Ответчик, возражая против иска, ссылается на то, что результат работ невозможно достичь ввиду несоответствия фактическим характеристикам объекта, на котором предполагалось выполнение работ по монтажу оборудования проектным решениям.

Рассмотрев доводы сторон, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

В рассматриваемом случае проведение экспертизы для установления факта выполнения качественных работ, а также наличия недостатков невозможно, поскольку в настоящий момент, недостатки устранены силами иных лиц.

Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии возможности проведения судебной экспертизы, в связи с чем, дело рассматривается по имеющимся документам.

В соответствии со статьей 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно п.7.4 договора установлено, что в случае если заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то подрядчик своими силами и без увеличения сметной стоимости работ, обязан в течение 2 рабочих дней с даты получения требования заказчика приступить к устранению недостатков.

Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, в его адрес заказчиком направлялось требование об устранении недостатков, которое было оставлено без удовлетворения.

В силу ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии со  ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

При этом суд учитывает, что ответчик, не оспаривая факт обращений истца, в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств того, что им предпринимались действия по устранению недостатков и завершения работ по договору.

Исполнитель (подрядчик) обязан обеспечить надлежащее выполнение работ и своевременное устранение выявленных недостатков, исходя из критерия добросовестности участников гражданских правоотношений.

Не устранение исполнителем недостатков, непринятие мер к совместному разрешению конфликтной ситуации, в том числе, путем исправления недостатков выполненных работ расценивается судом как намеренный отказ от исполнения обязательств по договору и поэтому не может быть признан добросовестным и не подлежит правовой защите.

Поведение истца, заявившего требование об устранении недостатков в выполненных работах, не является поведением, отклоняющимся от стандартов разумного и добросовестного поведения любого участника данных правоотношений.

Факт несения расходов в заявленном размере подтвержден представленными истцом в материалы дела первичными документами по договору подряда №21 от 25.11.2023.

Расчет убытков ответчиком не оспорен.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В свою очередь, возражения ответчика судом рассмотрены и отклонены в силу следующего.

Согласно ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

Пункт 1 данной статьи возлагает на подрядчика как профессионала в сфере отношений, соответствующей характеру выполняемых по договору подряда работ, обязанность немедленно предупредить заказчика обо всех обстоятельствах, грозящих для заказчика неблагоприятными последствиями, касающимися предмета договора, и до получения от заказчика указаний приостановить работу.

Эта норма в совокупности с закрепленным в пункте 3 статьи 307 ГК РФ общим принципом солидаризма сторон, заключающимся в обязанности по взаимному оказанию необходимого содействия для достижения цели обязательства (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 № 7-П), устанавливает алгоритм ожидаемого поведения подрядчика, на котором строится стандарт добросовестного осуществления гражданских прав участником гражданского оборота (пункт 1 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 25 от 23 июня 2015 г. N 25).

Отклонения от указанного стандарта в соответствии с пунктом 2 статьи 10, пунктом 2 статьи 716 ГК РФ лишает подрядчика права ссылаться на соответствующие обстоятельства.

Равным образом, подрядчик вправе не приступать к работе при бездействии заказчика, выражающемся в непередаче необходимых для надлежащего выполнения работ материалов и документов, и вправе отказаться от исполнения договора применительно к пункту 2 статьи 328 ГК РФ, а также потребовать от заказчика возмещения причиненных этим убытков (статья 719 ГК РФ).

Таким образом, закон регламентирует порядок действий добросовестного, разумного и осмотрительного подрядчика, отклонение от которого должно иметь веские причины, чтобы быть оцененным судом как нормальное поведение подрядчика, не являющееся влекущей для него негативных последствий девиацией.

При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчик не нашел оснований для использования правового инструментария, содержащегося в статьях 716, 719 ГК РФ, фактически сочтя переданную ему заказчиком документацию достаточной для надлежащего выполнения принятых по договору обязанностей, он лишается права ссылаться на неисполнение заказчиком встречных обязанностей и несет негативные последствия ненадлежащего оказания услуг.

В этой связи, заявленные ответчиком доводы не могут быть приняты в качестве оснований для освобождения его от ответственности.

В связи с чем, суд приходит к выводу о том, выполненные ответчиком работы были произведены некачественно с отступлениями от требований действующих норм и правил.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации возложение на должника обязанности по возмещению убытков возможно лишь при наличии условий ответственности, предусмотренных законом. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать противоправность действий (бездействия) лица, причинившего убытки, их наличие и размер, причинную связь между правонарушением и убытками.

Таким образом, все условия для возмещения убытков имеются, а именно,  противоправное поведение ответчика, выразившееся в ненадлежащем исполнении обязанностей по договору,  наличие убытков, выразившихся в расходах по устранению последствий недостатков, имеется причинно-следственная связь между действиями ответчика и убытками.

Представленными истцом в материалы дела документами, оцененными судом с учетом требований статей 67, 68, 71 и 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признанными надлежащими письменными доказательствами по делу, подтверждено наличие факта наличия недостатков выполненных ответчиком работ

Поскольку убытки были причинены истцу ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств, что подтверждено материалами дела,  истцом обоснован размер понесенных убытков в размере 106377 руб., суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Также истцом заявлено о взыскании 166745,7 руб. неосновательного обогащения (уточненные требования).

В соответствии с пунктом 2 ст. 715 Гражданского кодекса  РФ,  если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Материалами дела подтверждается, что истец в рамках договора перечислил  ответчику сумму аванса.

Доказательств выполнения каких-либо работ и сдачи их заказчику на всю сумму аванса ответчиком в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено. 

В связи с направлением истцом ответчику письма о расторжении договора, возврате денежных средств и отсутствием доказательств выполнения ответчиком работ на сумму предоплаты, у ответчика отсутствуют основания для удержания указанных денежных средств.

Доводы ответчика о выполнении работ на сумму 429866 руб. документально не подтверждены, акты выполненных работ подписаны в одностороннем порядке, иные доказательства фактического выполнения работ по договору, а также согласования заказчиком выполнения дополнительных работ в дело не представлены. 

При этом третье лицо – заказчик работ в отзыве указало на наличие недостатков в работах ответчика, представило фото-фиксацию выявленных нарушений.

Ответчик указанные обстоятельства не опроверг, доказательства устранения недостатков не представил.

Статьей 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Представленными истцом в материалы дела документами, оцененными судом с учетом требований статей 67, 68, 71 и 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признанными надлежащими письменными доказательствами по делу, подтвержден факт наличия  неосновательного обогащения на сумму  166745,7 руб.

На основании изложенного, требование истца о взыскании 166745,7 руб. неосновательного обогащения признаётся судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истцом при подаче иска по платежному поручению № 47 от 15.01.2024 уплачена государственная пошлина в размере 12328 руб.

В соответствии со ст. 333.21 НК РФ, сумма государственной пошлины по настоящему иску с учетом уточнений, составляет 8462 руб.

Исходя из правил, установленных ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено, что судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, судебные расходы в размере 8462 руб. относятся судом на ответчика и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, 3866 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета в связи с уменьшением истцом суммы исковых требований.

Вместе с тем, поскольку истцом не представлен оригинал платежного поручения № 47 от 15.01.2024, оснований для возврата государственной пошлины из федерального бюджета РФ не имеется.

Государственная пошлина судом будет возвращена истцу после предоставления соответствующего ходатайства с приложением оригинала платежного поручения № 47 от 15.01.2024  на бумажном носителе с отметкой банка.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Росттрестстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Судостроительный-судоремонтный завод "Мидель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 166745,7 руб. неосновательного обогащения, 106377 руб. убытков, а также 8462 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               Абдулина С. В.