Арбитражный суд Пермского края

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А50-28167/2017

01 декабря 2017 г.

г. Пермь

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен          01 декабря 2017 года

 

          Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Антоновой Е.Д.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрел в заседании суда дело по иску 

Администрации г. Губахи  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 618250, 

<

...>)

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройГрупп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 614064, Пермский край, ул. Чкалова  д. 9, корпус Е)

о взыскании штрафа, пеней в сумме 10 949 руб. 52 коп.,

 

В заседании приняли участие:

от истца: ФИО2 (доверенность № 7 от 09.01.2017 г.), паспорт

от ответчика: не явился, извещён

 

        Истец, Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края обратился в арбитражный суд с иском к ООО «ИнвестСтройГрупп» о взыскании штрафа и пеней в размере 10 949 руб. 52 коп.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения судебного разбирательства извещён надлежащим образом, в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

На основании ч.4 ст. 137 АПК РФ, суд завершает предварительное судебное заседание и переходит к рассмотрению дела по существу.

Дело рассматривается судебным разбирательством, в отсутствие надлежащим образом  извещённого ответчика, по правилам  ст. 156 АПК РФ.

 

Исследовав материалы дела, доводы представителей истца, арбитражный суд установил.

  В соответствии с муниципальным контрактом № 0156300004315000048-0232109-01 от 21.12.2015 ответчик принял на  себя обязательство по выполнению работ по сносу ветхого  деревянного жилого дома по адресу: г. Губаха по адресу: г. Губаха, 

<

...> лет Октября, 15. (л.д. 17-26).

  Пунктом 4.1 контрактом предусмотрен срок начала   работ-в течении трёх дней с дату заключения муниципального контракта (т.е. с 21.12.2015 г.). Срок окончания работ-в течении 14 календарных дней с даты заключения муниципального контракта, то есть 04.01.2016 г.

 Согласно Акту приёмочной  комиссии № 1 от 11.01.2016 г.  на 11.01.2016 г. работы были не выполнены. (л.д. 27-35).

 08.02.2016 г. ответчик уведомил Администрацию городского округа «Город Губаха» о том, что работы по сносу ветхого жилого дома выполнены. (л.д. 35).

 Актом № 2 от 09.08.2016 г. зафиксирован факт выполнения работ по сносу дома. (л.д. 32-34).

 Пунктом 8.3.2 контракта предусмотрено, что  пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных  контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Неустойка рассчитана истцом по формуле и составляет 4 576 руб. 11 коп.

Согласно п. 8.3.3 контракта за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком   обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом ,подрядчик выплачивает заказчику штраф  в размере: а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. Штраф рассчитан истцом  следующим образом: 63 734 руб. 08 коп.х10%=6 373 руб. 41 коп.

Сумма начисленной за период с 11.01.2016 г. по 08.02.2016 г. неустойки составляет  10 949 руб. 52 коп. (согласно представленному расчёту истца-л.д. 10-11). 

За просрочку исполнения обязательства по оплате подлежит применению гражданско-правовая ответственность в форме договорной неустойки (штрафа, пени). 

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. (ч.1 ст.708 ГК РФ).

15.04.2016 г. претензия, направленная в адрес ответчика с требованием об уплате неустойки и штрафа, оставлена без исполнения ( л.д. 9-16). 

В нарушение ст. 65 АПК РФ, ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о выполнении работ по контракту в предусмотренный срок.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объёме.

На основании ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст. ст.110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

        Взыскать с Администрации г. Губахи  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 618250, 

<

...>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройГрупп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 614064, Пермский край, ул. Чкалова  д. 9, корпус Е)  денежные средства в сумме 10 949 руб. 52 коп., в том числе  неустойку в размере 4 576 руб. 11 коп., штраф в размере  6 373 руб. 41 коп.

        Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

        Взыскать с Администрации г. Губахи  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 618250, 

<

...>)  в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 2000 руб.      

        Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

        Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), через Арбитражный суд Пермского края.

          Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной  жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.

 

Судья                                                                                      Антонова Е.Д.