Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 07.10.2020 года Дело № А50-7288/20 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Н.В. Гусельниковой при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.О. Ануфриевым 

рассмотрел в заседании суда дело по иску акционерного общества  «Транснефть-Прикамье» (420081, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>)  

к федеральному казенному учреждению «Управление федеральных  автомобильных дорог «Прикамье» федерального дорожного агентства  (614068, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора от  10.07.19 № 43,  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 170, 176 АПК РФ, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора от  10.07.19 № 43.  

Пункт 3.1 изложить в редакции: "При необходимости производства  работ по прокладке, переносу, переустройству и демонтажу Инженерной  коммуникации разработать проектную и рабочую документацию в  соответствии с «Техническими требованиями и условиями», выданными  Владельцем дороги, являющимися Приложением № 1 настоящему Договору,  а также в соответствии с требованиями постановления Правительства  Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013  «Система проектной документации для строительства. Основные требования  к проектной и рабочей документации», СП 34.13330.2012 «Свод правил.  

Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»,  приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 № 5  «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог  федерального значения», приказа Министерства транспорта Российской  Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании  придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» и  другими нормативно-техническими и законодательными актами Российской  Федерации."  

Пункт 3.6 изложить в редакции: «Прокладку Инженерной коммуникации  и установление охранной зоны предусмотреть таким образом, чтобы не  нарушать требования безопасности дорожного движения, установленные  соответствующими национальными стандартами и строительными нормами.  

Кроме того, считать согласованными проведение работ по содержанию  Автомобильной дороги и искусственных инженерных сооружений на ней, в  отношении которой установлена охранная зона, при условии, что проведение  данных работ не противоречит Правилам охраны магистральных  трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго РФ 29.04.1992,  Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9».  

Пункт 4.3 изложить в редакции «Дефекты дорожного полотна и других  конструктивных элементов участка Автомобильной дороги, обнаруженные и  причиненные вследствие эксплуатации Инженерной коммуникации  устраняются Владельцем коммуникации за его счёт, в сроки согласованные с  Владельцем дороги».  

В раздел 3 внести пункт 3.13 следующего содержания «Дефекты  дорожного полотна и других конструктивных элементов участка  Автомобильной дороги, обнаруженные и причиненные вследствие  прокладки, переноса, переустройства или демонтажа Инженерной  коммуникации устраняются Владельцем коммуникации за его счёт, в сроки  согласованные с Владельцем дороги».  

Пункт 4.7 исключить. 

Пункт 5.1 изложить в редакции " В случае если Инженерная  коммуникация будет создавать препятствие для осуществления Владельцем  дороги дорожной деятельности, Стороны заключают соглашение,  регулирующее порядок, сроки проведения работ и условия возмещения  затрат по переносу, переустройству и (или) демонтажу Инженерной  коммуникации.  

Владелец коммуникации за счет Владельца дороги либо в его  интересах Владелец дороги, осуществляющий строительство,  реконструкцию, капитальный ремонт Автомобильной дороги, если иное не  предусмотрено указанным соглашением, выполняют полный комплекс работ  по переносу, переустройству и (или) демонтажу Инженерной коммуникации,  а именно:"  

Пункт 5.1.1 изложить в редакции " Осуществляют в разумные и  согласованные Сторонами сроки разработку проектной и рабочей  документации по переносу, переустройству и (или) демонтажу Инженерной  

коммуникации. Проектная и рабочая документация согласовывается  Сторонами в обязательном порядке".  

Пункт 5.1.2 изложить в редакции " Осуществляют строительно- монтажные работы по переносу, переустройству и (или) демонтажу  Инженерной коммуникации в сроки, установленные в проекте организации  строительства, входящего в состав утвержденной проектной документации, а  также получают в соответствии с градостроительным законодательством все  необходимые для производства работ разрешения и согласования".  

Пункт 5.1.3 изложить в редакции " При выполнении работ по переносу,  переустройству и (или) демонтажу Инженерной коммуникации  обеспечивают соблюдение требований техники безопасности, пожарной  безопасности, промышленной санитарии, природоохранного  законодательства. Сторона, осуществляющая выполнение указанных работ,  несет ответственность за соблюдение своим персоналом и персоналом  привлекаемых подрядных организаций указанных требований перед  надзорно-контрольными органами, другой Стороной и иными  заинтересованными лицами".  

Пункт 5.2 изложить в редакции " В случае выполнения строительно- монтажных работ по переносу, переустройству и (или) демонтажу  Инженерной коммуникации Владельцем коммуникации, затраты на  выполнение таких работ возмещаются ему Владельцем дороги в пределах  объема, определенного утвержденной проектной документацией".  

Пункт 5.3 изложить в редакции " Для проведения Владельцем дороги  работ по переносу, переустройству и (или) демонтажу Инженерной  коммуникации, Владелец коммуникации в течение тридцати дней со дня  поступления обращения в письменной форме Владельца дороги обязуется  предоставить технические требования и условия для разработки проектной и  рабочей документации".  

Пункт 5.4 исключить 

Пункт 5.5 изложить в редакции "Согласно п. 7 ст. 19 Федерального  закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ в случае, если работы по переносу,  переустройству и (или) демонтажу Инженерной коммуникации выполняются  с нарушением технических требований и условий, Владелец коммуникации  по требованию Владельца дороги обязан прекратить прокладку, перенос,  переустройство Инженерной коммуникации, её эксплуатацию, осуществить  снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести  автомобильную дорогу в первоначальное состояние. В случае отказа от  исполнения указанных требований Владелец автомобильной дороги  выполняет работы по ликвидации проложенных, перенесенных,  переустроенных Инженерных коммуникаций с последующей компенсацией  затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в нарушении  технических требований и условий и незаконных прокладке, переносе,  переустройстве таких сооружений, иных объектов, в соответствии с  законодательством Российской Федерации".  

Пункт 6.4 изложить в редакции " Если в связи с планируемыми  строительством, реконструкцией Автомобильной дороги необходимы  перенос, переустройство и (или) демонтаж Инженерной коммуникации,  Владелец дороги возмещает Владельцу коммуникации затраты на  выполнение таких работ в пределах объема, определенного утвержденной  проектной документацией, в случае проведения работ Владельцем  коммуникации, либо осуществляет выполнение указанных работ в интересах  Владельца коммуникации за свой счет".  

Пункт 6.5 изложить в редакции " Владелец дороги не несёт  ответственности за повреждение при ведении дорожной деятельности  Инженерной коммуникации и иных сооружений, построенных и/или  введенных в эксплуатацию с нарушением проектной и рабочей  документации.  

Факт несоответствия Инженерной коммуникации проектной и рабочей  документации фиксируется Сторонами по результатам совместного  обследования с составлением акта обследования".  

 Пункт 6.6 исключить. 

 Пункт 7.3 изложить в редакции " Требовать от Владельца  коммуникации возмещения ущерба, нанесенного по вине Владельца  коммуникации Автомобильной дороге и расположенным на ней  сооружениям, при проведении работ по прокладке, переносе, переустройстве,  демонтаже Инженерной коммуникации и (или) её эксплуатации".  

 Пункт 7.6. изложить в редакции "В случае изменения действующего  законодательства Стороны исполняют данный Договор с учетом указанных  изменений.  

Если указанные изменения носят диспозитивный характер, стороны  вносят соответствующие изменения в договор путём заключения  дополнительного соглашения к договору".  

 Пункт 7.7 исключить  Пункт 8.4 исключить 

 Пункт 10.1 изложить в редакции "В случае невыполнения технических  требований и условий, выданных Владельцем дороги, или условий  настоящего Договора, Владелец дороги имеет право направить в адрес  Владельца коммуникации обращение о необходимости исполнения  требований технических условий.  

По требованию одной из Сторон настоящий договор может быть  изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством".  

 Пункт 10.2 изложить в редакции "В случае, если в период действия  настоящего договора одной из Сторон, участникам дорожного движения и  (или) третьими лицам будет причинен ущерб виновными действиями  (бездействиями) другой Стороны, обязанность по компенсации такого  ущерба лежит на виновной Стороне".  

 Пункт 11.2 изложить в редакции "Споры, возникающие при  исполнении требований настоящего Договора, разрешаются Сторонами  путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен  

для Сторон. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) дней с момента ее  получения. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто  согласие, разрешаются в соответствии с законодательством Российской  Федерации в Арбитражном суде по месту юридического адреса Владельца  дороги согласно действующему законодательству Российской Федерации."  

 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон изложить в редакции "ВЛАДЕЛЕЦ КОММУНИКАЦИИ: Акционерное общество «Транснефть-Прикамье» (АО «Транснефть - Прикамье») 

Адрес: 420081, 

<

...>, тел: (843) 291-71-00, 291-71-11  

e-mail: office@kaz.transneft.ru ИНН 

<

***> КПП 997150001 ОГРН 

<

***> р/ счет 

<

***> к/с 30101810700000000187 Банк ВТБ (ПАО) г. Москва БИК 044525187  Пункт 25 приложения № 1 исключить 

 Взыскать с федерального казенного учреждения «Управление  федеральных автомобильных дорог «Прикамье» федерального дорожного  агентства (614068, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного  общества «Транснефть-Прикамье» (420081, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) госпошлину 6 000руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционной суд в течение  месяца со дня его принятия.  

Судья Н.В. Гусельникова