Арбитражный суд Республики Тыва

Кочетова ул., д. 91, г. Кызыл, 667000, тел. (39422) 2-11-96 (факс) 

http://www.tyva.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Кызыл

                            Дело № А69-306/2018

Резолютивная часть решения объявлена 04 июля 2018 года. Полный текст решения изготовлен 11 июля 2018 года.

Арбитражный суд Республики Тыва в составе судьи Маады Л.К-Б., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению федерального казенного предприятия «Аэропорт Кызыл» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 667000, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройснабмонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 667005, 

<

...>) о взыскании необоснованно сбереженной задолженности в размере 2 930 912 рублей, штрафных санкций за просрочку платежа в размере 421 521 рублей, всего  на сумму 3 352 433 рублей, судебных расходов,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2 по доверенности от 03.08.2017г. № 17 АА 0167808,

от ответчиков – ФИО3 по доверенности от 26.02.2018г.,

установил:

федеральное казенное предприятие «Аэропорт Кызыл» обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с исковым заявлением, уточенного в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью«Стройснабмонтаж» о взыскании штрафных санкций за просрочку платежа в размере 421 521 рублей.

В судебном заседании представитель истца уточненное исковое заявление поддержала и просила взыскать с ответчика штрафные санкции за просрочку платежа в размере 421 521 рублей.

В судебном заседании представитель ответчика с уточненными требованиями не согласилась и  просила в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме по следующим основаниям:

- с момента подписания акта выполненных работ Заказчик не предъявлял к Подрядчику никаких претензий по поводу нарушений сроков выполненных работ, также по качеству выполненных работ;

- по составленному и подписанному 04.08.2016г. между сторонами акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016г. по 04.08.2016г. задолженность федерального казенного предприятия «Аэропорт Кызыл» в пользу ООО « Стройснабмонтаж» составляет 6 152 064 рублей 93 копейки;

- кроме того решением Арбитражного суда Республики Тыва от 01.02.2018г. по делу № А69-2574/17  по иску ООО "Стройснабмонтаж"  взыскано с Федерального казённого предприятия "Аэропорт Кызыл" задолженность по договору № 277/15-П от 01.10.2015 г. в сумме 5443088 руб., пени по договору за период 04.08.2016 г. по 12.09.2017 г. в размере 773757 руб. 21 коп. 

Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, всесторонне исследовав и оценив в совокупности доказательства по делу, суд считает, что в удовлетворении исковых требований следует отказать.

Как следует из материалов дела, 03.07.2015г. между федеральным казенным предприятием «Аэропорт Кызыл» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Стройснабмонтаж» (Подрядчик) заключен договор №182/15-п на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения, сроком исполнения 45 календарных дней.

Согласно первичным подписанным без разногласий актам приемки выполненных работ от 30.09.2015г. заказчик принял и оплатил стоимость работ в сумме 18 666 000 рублей, а подрядчик передал выполненные работы 30.09.2015г., за исключением работ по установке теплосчетчиков.

30 сентября 2015 года от Подрядчика направлено Гарантийное письмо, согласно которому Подрядчик указал Заказчику, что установка теплосчетчиков возможна только в период когда работа котельной приостанавливается, в связи с чем Подрядчик, выполнивший все предусмотренные договором работы гарантирует установку теплосчетчиков по окончании отопительного сезона 2015-2016 г.г., до 1 июля 2016 года.

24.11.2015г. заключено дополнительное соглашение к договору на дополнительные работы с дополнительной оплатой и установлением изменений в части сроков исполнения работ, т.е. на 150 календарных дней.

Указанные в дополнительном соглашении работы выполнены и переданы Заказчику согласно акту приема передачи выполненных работ 04.12.2015г. без замечаний и оплачены денежные средства в размере 1 866 600 рублей.

06 апреля 2016 года, за № 19/323 в адрес подрядчика заказчиком направлено письмо, об окончании отопительного периода и наличии возможности установить теплосчетчики по гарантийному обязательству в рамках договора 182/15 от 03.07.2015г.

12 апреля 2016 года проведен осмотр технического состояния наружных сетей представителями Заказчика и Подрядчика, о чем составлен акт и по результатам осмотра рекомендовано Заказчику произвести анализ фактически выполненных объемов работ.

15 июня 2016 года Заказчиком издан приказ №135 о создании комиссии для проведения обследования фактически выполненных объемов работ.

Подрядчик письмом от 19 июля 2016 года уведомил Заказчика о выполнении всего объема работ в рамках договора, а так же уведомил о проведении обследования объекта строительства и корректировки на основании обследования форм КС-2, КС-3 и направил в адрес Заказчика акты выполненных работ по договору 182/15 от 03.07.2015г. в рамках принятых гарантийных обязательств от 19.07.2016г. Указанные документы были подписаны сторонами без замечаний.

Письмом № 171 от 19.07.2016г. Подрядчик направил Заказчику письменное обоснование корректировки ранее подписанных форм КС-2, КС-3, с указанием, что сумма фактически выполненных работ в рамках договора составила 15 785 088 рублей т.е. снижение стоимости работ составило 2 930 912 рублей из расчета 18 666 000 - 15 785 088 = 2 930 912 рублей.

С момента подписания акта выполненных работ Заказчик не предъявлял к Подрядчику никаких претензий по поводу нарушения сроков выполненных работ и по качеству выполненных работ.

По составленному и подписанному 04.08.2016г. между сторонами акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016г. по 04.08.2016г. задолженность федерального казенного предприятия «Аэропорт Кызыл» в пользу ООО «Стройснабмонтаж» составила 6 152 064 рублей 93 копейки.

В связи с чем, Общество с ограниченной ответственностью «"Стройснабмонтаж» обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с исковым заявлением к Федеральному казённому предприятию «Аэропорт Кызыл» о взыскании задолженности в сумме 6 216 845 руб. 25 коп., в том числе задолженности по договору № 277/15-П от 01.10.2015 г. в сумме 5443088 руб., пени за просрочку исполнения обязательства по оплате работ за период 04.08.2016 г. по 12.09.2017 г. в размере 773757 руб. 21 коп. 

Акт составлялся по договору 182/15 от 03.07.2015г. и договору 277/15-П от 01.10.2015г.

01.10.2015г. между ФКП «Аэропорт Кызыл» (Заказчик) и ООО «Стройснабмонтаж» (Подрядчик) заключен договор 277\15-П наизготовление, поставку и монтаж быстровозводимого модульного гаражногобокса №2 габаритным размером не менее 18*36 метров, согласно которомуПодрядчик обязуется из своих материалов, собственными силами исредствами изготовить поставить и произвести работы по монтажубыстровозводимого модульного гаражного бокса №2 габаритным размеромне менее 18*36 метров на территории ФКП «Аэропорт Кызыл», а Заказчикобязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и на условиях,предусмотренных договором.

Согласно п.2.1 договора стоимость работ определена 24 125 000рублей.

В рамках договора у Заказчика перед Подрядчиком образовалась задолженность по оплате на 04.08 2016г. в размере 9 055 976,93 рублей, у Подрядчика перед Заказчиком имелась задолженность в результате корректировки объемов выполненных работ по договору №182/15 в размере 2 930 912 рублей.

Составляя акт сверки взаимных расчетов, стороны исходили из взаимных задолженностей, в результате которого задолженность ФКП «Аэропорт Кызыл» перед ООО «Стройснабмонтаж» составила 6 152 064,93 рублей.

После подписания и урегулирования сумм задолженности Заказчик перечислил Подрядчику задолженность: платежным поручением №34 от 29.08.2016г. на сумму 108 963 рублей, согласно КС -3 от 18.04.2016 года; платежным поручением №690 от 23.09.2016г. на сумму 100 013 рублей 93 коп по счет фактуре №1 от 03.03.2016г.

05.04.2017г. Подрядчиком в адрес Заказчика направлена претензия о задолженности в размере 5 943 088 рублей и пени на сумму 492 181 рубля.

От Заказчика в адрес подрядчика поступило письмо от 19.04.2017г. №21/367 о том, что Заказчик просит предоставить отсрочку исполнения обязательств до 30.06.2017г.

Платежным поручением № 460 от 07.06.2017г. Заказчик перечислил Подрядчику 500 000 рублей по счет фактуре №1 от 03.03.2016г.

В связи с чем, задолженность Заказчика перед Подрядчиком  на   12.09.2017г. составила 5 443 088 рублей.

Посчитав, что ответчиком не возращены излишне уплачены денежные средства по договорам подряда в размере 2 930 912 рублей, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании необоснованно сбереженной задолженности в размере 2 930 912 рублей, штрафных санкций за просрочку платежа в размере 421 521 рублей.

Заявлением от 11.05.2018г. об уточнении исковых требований и уменьшении суммы иска истец отказался от исковых требований в части взыскания задолженности в размере 2 930 912 рублей, поскольку стороны не вели раздельного учета по каждому заключенному между ними договорам и указанная сумма уже учтена Решением суда по делу А69-2574/2017 от 01.02.2018г.

Общество с ограниченной ответственностью "Стройснабмонтаж" обращалось в Арбитражный суд Республики Тыва с исковым заявлением к Федеральному казённому предприятию "Аэропорт Кызыл" о взыскании 6216845 руб. 25 коп., в том числе задолженности по договору № 277/15-П от 01.10.2015 г. в сумме 5443088 руб., пени за просрочку исполнения обязательства по оплате работ за период 04.08.2016 г. по 12.09.2017 г. в размере 773757 руб. 21 коп.  

Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 1 февраля 2018 года по делу А69-2574/2017 с ФКП «Аэропорт Кызыл» в пользу ООО «Строснабмонтаж» взыскана задолженность по договору № 277/15-П от 01.10.2015 г. в сумме 5443088 руб., пени по договору за период 04.08.2016 г. по 12.09.2017 г. в размере 773757 руб. 21 коп. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в частности, из договоров и иных сделок.

Согласно пункту 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Как следует из материалов дела и установлено судом задолженности ответчика перед истцом не имеется, поскольку стороны не вели раздельного учета по каждому заключенному между ними договорам и сумма в размере 2 930 912 рублей уже учтена Решением суда по делу А69-2574/2017 от 01.02.2018г.

Указанные обстоятельства истец не отрицает, доказательств обратного истцом не представлены.

Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии задолженности ООО «Сторйснабмонтаж» перед ФКП «Аэропорт Кызыл», следовательно, просрочки исполнения обязательств.

При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований о взыскании штрафных санкций за просрочку платежа в размере 421 521 рублей.

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167-171, 176 и 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований федерального казенного предприятия «Аэропорт Кызыл» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 667000, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройснабмонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 667005, 

<

...>) в части взыскании штрафных санкций за просрочку платежа в размере 421 521 рублей отказать.

Производство по делу в части исковых требований федерального казенного предприятия «Аэропорт Кызыл» к обществу с ограниченной ответственностью «Стройснабмонтаж» о взыскании необоснованно сбереженной задолженности в размере 2 930 912 рублей прекратить. 

Выдать истцу справку, на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины в размере 39 507 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Третий арбитражный апелляционный суд (г.Красноярск) путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня его принятия. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Тыва.

 

Судья                                                                                      Л.К-Б. Маады