Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-17365/2022

г. Москва

11 июля 2022 года.

Резолютивная часть решения объявлена 22 июня 2022 года.

Мотивированное решение изготовлено 11 июля 2022 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Арешкиной И.Д.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Атлантис-Строй»

(ИНН:9705121106, ОГРН:1187746654765) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Мобильстрой» 

(ИНН:7720744623, ОГРН:1127746192804) 

о взыскании 4 221 260, 59 руб.

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 по дов. от 10.03.2021 № 5, паспорт, диплом,

от ответчика – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Атлантис-Строй» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО «Мобильстрой» (далее – ответчик) о взыскании 4 136 601,92 руб. неосновательного обогащения, возникшего из договора подряда № 08/06-21Б от 08.06.2021, 84 658,67 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2022 по 11.03.2022.

Исковые требования мотивированны неисполнением ответчиком своих обязательств по договору подряда в установленные сроки.

В судебном заседании представитель истца требования искового заявления поддержал в полном объёме, а представитель ответчика для участия в нем не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте его проведения.

Рассмотрев материалы искового заявления ООО «Атлантис-Строй», исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителя истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как следует из материалов дела, 08.06.2021 между ООО «Атлантис-Строй» (генподрядчик) и ООО «Мобильстрой» (подрядчик) заключен договор подряда № 08/06-21Б на выполнение работ по благоустройству территории (далее – договор), согласно которому подрядчик принимает на себя обязательства выполнить весь комплекс работ по устройству подпорной стены и сопутствующих мероприятий на объекте в соответствии с приложением № 1 и передать генподрядчику надлежаще оформленный результат выполнения всех работ в соответствии с договором и приложениями к нем, а генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в размере, указанном в договоре и приложениях к нему (п. 1.1 договора).

В соответствии с п. п. 1.2, 1.3 Договора подряда. Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, указанные в приложении № 2 - «График выполнения работ».

Если в процессе выполнения работ возникает необходимость корректировки сроков и объемов выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями сторон.

Пунктами 1.5, 1.6 Договора подряда предусмотрено, что Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 Договора, из собственных материалов и материалов Генподрядчика, своими и/или привлеченными силами и средствами. По запросу Подрядчика материалы могут закупаться Генподрядчиком, при этом сметная стоимость уменьшается на стоимость материалов. Материалы передаются Подрядчику на давальческой основе. Основанием для принятия к учету давальческого сырья является подписанный сторонами акт приема-передачи давальческого сырья.

Подрядчик представляет Генподрядчику отчет об использовании материалов, в котором указывается наименование, остаток на начало, расход, остаток на конец, который является приложением к актам КС-2, КС-3.

Цена договора определяется в приложении № 1 к договору и составляет 15 556 068,85 руб. (п. 2.1 договора).

Цена Договора является твердой Договорной ценой на все время производства работ и включает все затраты Подрядчика в том числе, материалы, машины, механизмы, все пошлины, налоги, сборы, накладные расходы, связанные с выполнением работ по Договору, а также вознаграждение Подрядчика. Твердая договорная цена не может быть изменена. Затраты Подрядчика, не перечисленные в настоящем Договоре отдельно, Подрядчику не компенсируются. Твердая договорная цена включает в себя все работы, которые необходимы для реализации всех работ в полном объеме. Превышение Подрядчиком стоимости каких-либо работ оплачивается Подрядчиком за свой счет.

Генподрядчик вправе в одностороннем порядке уменьшить объем выполняемых Подрядчиком работ по договору, в таком случае стоимость работ изменяется (уменьшается), в связи с исключением (уменьшением) видов и фактических объемов работ, предусмотренных Приложением № 1.

Согласно п. 2.2 Договора подряда, Генподрядчик производит оплату по Договору в следующем порядке:

оплата надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ, осуществляется по соответствующим счетам Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания Генподрядчиком отчетных документов.

- оплата за счет авансовых платежей происходит согласно Приложения № 3 (График финансирования).

От общей суммы, указанной в Акте о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 за отчетный месяц, производится пропорциональное удержание ранее выплаченных авансов, включая НДС:

- 5% - Гарантийная сумма - от строительно-монтажных работ до окончания выполнения работ в полном объеме и проведения полного технического освидетельствования в качестве обеспечения надлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств;

Все суммы, подлежащие удержанию из стоимости выполненных работ согласно акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, указывается отдельной строкой в Справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 и счете на оплату.

Оплата удержанной Гарантийной суммы в размере 5%, осуществляется в течение 3 (Трех) месяцев с даты подписания Акта об окончании работ по Договору полномочными представителями Сторон при условии полного и надлежащего выполнения и сдачи результата выполненных работ по Договору, предоставления Подрядчиком исполнительной и эксплуатационной документации, отсутствия со стороны Генподрядчика неурегулированных претензий к Подрядчику, в том числе, и по соблюдению Правил внутреннего распорядка, мероприятий по пожарной безопасности, по технике безопасности и окружающей среды.

Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Генподрядчика по оплате считается выполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.

В соответствии с п. 2.3 Договора подряда, Генподрядчик вправе уменьшить платеж, который должен быть уплачен Генподрядчиком Подрядчику на сумму начисленной неустойки (пени) в соответствии с Договором.

Окончательный расчет за выполненные работы производится после предоставления Подрядчиком исполнительной документации в полном объеме, (п. 2.4 Договора подряда).

В соответствии с п. 3.1, п. 3.3 Договора подряда, Генподрядчик обязуется предоставить Подрядчику место выполнения Подрядчиком работ на Объекте. Данное действие оформляется подписанием «Акта приема-передачи рабочей площадки» по форме согласно Приложению № 4 к данному Договору после подписания Договора и подтверждает начало работ по Договору. Подрядчик не имеет права использовать рабочую площадку с любой целью, не имеющей отношения к выполнению работ.

В случае выявления несоответствия Рабочей документации установленным законодательством требованиям Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи Рабочей документации обязан письменно уведомить Генподрядчика об отказе от приемки документации в части несоответствий. Непредставления такого уведомления подтверждает, что переданная Подрядчику Рабочая документация является достаточной для выполнения работ по Договору.

Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за результаты и ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками.

Подрядчик обязан обеспечить доставку всех необходимых для выполнения работ по Договору материалов, оборудования и строительной техники, осуществлять за свой счет их приемку, разгрузку и складирование. Генподрядчик оставляет за собой право на приобретение и поставку основных материалов. При этом стоимость Договора уменьшается на стоимость поставленных материалов, с учетом НДС (п. п. 3.8, 3.11 Договора подряда).

В соответствии с п.3.18.1 Договора подряда, Подрядчик обязан вести и предоставлять Генподрядчику Исполнительную документацию о ходе выполнения работ в соответствии с требованиями действующих технических регламентов.

Согласно п. 3.22, п. 3.23, 3.24 Договора подряда, риск случайной гибели или повреждения результата работ, его части на рабочей площадке несет Подрядчик с момента приемки рабочей площадки по Акту и до момента приемки результата работ Генподрядчиком по акту приема-передачи результата работ в полном объеме, по форме, приведенной в Приложении № 5. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования Подрядчика, несет Подрядчик.

Право собственности на часть работ переходит к Генподрядчику в момент промежуточной приемки выполненной части работ в порядке, предусмотренном договором.

Подрядчик несет полную ответственность, связанную с возмещением вреда, который может быть нанесен Генподрядчику и третьим лицам при выполнении Подрядчиком своей деятельности по Договору.

Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по Договору на следующий календарный день после поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика, и подписания Акта приема-передачи Рабочей площадки по форме Приложения № 4.

Подрядчик, независимо от объемов фактически выполненных работ, ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, представляет Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6 и иную документацию, предусмотренную настоящим Договором.

По факту завершения всего объема работ по договору Подрядчик готовит и предоставляет в четырех экземплярах Акт приема-передачи результата работ по форме согласно Приложению № 5 к данному Договору, Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6 и иную документацию, предусмотренную настоящим договором, (п. 4.1, п. 4.4, п. 4.5 Договора подряда).

В соответствии с п.п. 5.1 - 5.3.4 Договора подряда, Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания работ письменно известить Генподрядчика о готовности работ к сдаче.

Генподрядчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку работ (осмотр, проверку и принятие) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения отчетных документов и извещения от Подрядчика о готовности работ к сдаче.

Прием-передача выполненных работ осуществляется по факту их завершения на основании Актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, Журнала учета выполненных работ по унифицированной форме КС-6а и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, а также документам согласно законодательству РФ, Рабочей документации, подтверждающим фактическое выполнение, актам на скрытые работы. Генподрядчик имеет право принять любую часть работ по своему усмотрению.

Генподрядчик вправе не принимать Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6, представленные без соответствующей исполнительной документации. В случае, если исполнительная документация, полученная Генподрядчиком будет иметь недостатки и требование Генподрядчика об их устранении не будет удовлетворено Подрядчиком в течение месяца, то Генподрядчик имеет право не принимать и не оплачивать последующие работы до устранения Подрядчиком указанных недостатков.

Подписание Генподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 и Журнала учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6 не влечет за собой снятия ответственности с Подрядчика за качество работ и не препятствует предъявлению претензий Генподрядчиком к Подрядчику вплоть до подписания финального Акта приема-передачи результата работ (Приложение № 5).

Генподрядчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика отчетных документов проводит проверку объемов и качества выполненных работ в натуре и их соответствие полученной документации. При отсутствии замечаний Генподрядчик подписывает Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 и Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-б, в пределах объемов, согласованных Заказчиком или при наличии замечаний - направляет мотивированный отказ в подписании.

В случае мотивированного отказа Генподрядчика от подписания Актов по унифицированной форме № КС-2, Справок по унифицированной форме № КС-3 и Журнала учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6, Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней за свой счет устраняет замечания Генподрядчика и повторно направляет последнему документы.

Приемка и обнаружение недостатков производится в соответствии с п.п. 5.4.1 - 5.4.7 Договора подряда.

Приемка скрытых работ производится Генподрядчиком согласно п.п. 6.1 - 6.4 Договора подряда.

Согласно п.п. 8.1, 8.2, 8.3 Договора подряда, гарантийный срок на Результат работ составляет 5 (Пять) лет. Гарантия качества распространяется на все, что составляет Результат работ. Подрядчик гарантирует качество Результата работ и возможность его эксплуатации в соответствии с назначением Объекта с момента передачи Результата работ до завершения гарантийного срока, который начинается с момента ввода Объекта в эксплуатацию. При обнаружении недостатков составляется дефектный акт в соответствии с Разделом 5 Договора подряда.

В случае предъявления Генподрядчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения этого требования.

Генподрядчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц в случае отказа Подрядчика и требовать от подрядчика возмещения расходов на их устранение при предъявлении документов, подтверждающих такие расходы.

15.09.2021 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2021 г. к Договору подряда (далее - Дополнительное соглашение № 1).

Согласно п. 1 Дополнительного соглашения № 1, по настоящему Соглашению Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает дополнительно к Договору подряда выполнить работы по благоустройству территории и сопутствующих мероприятий, согласно Приложению № 1.

В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения № 1. сроки выполнения работ: начало: не позднее 16.09.2021 г., окончание работ: не позднее 31.10.2021 г.

Согласно п. 5 Дополнительного соглашения № 1, оно является неотъемлемой частью Договора подряда.

Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к договору подряда (Протокол согласования цены), стоимость работ увеличена на сумму 3 918 205, 00 (Три миллиона девятьсот восемнадцать тысяч двести пять) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%.

Таким образом, общая стоимость работ по Договору подряда, с учетом Дополнительного соглашения № 1 составила сумму в размере 19 474 273, 85 (Девятнадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи двести семьдесят три) руб. 85 коп., в том числе НДС 20%.

Так, во исполнение своих обязательств по Договору подряда (п. п 3.1, 3.2, 3.3) Истцом передан, а Ответчиком принят строительный объект для выполнения работ по благоустройству территории на Объекте: «Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, поселение Московский, вблизи дер. Румянцево, уч. 3.2 (корп.7), что подтверждается подписанным обеими сторонами Акта передачи строительного объекта (фронта работ) от 08.06.2021 г. к Договору подряда (Приложение № 4).

Во исполнение п.п. 2.1. 2.2 Договора подряда, п. 1 Дополнительного соглашения № 1, Истцом произведены авансовые платежи в пользу Подрядчика на общую сумму 17 300 000, 00 (Тринадцать миллионов триста тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС, что подтверждается, следующими платежными поручениями:

• п/п № 904 от 11.06.2021 г. на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей, 00 коп., в том числе НДС 20%.;

• п/п № 996 от 25.06.2021 г. на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей, 00 коп., в том числе НДС 20%.;

• п/п № 1050 от 05.07.2021 г. на сумму 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, 00 коп, в том числе НДС 20%;

• п/п № 1170 от 15.07.2021 г. на сумму 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, 00 коп, в том числе НДС 20%;

• п/п № 1235 от 26.07.2021 г. на сумму 435 223 (Четыреста тридцать пять тысяч двести двадцать три) рубля, 70 коп, в том числе НДС 20%;

• п/п № 1234 от 26.07.2021 г. на сумму 1 064 776 (Один миллион шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей, 30 коп, в том числе НДС 20%;

• п/п № 1345 от 05.08.2021 г. на сумму 2 000 000 (Два миллиона) рублей, 00 коп, в том числе НДС 20%;

• п/п № 1383 от 11.08.2021 г. на сумму 2 000 000 (Два миллиона) рублей, 00 коп, в том числе НДС 20%;

• п/п № 1446 от 20.08.2021 г. на сумму 2 000 000 (Два миллиона) рублей, 00 коп, в том числе НДС 20%;

• п/п № 1523 от 31.08.2021 г. на сумму 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, 00 коп., в том числе НДС 20%;

• п/п №1907 от 18.10.2021 г. на сумму 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Во исполнение условий Договора подряда, в том числе Дополнительного соглашения № 1, Ответчиком выполнены работы, за период с 08.06.2021 г. по 31.08.2021 г., которые приняты Истцом на общую сумму 4 730 678, 99 (Четыре миллиона семьсот тридцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб. 99 коп., в том числе НДС 20%, что подтверждается:

- КС-3 №1 от 30.06.2021г. и КС-2 №1 от 30.06.2021г. (счет-фактура № 32 от 30.06.2021 г.) на сумму 513 659 (Пятьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей, 00 коп, в том числе НДС 20%; Акт об использовании материалов № 1 от 30.06.2021 г.; Накладная № 148 на отпуск материалов на сторону от 30.06.2021 г.

- КС-3 №2 от 31.07.2021г., КС-2 №2 от 31.07.2021г. и КС-2 №3 от 31.07.2021 г. (счет-фактура № 33 от 31.07.2021 г.) на сумму 1 663 533 (Один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать три) рубля, 55 копеек, в том числе НДС 20%; Акт об использовании материалов № 2 от 31.07.2021 г.; Акт об использовании материалов № 3 от 31.07.2021 г.; Накладная № 204 на отпуск материалов на сторону от 31.07.2021 г.

-  КС-3 №3 от 31.08.2021г., КС-2 №4 от 31.08.2021г. и КС-2 №5 от 31.08.2021 г. (счет-фактура № 41 от 31.08.2021 г.) на сумму 2 553 486 (Два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей, 44 копейки, в том числе НДС 20%; Акт об использовании материалов № 4 от 31.08.2021 г.; Акт об использовании материалов № 5 от 31.08.2021г.

Руководствуясь п. 2.1 Договора подряда, 01.11.2021 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение № 2 от 01.11.2021 г. к Договору подряда (далее - Дополнительное соглашение № 2).

Согласно п. 1 Дополнительного соглашения № 2, в рамках настоящего Дополнительного соглашения № 2 Стороны утверждают уточненную стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в рамках Договора № 08/06-21Б от 08.06.2021 г. и Дополнительного соглашения № 1 от 15.09.2021 г. с учетом ее изменения в соответствии с корректировкой проекта.

Согласно п. 2 Дополнительного соглашения № 2, стоимость работ по Договору согласно Сметы (Приложение № 1 к Договору) составляет 11 406 280, 30 (Одиннадцать миллионов четыреста шесть тысяч двести восемьдесят) руб. 30 коп., в т. ч. НДС 20 %.

Согласно п. 3 Дополнительного соглашения № 2, стоимость работ по Дополнительному соглашению № 1 согласно Сметы (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1) составляет 3 753 205, 00 (Три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи двести пять) руб. 00 коп., в т. ч. НДС 20 %.

Согласно п. 4 Дополнительного соглашения № 2. общая стоимость работ по Договору № 08/06-21Б от 08.06.2021 г. согласно Сметы (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 01.11.2021 г.) составляет 15 159 485, 30 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят пять) руб. 30 коп., в т. ч. НДС 20 %.

В соответствии с п. 7 Дополнительного соглашения № 2, оно вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Во исполнение условий Договора подряда, в том числе Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2, Ответчиком выполнены работы, за период с 01.09.2021 г. по 30.11.2021 г., которые приняты Истцом на общую сумму 7 401 166, 15 (Семь миллионов четыреста одна тысяча сто шестьдесят шесть) руб. 15 коп., в том числе НДС 20%, что подтверждается:

- КС-3 №4 от 30.11.2021г. и КС-2 №6 от 30.11.2021г. на сумму 7 401 166, 15 (Семь миллионов четыреста одна тысяча сто шестьдесят шесть) руб. 15 коп., в том числе НДС 20%; Акт об использовании материалов № 6 от 30.11.2021 г.

Выполнение ответчиком и принятие истцом вышеперечисленных работ не оспаривается сторонами по существу, а также подтверждаются актом сверки взаимных расчетов за период 2021 г. между сторонами (т. 1, л. д. 86).

Кроме того, 30.12.2021 г. между Истцом и Ответчиком был произведен взаимозачет на сумму 1 031 552, 94 (Один миллион тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят два) руб. 94 коп., что подтверждается соответствующими - Актом зачета встречных однородных требований и Актом взаимозачета, подписанными сторонами и скрепленными печатями организаций.

Таким образом, Истцом приняты согласованные и выполненные Ответчиком работы за период с 08.06.2021 г. по 30.11.2021 г. (с учетом произведенного взаимозачета) на общую сумму 13 163 398, 08 (Тринадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи триста девяносто восемь) руб. 08 коп., в т.ч. НДС 20 %.

Принимая во внимание произведенную Генподрядчиком в рамках Договора подряда (Дополнительных соглашений №1, № 2) оплату в пользу Подрядчика на общую сумму 17 300 000. 00 руб.. переплата составляет (17 300 000. 00 руб. - 13 163 398. 08 руб.) = 4 136 601. 92 (Четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч триста девяносто восемь) руб. 08 коп, в т. ч. НДС 20 %, что дополнительно подтверждается актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2021 г., подписанным Истцом и Ответчиком.

28.02.2022 г. исх. № 51, руководствуясь п. 10.1 Договора подряда, Истец направил Ответчику досудебную претензию с требованием о возврате излишне уплаченных авансовых платежей, полученных Ответчиком в рамках Договора подряда.

Ответчик денежные средства не вернул, что послужило для истца основанием обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

 В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ на сумму перечисленного аванса, установленный факт прекращения действия договора подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств в сумме 4 136 601,92 руб. неосновательного обогащения, возникшего из договора подряда № 08/06-21Б от 08.06.2021 подлежит удовлетворению в полном объеме.

Каких-либо доказательств передачи генподрядчику результата работ на сумму 4 136 601,92 руб. по договору подряда или возврата указанных денежных средств, подрядчиком при рассмотрении судом настоящего дела не представлено.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по возврату суммы неотработанного аванса, ссылаясь на положения статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец заявил требования о взыскании с ответчика 84 658,67 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 01.01.2022 по 11.03.2022.

Согласно положениям пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами, а также период их начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

Таким образом, требования истца о взыскании 84 658,67 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 01.01.2022 по 11.03.2022, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком своих обязательств по спорному договору подряда, при наличии документально подтвержденных требований истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мобильстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Атлантис-Строй» 4 136 601,32 руб. задолженности, 84 658,67 руб. процентов и 44 106 руб. расходов по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. 

 

Судья      И.Д. Арешкина