АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Томск Дело № А67-12737/2018  28.05.2020 дата оглашения резолютивной части решения  

01.06.2020 дата изготовления решения в полном объеме Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.Н. Какушкиной, 

при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к Департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

третьи лица без самостоятельных требований - общество с ограниченной ответственностью  «Брикс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и муниципальное бюджетное учреждение  «Центр технического надзора» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  

о взыскании 803 141,74 руб., при участии в заседании: 

от истца – представителя ФИО2 по доверенности от 01.01.2019 № 02,  

от Департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города  Томска – представителя ФИО3 по доверенности от 20.05.2020 № 01-01-02-06/19,  

от муниципального бюджетного учреждения «Центр технического надзора» - без  участия (извещено),  

от общества с ограниченной ответственностью «Брикс» – участия (извещено),  У С Т А Н О В И Л: 

в рамках дела № А67-12737/2018 Арбитражным судом Томской области рассмотрены  исковые требования унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г.  Томска» к муниципальному образованию «Город Томск» в лице Департамента дорожной  деятельности и благоустройства администрации города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН  

1037000100246) и Департамента финансов администрации города Томска (ИНН 7021023925,  ОГРН 1037000090511) о взыскании неосновательного обогащения в размере 803 141,74 руб.  

Определением Арбитражного суда Томской области от 06.11.2018 к участию в деле в  качестве третьих лиц привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Брикс» и  муниципальное бюджетное учреждение «Центр технического надзора».  

Решением Арбитражного суда Томской области от 13.05.2019, оставленным в силе  постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2019, исковые  требования удовлетворены, с муниципального образования «Город Томск» в лице  Департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за счет казны муниципального образования «Город  Томск» в пользу унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) взыскано неосновательное обогащение в размере  803 141,74 руб., а также 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины, всего 805 141,74 руб.  

Между тем, постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от  16.12.2019 решение Арбитражного суда Томской области от 13.05.2019 и постановление  Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2019 отменены, дело передано на  новое рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.  

При новом рассмотрении с учетом доводов лиц, участвующих в деле, суд определил  (протокольное определение от 02.03.2020) ответчиком по делу считать Департамент  дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска, исключить из  числа представителей ответчика Департамент финансов администрации города Томска.  

Истец в письменных пояснениях по делу и его представитель в судебном заседании  настаивали на взыскании денежных средств в заявленном размере, указав, что в рамках  муниципального контракта от 29.04.2016 № Ф.2016.626299 унитарное муниципальное  предприятие «Спецавтохозяйство г. Томска» выполняло работы по ремонту улично- дорожной сети муниципального образования «Город Томск», в качестве субподрядчика  привлекло общество с ограниченной ответственностью «Брикс». Спорные работы,  выполненные субподрядчиком, не были приняты заказчиком в связи с их ненадлежащим  качеством. Поэтому при расторжении контракта они не были предъявлены к оплате. Между  тем, после расторжения контракта, решением Арбитражного суда Томской области по делу   № А67-3861/2017 с унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г.  Томска» взыскана задолженность за выполненные субподрядчиком работы в размере  803 141,74 руб. В связи с этим унитарное муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство  

г. Томска» обратилось к заказчику с требованием принять работы и изменить условия  подписанного соглашения о расторжении контракта, однако получило отказ.  

Ответчик и третьи лица при новом рассмотрении дела письменных пояснений не  представили. Представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что у заказчика  отсутствует обязательство по приемке работ в связи с расторжением муниципального  контракта от 29.04.2016 № Ф.2016.626299, все принятые работы оплачены в полном объеме.  

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив представленные  доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд приходит к следующим выводам по существу заявленных исковых  требований.  

Как следует из материалов дела, между Управлением дорожной деятельности,  благоустройства и транспорта Администрации города Томска (заказчиком) от имени  муниципального образования «Город Томск» и унитарным муниципальным предприятием  «Спецавтохозяйство г. Томска» (подрядчиком) заключен муниципальный контракт от  29.04.2016 № Ф.2016.626299 (далее по тексту – Контракт, л.д. 14-29 т. 1).  

В соответствии с условиями Контракта подрядчик принял на себя обязательства  выполнить работы по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования «Город  Томск» (далее – работы) и сдать результат заказчику, а заказчик обязался принять результат  работы и оплатить его в соответствии с условиями контракта (пункт 1.1 Контракта).  

 В соответствии с пунктами 1.2-2.5, 2.16 Контракта работы подлежат выполнению в  соответствии с техническими заданиями (Приложения № 1 и № 2 к Контракту) и перечнем  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  «Город Томск» (Приложение № 3 к Контракту) в период с 29.04.2016 по 15.10.2016. Работы  производятся по предварительной заявке заказчика с уточнением сроков выполнения работ,  видов, объемом работ и стоимости выполнения работ для каждого этапа работ по контракту.   Цена контракта установлена в пункте 3.1 в размере 288 377 331,53, руб., является  твердой. Цена контракта определяется в соответствии с локальными сметными расчетами  (Приложения № 4 и № 5 к Контракту), сводным сметным расчетом (Приложение № 6 к  Контракту) с учетом коэффициента снижения сметной стоимости по итогам электронного  аукциона.  

 В силу раздела 7 Контракта контроль за качеством работ, ходом проведения работ,  сроками производства работ, объемом выполняемых работ осуществляется заказчиком путем  привлечения специализированной организации. При исполнении данного Контракта для  осуществления технического надзора ответчиком привлечено муниципальное бюджетное  учреждение «Центр технического надзора».  

В соответствии с пунктом 7.14 Контракта приемке результата работ должны  предшествовать предварительные испытания асфальтобетонной смеси, которые  выполняются подрядчиком за счет накладных расходов (в том числе заделка вырубок из  асфальтобетона).  

Работы считаются завершенными после выполнения подрядчиком работ на объекте,  указанном в предварительной заявке заказчика, в полном объеме, либо в объеме отдельного  этапа работ и устранения всех недостатков, выявленных в ходе выполнения работ, что  должно подтверждаться подписями организации, осуществляющей строительный контроль  (технический надзор), удостоверяющими в общем журнале работ дату окончания работ.  Документом, подтверждающим дату окончания работ, является общий журнал работ, в  котором дата окончания работ подтверждена подписями представителей подрядчика и  организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор). Отказ  организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), от  удостоверения подписью даты окончания работ допускается по любому из следующих  оснований: выполнение работ не в полном объеме, неустранение или неполное устранение  недостатков, выявленных в ходе выполнения работ; отсутствие, неполнота или  ненадлежащее оформление исполнительской документации (пункт 7.20 Контракта).  

Приемка отдельного (промежуточного) этапа выполнения работ на объекте возможна  по согласованию с заказчиком, при этом подрядчик обязан предоставить в организацию,  осуществляющую строительный контроль (технический надзор), исполнительную  документацию, акты скрытых работ и испытания вырубок (пункт 7.21 Контракта).  

Акты о приемке выполненных работ и исполнительная документация отдельно по  каждому объекту, указанному в предварительной заявке заказчика, оформленная и  составленная в соответствии с пунктом 7.9 контракта, предоставляются подрядчиком  

организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), не позднее 10  дней после завершения работ либо отдельного этапа работ на объекте (пункт 7.22  Контракта). Акты о приемке выполненных работ с прилагаемыми к ним документами,  переданные в организацию, осуществляющую строительный контроль (технический надзор),  до устранения подрядчиком недостатков, выявленных в ходе выполнения работ,  

либо без исполнительной документации в полном объеме, возвращаются подрядчику без  рассмотрения и считаются неподанными при решении вопроса об ответственности  подрядчика за нарушение сроков предъявления работ к приемке (пункт 7.23 Контракта).  

Организация, осуществляющая строительный контроль (технический надзор), в  течение семи рабочих дней рассматривает акты о приемке выполненных работ,  исполнительную документацию и при отсутствии замечаний подписывает их либо дает  

письменный мотивированный отказ от подписания актов о приемке выполненных работ с  указанием конкретных выявленных недостатков и направляет указанные документы  подрядчику. Мотивированный отказ организации, осуществляющей строительный контроль  (технический надзор), выдается единожды и учитывает и включает в себя все замечания, а  также перечень недостающей документации. В случае, если подрядчик после устранения  недостатков результатов работ или исполнительный документации, указанных в  мотивированном отказе организации, осуществляющей строительный контроль  (технический надзор), повторно предъявил акты выполненных работ и (или)  исполнительную документацию для проверки, организация, осуществляющая строительный  контроль (технический надзор), письменно снимает свои замечания, указанные в  мотивированном отказе, либо письменно указывает на недостатки, обнаруженные при  повторной проверке, в том числе, на недостатки, являющиеся результатом изменений,  внесенных подрядчиком в результаты работ и (или) исполнительную документацию.  При повторной проверке организация, осуществляющая строительный контроль  (технический надзор), не вправе указывать на недостатки, которые могли быть обнаружены  при первоначальной проверке актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 и  исполнительной документации (пункт 7.24 Контракта).  

Акты о приемке выполненных работ, исполнительную документацию и письменные  замечания организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор),  подрядчик передает в приемочную комиссию заказчика в течение трех дней с момента  поступления документации от организации, осуществляющей строительный контроль  (технический надзор) (пункт 7.26 Контракта).  

При поступлении указанных документов заказчик обеспечивает проведение в течение 7  рабочих дней экспертизы результатов выполненных работ (пункт 7.27 Контракта). В  течение 7 дней с момента поступления в адрес заказчика актов о приемке выполненных  работ, подписанных организацией, осуществляющей строительный контроль (технический  надзор), исполнительной документации, а также заключений эксперта (экспертной  организации) приемочная комиссия заказчика на основании документов, представленных  организацией, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), экспертом  (экспертной организацией), рассматривает и подписывает акты о приемке выполненных  работ или возвращает их подрядчику с письменным мотивированным отказом от подписания  (пункт 7.28 Контракта).  

Работы считаются принятыми с момента подписания актов о приемке выполненных  работ созданной заказчиком приемочной комиссией и подрядчиком (пункт 7.30 Контракта).  

Сложившиеся между сторонами в рамках муниципального контракта № Ф.2016.62629  от 29.04.2016 правоотношения регулируются параграфом 3 «Строительный подряд» главы 37  Гражданского кодекса Российской Федерации. К договору строительного подряда  применяются общие положения о подряде, если иное не установлено специальными  правилами об этом виде договора (пункт 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором  срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные  строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для  выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно пункту 1 статью 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата  выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном  сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного  подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ  производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или  отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим  образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Пунктом 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено,  что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено  договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи  или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае,  если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно заявке на производство работ от 14.06.2016 утверждено выполнение работ по  ремонту объекта «МБОУ СОШ «Эврика - развитие», пер. Юрточный, 8, стр. 1 (пер.  Юрточный, пер. Шумихинский, пер. ФИО4) ориентировочной стоимостью 1 547 213,83  руб. в период с 15.07.2016 по 20.07.2016 (л.д. 30 т. 1).  

Материалами дела подтверждается, что выполнение работ по указанной заявке  осуществлялось унитарным муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство г. Томска» с  привлечением субподрядчика - общества с ограниченной ответственностью «Брикс» (л.д.  106-143 т. 1).  

30.11.2016 с сопроводительным письмом № 2413/11 истец вручил муниципальному  бюджетному учреждению «Центр технического надзора» заверенные копии протоколов  испытания вырубки из горячей асфальтобетонной смеси. По результатам их рассмотрения  организацией, осуществляющей технический надзор, подготовлен ответ № 1200 от  01.12.2016 (л.д. 51, 50, 48-49 т. 1).  

В данном ответе, в том числе указано, что в соответствии с представленным истцом  протоколом В 20416 Э от 30.08.2016 толщина асфальтобетонного покрытия нижнего слоя  тротуара составляет 3,4 см, что не соответствует дефектной ведомости, локально-сметному  расчету, нормативным требованиям и допустимым отклонениям – 1 вырубка или 100 %.  Кроме того, в протоколе нижний слой указан как выравнивающий, что также не  соответствует утвержденным заказчиком дефектной ведомости и локально-сметному  расчету, прошедшему проверку достоверности определения сметной стоимости.  

На основании вышеизложенного, муниципальное бюджетное учреждение «Центр  технического надзора» в ответе № 1200 от 01.12.2016 просило подрядчика принять меры к  устранению допущенных нарушений.  

08.12.2016 вместе с сопроводительным письмом подрядчик передал заказчику акт  выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат и счет-фактуру (л.д.  58 1).  

Указанные документы заказчиком не были подписаны. 

На основании соглашения № 1 от 30.12.2016 муниципальный контракт от 29.04.2016 №  Ф.2016.626299 расторгнут сторонами по соглашению сторон (л.д. 62 т. 2). В соглашении  стороны зафиксировали, что стоимость фактически выполненных работ на момент  расторжения контракта составляет 276 636 047,69 руб. (пункт 2 контракта).  

Исходя из анализа актов КС-2 и платежных поручений (за весь период действия  Контракта) усматривается, что спорный объем работ по пер. Юрточный, 8, стр. 1 (пер.  Юрточный, пер. Шумихинский, пер. ФИО4) не нашел своего отражения в упомянутом  соглашении, поскольку не был принят заказчиком.  

Между тем, уже после расторжения Контракта, 31.05.2017 общество с ограниченной  ответственностью «Брикс» обратилось в Арбитражный суд Томской области к унитарному  муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство г. Томска» с требование об оплате  работ, выполненных по пер. Юрточный, 8, стр. 1 (пер. Юрточный, пер. Шумихинский, пер.  

Плеханова). К участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований  привлечено Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта  администрации Города Томска.  

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Томской области от  23.10.2017 по делу № А67-3861/2017 удовлетворены исковые требования субподрядной  организации - общества с ограниченной ответственностью «Брикс» к унитарному  муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство г. Томска» о взыскании 803 141,74  руб. задолженности за выполнение спорных работ.  

Указанное решение исполнено унитарным муниципальным предприятием  «Спецавтохозяйство г. Томска», что подтверждается представленным в материалы дела  платежными поручениями № 434 от 01.02.2018, № 452 от 05.02.2018, № 450 от 05.02.2018 и   № 451 от 02.02.2018 (л.д. 144-147 т. 1).  

12.05.2020 истцом в адрес ответчика были направлены: акт о приемке выполненных  работ № 304 от 03.09.2018, счет-фактура № 343917 о 03.09.2018, справка о стоимости  выполненных работ и затрат № 304 от 03.09.2018 на сумму 803 141,74 руб.; в  сопроводительном письме истец предложил в порядке статьи 151 Гражданского кодекса  Российской Федерации внести изменения в соглашение о расторжении муниципального  контракта.  

Заказчик отказался подписывать указанные документы, ссылаясь на ненадлежащий  порядок сдачи работ и отсутствие финансирования.  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения  обязательств недопустим.  

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения  недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре  строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (статья  753 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Стоимость фактически выполненных и пригодных для использования по своему  назначению работ установлена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда  Томской области от 23.10.2017 по делу № А67-3861/2017, которое имеет для настоящего  дела преюдициальное значение.  

Учитывая изложенное, отказ заказчика от приемки работ по указанному основания  является неправомерным.  

По общему правилу, при расторжении договора обязательства сторон прекращаются,  если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства  (пункт 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

При подписании соглашения о расторжении муниципального контракта №  Ф.2016.62629 от 29.04.2016 стороны не могли предвидеть, что спорные работы подлежали  оплате (при рассмотрении иска субподрядчика и истец и ответчик возражали против  заявленных требований). Между тем, в результате исполнения решения Арбитражного суда  Томской области от 23.10.2017 по делу № А67-3861/2017 истец оплатил 803 141,74 руб. за  работы, имеющие потребительскую ценность для ответчика и выполненные именного для  него в рамках муниципального контракта посредством привлечения субподрядчика.  

При таких обстоятельствах следует признать, что прекращение обязательства по оплате  выполненных работ в результате расторжения Контракта будет противоречить сущности  обязательства, что недопустимо.  

 Данный вывод также подтверждается судебными актами по делу № А67-9188/2018,  следуя которым в пользу унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г.  Томска» с заказчика по этому же Контракту взыскана задолженность за выполненные работы  в размере 1 379 646,87 руб. также после расторжения Контракта (то есть дополнительно к  сумме, указанной в пункте 2 соглашения о расторжении Контракта).  

Исходя из единообразия судебной практики, суд не усматривает оснований для отказа в  удовлетворении иска.  

Претензионный порядок разрешения спора истцом соблюден (л.д. 10-11). 

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в  заявленном размере.  

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере  2 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 3715 от 15.08.2018 (л.д. 7 т. 1).  

Расходы истца по уплате государственной пошлины по правилам части 1 статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с Департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации  города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу унитарного  муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) сумму основного долга в размере 803 141,74 руб., а также 2 000 руб. в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего 805 141,74 руб.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Томской области.  

Судья Н.Н. Какушкина