Арбитражный суд Московской области

         107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-61083/23

22 декабря 2023 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 04 декабря 2023 года

Полный текст решения изготовлен 22 декабря 2023 года

Арбитражный суд в составе:

председательствующего – судьи Арешкиной И.Д.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леоновым С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Русоблстрой» 

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГРАД» 

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании 10 936 184,44 руб.,

при участии в заседании:

согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Русоблстрой» (далее – ООО «Русоблстрой», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГРАД» (далее – ООО «СК «ГРАД», ответчик) о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 10 564 161,20 руб., процентов в размере 372 023,64 руб., процентов по дату фактической выплаты долга.

Истец направил в судебное заседание своего представителя, который поддержал требования иска.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, мотивированный отзыв, документальное обоснование возражений на иск, контррасчет не представил. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным проведение судебного заседания в его отсутствие.

Рассмотрев материалы искового заявления, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, между ООО «Русоблстрой» (подрядчик) и ООО «СК «ГРАД» (заказчик) заключен договор подряда от 10.09.2021 № 14 (далее - договор), по которому подрядчик обязуется выполнить работы, определенные договором, а заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы.

В соответствии с п. 1.1.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 30.08.2022 № 2) работы, составляющие предмет настоящего договора: переработка горной массы, мраморовидных известняков, разрыхленных буровзрывным способом до фракции 0-500 мм (далее давальческое сырье) в продукцию: Щебеночно-песчаная смесь С4 фракции 0-80 мм (ГОСТ 25607-2009), щебень фракции 40-70 (80 мм) (ГОСТ 8267-93), щебень фракции 20-40 мм (ГОСТ 8267-93), щебень фракции 5-20 мм) (ГОСТ 8267-93) и песок из отсевов дробления фракции 0-5 мм (класс II, ГОСТ 31424-2010). Давальческое сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, является собственностью Заказчика. Право собственности на произведенную Подрядчиком из давальческого сырья продукцию принадлежит Заказчику (п. 1 ст. 220, п.п. 1,2  ст. 703 ГК РФ).

В силу п. 2.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 30.08.2022 № 2) стоимость работ составляет: 

- 130 руб., в том числе НДС 20 %, за одну тонну переработанного давальческого сырья в продукцию, Щебеночно-песчаная смесь С4 фракции 0-80 мм и Щебеночно-песчаная смесь С1 фракции 0-40 мм;

- 160 руб., в том числе НДС 20 %, за одну тонну переработанного давальческого сырья в продукцию, щебень фракции 40-70 (80 мм), щебень фракции 20-40 мм, щебень фракции 5-20 мм и песок из отсевов дробления фракции 0-5 мм.

Согласно п. 3.2 договора объем готовой продукции, полученной из переработки давальческого сырья, по настоящему договору, определяется 2 раза в месяц следующим образом:

- 15 и 30 (31) числа текущего месяца в объеме фактически вывезенной продукции, полученной из переработки давальческого сырья, на основании данных автомобильных весов заказчика, а также маркшейдерского замера остатков наработанной продукции в конце каждого месяца.

Общество с ограниченной ответственностью «Русоблстрой» выполнило обязательства по выполнению работ по договору, что подтверждается подписанными сторонами без замечаний актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), а именно: от 30.11.2021 на сумму 427 348,80 руб., от 15.12.2021 на сумму 679 870,80 руб., от 30.12.2021 на сумму 407 769,60 руб., от 30.01.2022 на сумму 3 560 646 руб., от 15.02.2022 на сумму 4 432 800 руб., от 28.02.2022 на сумму 5 798 202 руб., от 15.03.2022 на сумму 4 159 672,80 руб., от 31.03.2022г. на сумму 3 758 602,80 руб., от 15.04.2022 на сумму 955 393,40 руб., от 30.04.2022 на сумму 1 251 845,40 руб., от 15.05.2022 на сумму 6 053 824,40 руб., от 31.05.2022 на сумму 7 277 036 руб., от 15.02.2022 на сумму 4 432 800 руб., от 15.06.2022 на сумму 5 327 324,60 руб.,  от 30.06.2022 на сумму 4 006 369,90 руб., от 15.07.2022 на сумму 6 924 945,30 руб., от 31.07.2022 на сумму 4 294 314,70 руб.,  от 15.08.2022 на сумму 5 585 648,90 руб., от 31.08.2022 на сумму 3 658 085,60 руб., от 15.09.2022 на сумму 1 835 752 руб., от 30.09.2022 на сумму 1 256 386 руб., от 15.10.2022 на сумму 3 469 260,90 руб., от 31.10.2022 на сумму 534 529,60 руб., от 15.11.2022 на сумму 689 496 руб., от 30.11.2022 на сумму 2 339 767,40 руб., от 15.12.2022г. на сумму 1 249 716 руб., от 27.12.2022 на сумму 2 989 961 руб., от 30.01.2023 на сумму 537 660,50 руб., от 15.03.2023 на сумму 5 491 547 руб., от 31.03.2023 на сумму 669 421,60 руб., от 30.04.2023 на сумму 800 193,10 руб., от 31.05.2023 на сумму 1 285 854,40 руб.

Оплата заказчиком выполненных работ подрядчиком осуществляется на условиях предварительной оплаты за каждые 10 000 тонн готовой продукции, предусмотренной п. 1.1.1 и п. 2.1 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика (п. 4.2 договора).

В силу п. 4.3 договора предварительная оплата, полученная подрядчиком, корректируется в каждом отчетном периоде, предусмотренном в п. 3.2 настоящего договора. В случае превышения суммы денежных средств, предварительной оплаты в текущем отчетном периоде, согласно подписанного акта выполненных работ, то она переходит в следующий отчетный период, как предварительная оплата. А в случае, денежных средств денежных средств в текущем отчетном периоде по акту выполненных работ Заказчик доплачивает эту сумму, и делает следующую предварительную оплату.

Вместе с тем, ответчик свои обязательства по оплате работ в полном объеме не исполнил, с учетом частичной оплаты задолженность ООО «СК «ГРАД» по оплате выполненных работ составила 10 564 161,20 руб.

Размер задолженности общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГРАД» по договору также подтверждается актами сверки, подписанными обеими сторонами, за период с декабря 2022 года по май 2023 года.

В материалы дела истцом представлен график погашения задолженности ответчиком от 16.06.2023 исх. № 16-06/01, который последним не исполняется.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 15.06.2023 исх. № 24-23 с требованиями об уплате задолженности и процентов.

Согласно п. 7.2 договора все споры и разногласия, которые будут возникать в ходе выполнения обязательств, стороны будут решать путем переговоров в соответствии с законодательством РФ. В случае не достижения согласия, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения истца.

Поскольку требования, изложенные в претензии, ответчиком в добровольном порядке выполнены не были, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Представленный истцом расчет задолженности соответствует условиям договора, ответчиком в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не оспорен.

Ответчиком возражения и доказательства оплаты долга в материалы дела не представлено, в связи с чем, суд считает подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании задолженности по договору подряда от 10.09.2021 № 14 в размере 10 564 161,20  руб.

Обществом с ограниченной ответственностью «Русоблстрой» также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов по состоянию на 12.07.2023 в размере 372 023,64 руб., а также процентов за период с 13.07.2023 по дату фактической выплаты долга.

В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

В силу п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору установлен судом, арбитражный суд находит требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежащими удовлетворению как заявленные правомерно, основанные на нормах действующего законодательства и не оспоренные ответчиком.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Строительная компания «ГРАД» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Русоблстрой» 10 564 161,20 руб. задолженности, 372 023,64 руб. процентов по состоянию на 12.07.2023, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму задолженности по правилам статьи 395 ГК РФ за период с 13.07.2023 по день фактического исполнения обязательства, и 77 681 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. 

Судья                                                                                                      И.Д. Арешкина