38/2020-177652(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-15126/2020

город Саратов

23 сентября 2020 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной  ответственностью «Ромекс-Кубань», г. Краснодар (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  государственному казенному учреждению Саратовской области «Управление капитального  строительства», г. Саратов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>); третьи лица -  Министерство финансов Российской Федерации, г. Москва; Министерство финансов  Саратовской области, г. Саратов; Комитет по реализации инвестиционных проектов в  строительстве Саратовской области, г. Саратов, об обязании заключить дополнительное  соглашение к государственному контракту № 0860500000220000009 от 08.04.2020 г.  

при участии: от истца- ФИО2, представитель по доверенности № 95 о 11.11.19 г.; от  ответчика – ФИО3, представитель по доверенности № 01-01/2481-1 от 04.09.2020 г.  

 Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 173 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать Заказчика государственное казенное учреждение Саратовской области  «Управление капитального строительства» заключить дополнительное соглашение к  государственному контракту № 0860500000220000009 от 08.04.2020 г. в течение трех дней с  момента вступления решения суда в законную силу, изложив пункт 3.3 контракта в следующей  редакции: «Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в сроки и в размере, которые установлены  Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к контракту) в размере 50% от цены  контракта, с учетом лимитов бюджетных обязательств по каждому году финансирования,  указанного в п. 3.1 государственного контракта. В счет оплаты каждого выполненного вида  работ, поставленного оборудования (комплекса работ, части отдельного вида работ)  засчитывается 100% от суммы полученного от Заказчика авансового платежа в соответствии с  Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к контракту)».  

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной  инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Электронная подпись действительна.

Судья Арбитражного суда 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного Саратовской области д е п а р т а мента И.В. Мещерякова  

Дата 16.09.2019 6:18:19

 Кому выдана Мещерякова Ирина Владимировна