АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-27/2017

07 июля 2017 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л. Ф.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью «Спутник» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 670045, ул.  Трактовая, д. 36, офис 1, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) к Обществу с ограниченной  ответственностью «Бургражданстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес:  670000, ул. Ленина, д. 44, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) об обязании ООО  «Бургражданстрой» осуществить оплату выполненных работ по договору на выполнение  работ от 27.04.2015г и дополнительному соглашению к нему путем предоставления  квартир в собственность ООО «Спутник» в строящихся домах по улице Смолина 63 по  цене 50 000 руб за один квадратный метр, 102 квартале г.Улан-Удэ по цене 35 000 руб за  один квадратный метр на сумму 4 341 949 руб 60 коп в течение 5-ти банковских дней со  дня вступления решения в законную силу. В случае отсутствия или нехватки квартир  (квадратных метров) обязать ответчика ООО «Бургражданстрой» выплатить истцу  разницу денежными средствами путем перечисления н расчетный счет ООО «Спутник» ,  указанный в договоре на выполнение работ от 27.04.2015г и дополнительном соглашению  к нему , в течение 10-ти банковских дней со дня вступления решения в законную силу.  

встречный иск о взыскании 1 357 994 руб 00 коп , в том числе 854 374 руб 31 коп -  неустойка, 503 620 руб 00 коп – убытки .  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Требования по первоначальному иску удовлетворить полностью в сумме 4 341 949 руб  60 коп, из которых 3 858 373 руб 45 коп – сумма долга, 483 576 руб 15 коп- проценты.  

Встречный иск удовлетворить в сумме 86 939 руб 61 коп – неустойки за просрочку  выполнения работ за период с 09 декабря 2015 по 30 декабря 2015.  

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.  

В результате зачета требований по первоначальному и встречному искам обязать  Общество с ограниченной ответственностью «Бургражданстрой» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) осуществить оплату выполненных работ по договору на выполнение  работ от 27.04.2015г и дополнительному соглашению к нему путем предоставления  квартир в собственность ООО «Спутник» в строящихся домах по улице Смолина 63 по  цене 50 000 руб за один квадратный метр, 102 квартале г.Улан-Удэ по цене 35 000 руб за  один квадратный метр на сумму 4 255 009 руб 99 коп в течение 5-ти банковских дней со  дня вступления решения в законную силу. В случае отсутствия или нехватки квартир  (квадратных метров) обязать ответчика ООО «Бургражданстрой» выплатить истцу  разницу денежными средствами путем перечисления н расчетный счет ООО «Спутник» ,  указанный в договоре на выполнение работ от 27.04.2015г и дополнительном соглашению  к нему, в течение 10-ти банковских дней со дня вступления решения в законную силу.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Бургражданстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Спутник» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 000 руб 00 коп – расходы по уплате  государственной пошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спутник» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Бургражданстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 701 руб 12 коп - расходы по  уплате государственной пошлины.   

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд  Республики Бурятия.  

Судья Л.Ф. Салимзянова