АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-6875/22

г. Уфа

29 августа 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 22.08.2022

Полный текст решения изготовлен 29.08.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Хазиахметовой З.Р. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ГК Башкирские инженерные сети" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Ника" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 17 510 839 руб. 17 коп. неотработанного аванса

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 18.01.2022;

от ответчика – не явились, извещены.

 

В судебном заседании объявлен перерыв до 22.08.2022 до 17 ч 15 мин. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же лицом, в отсутствие представителей сторон.

Общество с ограниченной ответственностью "ГК Башкирские инженерные сети" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ника" о взыскании 17 510 839 руб. 17 коп. неотработанного аванса.

Определением от 16.03.2022 исковое заявление принято к производству суда.

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил, каких-либо ходатайств не заявил.

Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном указанным Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

В соответствии с частью 4 данной статьи судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица, которое в свою очередь определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц местом нахождения ответчика является: 450006, 

<

...>, этаж 4, ком. 28, в исковом заявлении указан адрес: 450006, 

<

...>.

Конверты с копией судебного акта по делу, направленные по юридическому адресу ответчика, и по указанному в исковом заявлении адресу ответчика, возвращены в суд с отметкой органов связи об истечении срока хранения. При этом основания полагать, что организацией почтовой связи нарушен порядок их доставки, у суда отсутствуют.

При таких обстоятельствах суд на основании пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ признает ответчика надлежащим образом извещенным о начавшемся процессе, времени и месте рассмотрения дела.

По смыслу статей 9, 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пункта 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" общество "СМР" несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу его регистрации, даже если оно фактически не находится по указанному адресу.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" тексты судебных актов по делу в установленный срок размещены на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет".

Принимая во внимание, что ответчик получение корреспонденции по юридическому адресу не обеспечивает, почтовые отправления возвращаются за истечением срока хранения, суд рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке статьи 156 АПК РФ.

Рассмотрев заявленные требования, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между обществом "ГК Башкирские инженерные сети" (подрядчик) и обществом "Ника" (субподрядчик) заключен договор от 18.06.2020 №01/2020/БУРАЕВО, согласно которому субподрядчик обязался выполнить строительные работы по объекту: «Комплексная застройка микрорайона «Восточный» в с. Бураево МР Бураевский район Республики Башкортостан» и своевременно сдать результаты работ подрядчику, а подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях настоящего договора.

В силу п. 2.1 договора стоимость составляет 103 166 036,00 (сто три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч тридцать шесть) рублей.

Согласно п. 3.1 календарные сроки выполнения работ: начало с даты заключения договора, окончание: 01.09.2021.

В соответствии с п. 7.1. Договора, Субподрядчик представляет Подрядчику на подписание заверенные надлежащим образом акты приемки выполненных работ (унифицированная форма КС- 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) в 6-ти экземплярах, с приложением исполнительной документации в 3-х экземплярах, счетов-фактур (счетов), паспортов и сертификатов на примененные материалы и оборудование.

В соответствии с п. 5.2.13 договора субподрядчик обязан поставить на Объект все предусмотренные технической документацией и Договором необходимые для проведения выполнения работ материалы, конструкции, оборудование, строительную технику инструменты, приборы учета, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение

Согласно п. 2.9 договора, в целях своевременного обеспечения субподрядчика строительными материалами и оборудованием, необходимыми для производства работ, Подрядчик вправе предоставить Субподрядчику авансы, размер и порядок предоставления которых указываются в дополнительных соглашениях к договору. Все предоставленные авансы носят целевой характер и могут быть использованы только на закупку материалов и оборудования, а также на оплату работ и услуг субподрядчиков по заключенным с ними договорам в рамках настоящего договора.

В порядке авансирования работ по договору общество "ГК Башкирские инженерные сети" перечислило обществу "Ника" 38 460 460 руб. 00 коп., помимо авансовых платежей предоставило материалы для производства работ на сумму 49 007 088 руб. 06 коп., что подтверждается универсально-передаточными актами.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период Январь 2020 г. - Декабрь 2021 г., подписанного обеими сторонами, задолженность в пользу ООО «ГК Башкирские Инженерные Сети» составляет 17 510 839, 17 (семнадцать миллионов пятьсот десять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей, 17 копеек.

Ссылаясь на то, что общество "Ника" выполнило работы частично, на сумму 69 956 708 руб., 89 коп., общество "ГК Башкирские инженерные сети" направило в его адрес претензию о возврате неотработанного аванса в размере 17 510 839,17 руб.

Неисполнение ответчиком в добровольном порядке указанного требования послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым иском о взыскании суммы неотработанного аванса.

Проанализировав условия договора от 18.06.2020 №01/2020/БУРАЕВО, суд приходит к выводу, что сторонами заключен договор подряда, следовательно, их правоотношения подлежат регулированию нормами главы 37 ГК РФ.

Статьей 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее. 

В силу положений статей 702, 711 ГК РФ сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном порядке является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 

В силу пункта 2 статьи 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе договор от 18.06.2020 №01/2020/БУРАЕВО, платежные поручения от 02.07.2020 № 386 на сумму 200 000 руб., от 02.09.2020 №844 на сумму 2 000 000 руб., от 09.09.2020 №892 на сумму 200 000 руб., от 18.09.2020 от 960 на сумму 300 000 руб., от 25.09.2020 №1017 на сумму 1 500 000 руб., от 29.09.2020 №1023 на сумму 350 000 руб., от 29.09.2020 №1027 на сумму 1 650 000 руб., от 09.10.2020 №1180 на сумму 2 000 000 руб., от 16.10.2020 от 1261 на сумму 2 500 000 руб., от 05.11.2020 №1380 на сумму 1 500 000 руб., от 11.11.2020 №1504 на сумму 700 000 руб., от 01.09.2020 №825 на сумму 300 000 руб., от 24.08.2020 №771 на сумму 5 000 000 руб., от 21.08.2020 №739 на сумму 1 500 00 руб., от 18.06.2020 №322 на сумму 1 000 000 руб., от 26.06.2020 №358 на сумму 2 000 000 руб., от 24.07.2020 №558 на сумму 2 000 000 руб., от 30.07.2020 №580 на сумму 3 000 000 руб., от 07.08.2020 №661 на сумму 2 500 000 руб., от 06.07.2020 №409 на сумму 1 000 000 руб., от 10.07.2020 №445 на сумму 5 000 000 руб., от 20.07.2020 №502 на сумму 300 000 руб., от 01.09.2020 №823 на сумму 460 460 руб., от 02.12.2020 №1721  на сумму 1 500 000 руб., счета-фактуры, суд установил факт заключения между сторонами договора подряда, факт перечисления ответчику денежных средств в счет оплаты работ по договору, а также отсутствие в материалах дела доказательств исполнения обязательств на сумму перечисленного аванса.

Суд предлагал ответчику представить отзыв по существу заявленных требований, доказательства выполнения работ либо возврата денежных средств. Таких доказательств ответчиком в материалы дела не представлено (статьи 9, 65, часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

Учитывая, что обществом "Ника", получившим денежные средства от общества ООО «ГК Башкирские Инженерные Сети» встречное удовлетворение на сумму произведенного последним платежа и переданных материалов не предоставлено, суд приходит к выводу о том, что аванс в сумме 17 510 839,17 руб. подлежит взысканию с общества "Ника".

С учетом изложенного требование общества ООО «ГК Башкирские Инженерные Сети» о взыскании с общества "Ника" 17 510 839,17 руб. неотработанного аванса подлежит удовлетворению в полном объеме.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку истцу в соответствии с частью 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при принятии иска к производству судом предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины и требования истца удовлетворены полностью, государственная пошлина за рассмотрение иска в сумме 110 554 руб. подлежит взысканию с ответчика непосредственно в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ГК Башкирские инженерные сети" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ника" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГК Башкирские инженерные сети" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму неотработанного аванса в размере 17 510 839 руб. 17 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ника" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 110 554 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в доход федерального бюджета выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

   Судья      З.Р. Хазиахметова