Именем Российской Федерации

             

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

17. 10. 2019 года.                                                                                    Дело № А40-144372/19-43-1327

Резолютивная часть решения объявлена 09. 10. 2019 года.

Решение изготовлено в полном объеме 17. 10. 2019 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ЗАО " Экспорт Файненс " УКО (Республика Армения)

к ООО " ЮгорскСтрой " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 5 682 311 руб. 64 коп. – суммы неотработанного авансового платежа, суммы комиссии,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 18/19 от 30.04.2019 г.; от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 5 682 311 руб. 64 коп. – суммы неотработанного авансового платежа, суммы комиссии, на основании статей 824, 826 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

25 апреля 2018г. между ЗАО «Экспорт Файненс» УКО (финансовый агент) и ООО «ЮгорскСтрой» (клиент) заключен договор №25/04/2018-1-БТ финансирования под уступку будущего денежного требования.

Как следует из пп. а) п. 1.1 Договора факторинга Клиент обязуется уступать Финансовому агенту денежные требования к третьим лицам, указанным в Приложении №5 к Договору факторинга, вытекающие из поставки Клиенту товаров, выполнения им работ или оказания услуг Должникам на основании соответствующих договоров, заключенных между Клиентом и Должниками.

В соответствии с п.3.1 Договора факторинга финансирование в счет уступаемых Клиентом денежных требований к Должникам производится Финансовым агентом, только по согласованной им Заявке Клиента, в порядке и на условиях, установленных Сторонами в Приложении №2 к Договору Факторинга.

Вместе с Заявкой Клиент предоставляет Финансовому агенту копию Контракта, а также копии всех документов, которые в соответствии с Контрактом позволяют идентифицировать денежное требование, являющееся предметом уступки по Договору факторинга, в момент его возникновения ( п.3.2 Договора факторинга).

В силу п. 5.2 Договора факторинга в день, когда возникает право на получение с Должника денежных средств, которые явились предметом уступки требования по Договору факторинга, Клиент обязан уведомить этого Должника об уступке таких денежных требований к нему в пользу Финансового агента. Уведомление об уступке денежных требований к должнику составляется по форме, установленной в Приложении №4 к Договору Факторинга.

Клиент обязан предоставить Финансовому агенту указанное уведомление, подписанное Должником, в течении 3 (трех) рабочих дней с даты, предусмотренной настоящим пунктом для направления Должнику такого уведомления.

В соответствии с п.4.1 в качестве вознаграждения за услуги, связанные с исполнением Договора факторинга, Финансовый агент взимает с Клиента комиссию за рассмотрение Заявки и комиссию за предоставление финансирования согласно Приложению №3 к Договору факторинга.

Согласно Приложению №3 к Договору факторинга комиссия за рассмотрение Заявки составляет 1% от суммы уступаемого денежного требования.

Комиссия за предоставление финансирования составляет 0,1% от суммы уступаемого денежного требования за каждый день срока указанного в заявке, предусмотренного Контрактом для исполнения Должником своих обязательств по оплате товара/выполненных работ/ оказанных услуг.

В соответствии с п. 1. 1 Договора факторинга и Приложением № 5 к нему в число лиц, требования к которым Клиент может уступить Финансовому агенту по Договору финансирования под уступку будущего денежного требования №25/04/2018-1-БТ от 25 апреля 2018г. входит ООО «ГазСтрой» ( ИНН7715500533, ОГРН 

<

***>).

16 февраля 2018 года между ООО «ГазСтрой» (Заказчик) и ООО «ЮГОРСКСТРОЙ» (Подрядчик) заключен договор № 167-70710-ЗиС-ГС на выполнение работ по капитальному ремонту ЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2018 году (работы).

Цена работ Подрядчика, в соответствии с п. 3.1. Договора составила 16 571 736,19 руб., кроме того НДС 18% - 2 982 912,51 руб., всего 19 554 648,70 руб.

Согласно п. 4.1. Договора начальный и конечный сроки выполнения работ, а также завершения отдельных этапов выполнения работ по настоящему Договору определены Приложением № 1 к Договору и утвержденным графиком производства работ.

В соответствии дополнительным соглашением № 1 от 15 марта 2018 года к Договору Цена работ Подрядчика составила 26 538 451,81 руб. с НДС.

Согласно Приложения № 1 к указанному дополнительному соглашению Подрядчик обязался выполнить работы на следующих объектах: ГТЮ Правохеттинское ЛПУМГ. Здание общежития Уренгой-Ужгород Правохеттинское ЛПУ, инв. № 123000000095. Капитальный ремонт кровли, фасадов, замена окон, входных групп, ремонт бетонной отмостки, внутренних помещений (№ п/п 3 Приложения № 1), стоимостью 17 043 632,75 руб. с НДС, в следующие сроки: начало - 01 апреля 2018 года, окончание - 30 ноября 2018 года. ГТЮ Правохеттинское ЛПУМГ. Здание ФОК п. Правохеттинский ЯНАО, инв. № 28171 Капитальный ремонт спортивного покрытия пола в игровом зале, зале аэробики, бильярда, замена внутренних дверей, стоимостью 5 446 580,65 руб. с НДС, в следующие сроки: начало -01 июля 2018 года, окончание - 30 ноября 2018 года (№ п/п 4 Приложения № 1).

Дополнительным соглашением № 1/1 от 09 августа 2018 года Цена работ Подрядчика составила 4 887 188,93 руб.

В соответствии с Приложениями № 1а и № 1.1а   Подрядчик обязался выполнить работы на следующем объекте: ГТЮ Правохеттинское ЛПУМГ. Здание общежития Уренгой-Ужгород Правохеттинское ЛПУ, инв. № 12300000_0095. Капитальный ремонт кровли, фасадов, замена окон, входных групп, ремонт бетонной отмостки, внутренних помещений, стоимостью 4 887 188,30 руб. с НДС, в следующие сроки: начало - 01 августа 2018 года, окончание - 30 августа 2018 года.

26 апреля 2018 года Финансовым агентом по заявке ООО «ЮгорскСтрой» на финансирование под уступку денежного требования от 25 апреля 2018 года платежным поручением № 002081 перечислен Подрядчику аванс в размере 6 000 000 руб. на приобретение МТР для выполнения работ по Договору.

Согласно заявке ООО «ЮгорскСтрой» от 25.04.2018г. сумма финансирования составила 6 000 000 рублей, а размер будущего денежного требования составил 8 510 638 рублей 30 копеек.

В соответствии с пунктом 1 статьи 824 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.

Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так н право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование).

Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения (пункт 1 статьи 826 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно пункту 2 статьи 826 Гражданского кодекса Российской Федерации при уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования, предусмотренной договором. Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием, она вступает в силу- после наступления этого события. Дополнительного оформления уступки денежного требования в этих случаях не требуется. В силу пункта 1 статьи 830 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.

Уведомлением об уступке денежных требований от 25.04.2018г истец уведомил ООО «ГазСтрой» об уступке ему денежного требования в размере 8 510 638 рублей 30 копеек, возникшего на основании договора № 167-70710-ЗиС-ГС от 16.02.2018г., заключенного между ООО «ЮгорскСтрой» и ООО «ГазСтрой».

В период с мая по июнь 2018г. ООО «ЮгорскСтрой» отработан аванс в размере 2 828 326 рублей 66 копеек, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.05.2018г. и №2 от 30.06.2018г., а также актом приемки выполненных работ за май №1 от 31.05.2018г. пактом приемки выполненных работ за июнь №2 от 30.06.2018г.

К выполнению оставшейся части работ Подрядчик не приступил, перечисленный аванс в размере 5 682 311 рублей 64 копеек не отработал.

05.02.2019г. ООО «ГазСтрой» перечислило ЗАО «Экспорт Файненс» УКО сумму отработанного ООО «ЮгорскСтрой» аванса в размере 2 828 326 рублей 66 копеек. В связи с невыполнением ООО «ЮгорскСтрой» работ по договору № 167-70710-ЗиС-ГС от 16.02.2018г. основание для требования у ООО «ГазСтрой» оставшейся сумму у фактора отсутствует.

В соответствии с п.5.4 Договора факторинга в случае, если право на получение с Должника денежных средств, которые явились предметом уступки требования по договору, не возникло у Клиента в срок, установленный Контрактом, Клиент обязан в течении 10 банковских дней с даты истечения указанного срока вернуть Финансовому агенту сумму финансирования, предоставленную Клиенту на основании соответствующей Заявки, а также уплатить Финансовому агенту вознаграждение.

В виду того, что срок окончания работ по договору № 167-70710-ЗиС-ГС от 16.02.2018г - 30 ноября 2018г. ООО «ЮгорскСтрой» обязано было в срок до 14 декабря 2018г. оплатить фактору комиссию в размере 2 510 638,30 руб. , а также вернуть сумму неотработанного авансового платежа в следующем размере: 6 000 000 руб. - 2 828 326,66 руб. = 3 171673,34 руб.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статьей 310 ГК РФ закреплено правило запрета одностороннего отказа от исполнения обязательства.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя  из смысла указанной  нормы, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости  собственного  имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того  имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за  счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за  счет другого.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Требование истца о взыскании неотработанного авансового платежа в сумме 3 171 673  руб. 34 коп. – законное и обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Требование истца о взыскании комиссии в сумме 2 510 638 руб. 30 коп. - законное и обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ, относятся на Ответчика.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 15, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 393, 401, 420-424, 431-434, 665-670, 702, 709, 711, 720, 740, 746, 753, 1102, 1103 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " ЮгорскСтрой " (ОГРН 

<

***>) в пользу ЗАО " Экспорт Файненс " УКО (Республика Армения) 5 682 311 руб. 64 коп., в том числе: 3 171 673  руб. 34 коп. – суммы неотработанного авансового платежа, 2 510 638 руб. 30 коп. - суммы комиссии и расходы по уплате госпошлины в сумме 51 412 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья                                                                                                          О.В. Романов