Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-119614/20-14-881

г. Москва

13 октября 2020 года

Резолютивная часть объявлена 06 октября 2020 г.

Дата изготовления решения в полном объеме             13 октября 2020 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе 

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. 

Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Ю.Ю., с использованием средств аудиозаписи 

рассмотрел дело по иску ГБУ "ЖИЛИЩНИК ТАГАНСКОГО РАЙОНА" (ОГРН 

<

***>) 

к ответчику ООО "ТЕХСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 1 901 031,93 руб. 

в судебное заседание явились: 

от истца – ФИО1 по доверенности от 12.03.2020г. 

в судебное заседание не явились: 

от ответчика – не явка, извещён 

УСТАНОВИЛ:

ГБУ «Жилищник Таганского района» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «ТЕХСТРОЙ» о взыскании суммы пени в размере 1 901 031,93 руб. по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от 20.05.2019 г. № 58-44-ТГ/19 на выполнение работ.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ, в заседание суда первой инстанции не явился. Отзыв не представил, иск по праву и размеру документально не оспорил.

Учитывая надлежащее уведомление ответчика о дате, времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 65 от 20.12.2006 г., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в отсутствие ответчика, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ по материалам, представленным истцом и не оспоренным ответчиком.

Выслушав представителя истца, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, считает иск подлежащим удовлетворению полностью по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 08.04.2019 г. между ГБУ «Жилищник Таганского района» и ООО «ТЕХСТРОЙ» был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (контракт) на благоустройство территории Таганского района.

Согласно п. 2.1 договора, цена контракта составляет 221 853 213,05 руб.

Заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта от 20.12.2019 г. № 6 на сумму 184 765 274,31 руб.

В соответствии с п. 3.1 контракта, работы выполняются с момента заключения контракта по 20 августа 2019 г.

В соответствии с п. 5.4.1 контракта, ООО «ТЕХСТРОЙ» обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту) и представитель заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего контракта.

Своевременно работы не выполнены. Документы об исполнении были представлены Заказчику с нарушением сроков, что подтверждается актами выполненных работ.

В соответствии с п. 7.1 контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

На основании п. 7.8 контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Согласно расчету истца по состоянию на 28.05.2020 г. сумма пени составляет 1 901 031,93 руб.

Досудебный порядок разрешения спора сторонами соблюден.

По настоящее время претензия не оплачена, ответ на неё не получен, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением. 

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, предусмотренной законом или договором неустойкой. Стороны, вступая в гражданско-правовые отношения, самостоятельно определяют меры ответственности за неисполнение обязательств. 

По смыслу статьи 330 ГК РФ по основаниям возникновения неустойка подразделяется на законную (нормативную) и договорную (добровольную). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также период её начисления и размер, проверен судом, является правильным. 

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика суммы пени в размере 1 901 031,93 руб. по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от 20.05.2019 г. № 58-44-ТГ/19 на выполнение работ подлежит удовлетворению в полном объеме. 

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Согласно п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ТЕХСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ГБУ "ЖИЛИЩНИК ТАГАНСКОГО РАЙОНА" (ОГРН 

<

***>) 1 901 031,93руб. – пени и 32 010руб. – государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. 

Судья: О.В. Лихачева