РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-78265/23-110-639

г. Москва

05 октября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 19 сентября 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 05 октября 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "КВАДРОСТРОЙ" (117342, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, БУТЛЕРОВА УЛ., Д. 17, ЭТАЖ 3, КОМ. 95, ОФИС 525, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ПМК-РАССВЕТ" (198217, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА, НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПР-КТ, Д. 149, СТР. 1, ПОМЕЩ. 39-Н ОФИС 6 РАБОЧЕЕ МЕСТО 1, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 1 036 986,30 руб.,

при участии:

от истца – ФИО3 по дов.  от  29.03.2023,

от ответчика- ФИО4 по дов.  от  12.04.2023,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КВАДРОСТРОЙ" обратилось с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "ПМК-РАССВЕТ" о расторжении договора №18/04-ПР от 12.04.2022, о взыскании 1 000 000 руб. аванса, 36 986,30 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «КВАДРОСТРОЙ» (далее -истец) и ООО «ПМК-РАССВЕТ» (далее -ответчик) был заключен договор № 18/04-ПР от 12.04.2022 на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция корпуса №2 районной поликлиники ГБУЗ РК «Нижнегорская РБ» по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, ул. Школьная, 1а» (далее - Договор).

Пунктом 4.1 Договора предусмотрено, что работы по Договору должны быть завершены Исполнителем не позднее 6 месяцев с даты получения исходных данных от Заказчика, при этом пп. 2.3.1 Договора предусмотрено, что Заказчик выплачивает Исполнителю первый авансовый платеж до начала выполнения работ в размере 1 000 000 руб.

Оплата первого авансового платежа произведена Заказчиком в полном объеме на 13.07.2022, что подтверждается платежными поручениями №130 от 08.06.2022 и №57 от 13.07.2022.

Таким образом, работы по Договору должны были быть завершены в срок не позднее шести месяцев с даты выплаты первого авансового платежа - 13.01.2023. Работы до сегодняшнего дня не исполнены и до настоящего времени Заказчику не переданы.

Согласно п. п. 1,3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст.309 ГК РФ).

Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Так же исходя из того, что работы не начаты, ответчик на наши претензии не отвечает, не имеет намерения исполнять обязательства, то денежные средства в виде аванса удерживаются и используются ответчиком незаконно. Соответственно истец считает, что на сумму задолженности подлежит начислению штрафные санкции, предусмотренные ст.395 ГК РФ. С даты последнего платежа в адрес ответчика и до дня составления искового заявления 30 марта 2023 года включительно.

Расчет процентов (учетом моратория на начисление штрафный санкций с 01 апреля 2022 года по 01 октября 2022 года):

Задолженность, руб.

Период просрочки

Процентная ставка

Дней в

году

Проценты, руб.

с

по

ДНИ

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]х[4]х[5]/[6]

1 000 000

02.10.2022

30.03.2023

180

7,50%

365

36 986,30

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем, в соответствии с п. 1.2   Контракта, Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить:

Первый этап: проработка планов на основании исходных планов ПИБ, замеры, геология (геологический отчет), обсуждение Технического задания.

Итог первого этапа работ - создание объемно-планировочных решений здания Объекта, согласования медико-технологического задания на проектирование, получение технический условий на инженерно-технологическое присоединение к сетям и коммуникациям для нужд Объекта. Стоимость первого этапа - 1 000 000 (один миллион) руб. 00 копеек.

В соответствии с п. 1.3. Контракта второй этап: Разработка проектно-сметной документации согласно постановлению 87 от 16 февраля 2008 года. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 1 декабря 2021 года). Для объекта капитального ремонта согласно техническим заданиям на проектирование. Подача проектной-документации на экспертную оценку. Ведение работ, по согласованию проектно-сметных решений в экспертной организации.

Стоимость второго этапа - 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 копеек.

В соответствии с п. 1.4. Третий этап после прохождения экспертизы Исполнитель переходит к выполнению стадии «Р» рабочая документация.

Стоимость третьего этапа -4 000 000 (четыре миллиона) руб. 00 копеек.

В соответствии с п. 1.5. Перечень услуг, место оказания и сроки, согласно которым Исполнитель обязан оказать услуги в рамках Контракта, определены в Техническом задании (Приложение №2 к Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

В соответствии с п. 2.1 Контракта общая цена контракта составляет 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением Исполнителем У.С.Н.

В соответствии, с пп. 2.3.1 п. 2.3 Контракта оплата производитсяпоэтапно, до начала выполнения работ, Заказчик выплачивает ИсполнителюПервый авансовый плате в размере: 1 000 000, 00 (один миллион) руб. 00 копеекбез НДС согласно У С Н.

12.05.2022г. ООО «ПМК-РАССВЕТ» направило в адрес Заказчика официальное письмо, в котором указывало, что по состоянию на 12.05.2022г. Исполнитель в соответствии с(Контрактом № 18/04-ПР от 18.04.2022г. выполнил в рамках предварительных работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция корпуса № 2 районной поликлиники ГБУЗ РК «Нижнегорская РБ» по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский,   ул.    Школьная,   д.    1    выполнило   ряд   организационно-подготовительных этапов, готовится медико-технологическое задание (МТЗ), в рамках подготовки ведется сбор нагрузок по инженерным системам, после утверждения которого требуется подача запросов на мощности в электроснабжающие организации, в рамках Технического задания определена потребность произвести 3d сканирование объекта для начала работ по разработке проектной документации (письмо от 12.05.2022г. № 12052022).

Согласно пп. 4 п. 1.7 Технического задания «Этапы проектирования и сроки проектирования» основанием для проектирования являются результаты обследования и согласования Заказчиком предпроектных решений.

Таким образом, без согласования Заказчиком предпроектных решений дальнейшее проектирование Объекта является невозможным.

Для выполнения указанных в Контракте работ, Исполнитель выезжал на Объект в Республику Крым для проведения лазерного сканирования здания поликлиники ГБУЗ РК «Нижнегорская РБ» с целью поэтапно выполнить Техническое задание, предусмотренного условиями Контракта.

Для указанных целей ООО «ПМК-РАССВЕТ» заключило Договор №22 от 19.07.2022 с ИП ФИО5.

22 августа 2022 года Работы по техническому сканированию были выполнены.

Вместе с этим, 3 июля на адрес заместителя генерального директора Заказчика был отправлен отчёт о ходе выполнения проекта по Договору с Заказчиком, 4 сентября 2022 года Исполнитель отправил в адрес заказчика запрос, о предоставлении контактных данных ответственного за проект по Договору, в связи со сменой у Заказчика учредителя и генерального директора.

Исполнитель, на основании выполненного лазерного сканирования Объекта приступил к выполнению объёмно планировочных решений, расчёта технических нагрузок на инженерные сети, и иных работ в соответствии С Контрактом и Техническим заданием к нему.

В соответствии с пп.4.2.1 п. 4.2 Контракта в процессе исполнения Контракта Исполнитель представляет Заказчику подписанные со своей стороны Промежуточные Акты сдачи - приемки выполненных работ в 2-х экземплярах.

В октябре 2022 г. сторонами Контракта был подписан Промежуточный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Таким образом, Ответчиком было выполнено задание по первому этапу и отработан аванс в размере 1 000 000 руб.

Однако, Заказчик не согласовал, направленную для согласования всоответствии с условиями Контракта, документацию, на контакт с Исполнителемне выходил, тем самым отказавшись в одностороннем порядке от дальнейшегоисполнения настоящего Контракта.

В исковом заявлении Истец указывает, что работы не начаты, Ответчик не имеет намерения исполнять обязательства, и что денежные средства в виде аванса удерживаются и используются Ответчиком незаконно.

Сроки выполнения этапов проектных работ по разработке проектно-сметной документации определены Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту). Для первого этапа (разработка предпроектных и технологических решений) установлен срок выполнения работ -30 дней.

Аванс в полном объеме по указанному' Контракту был оплачен Заказчиком - 13.07.2022 г.

В силу статей 711, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить выполненную подрядчиком работу после сдачи результатов работ в сроки и в порядке, предусмотренные условиями договора.

Ответчик направил Истцу результат выполненных работ по первому этапу и промежуточный Акт сдачи-приемки работ, который был подписан Истцом, однако, согласование предпроектных и технологических решений по Объекту Истец не произвел, поэтому Ответчик не мог приступить к следующему этапу работу.

Как было указано выше, без согласования с Заказчиком предпроектных решений, дальнейшее проектирование Объекта является невозможным согласно пп. 4 п. 1.7 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью Контракта.

Авансовый платеж был полностью освоен Ответчиком, что подтверждается представленными доказательствами.

В силу пункта 3 статьи 450 и пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в связи с тем, что подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Для того, чтобы отказаться от договора в связи с ненадлежащим . исполнением подрядчиком его обязанностей, заказчик должен провести проверку работ и доказать, что при данном темпе выполнения работы будут нарушены сроки ее выполнения.

Исходя из содержания статьи  715 Гражданского кодекса Российской Федерации, немотивированный отказ заказчика от подписания акта приема-передачи не дает ему права ссылаться на то, что работы не были приняты, и отказываться от договора в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком его обязанностей.

Следовательно, нарушение предусмотренного Контрактом календарного порядка сдачи этапов работ произошло вследствие неисполнения встречных обязательств Истца, а именно: согласовать Ответчику предпроектные и технологические решения, без согласования которых, невозможно дальнейшее выполнение проектных работ.

При таком положении, оснований для удовлетворения заявленных Истцом требований о расторжении договора № 18/04-ПР от 12.04.2022г.на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция корпуса № 2 районной поликлиники ГБУЗ РК «Нижнегорская РБ», расположенному по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, ул. Школьная, д. 1а и взыскании денежных средств в  размере 1 000 000 руб., уплаченного ООО «ПМК-РАССВЕТ» в качестве аванса, процентов за пользование чужими денежными средствами въразмере 36 986,30 руб., не имеется.

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1