АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 24145/2018

16 января 2023 года

г. Ижевск

 

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 октября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 16 января 2023 года

 

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи О.В. Бусыгиной, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-18" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 765 214 руб. 90 коп. долга по договорам субподряда №05/58-16 от 08.08.2016, №05/20-17 от 21.03.2017, №05/26-17 от 22.03.2017, № 05/27-17 от 22.03.2017, № 05/31-17 от 29.03.2017, №05/50-17 от 10.05.2017, № 05/53-17 от 18.05.2017, №05/56-17 от 23.05.2017, №05/57-17 от 23.05.2017,  №05/58-17 от 23.05.2017, № 05/59-17 от 23.05.2017,  № 05/61-17 от 30.05.2017, 

встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-18" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании задолженности по договорам субподряда №05/58-16 от 08.08.2016, №05/20-17 от 21.03.2017, № 05/26-17 от 22.03.2017, № 05/27-17 от 22.03.2017, № 05/31-17 от 29.03.2017, №05/50-17 от 10.05.2017, № 05/53-17 от 18.05.2017, №05/56-17 от 23.05.2017, №05/57-17 от 23.05.2017,  № 05/58-17 от 23.05.2017, № 05/59-17 от 23.05.2017, №05/61-17 от 30.05.2017, № 05/96-17 от 05.09.2017, № 05/97-17 от 05.09.2017 в размере 804 339 руб. 00 коп., пени по договору субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016 за период с 01.04.2017 по 09.01.2019 в размере 1 947 000 руб. 00 коп.,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора: 

1)                Общества с ограниченной ответственностью "СЭЛС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

2)                Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Сайгас" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

при участии представителей сторон: 

от ИП ФИО2: не явились, уведомлены, 

от ООО "РСУ - 18": ФИО3 по доверенности от 15.08.2022, диплом, паспорт, 

от ООО "СЭЛС": не явились, уведомлены,

от ООО "АН "Сайгас": не явились, уведомлены, 

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2  (далее – ИП ФИО2, истец) обратился в арбитражный суд с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью  "Ремонтно-строительное управление-18" (далее – ООО "РСУ - 18", ответчик) о взыскании 999 299 руб. 90 коп. долга по договорам субподряда №05/58-16 от 08.08.2016, №05/20-17 от 21.03.2017, №05/26-17 от 22.03.2017, № 05/27-17 от 22.03.2017, № 05/31-17 от 29.03.2017, №05/50-17 от 10.05.2017, № 05/53-17 от 18.05.2017, №05/56-17 от 23.05.2017, №05/57-17 от 23.05.2017,  №05/58-17 от 23.05.2017, № 05/59-17 от 23.05.2017,  № 05/61-17 от 30.05.2017. 

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.12.2018 исковое заявление принято к производству, делу присвоен А71-24145/2018.

Определением суда от 06.02.2019 принято к производству для рассмотрения совместно с первоначальным иском встречное исковое заявление ООО "РСУ - 18" к ИП ФИО2 о  взыскании задолженности по договорам субподряда №05/20-17 от 21.03.2017, № 05/26-17 от 22.03.2017, № 05/27-17 от 22.03.2017, № 05/31-17 от 29.03.2017, №05/50-17 от 10.05.2017, № 05/53-17 от 18.05.2017, №05/56-17 от 23.05.2017, №05/57-17 от 23.05.2017,  № 05/58-17 от 23.05.2017, №05/59-17 от 23.05.2017, № 05/61-17 от 30.05.2017, № 05/96-17 от 05.09.2017, № 05/97-17 от 05.09.2017 в размере 804 249 руб. 10 коп.; к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "СЭЛС" (далее - ООО "СЭЛС", третье лицо 1).

ООО "РСУ - 18" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к индивидуальному предпринимателю ИП ФИО2 (ОРГН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании договора субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016 расторгнутым, о взыскании 90 000 руб. неосновательного обогащения, 15 000 руб. пени по договору субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016. Делу присвоен номер №А71-24489/2018.

Определением суда от 04.04.2019 на основании статьи 130 Арбитражного кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела  №А71-24145/2018 и № А71-24489/2018 объединены в одно производство для совместного рассмотрения с присвоением  объединенному делу № А71-24145/2018. 

Определением суда от 02.08.2019 по настоящему делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено Автономной некоммерческой организации "Экспертное бюро "Флагман" (далее - АНО "Экспертное бюро "Флагман") – экспертам ФИО4 (далее – ФИО4), ФИО5 (далее – ФИО5),  ФИО6 (далее – ФИО6). 

06.09.2019 от АНО "Экспертное бюро "Флагман" в Арбитражный суд Удмуртской Республики поступило экспертное заключение №1351-19 от 05.09.2019.

Определением суда от 19.09.2019 назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по делу № А71-24145/2018.

В судебном заседании, состоявшемся 19.12.2019, заслушаны пояснения эксперта ФИО4 по проведенной экспертизе.

20.01.2020  от АНО "Экспертное бюро "Флагман" в суд поступили  дополнительные письменные пояснения к экспертному  заключению № 1351-19 от 05.09.2019. 

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по делу откладывалось, в том числе в связи с особым режимом работы суда в период действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В судебном заседании, состоявшемся  21.07.2020, судом на основании ст. 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство ИП ФИО2 об уточнении исковых требований (исх. от 18.10.2019), согласно которому ИП ФИО2 просит взыскать с ООО "РСУ - 18"  765 214 руб. 90 коп. долга.  

Кроме того, судом на основании ст. 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство ООО "РСУ - 18" об уточнении исковых требований (исх. от 17.01.2020), согласно которому ООО "РСУ - 18" просит взыскать с ИП ФИО2  задолженность по договорам субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016,  №05/20-17 от 21.03.2017, № 05/26-17 от 22.03.2017, № 05/27-17 от 22.03.2017, № 05/31-17 от 29.03.2017, №05/50-17 от 10.05.2017, № 05/53-17 от 18.05.2017, №05/56-17 от 23.05.2017, №05/57-17 от 23.05.2017,  № 05/58-17 от 23.05.2017, №05/59-17 от 23.05.2017, № 05/61-17 от 30.05.2017, № 05/96-17 от 05.09.2017, № 05/97-17 от 05.09.2017 в размере 804 339 руб. 00 коп., пени в размере 1 947 000 руб. 00 коп. по договору субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016 за период с 01.04.2017 по 09.01.2019.

Определением суда от 21.07.2020 производство по делу возобновлено.

Определением суда от 16.11.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Сайгас" (далее - ООО "АН "Сайгас", третье лицо 2).

В судебном заседании, проведенном в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 05.10.2022 с перерывом до 12.10.2022, представитель ООО "РСУ - 18" относительно удовлетворения исковых требований ИП ФИО2 возражала по мотивам, изложенным в ранее представленном отзыве на исковое заявление и письменных дополнениях к нему (т. 8. л.д. 36-38), просит в удовлетворении иска отказать, встречные исковые требования ООО "РСУ - 18" поддержала в полном объеме.

ИП ФИО2 явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил; согласно ранее представленным письменным пояснениям на исковых требованиях настаивает, согласно отзыву на встречное исковое заявление и дополнениям к нему (т. 4 л.д. 63-64, т. 7 л.д. 87, т. 8 л.д. 12-15, т. 8 л.д. 90-92) полагает встречные исковые требования не подлежащими удовлетворению, а в случае их удовлетворения просит применить ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Третьи лица - ООО "СЭЛС", ООО "АН "Сайгас" явку своих представителей в судебное заседание также не обеспечили.

Суд признал возможным рассмотреть дело в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие ИП ФИО2, ООО "СЭЛС", ООО "АН "Сайгас", надлежащим образом извещенных о начавшемся процессе, времени и месте судебного заседания, в том числе публично посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети «Интернет» (п.16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»).

Выслушав представителя ООО "РСУ - 18", исследовав и оценив собранные по делу доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 08.08.2016 между ООО "РСУ - 18" (Генподрядчик) и ИП ФИО2 (Субподрядчик) заключен договор субподряда  № 05/58-16  (далее – договор №05/58-16, т.1, л.д. 9-20) в редакции протокола разногласий (т.1, л.д. 21), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы вентиляции 3 эт. В ЦЧ в осях 4-22/Г-И1 на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/58-16 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но, не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/58-16).

В силу п. 5.1.2 договора №05/58-16 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/58-16 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/58-16 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 300 000 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в размере 90 000 руб. 

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в размере 210 000 руб.  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ с учетом условия п. 3.1.1 договора.

Согласно п.6.1 договора №05/58-16 общий срок выполнения работ составляет 30 календарных дней после оплаты аванса.

Кроме того, между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/20-17 от 21.03.2017 (далее – договор №05/20-17, т.1 л.д. 25-33), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы вентиляции 4 эт. В ЦЧ в осях 4-22/Г-И1 (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/20-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но, не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/20-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/20-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/20-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/20-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 315 000 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора; 

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ.

Согласно п.6.1 договора №05/20-17 общий срок выполнения работ составляет 30 календарных дней после получения аванса 30% Субподрядчиком. 

22.03.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/26-17 (далее – договор №05/26-17, т.1, л.д. 35-42), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы вентиляции 3 эт. СК в осях 19-22/Г-П/1 (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/26-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но, не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/26-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/26-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/26-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/26-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 272 131 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ (п.3.1.1).

Согласно п.6.1 договора №05/26-17 общий срок выполнения работ составляет 25 календарных дней после получения аванса 30% Субподрядчиком. 

22.03.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/27-17 (далее – договор №05/27-17, т.1, л.д. 44-51), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы вентиляции 4 эт. СК в осях 19-22/Г-П/1 (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/27-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но, не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/27-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/27-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/27-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/27-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 285 737 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ (п.3.1.1).

Согласно п.6.1 договора №05/27-17 общий срок выполнения работ составляет 25 календарных дней после получения аванса 30% Субподрядчиком. 

29.03.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/31/17 (далее – договор №05/31-17, т.1, л.д. 53-63), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы вентиляции ПВ-2, ПВ-3, ДУ2, ДУ-3 транзитные участки с 4 этажа на чердак Центральной части в осях 4-19/Г-И/1, В-11 транзитный участок с 3 этажа (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/31-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но, не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/31-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/31-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/31-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/31-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 307 248 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ.

Согласно п.6.1 договора №05/31-17 общий срок выполнения работ составляет 20 календарных дней после получения аванса Субподрядчиком. 

10.05.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/50-17 (далее – договор №05/50-17, т.1, л.д. 65-72), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы вентиляции 5 этаже Центральной части в осях 4-19/Г-И/1 (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/50-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/50-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/50-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/50-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/50-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 315 000 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ (п.3.1.1).

Согласно п.6.1 договора №05/50-17 общий срок выполнения работ составляет 30 календарных дней после получения аванса 30% Субподрядчиком. 

18.05.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/53-17 (далее – договор №05/53-17, т.1, л.д. 75-82), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы вентиляции на 5 этаже Северного крыла в осях 19-22/Г-П/1 (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/53-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но, не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/53-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/53-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/53-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/53-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 285 737 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ (п.3.1.1).

Согласно п.6.1 договора №05/53-17 общий срок выполнения работ составляет 25 календарных дней после получения аванса 30% Субподрядчиком. 

23.05.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/56-17 (далее – договор №05/56-17, т.1, л.д. 86-93), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу электрики системы вентиляции В11 (туалеты) на 2,3,4,5 этаже Центральной части в осях 4-22/Г-И/1 (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/56-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/56-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/56-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/56-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/56-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 22 417 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ (п.3.1.1).

Согласно п.6.1 договора №05/56-17 общий срок выполнения работ составляет 25 календарных дней после получения аванса 30% Субподрядчиком. 

23.05.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/57-17 (далее – договор №05/57-17, т.1, л.д. 98-105), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу огнезадерживающих клапанов на 2,3,4,5 этаже Центральной части в осях 4-22/Г-И/1 (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/57-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но, не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/57-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/57-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/57-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/57-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 123 147 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ (п.3.1.1).

Согласно п.6.1 договора №05/57-17 общий срок выполнения работ составляет 25 календарных дней после получения аванса 30% Субподрядчиком. 

23.05.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/58-17 (далее – договор №05/58-17, т.1, л.д. 110-117) в редакции протокола разногласий (т.1, л.д. 21), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу электроснабжения системы дымоудаления ДУ2, ДУ3 на 2,3,4,5 этаже Центральной части в осях 19-22/Г-П/1 (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/58-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но, не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/58-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/58-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/58-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/58-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 100 763 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ (п.3.1.1).

Согласно п.6.1 договора №05/58-17 общий срок выполнения работ составляет 25 календарных дней после получения аванса 30% Субподрядчиком. 

23.05.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/59-17 (далее – договор №05/59-17, т.1, л.д. 121-128), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу огнезадерживающих клапанов на 2,3,4,5 этаже  Северного крыла в осях 19-22/Г-П/1 (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/59-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/59-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/59-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/59-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/59-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 48 927 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ (п.3.1.1).

Согласно п.6.1 договора №05/59-17 общий срок выполнения работ составляет 25 календарных дней после получения аванса 30% Субподрядчиком. 

30.05.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/61-17 (далее – договор №05/61-17, т.1, л.д. 130-137), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы вентиляции (транзиты и огнезащита) с 3 этажа до чердака включительно Северного крыла в осях 19-22/Г-П/1 (согласно проекту) на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/61-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/61-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/61-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/61-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/61-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 94 400 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора  в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ (п.3.1.1).

Согласно п.6.1 договора №05/61-17 общий срок выполнения работ составляет 25 календарных дней после получения аванса 30% Субподрядчиком. 

05.09.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/96-17 (далее – договор №05/96-17, т.2, л.д. 133-143), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по покраске системы  вентиляции 5 этажа в осях 19-22/Г-П/1 на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/96-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/96-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/96-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/96-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/96-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 27 674 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в размере 8 302 руб. 20 коп.;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в размере 19 371 руб. 80 коп. в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ.

Согласно п.6.1 договора №05/96-17 общий срок выполнения работ составляет 7 рабочих дней после получения аванса Субподрядчиком. 

05.09.2017 между сторонами спора был заключен договор субподряда №05/97-17 (далее – договор №05/97-17, т.2, л.д. 144-154), по условиям которого (пункт 2.1) Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по покраске системы  вентиляции 5 этажа в осях 4-19/Г-И на Объекте «ТОЦ Горького, 79», в соответствии с Договором, Проектной (технической), Сметной документации (далее по тексту - работы). 

Согласно п. 2.2 договора №05/97-17 наименование и объем работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении работ материалов и стоимость выполняемых работ определяются сторонами в проектной (технической) и сметной документации к настоящему договору. 

Вид, состав, наименование и объем работ по настоящему договору определяются проектной (технической) и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ на объекте, но не отклоняясь при этом от условий договора, сроков выполнения работ, требований проектной (технической) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора, а также соблюдая требования соответствующих СНИП, ГОСТ, технических регламентов.  Качество работ должно соответствовать условиям договора, приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам (п. 7.1 договора №05/97-17).

В силу п. 5.1.2 договора №05/97-17 Генподрядчик обязался организовать и произвести приемку выполненных субподрядчиком работ в течение всего срока производства работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с п. 4.1.1 договора №05/97-17 субподрядчик обязуется выполнить своими силами (своим инвентарем, инструментарием, конструкциями, техникой, рабочими и т.п.) все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работоспособный пригодный для эксплуатации результат работ Генподрядчику а состоянии, соответствующем требованиям СНИП, ГОСТ, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с его функциональным назначением. 

Согласно п.3.1 договора №05/97-17 стоимость осуществляемых субподрядчиком работ по настоящему договору составляет 30 000 руб., НДС не облагается. Генподрядчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:

- аванс – 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в размере 9 000 руб. 00 коп.;

- оставшуюся часть – 70% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в размере 21 000 руб. 00 коп. в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2. 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов субподрядчика на производимые работы, на приобретение необходимого для работы строительного инвентаря, инструментария, строительной техники, компенсацию всех издержек субподрядчика на выполнение работ определенных договором и сметой, и любые иные возможные расходы субподрядчика для качественного и своевременного выполнения работ.

Согласно п.6.1 договора №05/97-17 общий срок выполнения работ составляет 7 рабочих дней после получения аванса Субподрядчиком. 

ООО «РСУ-18» в счет исполнения принятых на себя обязательств по договорам перечислил ответчику денежные средства в размере 741 212 руб. 10 коп. по платежным поручениям:  

- № 146 от 01.03.2017 на сумму 90 000 руб. 00 коп. (предоплата по договору субподряда №05/58-16; т. 4 л.д. 30), 

- №277 от 24.07.2017 на сумму 94 500 руб. (предоплата по договору субподряда №05/20-17; т. 3 л.д. 1), 

- №278 от 27.04.2017 на сумму 81 639 руб. 30 коп. (предоплата по договору субподряда №05/26-17; т. 3 л.д. 2), 

- №279 от 27.04.2017 на сумму 85 721 руб. 10 коп. (предоплата по договору субподряда №05/27-17; т. 3 л.д. 3), 

- №472 от 22.06.2017 на сумму 92 174 руб. 40 коп. (предоплата по договору субподряда №05/31-17; т. 3 л.д. 4), 

- №480 от 22.06.2017 на сумму 94 500 руб. 00 коп. (предоплата по договору субподряда №05/50-17; т. 3 л.д. 5), 

- №499 от 22.06.2017 на сумму 85 721 руб. 10 коп. (предоплата по договору субподряда №05/53-17; т. 3 л.д. 6), 

- №470 от 22.06.2017 на сумму 6 725 руб. 10 коп. (предоплата по договору субподряда №05/56-17; т. 3 л.д. 7), 

- №471 от 22.06.2017 на сумму 36 944 руб. 10 коп. (предоплата по договору субподряда №05/57-17; т. 3 л.д. 8), 

- №493 от 22.06.2017 на сумму 30 288 руб. 90 коп. (предоплата по договору субподряда №05/58-17; т. 3 л.д. 9), 

- №492 от 22.06.2017 на сумму 14 678 руб. 10 коп. (предоплата по договору субподряда №05/59-17; т. 3 л.д. 10), 

- №491 от 22.06.2017 на сумму 28 320 руб. (предоплата по договору субподряда №05/61-17; т. 3 л.д. 11). 

Кроме того, материалами дела подтвержден и ИП ФИО2 не оспаривается факт перечисления ему обществом «РСУ-18» денежных средств в общем размере 63 187 руб. 00 коп. по платежным поручениям №623 от 25.08.2017 на сумму 30 000 руб. 00 коп. (т. 7 л.д. 155), № 645 от 05.09.2017 на сумму 4 350 руб. 00 коп. (т. 7 л.д. 11), №651 от 08.09.2017 на сумму 15 000 руб. (т. 7 л.д. 150), №652 от 08.09.2017 на сумму 13 837 руб. (т. 7 л.д. 152) в качестве предоплаты по спорным договорам.

Таким образом, всего во исполнение условий договоров ООО «РСУ-18» перечислило  ИП ФИО2 авансовых платежей на сумму 804 399 руб. 10 коп.

Истец указал, что во исполнение условий договоров, выполнил работы  на общую сумму 1 535 204 руб. 00 коп., в подтверждение чего в материалы дела представлены подписанные истцом в одностороннем порядке акты о приемке выполненных работ  унифицированной формы КС-2: 

- № 48 от 06.09.2017 на сумму 271 816 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/58-16 от 08.08.2016 (т. 4, л.д. 105-106), 

- № 49 от 06.09.2017 на сумму 181 914 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/26-17 от 22.03.2016 (т. 4, л.д. 124-125),

- № 51 от 02.10.2017 на сумму 251 909 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/53-17 от 18.05.2017 (т. 4, л.д. 115-116),

- № 52 от 02.10.2017 на сумму 315 000 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/50-17 от 10.05.2017 (т. 4, л.д. 121-122),

- от 02.10.2017 б/н на сумму 27 674 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/96-17 от 05.09.2017 (т.4 , л.д. 111-113),

- от 02.10.2017 б/н на сумму 30 000 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/97-17 от 05.09.2017 (т. 4, л.д. 109),

- № 44 от 02.10.2017 на сумму 307 248 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/31-17 от 29.03.2017 (т. 4, л.д. 132-133),

- № 54 от 02.10.2017 на сумму 94 400 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/61-17 от 30.05.2017 (т. 4, л.д. 118-119),

- № 1 от 04.07.2018 на сумму 5 293 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/56-17 от 23.05.2017 (т. 4, л.д. 127-128),

- № 3 от 04.07.2018 на сумму 39 994 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/57-17 от 23.05.2017 (т. 4, л.д. 112-113),

- № 2 от 01.07.2018 на сумму 4 931 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/58-17 от 23.05.2017 (т. 4, л.д. 129-130),

- № 4 от 04.07.2018 на сумму 5 025 руб. 00 коп. к договору субподряда №05/59-17 от 23.05.2017 (т. 4, л.д. 103-104).

Указанные акты направлены ИП ФИО2  23.08.2018 ответчику для подписания посредством почтовой связи и получены ответчиком 03.09.2018 (т.3 л.д. 13 – 17, т. 4 л.д. 108).

ИП ФИО2, указывая на то, что работы, предусмотренные вышеуказанными договорами им выполнены на общую сумму 1 535 204 руб. 00 коп. (т. 7 л.д. 4)., надлежащим образом, однако ответчик работы в установленном порядке не принял, безосновательно не подписал предъявленные ему акты выполненных работ формы №КС-2, в нарушение условий договоров обязательства по оплате выполненных работ надлежащим образом не исполнил, в связи с чем, за ним образовалась задолженность в общем размере 765 214 руб. 00 коп., обратился в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

11.09.2018 ООО «РСУ-18» направило ИП ФИО2 ответные письма  (т. 3 л.д. 19-28), в которых, со ссылкой на несоблюдение предусмотренного договорами порядка сдачи работ,  указало, что считает вышеуказанные акты не принятыми к рассмотрению.

Ссылаясь на неисполнение ИП ФИО2 принятых на себя в соответствии с заключенными договорами обязательств, ООО «РСУ-18»   претензиями (исх. от 28.09.2018 №№02/070, 02/071, 02/072, 02/073, 02/074, 02/075, 02/076, 02/077, 02/078, 02/079, 02/080, 02/081, 02/082, 02/083 – т. 4 л.д. 31, т.3 л.д. 30-43) потребовало возвратить сумму оплаченного, но не отработанного аванса и уплатить пени. Данные претензии были направлены посредством почтовой связи 02.10.2018 и вручены  ИП ФИО2 08.10.2018 (т. 3, л.д. 144-145).  

Далее,  ООО «РСУ-18», указывая на нарушение срока выполнения работ по договорам и невыполнение работ, им предусмотренных, 31.12.2018 направил ИП ФИО2 посредством почтовой связи (т. 3, л.д. 57-60)  уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке (т. 3, л.д. 44-56), одновременно потребовав возвратить сумму оплаченного, но не отработанного аванса и уплатить пени на основании п. 14.2 договоров.

Поскольку требования ООО «РСУ-18» в добровольном порядке не были удовлетворены ИП ФИО2, ответчик обратился в суд со встречными исковыми требованиями о взыскании с ИП ФИО2 в пользу ООО «РСУ-18» неотработанного аванса по договорам субподряда №05/58-16 от 08.08.2016, №05/20-17 от 21.03.2017, № 05/26-17 от 22.03.2017, № 05/27-17 от 22.03.2017, № 05/31-17 от 29.03.2017, №05/50-17 от 10.05.2017, № 05/53-17 от 18.05.2017, №05/56-17 от 23.05.2017, №05/57-17 от 23.05.2017,  № 05/58-17 от 23.05.2017, № 05/59-17 от 23.05.2017, №05/61-17 от 30.05.2017, № 05/96-17 от 05.09.2017, № 05/97-17 от 05.09.2017 в общей сумме 804 339 руб. 00 коп., а также пени по договору субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016 в размере 1 947 000 руб. 00 коп. 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Отношения сторон по исполнению договора подряда подлежат регулированию нормами гражданского законодательства о  подряде (глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации  в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации   оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Основанием для возникновения обязательств заказчика по оплате выполненных работ является факт передачи результата  работ подрядчиком заказчику (ст.ст.  720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В силу ст. 754 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.  При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

В связи с имеющимися между сторонами разногласиями относительно объемов, стоимости и качества выполненных работ, для разъяснения которых, требовались специальные познания, судом была назначена строительно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено экспертам экспертной организации Автономная некоммерческая  организация "Экспетное бюро "Флагман" (ИНН 

<

***>) ФИО4, ФИО5,  ФИО6.

По результатам проведенного исследования судебными экспертами подготовлено экспертное заключение №1351-19 от 05.09.2019 (т. 5 л.д.127-198).

20.01.2020  от АНО "Экспертное бюро "Флагман" в суд поступили  дополнения к экспертному  заключению № 1351-19 от 05.09.2019 (т. 7 л.д.33-37). 

Эксперты указали, что если фактически выполненные работы сопоставлять с проектом №04/07-11-ИОС.4.2 стадия «П», то все фактически выполненные работы по договорам субподряда №05/58-16 от 08.08.2016, №05/20-17 от 21.03.2017, №05/26-17 от 22.03.2017, № 05/27-17 от 22.03.2017, № 05/31-17 от 29.03.2017, №05/50-17 от 10.05.2017, № 05/53-17 от 18.05.2017, №05/56-17 от 23.05.2017, №05/57-17 от 23.05.2017,  №05/58-17 от 23.05.2017, №05/59-17 от 23.05.2017, № 05/61-17 от 30.05.2017, № 05/96-17 от 05.09.2017, № 05/97-17 от 05.09.2017 не соответствуют проекту №04/07-11-ИОС.4.2 стадия «П», следовательно, данные работы признаются как выполненные не качественно (не соответствуют данному проекту) и стоимость фактически выполненных работ не расчитывается, так как будет равна нулю.

В силу п.п. 1-4 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство оценивается арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Исследовав и оценив представленное в материалы дела уточненное экспертное заключение № 1351-19 от 05.09.2019 (т. 7 л.д.33-37) в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, с учетом устных пояснений эксперта ФИО4, данных в ходе судебного заседания, суд пришел к выводу, что оно является надлежащим доказательством.

Эксперты, проводившие исследования, имеют соответствующие образование, специальность и стаж работы, необходимые для производства данного вида экспертизы, предупреждены об ответственности по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (о чем указано в определении о назначении экспертизы от 02.08.2019 и имеется соответствующая подписка в материалах самого экспертного заключения. 

Надлежащие доказательства, позволяющие поставить под сомнение выводы экспертов и свидетельствующие о недостоверности выводов, суду не представлены.

Само по себе несогласие с выводами экспертов не является основанием для признания заключения ненадлежащим доказательством, учитывая, что истец надлежащих доказательств недостоверности выводов экспертов, составивших экспертное заключение, а равно доказательства, опровергающие выводы экспертов в материалы дела не представил.

Таким образом, по результатам проведенной по делу экспертизы установлен факт того, что фактически выполненные истцом работы не соответствуют проекту №04/07-11-ИОС.4.2 стадия «П», следовательно, данные работы признаются как выполненные не качественно (не соответствуют данному проекту) и стоимость фактически выполненных работ не расчитывается, так как будет равна нулю.

В процессе рассмотрения дела ИП ФИО2 ходатайствовал о назначении по делу дополнительной экспертизы, мотивировав его недостатками экспертного заключения.

Согласно ч. 1 ст. 87 АПК РФ при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

Вопросы назначения дополнительной экспертизы относятся к компетенции суда, разрешающего дело по существу; при этом суд исходит из баланса интересов сторон.

Проанализировав и оценив представленное в материалы дела заключение, учитывая пояснения эксперта, данного в судебном заседании,  принимая во внимание, достаточную ясность и полноту заключения, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для назначения дополнительной экспертизы, в связи с чем в удовлетворении ходатайства истца отказал.

Согласно п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цены работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В силу положений п. 1 ст. 754 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

Истец при выполнении работ на объекте, обязан был уведомить ответчика обо всех отступлениях от проектного решения, если для этого имелась необходимость и обо всех существенных изменениях при проведении работ на объекте.

В соответствии со ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии - разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Подрядчик, заключая договор и приступая к выполнению работ, выступал как лицо, обладающее специальными познаниями и опытом в области выполнения данного вида работ, в связи с чем при выполнении работ как специализированная организация должен был знать и обеспечить соблюдение обязательных требований нормативно-технических документов, предупредить заказчика о возникших при выполнении работ обстоятельствах, грозящих годности результата работ (недостижению заданных параметров), согласовать с заказчиком необходимые мероприятия, позволяющие провести работы в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и целью договора, и сдать заказчику результат работ, соответствующий предусмотренным договором и проектной документации требованиям, либо при невозможности выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика отказаться от исполнения договора (п. 3 ст. 716  ГК РФ).

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований, в связи с чем в их удовлетворении отказал.

Как указано выше, ответчик обратился в суд со встречными исковыми требованиями о взыскании с ИП ФИО2 в пользу ООО «РСУ-18» неотработанного аванса по договорам субподряда №05/58-16 от 08.08.2016, №05/20-17 от 21.03.2017, № 05/26-17 от 22.03.2017, № 05/27-17 от 22.03.2017, № 05/31-17 от 29.03.2017, №05/50-17 от 10.05.2017, № 05/53-17 от 18.05.2017, №05/56-17 от 23.05.2017, №05/57-17 от 23.05.2017,  № 05/58-17 от 23.05.2017, № 05/59-17 от 23.05.2017, №05/61-17 от 30.05.2017, № 05/96-17 от 05.09.2017, № 05/97-17 от 05.09.2017 в общей сумме 804 339 руб. 00 коп., а также пени по договору субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016 в размере 1 947 000 руб. 00 коп.

Пунктом 13.1. вышеуказанных договоров предусмотрено, что генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения договора или отказаться от исполнения договора в том, числе, в случае нарушения субподрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ, т. е. когда установленный в договоре срок увеличивается более чем на 5 (пять) календарных дней.

Генподрядчик  вправе в любое время до сдачи ему конечного результата работ отказаться от исполнения договора по основаниям, не предусмотренным в п. 13.1 настоящего договора. В этом случае генподрядчик оплачивает субподрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме согласно сметной документации (п. 13.2 договоров). 

В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной;  2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

 Согласно п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В связи с тем, что работы, предусмотренные договорами, ИП ФИО2 в полном объеме выполнены не были, указывая на нарушение срока выполнения работ, ООО «РСУ-18» утратив интерес к дальнейшему продолжению договорных отношений, направило ИП ФИО2 посредством почтовой связи (т. 3, л.д. 57-60)  уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке (т. 3, л.д. 44-56), одновременно потребовав возвратить сумму оплаченного по договорам, но не отработанного аванса и уплатить пени на основании п. 14.2 договоров.

Поскольку доказательств надлежащего исполнения ИП ФИО2 обязательств, предусмотренных договорами субподряда, в материалы дела не имеется, суд признал односторонний отказ ООО «РСУ-18» от исполнения договоров (ст.ст. 310, 715 Гражданского кодекса Российской Федерации) правомерным, а  договоры субподряда №05/58-16 от 08.08.2016, №05/20-17 от 21.03.2017, № 05/26-17 от 22.03.2017, № 05/27-17 от 22.03.2017, № 05/31-17 от 29.03.2017, №05/50-17 от 10.05.2017, № 05/53-17 от 18.05.2017, №05/56-17 от 23.05.2017, №05/57-17 от 23.05.2017,  № 05/58-17 от 23.05.2017, № 05/59-17 от 23.05.2017, №05/61-17 от 30.05.2017, № 05/96-17 от 05.09.2017, № 05/97-17 от 05.09.2017 расторгнутыми.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п.п. 1,4,5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» в соответствии со статьей 310 и пунктом 3 статьи 450 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом (например, статья 328, пункт 2 статьи 405, статья 523 ГК РФ) или соглашением сторон, влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по решению суда.  При отсутствии соглашения сторон об ином положение пункта 4 статьи 453 ГК РФ подлежит применению лишь в случаях, когда встречные имущественные предоставления по расторгнутому впоследствии договору к моменту расторжения осуществлены надлежащим образом либо при делимости предмета обязательства размеры произведенных сторонами имущественных предоставлений эквивалентны. Если при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, по которому одна из сторон передала в собственность другой стороне какое-либо имущество, судом установлено нарушение эквивалентности встречных предоставлений вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей одной из сторон, сторона, передавшая имущество, вправе требовать возврата переданного другой стороне в той мере, в какой это нарушает согласованную сторонами эквивалентность встречных предоставлений. При этом к названным отношениям сторон могут применяться положения главы 60 ГК РФ, поскольку иное не установлено законом, соглашением сторон и не вытекает из существа соответствующих отношений (статья 1103 Кодекса).

Положения пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым стороны не вправе требовать возмещения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала (п.1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 11.01.2000г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, факт перечисления ответчиком истцу в счет оплаты работ по договорам субподряда №05/58-16 от 08.08.2016, №05/20-17 от 21.03.2017, № 05/26-17 от 22.03.2017, № 05/27-17 от 22.03.2017, № 05/31-17 от 29.03.2017, №05/50-17 от 10.05.2017, № 05/53-17 от 18.05.2017, №05/56-17 от 23.05.2017, №05/57-17 от 23.05.2017,  № 05/58-17 от 23.05.2017, № 05/59-17 от 23.05.2017, №05/61-17 от 30.05.2017, № 05/96-17 от 05.09.2017, № 05/97-17 от 05.09.2017 денежных средств в общей сумме 804 399 руб. 10 коп. по платежным поручениям: № 146 от 01.03.2017, №277 от 24.07.2017, №278 от 27.04.2017, №279 от 27.04.2017, №472 от 22.06.2017, №480 от 22.06.2017, №499 от 22.06.2017, №470 от 22.06.2017, №471 от 22.06.2017 , №493 от 22.06.2017 , №492 от 22.06.2017, №491 от 22.06.2017, №623 от 25.08.2017, № 645 от 05.09.2017, №651 от 08.09.2017, №652 от 08.09.2017.

Судом установлено, что результат работ истцом не достигнут, фактически общая стоимость выполненных  истцом работ по договору  составляет 0 руб. 00 коп.

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами и сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В силу пункта 3 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации правила Кодекса о возврате неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

ИП ФИО2 надлежащих доказательств фактического исполнения обязательств, предусмотренных договорами, на всю сумму перечисленной предоплаты либо доказательств, свидетельствующих о возврате ООО «РСУ-18» суммы неотработанного аванса, в материалы дела не представил.

Оснований для удержания полученных от заказчика денежных средств после расторжения договоров, при отсутствии надлежащих доказательств произведенного на указанную сумму встречного исполнения в виде выполненных по спорным договорам работ, у  истца не имеется.

Учитывая изложенное, суд признал встречное исковое требование ООО «РСУ-18» о взыскании с ИП ФИО2 неотработанного аванса по договорам законным, обоснованным и на основании ст.ст. 309, 310, 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежащим удовлетворению в заявленной сумме в сумме 804 339 руб. 00 коп.

Также ООО «РСУ-18» просит взыскать с ИП ФИО2 1 947 000 руб. 00 коп. пени в связи с нарушением последним сроков выполнения работ на основании п. 5.7. договора субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016.

По смыслу гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации целью заключения договора подряда является получение заказчиком надлежащего результата выполненных работ.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 14.2. договора субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016 субподрядчик несет ответственность за нарушение начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков выполнения промежуточных (в случае их наличия). В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных договором, субподрядчик выплачивает пени в размере 1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

Ссылаясь на вышеназванное условие договора субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016 ООО «РСУ-18» начислило ИП ФИО2 1 947 000 руб. 00 коп. пени за период с 01.04.2017 по 09.01.2019.

 Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойка в гражданских правоотношениях является одним из способов обеспечения исполнения основного обязательства. 

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Факт просрочки выполнения работ по договору материалами дела подтвержден, ответчиком надлежащими доказательствами не опровергнут (ст. 65 АПК РФ).

Расчет ООО «РСУ-18» судом проверен и признан соответствующим условиям договора и нормам действующего законодательства.

Вместе с тем ИП ФИО2 заявлено ходатайство об уменьшении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Как разъяснено в пунктах 71, 73, 75, 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 N 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Явная несоразмерность заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, четких критериев ее определения применительно к тем или иным категориям дел законодательством не предусмотрено, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, учитывая обстоятельства дела.

Критериями для установления несоразмерности могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и другие.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

К выводу о наличии или отсутствии оснований для снижения суммы неустойки арбитражный суд приходит в каждом конкретном случае при оценке имеющихся в деле доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании (пункт 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд, рассмотрев ходатайство ИП ФИО2 об уменьшении неустойки и принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, отсутствие доказательств причинения истцу убытков неисполнением обязательств, компенсационный характер неустойки, направленной на восстановление нарушенного права, соблюдение баланса между применяемой к ответчику мерой ответственности и последствиями ненадлежащего исполнения принятого им обязательства, счел возможным удовлетворить соответствующее ходатайство истца и снизить размер подлежащей взысканию неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до суммы 194 700 руб. 00 коп., исходя из ставки 0,1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, что соответствует обычной практике делового оборота и отвечает принципу соразмерности ответственности допущенному нарушению. 

Таким образом, встречные исковые требования ООО «РСУ-18» о взыскании пени по договору субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016 за период с 01.04.2017 по 09.01.2019 на основании ст.ст. 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат удовлетворению частично в сумме  194 700 руб. 00 коп., в остальной части требований судом отказано.

С учетом принятого по делу решения и на основании ст. 110 АПК РФ, п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» судебные расходы по оплате государственной пошлины по первоначальному и встречному исковым заявлениям, а также расходы по оплате стоимости проведения судебной экспертизы относятся на ИП ФИО2

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначального иска отказать.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 4 682 руб. 00 коп. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 87 от 20.11.2018.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-18" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 804 339 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 194 700 руб. 00 коп. пени по договору субподряда № 05/58-16 от 08.08.2016, 28 017 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

В остальной части встречных исковых требований отказать.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 8 740 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья                                                          О.В. Бусыгина