1 9 

12/2020-84168(1) 

н о 

я 

 б р 

Арбитражный суд Рязанской области я 

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;   

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru 2 

 0 

Именем Российской Федерации 2

 0

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г

о 

г. Рязань Дело № А54-10240/2019  

д 

18 ноября 2020 года а  

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Сельдемировой В.А.,  руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Обязать общества с ограниченной ответственностью "С-Инвест" (ОГРН  

<

***>, г. Рязань) в срок, не позднее пяти месяцев со дня вступления ре- 

шения суда в законную силу, своими силами, средствами и за свой счет, с ис- 

пользованием материалов, качество которых не ниже качества материалов, ука- 

занных в техническом задании к договору, устранить недостатки (дефекты) вы- 

полненных на основании договора № 08-10/0616/175 от 08.06.2016 работ по капи- 

тальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.  

Рязань, Касимовское шоссе, д. 38 путем выполнения следующих видов работ в  

следующих объемах: - по ремонту проходных балконов: • Установка инвентарных лесов - факт; • Расшивка отслоений штукатурного слоя - 3,6 м.п; • Расчистка поверхности щетками - 0,9 м2; • Ремонт балконных плит (обетонирование) - факт.; • Грунтование поверхности плит - 0,9 м2; • Оштукатуривание поверхности плит - 0,9 м2; • Грунтование поверхности плит после оштукатуривания -0,9 м2; 

• Шпатлевка под окраску акриловыми красками - 0,9 м2;  • Грунтование поверхности перед окраской - 0,9 м2;  

• Окраска акриловым составом - 0,9 м2; • Разборка инвентарных лесов - факт; • Погрузка строительного мусора - т/факт; • Вывоз строительного мусора - т/факт. 

- по ремонту входных групп: • Расчистка поверхности щетками - 1,3 м2; • Грунтование поверхности - 1,3 м2; • Оштукатуривание поверхности - 1,3 м2; • Грунтование поверхности после оштукатуривания - 1,3 м2; • Шпатлевка под окраску акриловыми красками - 1,3 м2; • Грунтование поверхности перед окраской - 1,3 м2; • Окраска акриловым составом - 1,3 м2. 

- по ремонту стен приямков: • Разборка некачественной кладки стен приямков - 0,03 м3; • Кладка отдельных участков и кирпича - 0,03 м3. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "С-Инвест"  (ОГРН 

<

***>, г. Рязань) в пользу Фонда капитального ремонта много- квартирных домов Рязанской области (ОГРН 

<

***>, г. Рязань) расходы  по оплате госпошлины в сумме 6000 руб., расходы по оплате судебной эксперти- зы в сумме 40000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской  области.  

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сро- ки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья В.А. Сельдемирова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.09.2020 7:51:43

Кому выдана Сельдемирова Валентина Андреевна