Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №

А26-11037/2023

г. Петрозаводск

21 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  06 марта 2024 года. Полный текст решения изготовлен   21 марта 2024 года.

 

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Колесовой Н.С.,   при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску  Фонда капитального ремонта Республики Карелия к обществу с ограниченной ответственностью «Контраст ЛТД» о взыскании 758 909 руб. 86 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору от 08.02.2021 года № 07/2021-р,

при участии представителя  истца – ФИО2, полномочия подтверждены доверенностью № 34 от 30.10.2023,

установил:

Фонд капитального ремонта Республики Карелия (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Контраст ЛТД» (далее – ответчик) о взыскании 758 909 руб. 86 коп.. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору от 08.02.2021 года № 07/2021-р.

Ответчик отзыв по существу искового заявления в суд не представил, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом.

Суд проводит судебное разбирательство в соответствии с положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя ответчика.

Представитель истца в судебном заседании пояснил, что при расчете неустойки использовалась итоговая стоимость работ, по которой был нарушен срок исполнения.

Изучив материалы дела, заслушав пояснение представителя истца, суд считает установленными следующие обстоятельства.

Между Фондом капитального ремонта Республики Карелия (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Контраст ЛТД» (подрядчик) заключен договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома от 08.02.2021 № 07/2021-р (далее – договор), согласно которому Фонд поручает, а общество принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 11, в том числе: по ремонту  фасада, крыши, инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 3.1. договора срок окончания выполнения работ – 01.10.2021.

В соответствии с пунктами 9.4, 9.5 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Согласно п. 3.2. Договора датой надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по выполнению работ (вида работ) считается дата подписания Заказчиком акта-приёмки работ в процессе капитального ремонта имущества (по форме, установленной ГОСТ Р 56193-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования) в отношении данных работ (вида работ) при условии предоставления Подрядчиком Заказчику, предусмотренных Договором документов.

Работы в части ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения сданы 12.12.2022, работы в части ремонта фундамента и подвала сданы 30.06.2022, работы в части ремонта внутридомовой инженерной системы водоснабжения и водоотведения сданы 14.09.2022, что подтверждается актами сдачи-приёмки выполненных работ.

Таким образом, Подрядчиком допущено нарушение положений заключенного договора в части сроков выполнения работ.

Общая сумма неустойки за нарушение срока выполнения работ по капитальному ремонту имущества многоквартирного дома № 11 по ул. Спиридонова в пгт. Надвоицы Сегежского района Республики Карелия по Договору составляет 758 909 руб. 86 коп. 

Фондом в адрес Ответчика направлена претензия от 07.09.2023 № 6018, однако требования регионального оператора до настоящего времени Подрядчиком не исполнены, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ). Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (п. 1 ст. 720 ГК РФ).

Из содержания данных норм ГК РФ следует, что договор подряда заключается для выполнения определенного вида работы, результат которой подрядчик обязан сдать, а заказчик принять и оплатить. Следовательно, целью договора подряда является не выполнение работы как таковой, а получение результата, который может быть передан заказчику.

В соответствии со статьями 393, 394 Гражданского кодекса Российской Федерации при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору лицо, нарушившее обязательство, обязано возместить убытки, а в случае, предусмотренном законом или договором, неустойку.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

Ответственность  за нарушение  сроков выполнения работ определена пунктами  9.4, 9.5 договоров.

По расчету заказчика неустойка начислена в размере 758 909 руб. 86 коп.. Начальная дата определена необходимой датой сдачи работ, конечная – фактической датой сдачи работ.

Материалами дела подтверждено, что ответчик сдал работы, нарушая сроки выполнения работ, установленные договором.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о правомерности начисления неустойки в заявленном размере.

Согласно принципу состязательности арбитражного процесса, закрепленному в части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Ответчик требование истца о взыскании неустойки в заявленном размере не оспорил.

С учетом вышеизложенного, требование истца о взыскании пени подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия 

 

РЕШИЛ:

1.      Иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Контраст ЛТД" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Фонда капитального ремонта Республики Карелия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 758 909 руб. 86 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору от 08.02.2012 № 07/2021-Р, 18 178 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

2.     Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

Судья

Колесова Н.С.