1009/2020-273906(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

23 октября 2020 года Дело № А55-33959/2019 

Арбитражный суд Самарской области в составе Хмелев С.П. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании 23 октября 2020 года дело по иску 

Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства  Муниципального района Нефтегорский Самарской области"  

От 28 октября 2019 года № 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Арт Дор Строй"  третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Трасса М95»  

об обязании устранить недостатки работ при участии в заседании 

от истца – ФИО2., представитель по доверенности от 12.10.2020  от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 09.01.2020  

от третьего лица – не явился, извещен 

Руководствуясь ст. 167-171, 180, 181, ч. 1 ст. 259, ч.3  ст.319 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО «Арт Дор Строй» в срок в течение месяца (в период года с устойчивым  положительными температурами) со дня вступления судебного акта в законную силу за  счет собственных средств устранить недостатки, выявленные после выполнения  обязательств по муниципальному контракту № 0142300042018000027_140391 от  01.06.2018 по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов  (асфальтовое покрытие, подъездные дороги, тротуары и проезжая часть) городского  поселения Нефтегорск, а именно выполнить следующие виды и объемы работ :  

- снять асфальтобетонное покрытие дворовой территории многоквартирного дома   № 3 по ул. Мира городского поселения Нефтегорск (дорога - 837 кв.м., тротуар - 57,9кв.м  отмостка 205,7кв.м., выходы из подъездов - 74,4кв.м.), самоходными холодным фрезами;  

- выполнить устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей дворовой  территории многоквартирного дома № 3 по ул. Мира городского поселения Нефтегорск  (дорога - 837 кв.м., тротуар - 57,9кв.м, отмостка 205,7кв.м., выходы из подъездов74,4кв.м.), в соответствии с СП 78.13330.2012 для парковки и дороги, СП 82.13330.2016  для тротуаров, входов и отмосток.  

Взыскать с ООО «Арт Дор Строй» в пользу Муниципального казенного учреждения  

"Управление капитального строительства Муниципального района Нефтегорский  Самарской области" 150 000 руб. - судебные расходы в виде оплаты судебной экспертизы,  6 000 руб. - государственная пошлина.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской  области.  

Судья / С.П. Хмелев