АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-33090/2019

г. Новосибирск

30 января 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 30 января 2020 года. 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Нефедченко И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Региональные электрические сети" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Новосибирск, 

к обществу с ограниченной ответственностью "СЖСИ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Новосибирск, 

о взыскании пени за просрочку внесения платы по договору №85357/5317602 от 16.05.2013 за период с 14.02.2019 по 22.02.2019 в размере 5 029 рублей 82 копеек, пени за просрочку выполнения мероприятий по договору №85357/5317602 от 16.05.2013 за период с 09.09.2016 по 24.09.2018 в размере 416 916 рублей 58 копеек, всего 421946 рублей 40 копеек, 

 при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО2, по доверенности № 488/19 от 08.08.2019, паспорт, 

от ответчика -  не явился, извещен, 

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Региональные электрические  сети» (далее – АО «РЭС») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СЖСИ » (далее – ООО «СЖСИ ») о взыскании 5029 рублей 82 копеек неустойки за период с 14.02.2019 по 22.02.2019 за нарушение сроков внесения платы и 416916 рублей 58 копеек неустойки за период с 09.09.2016 по 24.09.2018 за просрочку выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 85357/5317602 от 16.05.2013.

Исковые требования основаны со ссылками на статьи  309,  310, 330 и 405  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы нарушением ответчиком обязательств по своевременной оплате оказанных истцом услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ООО «СЖСИ»  к электрическим сетям, а также  по своевременному выполнению мероприятий по технологическому присоединению по договору.

 В судебном заседании истец поддержал иск в полном объеме.

 Ответчик в судебное заседание не явился, отзывом иск не признал, суть возражений сводится к тому, что просрочка по оплате у него отсутствует, соблюдение сроков по выполнению мероприятий  предусмотрено только для сетевой организации,  следовательно, пени  начислены неправомерно. Также ответчик указал на пропуск срока исковой давности. Подробно возражения изложены в отзыве.

         Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований и необходимости их удовлетворения, при этом суд исходит из следующего. 

Как следует из материалов дела,  между АО «РЭС» (сетевая организация) и ООО «СЖСИ » (заявитель) 16.05.2013  заключен договор №  85357/5317602 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор), по условиям которого сетевая организация обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объекта – жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...> в Заельцовском районе (кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:10163, а заявитель обязуется оплатить указанное присоединение  в срок, установленный в договоре (пункты 1 и 2 договора).

Общая плата за технологическое присоединение составляет 492070 рублей 80 копеек  (в том числе НДС 20%) (п. 1 акта об осуществлении технологического присоединения от 29.01.2019).

Порядок внесения платы за технологическое присоединение предусмотрен пунктом 4 дополнительного соглашения № 2 от 15.12.2014 к договору: 

а)10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня  заключения договора (соответствующего дополнительного соглашения);

б)30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня  заключения настоящего договора (соответствующего дополнительного соглашения);

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 180 дней со дня заключения договора (доп.соглашения);

в)30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня  фактического присоединения;

г)10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

Акт о выполнении технических условий № 4-2-С/155807  подписан сторонами 24.09.2018, акт об осуществлении технологического присоединения № 85357/5317602 подписан сторонами 29.01.2019, при подписании акта № 85357/5317602 стороны подтвердили, что на момент его подписания задолженность ООО «СЖСИ » перед АО «РЭС» составляет разницу, образовавшуюся в размере платы за технологическое присоединение в связи с изменениями ставки НДС с 01.01.2019.

В соответствии с п. 7 подписанного сторонами акта № 85357/5317602 от 29.01.2019 ответчик обязан уплатить указанную разницу в течение 15 дней с момента подписания акта об осуществлении технологического присоединения, то есть в рассматриваемой ситуации не позднее 13.02.2019, фактически оплата произведена 22.02.2019, просрочка составила 9 дней.

В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год, в связи с увеличением мощности стороны в дополнительном соглашении № 2 от 15.12.2014 (п. 6) увеличили срок выполнения мероприятий еще на четыре месяца с момента подписания данного дополнительного соглашения, то есть до 15.04.2015.

АО «РЭС» в полном объеме исполнило свои обязательства по договору, необходимые  для технологического присоединения объекта ответчика, что подтверждается справками  о стоимости выполненных работ № 1 от 19.05.2014, № 1 от 25.04.2014, справками стоимости выполненных работ.

Заявитель же, в свою очередь, выполнил мероприятия по технологическому присоединению 15.05.2018.

Ссылаясь на нарушение установленных сроков оплаты по  договору после фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также на нарушение срока по выполнению мероприятий со стороны ООО «СЖСИ », истец обратился с претензией исх. № 19-23/85357-9  от 11.04.2019 к ответчику с указанием на необходимость уплаты неустойки. 

Неоплата неустойки в добровольном порядке послужила основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со статьей 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно пункту 6 Правил N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации, так как данный вид договора на основании абзаца второго части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике имеет статус публичного.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям подлежит государственному регулированию (часть 2 статьи 23 Закона об электроэнергетике).

Технологическое присоединение во всех случаях заканчивается составлением акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон (пункты 7 и 19 Правил N 861).

Факт несвоевременности внесения окончательных платежей, как и факт нарушения сроков выполнения мероприятий  ООО «СЖСИ »  подтверждаются материалами дела, в обоснованием возражений ответчиком не представлено соответствующих документов, то есть в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не доказаны те обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своих доводов.

В соответствии с пунктом 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней с дня наступления просрочки оплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка России, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

В силу п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств.

Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1 ст. 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Так как факты допущенных ответчиком просрочек по исполнению обязательств по оплате и по выполнению мероприятий по технологическому присоединению объекта истца к электрическим сетям в установленные договором сроки подтверждены документально, в отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих наличие непреодолимой силы, обусловившей невозможность надлежащего исполнения обязательств, а также доказательств, подтверждающих принятие всех возможных мер, направленных на исполнение ответчиком возложенных на него обязательств, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного АО «РЭС» требования о взыскании с ООО «СЖСИ »  неустойки.

Согласно расчетам истца сумма неустойки за просрочку внесения платы составила 5029 рублей 82 копейки за  период с 13.02.2019  по 22.02.2019, сумма неустойки за просрочку выполнения мероприятий – 416916 рублей 58 копеек за период с 09.09.2016 (дата начала с учетом срока исковой давности)  по 24.09.2018 (дата акта о выполнении технических условий).

Расчеты проверены судом, являются верными, о снижении  неустойки по статье 333 ГК РФ ответчиком не  заявлено.

Доводы ответчика по отсутствию задолженности и внесению платы в установленные сроки судом не принимается ввиду следующего.

Так, ООО «СЖСИ» должно было внести платеж следующим образом:

- 8 201,18 руб. доплата НДС 20 %, в срок не позднее 13.02.2019 г. фактически оплачено (22.02.2019) просрочка платежа на 9 дней.

Следовательно, Ответчик считается допустившим просрочку исполнения обязательства с 14.02.2019 по 22.02.2019 (9 дней).

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает, правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.

Также является ошибочным довод ответчика о том, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен только для сетевой организации.

Так, порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила № 861).

В силу п. 16 Правил технологического присоединения договор должен содержать, в частности, существенное условие о сроках осуществления мероприятий по технологическому присоединению (определенного в технических условий), который не может превышать 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии с указанным и условиями Договора на ООО «СЖСИ» были возложены обязательства, в том числе, по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ принадлежащего Заявителю земельного участка (п. 8 Договора, п. 11 Технических условий).

Более того,  согласно абз. «б» п. 16 Правил № 861 существенным условием договора является срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который в соответствии с п. 5 заключенного договора составляет 1 год как для АО «РЭС», так и для ООО «СЖСИ». Дополнительными соглашениями срок, указанный в п. 5 в связи с увеличением мощности был продлен в срок до 15.04.2015.

В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Исходя из вышеуказанного, в случае нарушения заявителем срока исполнения обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению сетевая организация вправе взыскать с контрагента неустойку за такое нарушение.

В рассматриваемом случае в соответствии с п.п. 5, 8 Договора, п. 11 Технических условий ООО «СЖСИ» было обязано выполнить мероприятия по технологическому присоединению и уведомить АО «РЭС» о выполнении технических условий не позднее 15.04.2015. Однако,  ООО «СЖСИ» существенно нарушило установленный срок, уведомив Сетевую организацию о выполнении технических условий только 15.05.2018.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения АО «РЭС» в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «СЖСИ» неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору за период с 09.09.2016. по 24.09.2018.

Что касается довода ответчика о пропуске срока исковой давности. То согласно ч. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три год со дня, определяемого с соответствии со ст. 200 ГК РФ.

Срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»).

Таким образом, неустойка подлежит взысканию с момента нарушения исполнения основанного обязательства до момента его полного исполнения за период в пределах трех лет, дате предъявления иска о взыскании неустойки, то есть начало течения срока исковой давности определяется по каждому дню в отдельности, то есть ежедневно.

Исковое заявление подано 09.09.2019 г., неустойка взыскивается за период с 09.09.2016 по 24.09.2018, то есть в пределах срока исковой давности. 

Оценивая указанные выше обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу, что   начисленная АО «РЭС» неустойка за просрочку внесения платы, а также выполнению мероприятий по договору технологического присоединения является законной и обоснованной. Общая сумма неустойки составляет 421946 рублей 40 копеек (5029 рублей 82 копейки + 416916 рублей 58 копеек).

Государственная пошлина распределяется по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СЖСИ" (ОГРН 

<

***>)  в  пользу акционерного общества «Региональные электрические сети» (ОГРН 

<

***>) сумму неустойки в размере 421946 рублей 40 копеек, а также расходы на оплату государственной пошлины в размере 11438  рублей.

Возвратить акционерному обществу  "Региональные электрические сети" (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1582 рублей, выдать справку. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

СудьяИ.В. Нефедченко