АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-20024/2021

г. Уфа

18 октября 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  Таврос Уфа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с  ограниченной ответственностью "Геострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании суммы неотработанного аванса по договору  субподряда № 31/1900 от 24.04.2020г. в размере 18 309 040 руб. 40 коп., из  которых 10 874 274 руб. 95 коп. сумма неотработанного аванса, 6  396 220 руб. 16 коп. сумма реального ущерба, 2 312 715 руб. 91 коп. сумма  договорной неустойки (с учетом уточнений исковых требований)  

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной  ответственностью "Геострой" (ИНН 0277114858, ОГРН 1110280009234) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  Таврос Уфа" (ИНН 0274170967, ОГРН 1120280044972) о признании  незаконным расторжение договора субподряда от 24.04.2020г. на  строительство объекта: "Подъездная автомобильная дорога к  "Свиноводческий комплекс-1" № 31/1900, взыскании суммы в размере 6 020  440 руб. 84 коп., расходов по оплате госпошлины в размере 59 102 руб. (с  учетом уточнений исковых требований)  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "Управляющая компания Таврос Уфа" удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Геострой"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Управляющая компания Таврос Уфа" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) сумму неосновательного обогащения в размере  2 950 120 руб. 50 коп., неустойку за период с 01.09.2020г. по 20.11.2020г. в  размере 642 396 руб. 76 коп., расходов по оплате государственной пошлины в  размере 22 476 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

В удовлетворении встречных исковых требований Общества с  ограниченной ответственностью "Геострой" отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая  компания Таврос Уфа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Геострой" (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 1110280009234) расходы на оплату судебной экспертизы в размере 225  064 руб.  

В результате зачета первоначального требования и расходов на оплату  судебной экспертизы взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Геострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Управляющая компания Таврос Уфа"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму в размере 3 389 929 руб. 26  коп.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П.Кузнецов