АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

14 июля 2025 года

Дело № А33-38779/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 07 июля 2025 года.

В полном объёме решение изготовлено 14 июля 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к акционерному обществу «Лесосибирский ЛДК № 1» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании договорной неустойки,

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, представителя по доверенности №86-025254 от 27.12.2024, личность удостоверена паспортом, представлен диплом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шевченко А.П.,

установил:

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу «Лесосибирский ЛДК № 1» (далее – ответчик) о взыскании 7 458 405 руб. 13 коп. неустойки по договору №25-з от 30.09.2008.

Определением от 27.12.2024 исковое заявление принято к производству суда.

Иные лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебное заседание не явились. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края.

От ответчика поступили пояснения с ходатайством о рассмотрении иска в его отсутствие, которое на основании статьи 66 АПК РФ приобщено к материалам дела.

В судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 14 час. 40 мин. 07.07.2025.

Иные лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебное заседание после перерыва не явились. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края.

Суд заслушал объяснения лиц, участвующих в деле, присутствующих в судебном заседании после перерыва.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между агентством лесной отрасли Красноярского края (далее - арендодатель) и открытым акционерным обществом «Лесосибирский ЛДК №1» (далее - арендатор) заключен договор аренды лесного участка от 30.09.2008 №25-з (далее - договор), в соответствии с пунктом 1 которого арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок на срок 46 (сорок шесть) лет, находящийся в государственной собственности, определенный пунктом 2 настоящего договора (далее - лесной участок).

Согласно пункту 2 договора  лесные участки, из состава земель лесного фонда, разрешенное использование - заготовка древесины, общей площадью 67 625,37 га, расположенного: Россия, Красноярский край, краевое государственное учреждение «Невонское лесничество», в том числе:

лесной участок в кварталах №№ 5; 6; 7; 8 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13); 9; 10; 33; 34;35;36(выделы1,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27); 37 (выделы 7. 8, 11, 12, 13, 14, 15,17, 18, 19.20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36, 37); 38 (выделы 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 43. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56); 76; 77; 78; 79 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36); 113  (выделы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,  12,13,14,15,16, 17,18, 19,20,21); 114 (выделы 2, 3,9, 10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23); 115 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20); 116 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31); 117; 118; 119 (выделы 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16,  17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31); 120 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40); 121 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.12,  13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,26, 28, 32, 33, 34, 35); 155; 156; 157 (выделы 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15); 158 (выделы 1,3,4,8,9, 10,11, 12, 16, 17, 18); 159(выделы 1,2,3,4,5,6, 7, 9, 10,11,15, 17, 19, 21); 160 (выделы 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20); 161; 162 (выделы 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33); 205 (выделы 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24); 206 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 18,  19, 20, 21, 22, 23, 24); 207 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22); 208 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23), Ирбинского участкового лесничества; в кварталах №№ 8 (выделы 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (части выделов 30*, 31*, 34*, 35*, 36*, 37*, 38*. 39*, 40*), 32, 33, 41. 42, 43, 44); 12 (выделы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (части выделов 18*, 20*, 21*, 23*), 19,22,24, 25); 13 (выделы 1,2,3,4, 5, 10,11,13,14, 15,16,18, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 34,37, 38, 39,40, 41,44, 45, 47, 48, 49, 50 (части выделов 52*, 53*, 56*, 61*, 62*), 54, 55, 57, 59); 17 (выделы 1,2, 3, 5, 6 (части выделов 4*, 7*, 8*, 9*, 10*, 12*, 27*), 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26); 19 (выделы 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11 (части выделов 3*, 4*, 5*, 7*, 22*), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21); 21; 23 (выделы (части выделов 1*, 2*), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27); 24; 25; 26; 27; 28 (выделы 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 23, 24, 25, 26); 29 (выделы 4, 5, 6,7, 11, 12, 16, 19,20,24,26,27,28,30); 30 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 27); 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33); 56; 57; 58; 59; 60; 61; 68; 69; 70; 76 (выделы 1, 2, 3,4, 5, 6.7.8.9. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21,22);77(выделы 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 21); 78 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 23); 86; 87; 88 Невонского участкового лесничества краевого государственного бюджетного учреждения «Невонское лесничество», площадью 60 245,37 га, имеет номер учетной записи в государственном лесном реестре 24-0175-2008-08-3355-1(1);

лесной участок в кварталах №№ 20 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18,

19. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38); 22 (выделы 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38); 23; 24; 49 (выделы 3, 4, 5, 8, 9, 10. 11. 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26); 50; 51 (выделы 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17. 21. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32);52 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29); 53, Ирбинского участкового лесничества краевого государственного бюджетного учреждения «Невонское лесничество», площадью 7 380,00 га, имеет номер учетной записи в государственном лесном реестре 24-0175-2008-08-3355-1(2).

В силу пункта 5 договора арендная плата по договору составляет 5 115 630 руб., ежегодно.

Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за единицу площади лесного участка, устанавливаемых в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации. Арендная плата подлежит обязательной уплате Арендатором в новом размере без дополнительного согласования и внесения изменений в Договор (пункт 8 договора).

Пунктом 15 договора установлено, за нарушение условий настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю неустойки:

за нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый день просрочки, до момента полного исполнения обязательства по внесению арендной платы:

за несвоевременный возврат лесного участка Арендодателю 0.1% от размера годовой арендной платы за каждый день не возврата;

за неисполнение подпунктов «и», «к» пункта 13 настоящего договора, арендатор уплачивает арендодателю штраф в размере 0,1% от исчисленной суммы вреда, причиненного лесам, вследствие нарушения лесного законодательства.

Между сторонами заключено дополнительное соглашение от 06.02.2017 №2 к договору (далее – дополнительное соглашение), в соответствии с пунктом 1.4 которого пункт 2 договора изложен в следующей редакции:

«Лесные участки из состава земель лесного фонда общей площадью 67 458,0200 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 739 778 574 кв.м), предоставляемые в аренду для заготовки древесины, в том числе:

площадью 48,1462 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 473 132 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в квартале: № 8 (части выделов 30, 31, 33-40), с кадастровым номером 24:07:8101001:1080;

площадью 332,6025 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 3 268 476 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в квартале: № 8 (выделы 16, 17, 21-23, 27-29, 32, 41, 42, части выделов 30, 31, 33-35, 37, 38), с кадастровым номером 24:07:8101001:1064;

площадью 653,0513 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 6 417 518 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в квартале: № 8 (выделы 1-15, 18-20, 24, 25, 43, 44), с кадастровым номером 24:07:8101001:1063;

площадью 1 831,2559 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 18 442 209 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в кварталах: №№ 12 (выделы 1-17, 19, 25, 26, части выделов 18, 20, 21, 23), 13 (выделы 1-48, 64, части выделов 50-53, 61), с кадастровым номером 24:07:8101001:1086;

площадью 66,9791 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 674 533 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в квартале: № 13 (части выделов 50-53, 56, 61), с кадастровым номером 24:07:8101001:1100;

площадью 0,1380 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 1380 кв.м), отнесенный к эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в квартале: № 12 (части выделов 20, 22), с кадастровым номером 24:07:8101001:1298;

площадью 3,5102 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 35328 кв.м), отнесенный к эксплуатационным лесам, - принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество,  Невонское участковое лесничество,  в  квартале:  №   12 (части выделов 20-22), с кадастровым номером 24:07:8101001:1252;

площадью 2,7168 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 27 393 кв.м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанскии район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в квартале № 12 (части выделов 20, 22), с кадастровым номером 24:07:8101001:1251;

площадью 190,6300 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 2 410 595 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанскии район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в квартале: № 17 (выделы 1-3, 5, 6, части выделов 4, 7-10, 12, 27), с кадастровым номером 24:07:8101001:1099;

площадью 214,8300 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 1 632 968 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанскии район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в квартале: № 19 (выделы 1, 2, части выделов 3, 4, 22), с кадастровым номером 24:07:8101001:1056;

площадью 18 112,8497 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 203 754 645 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанскии район, Невонское лесничество, Ирбинское участковое лесничество, в кварталах: №№ 5-10, 33-38, 76-79, 113-115, 116 (выделы 1-24, 30, 31, часть выдела 29), 117 (выделы 1-13, 15, 16),118 (выделы 1-19, 21-24), 119-121, 155 (выделы 1,17, часть выдела 18), 156 (выдел 1), 159 (выделы 2-7), 160 (выделы 1-8, 13), 161 (выделы 1-9), 162 (выделы 1-5), с кадастровым номером 24:07:8101001:1117;

площадью 0,6532 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 6532 кв.м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанскии район, Невонское лесничество, Ирбинское участковое лесничество, в квартале: № 208 (части выделов 2, 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19), с кадастровым номером 24:07:8101001:1249;

площадью 9025,1246 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 101526037 кв.м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанскии район, Невонское лесничество, Ирбинское участковое лесничество, в кварталах: №№ 116 (выделы 25-28, часть выдела 29), 117 (выделы 14, 17),118 (выдел 20), 155 (выделы 2-16, часть выдела 18), 156 (выделы 2-19), 157, 158, 159 (выделы 1, 8-22), 160 (выделы 9-12, 14-20), 161 (выделы 10-21), 162 (выделы 6-33), 205-207, 208 (выделы 1, 3-5, 7-9, 12, 13, 15, 17, 20-23, части выделов 2, 6, 10, И, 14, 16, 18, 19), с кадастровым номером 24:07:8101001:1142.

площадью 29 546,5113 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 332 598 570 кв.м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в кварталах: №№ 12 (выдел 24, части выделов 18, 20, 21, 22, 23), 13 (выделы 49, 54, 55, 59, 60, 63, части выделов 52, 53, 56, 57, 58, 61, 62), 17 (выделы 11, 13-26, части выделов 8, 9, 10, 12, 27), 19 (выделы 6, 9-21, части выделов 3, 4, 5, 7, 8, 22), 21, 23 (выделы 3, 8-13, 15-27, части выделов 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14), 24 (выделы 5-33, части выделов 1, 2, 3, 4), 25 (выделы 2-18, часть выдела 1), 26 (выделы 2, 4-23, части выделов 1, 3), 27-36, 38, 39, 48-53, 55-61, 68-70, 76-78, 86-88, с кадастровым номером 24:07:8101001:1231;

площадью 1,7729 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 17729 кв.м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, Невонского лесничества, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в кварталах: №№ 12 (части выделов 18, 21, 23), 13 (части выделов 52, 53, 57, 58, 61), 17 (части выделов 8, 9, 10, 12), 19 (части выделов 3, 4, 7, 8, 22), 23 (части выделов 2, 4, 6, 7, 14), 24 (части выделов 2, 3), с кадастровым номером 24:07:8101001:1299;

площадью 57,2183 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 572183 кв.м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, предназначенный для использования лесов в соответствии с видами, разрешенными лесохозяйственным регламентом Невонского лесничества, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Невонское участковое лесничество, в кварталах: №№ 12 (части выделов 18, 21, 23), 13 (части выделов 52, 53, 56, 57, 58, 61, 62), 17 (части выделов 8, 9, 10, 12), 19 (части выделов 3, 4, 5, 7, 8, 22), 23 (части выделов 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14), 24 (части выделов 1, 2, 3, 4) с кадастровым номером 24:07:8101001:1232;

площадью 5 445,6888 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 50 117 288 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Ирбинское участковое лесничество, в кварталах: №№ 22 (выделы 4-9, 12-37), 23, 24, 50 (выделы 5-8, 12-14, 17-20, 22-25), 51-53, с кадастровым номером 24:07:8101001:1121;

площадью 104,0701 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 1 049 806 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Ирбинское участковое лесничество, в квартале: № 22 (выделы 1-3, 10, 11), с кадастровым номером 24:07:8101001:1173;

площадью 1 820,2711 га (уточненная площадь в соответствии с проведенным межеванием 16 752 252 кв. м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Невонское лесничество, Ирбинское участковое лесничество, в кварталах: №№ 20, 49, 50 (выделы 1-4, 9-11, 15, 16, 21, 26), с кадастровым номером 24:07:8101001:1120.».

Согласно пункту 1.5 дополнительного соглашения пункт 6 договора изложен в следующей редакции:

«Арендатор вносит арендную плату ежеквартально равными частями в размере 1/4  части годового размера арендной платы с 1 до 15 числа последнего месяца текущего квартала согласно приложению № 4 к настоящему Договору по реквизитам, указанным Арендодателем и представляет в течение одного месяца Арендодателю копию платежного поручения (квитанцию), подтверждающую своевременное внесение платежей. Начисление арендной платы производится с момента регистрации данного Договора.

Датой поступления платежей, указанных в пункте 5 настоящего Договора, считается день поступления денежных средств на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК РФ по Красноярскому краю (министерство лесного хозяйства Красноярского края), ИНН 

<

***>, КПП 246301001, р/счёт 

<

***>;

Банк получателя: Отделение Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04 626000;

(053 1 12 04012 01 6000 120 - плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы), (031 1 12 04014 02 0000 120 - плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы).».

В силу пункта 1.7 дополнительного соглашения пункт 13 договора подпункты «е», «ж», «з» изложены в следующей редакции:

«е) осуществлять меры противопожарного обустройства лесов на основании проекта освоения лесов;

в случае обнаружения лесного пожара на лесном участке немедленно сообщать об этом в специализированную диспетчерскую службу и принимать все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара;

ж)  обеспечивать наличие средств предупреждения и тушения лесных пожаров, в нормативах, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

з)    осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от     захламления,     загрязнения     и     иного     негативного     воздействия), лесовосстановление и уход за лесами на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении 6.».

В соответствии с пунктом 1.10 дополнительного соглашения пункт 15 договора дополнен следующим абзацем:

«за невыполнение и несвоевременное выполнение противопожарных, санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по воспроизводству лесов, установленных подпунктами «е», «ж» пункта 13 Договора - 3-кратная стоимость затрат, необходимых для выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции Арендодателя;

За невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, захламление по вине Арендатора просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 50 метров 5-кратная стоимость затрат, необходимых для очистки данной территории по нормативам в области лесного хозяйства, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции Арендодателя.».

Во исполнение условий договора утвержден проект освоения лесов лесного участка, переданного в аренду акционерному обществу «Лесосибирский ЛДК №1» для заготовки древесины, расположенного на территории Невонского лесничества Богучанского муниципального района Красноярского края (договор аренды от 30.09.2008 №25-з).

Письмом от 06.04.2023 №86-05505 Министерство сообщило о озможности следующей корректировке лесовосстановления:

- искусственное лесовосстановление - 0 га;

- подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 0 га;

-  в том числе будущего года - 0 га;

- естественное лесовосстановление - 103 га;

- агротехнический уход за лесными культурами - 0 га;

- дополнение лесных культур - 0 га;

- заготовка лесных семян - 0 кг.

Скорректированный план 2023 года по договору аренды от 30.09.2008 №22-з КГБУ «Кодинское лесничество» составляет:

-  искусственное лесовосстановление - 0 га;

-  подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 3 га;

-  в том числе будущего года - 3 га;

- естественное лесовосстановление - 323,2 га;

-  агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки -160,8 га;

- дополнение лесных культур - 0 га;

- заготовка лесных семян - 0 кг.

Скорректированный план 2023 года по договору аренды от 21.08.2008 №24-з составляет:

- искусственное лесовосстановление - 0 га;

- подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 0 га;

- в том числе будущего года - 0 га;

- естественное лесовосстановление - 364 га;

- агротехнический уход за лесными культурами - 62 га;

- дополнение лесных культур - 0 га;

- заготовка лесных семян - 0 кг.

Скорректированный план 2023 года по договору аренды от 30.09.2008 №26-з составляет:

- искусственное лесовосстановление - 43,7 га;

- подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 43,7 га;

- в том числе будущего года - 0 га;

- естественное лесовосстановление - 340,1 га;

- агротехнический уход за лесными культурами - 227 га;

- дополнение лесных культур — 0 га;

- заготовка лесных семян (сосна) - 35 кг.

Скорректированный план 2023 года по договору аренды от 30.09.2008 №23-з составляет:

- искусственное лесовосстановление - 0 га;

- подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 0 га; - в том числе будущего года - 0 га;

- естественное лесовосстановление - 84 га;

- агротехнический уход за лесными культурами - 39,2 га;

- дополнение лесных культур - 0 га;

- заготовка лесных семян - 0 кг.

Скорректированный план 2023 года по договору аренды от 10.09.2008 №25-з составляет:

- искусственное лесовосстановление - 50 га;

- подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 12,6 га;

- в том числе будущего года - 12,6 га;

- естественное лесовосстановление - 143,9 га; -агротехнический уход за лесными культурами путем оправки - 175,8 га;

- дополнение лесных культур - 0 га;

- заготовка лесных семян (сосна) - 40 кг.

В обоснование исковых требований истец указывает, согласно справке о выполнении лесовосстановительных работ за 2023 г. задолженность АО «Лесосибирский ЛДК№1» по мероприятиям по воспроизводству лесов за 2023 год составила:

искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с закрытой корневой системой - 9,8 га;

подготовка почвы - 12,6 га;

естественное лесовосстановление путем минерализации почвы - 35,8 га;

агротехнический уход путем оправки - 175,8 га.

Согласно расчетно- технологической карте затраты на мероприятия за 2023 составляют:

искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с закрытой корневой системой- 94 165,63 руб. за 1 га;

подготовка почвы - 17 500,00 руб. за 1 га;

естественное лесовосстановление путем минерализации почвы -5 424,47 руб. за 1 га;

агротехнический уход путем оправки - 6 450,34 руб. за 1 га.

Таким образом, 3-х кратная стоимость, соответственно, составляет 7 458 405,13 руб. = (94 165,63 * 9,8 *3) + (17 500,00 * 12,6 * 3) + (5 424,47 * 35,8*3)+ (6 450,34* 175,8*3).

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием об оплате неустойки от 20.03.2024 №86-04379, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Оставление претензии без удовлетворения явилось основанием истцу для обращения с настоящим иском в Арбитражный суд Красноярского края.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указывает на следующее:

- трехкратная стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий, может быть применена только к мероприятиям, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 13 договора, а именно в отношении мероприятий по противопожарному обустройству лесов и обеспечению средствами предупреждения и тушения пожаров;

- необходимость применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом освоения лесов, выполнены ответчиком в полном объеме.

В качестве доказательств выполнения мероприятий в материалы дела представлены следующие акты:

- акт по воспроизводству лесов от 07.10.2024 объемом 10,08 га;

- акт по воспроизводству лесов от 07.10.2024 объемом 2,52 га;

- акт по воспроизводству лесов от 30.10.2024 объемом 11,8 га;

- акт по воспроизводству лесов от 30.10.2024 объемом 8,9 га;

- акт по воспроизводству лесов от 30.10.2024 объемом 25,0 га;

- акт по воспроизводству лесов от 30.10.2024 объемом 10 га;

- акт по воспроизводству лесов от 30.10.2024 объемом 11,8 га;

- акт по воспроизводству лесов от 30.10.2024 объемом 2,52 га;

- сводные ведомости по уходам в лесных культурах от 14.10.2024 на 27,4 га; на 48,4 га; на 41,0 га; на 38,7 га.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно пункту 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц. В том числе, гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, вследствие неосновательного обогащения. 

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями.

Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.

Согласно части 2 статьи 4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее также – ЛК РФ, Лесной кодекс), от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.

Из части 1 статьи 82 Лесного кодекса Российской Федерации следует, что к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относятся, в том числе, полномочия по владению, пользованию, распоряжению лесными участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление следующих полномочий в области лесных отношений, в том числе предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том числе организация и проведение соответствующих аукционов), принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесного фонда, принятие решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков в границах земель лесного фонда.

Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.07.2016 № 560-р образовано Министерство лесного хозяйства Красноярского края, действующее на основании Положения о министерстве лесного хозяйства Красноярского края утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2016 № 374-п.

Министерство является органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим надзор (контроль) в области лесных отношений.

Постановлением Правительства Красноярского края от 28.12.2023 № 1103-п внесены изменения в Положение о министерстве лесного хозяйства Красноярского края, в частности наименование министерства изменено на министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

15.01.2024 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении наименования министерства лесного хозяйства Красноярского края на министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

Таким образом, Министерство является надлежащим истцом по настоящему иску.

Согласно статье 3 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков и лесных насаждений, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (часть 2).

Частью 1 статьи 71 ЛК РФ предусмотрено, что лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду на основании соответствующего договора аренды.

Как следует из положений части 4 статьи 71 ЛК РФ, к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом и Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом.

В соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

В силу положений пункта 1 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации, арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.

В соответствии с частью 1 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации мероприятия по сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению (далее также - мероприятия по сохранению лесов), а также мероприятия по лесоустройству осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, и лицами, которые используют леса и (или) на которых настоящим Кодексом возложена обязанность по выполнению таких работ

Согласно частям 1 и 2 статьи 61 ЛК РФ вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов включает в себя: лесное семеноводство; лесовосстановление; уход за лесами; осуществление отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями.

В силу статьи 62 ЛК РФ лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов. На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. Правила лесовосстановления устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (рубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия). Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов (части 1, 2 статьи 64 Лесного кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 88 ЛК РФ лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, а также лица, использующие леса на основании сервитута или публичного сервитута, составляют проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 настоящего Кодекса.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Истцом начислена неустойка в размере 7 458 405 руб. 13 коп. за ненадлежащее исполнение обязательств по лесовосстановительным работам в 2023 году.

Произведенный расчет неустойки проверен судом признан верным, произведен с учетом положений договора в редакции дополнительного соглашения от 06.02.2017 №2.

Суд отмечает, что в силу положений статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»  разъяснено, условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

Вопреки доводам ответчика, исходя из положений пункта 1.10 дополнительного соглашения к договору, а также цели установления санкции за невыполнение спорных работ, стороны при заключении дополнительного соглашения от 06.02.2017 №2 к договору согласовали в отношении спорных работ неустойку в размере - 3-кратная стоимость затрат.

Ответчиком заявлено о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. В силу части 2 указанной статьи уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

При этом следует учитывать, что степень несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, четких критериев ее определения применительно к тем или иным категориям дел, рассматриваемым спорным правоотношениям сторон законодательством не предусмотрено.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21.12.2000 № 263-О, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Исходя из правовой позиции, сформированной Верховным Судом Российской Федерации, в том числе в определении от 13.04.2023 № 307-ЭС22-18849, неустойка направлена на восстановление нарушенного права. Выполняя компенсаторную функцию, она служит средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 06.10.2016 № 305-ЭС16-7657 по делу № А40- 125377/2015, постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14 по делу № А53- 10062/2013).

Задача суда состоит в устранении явной несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению.

Степень соразмерности заявленного истцом штрафа последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пунктам 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Защита права потерпевшего посредством полного возмещения должна обеспечивать восстановление нарушенного права потерпевшего, но не приводить к его неосновательному обогащению.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. Так, в качестве критерия для установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства может быть признан слишком высокий размер процента, на основании которого определяется неустойка.

Судом учтено, что согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-О, при применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

При этом вопрос о наличии или отсутствии оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд решает с учетом представленных доказательств и конкретных обстоятельств дела.

Из указанного следует, что признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

При таких обстоятельствах задача суда состоит в устранении явной несоразмерности договорной ответственности, следовательно, суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению.

Таким образом, в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств спора и взаимоотношений сторон.

Суд должен исходить из необходимости обеспечения баланса интересов сторон, участвующих в конкретных правоотношениях, а устанавливая такой баланс в спорных отношениях, принимать решение, отвечающее принципу справедливости (постановление от 18.11.2014 № 30-П, определение от 09.12.2014 № 2750-О Конституционного Суда РФ).

По смыслу закона неустойка направлена на восстановление нарушенного права. Выполняя компенсаторную функцию, она служит средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.04.2023 № 307-ЭС22-18849, от 17.11.2016 № 305-ЭС16-6006(7)).

Обеспечительная функция проявляется в том, что применение неустойки создает экономические стимулы правомерного поведения должника: разумный участник оборота будет стремиться избежать неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства под угрозой применения меры ответственности, если потери, ожидаемые в случае взыскания неустойки, для него окажутся большими в сравнении с преимуществом, получаемым из нарушения условий обязательства (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.11.2022 № 305-ЭС22-10240).

Таким образом, её начисление призвано, с одной стороны, стимулировать должника к соблюдению сроков исполнения договора, а с другой – позволяет кредитору компенсировать расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие допущенной должником просрочки в исполнении договора (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.04.2023 № 305- ЭС22-23773, от 06.12.2022 № 305-ЭС22-16483, от 25.10.2022 № 308-ЭС21-16199, от 24.01.2022 № 305-ЭС21-16757, от 02.09.2021 № 309-ЭС20-24330).

Размер неустойки установлен типовым договором.

В целях необходимости обеспечения баланса интересов сторон, суд приходит к следующему выводу при рассмотрении ходатайства ответчика ходатайство о снижении неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судом учтено, что в данном случае начисление неустойки в указанном размере призвано, с одной стороны, стимулировать арендатора к соблюдению сроков исполнения договора, а с другой – позволяет арендодателю компенсировать расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие допущенной заказчиком просрочки в исполнении договора (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.04.2023 № 305- ЭС22-23773, от 06.12.2022 № 305-ЭС22-16483, от 25.10.2022 № 308-ЭС21-16199, от 24.01.2022 № 305-ЭС21-16757, от 02.09.2021 № 309-ЭС20-24330).

Вместе с тем, в целях необходимости обеспечения баланса интересов сторон, учитывая размер неустойки, стимулирование арендатора к надлежащему выполнению условий договора аренды, поведение арендатора, соотношение размера арендной платы и начисленной неустойки, фактический объем выполненных лесовосстановительных работ, с учетом начисления неустойки на невыполненную часть мероприятий своевременно (иное не доказано ответчиком), суд приходит к выводу о снижении её на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, до 3 700 000 руб.

Данная сумма неустойки адекватна и соизмерима с нарушенным интересом, с одной стороны обеспечит стимулирование ответчика к исполнению обязательств по договору, а с другой – позволит истцу компенсировать расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие допущенной ответчиком просрочки в исполнении договора, тем самым обеспечит соблюдение баланса интересов сторон.

Неустойка по своей природе носит компенсационный характер, является способом обеспечения исполнения обязательства. Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценка указанного критерия относится к исключительной компетенции суда, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, исковые требования в части взыскания неустойки подлежат частичному удовлетворению в размере 3 700 000 руб., с учетом применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска составляет  248 752 руб.

Согласно разъяснениям, изложенным в ответе на вопрос №2 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2, 3 (2024), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2024, в соответствии со статьей 89 ГПК РФ, статьей 105 АПК РФ, частью 1 статьи 104 КАС РФ льготы по уплате государственной пошлины предоставляются в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Как указано в подпункте 19 пункта 1 статьи 333.36, подпункте 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, законодательством об административном судопроизводстве и арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, арбитражными судами, освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие в качестве истцов (административных истцов) или ответчиков (административных ответчиков).

В пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, рассматривая вопросы о распределении между сторонами расходов по уплате государственной пошлины в случаях уменьшения размера подлежащей взысканию неустойки, арбитражным судам необходимо учитывать, что согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации в цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и проценты.

Если истец уменьшил размер требования о взыскании неустойки, излишне уплаченная государственная пошлина возвращается истцу органом Федерального казначейства как уплаченная в размере большем, чем предусмотрено законом (подпункт 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации).

Если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

В случаях, когда истец освобожден от уплаты государственной пошлины, соответствующая сумма государственной пошлины взыскивается с ответчика пропорционально размеру сниженной судом неустойки (часть 3 статьи 110 АПК РФ).

При указанных обстоятельствах, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 123 402,09 руб. (3 700 000 руб. / 7 458 405,13 руб.* 248 752 руб.).

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Лесосибирский ЛДК № 1» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 700 000 руб. неустойки, а также 248 752 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

С.А. Красовская