РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-174328/19-110-1518

10 октября 2019 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 10 октября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ермоловой В.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Би.Си.Си."  (194100, Санкт-Петербург город, проспект Лесной, 64, литер А, ОГРН: 1147847394012) к Федеральному государственному унитарному предприятию "Главное военно-строительное управление №12" (125212, Москва город, улица Адмирала Макарова, 6, 1,  ОГРН: 1025004058639) о взыскании 6 291 722,85 руб.

при участии:

от истца – Аносов  Р.А. по дов.  от  01.01.2017№69,

от ответчика- не явился 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Би.Си.Си." обратилось с иском к Федеральному государственному унитарному предприятию "Главное военно-строительное управление №12" о взыскании 6 291 722,85 руб. задолженности по Договору №1412-18-СУБ от 11.12.2014.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении спора по существу в случае его неявки и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в I инстанции, в заседание не явился, возражений против открытия судебного заседания в I инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявил. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в его отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственность «Би.Си.Си.», являющимся правопреемником ЗАО «Бизнес Компьютер Центр», и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление № 12» (далее ФГУП «ГВСУ № 12», Ответчик, Генподрядчик), являющимся правопреемником ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России», был заключен Договор № 1412-18-СУБ от 11.12.2014 на выполнение субподрядных работ по реконструкции административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42 (далее - Договор).

В соответствии с условиями Договора Истец обязался выполнить работы по реконструкции административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, (далее - Объект).

Цена Договора в соответствии с пунктом 3.1. является твердой и составляет 36 063 636 (тридцать шесть миллионов шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18% 5 501 232 (пять миллионов пятьсот одна тысяча двести тридцать два) рубля 68 копеек.

В соответствии с пунктом 5.2. Договора дата начала работ 11.12.2014, дата окончания работ 31.03.2015.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.11.2015 (далее - ДС № 1) стороны уточнили виды работ, а также продлили сроки выполнения работ по Договору.

Срок окончания выполнения работ согласно ДС № 1 (Приложение № 2 к исковому заявлению) продлен по 30.12.2015.

В соответствии с пунктом 4.3. Договора оплата выполненных ООО «Би.Си.Си.» строительно-монтажных работ производится ФГУП «ГВСУ № 12» ежемесячно в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней после подписания ФГУП «ГВСУ № 12» Актов о приемки выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оригиналов счета, счет-фактуры.

В соответствии с разделом 12 Договора сдача-приемка выполненных работ осуществляется на основании предоставляемых ООО «Би.Си.Си.» в адрес ФГУП «ГВСУ № 12» Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счет-фактуры (подпункт 12.1.1 Договора).

Согласно подпункту 12.1.3. Договора Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет ООО «Би.Си.Си.» подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения. При отсутствии замечаний производит их оплату.

Ответчиком, на основании подписанных обеими сторонами Актов (форма КС-2), Справок (форма КС-3), приняты выполненные ООО «Би.Си.Си.» работы на общую сумму 13 896 158,02 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят восемь, в том числе НДС в размере 18%, что подтверждается следующими документами, подписанными с двух сторон. (Акт (форма КС-2) №1 от 31.03.2015, Справка (форма КС-3) № 494 от 31.03.2015 на сумму 873 045,49 рублей; Акты (форма КС-2) № 2, № 4 от 30.04.2015, Справка (форма КС-3) №865 от 30.04.2015 на сумму 263 519,11 рублей; Акт (форма КС-2) № 5 от 29.05.2015, Справка (форма КС-3) №1005 от 29.05.2015 на сумму 157 718,65 рублей; Акт (форма КС-2) № 6 от 24.06.2015, Справка (форма КС-3) №1240 от 24.06.2015 на сумму 136 931,45 рублей; Акт (форма КС-2) № 9 от 31.08.2015, Справка (форма КС-3) №1-01799 от 31.08.2015 на сумму 132 616,16 рублей; Акты (форма КС-2) №10, №11 от 30.09.2015, Справка (форма КС-3) №1-02052 от 30.09.2015 на сумму 1 243 319,77 рублей; Акт (форма КС-2) №12 от 30.10.2015, Справка (форма КС-3) №1-02225 от 30.10.2015 на сумму 157 368,95 рублей;  Акт  (форма  КС-2)  №13   от  21.12.2015,  Справка  (форма  КС-3)  №2704 от 21.12.2015 на сумму 308 519,07 рублей; Акты (форма КС-2) №14, №15 от 31.05.2016, Справка (форма КС-3) №1270 от 31.05.2016 на сумму 9 827 169.92 рублей; Акт (форма КС-2) №16 от 29.12.2016, Справка (форма КС-3) №3193 от 29.12.2016 на сумму 296 693,72 рублей; Акты (форма КС-2) №17, №18 от 28.04.2017, Справка (форма КС-3) №971 от 28.04.2017 на сумму 499 255,73 рублей.

Общая сумма всех произведенных ФГУП «ГВСУ 12» платежей по Договору составила 10 012 286,04 (десять миллионов двенадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 04 копейки, в том числе НДС в размере 18%.

Таким образом, задолженность по принятым на основании подписанных с двух сторон Актов составляет 3 883 871,98 рублей, в том числе НДС в размере 18%.

В ходе выполнения договорных обязательств, в связи с обнаружением недостатков в выданной Ответчиком технической документации, в адрес Ответчика Истцом неоднократно направлялись письма о необходимости согласования проектных решений. Кроме того, Истцом направлялись письма с требованием обеспечить строительную готовность Объекта для доставки и монтажа оборудования.

15.05.2015 Истец проинформировал (письмо № 02848 от 15.05.2015) Ответчика о выполнении договорных обязательств по закупке всего оборудования, выполнения части строительно-монтажных работ, а также разработке проектной документации по разделу «Автоматика вентиляции». Кроме того, Истец сообщил о причинах, препятствующих дальнейшему выполнению работ. Ответ на письмо № 02848 от 15.05.2015 Ответчиком не направлен.

10.06.2015 Истец направил очередное письмо № 03417, о необходимости продления сроков выполнения работ по Договору и заключения соответствующего дополнительного соглашения в связи с отсутствием Рабочей документации (далее - РД) по системам вентиляции и разделам тепло/холодоснабжение вентиляции, а также иных причинах, находящихся в зоне ответственности Ответчика и препятствующих выполнению работ.

13.08.2015 Истец, в связи с непредоставлением Ответчиком необходимой РД, был вынужден обратился с запросом информации о моделях и требуемых характеристиках дверей, устанавливаемых в помещения вентиляционных камер (письмо № 04792 от 13.08.2015).

08.12.2015 ООО «Би.Си.Си.» направило письмо № 07824, содержащее информацию о невыполнении ФГУП «ГВСУ №12» встречных обязательств, а также информацию о необходимости продления сроков работ в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных первоначальными договорными условиями.

18.12.2015 ООО «Би.Си.Си.» направило ФГУП «ГВСУ №12» письмо № 08142 с просьбой оказать содействие в решении вопросов по согласованию и выдаче в производство работ отсутствующей РД, а также с приложением актуализированного графика выполнения работ на Объекте. Ответ на указанное письмо Ответчиком не направлен.

10.06.2016 Истец направил письмо № 3328 «О производстве работ», содержащее информацию о причинах, препятствующих выполнению работ, в том числе, отсутствии скорректированной, согласованной РД, отсутствии строительной готовности, несогласованности действий служб Ответчика и службы эксплуатации заказчика. Ответ на указанное письмо № 3328 от 10.06.2016 Ответчиком не предоставлен.

30.06.2016 в адрес Ответчика направлено очередное письмо №03736 с обоснованием необходимости продления срока выполнения работ по причинам неисполнения Ответчиком встречных обязательств по предоставлению необходимой РД, а также отсутствия строительной готовности. Также письмом №03736 от 30.06.2016 в адрес Ответчика направлен проект Дополнительного соглашения № 3, предусматривающего увеличение срока выполнения работ. На указанное письмо ФГУП «ГВСУ № 12» ответ не направило.

06.06.2017 ООО «Би.Си.Си.» направило очередное письмо № 03216 «О выполнении работ по Договору» согласно которому Ответчик проинформирован о необходимых, взаимных действиях сторон Договора, которые позволят завершить работы на Объекте, сообщено о необходимости заключения Дополнительного соглашения, конкретизирующего виды работ, сроки их выполнения и итоговую стоимость. Ответ на письмо № 03216 от 06.06.2017 в адрес Истца не направлен.

13.06.2017 Истец направил письмо № 03405 о необходимости погашения Ответчиком дебиторской задолженности в размере 4 378 321,51 (четыре миллиона триста семьдесят восемь тысяч триста двадцать один рубль 51 копейка) рубль, в том числе НДС в размере 18%. Требования Истца, изложенные в письме № 03405 от 13.06.2017, Ответчиком не исполнены, задолженность не погашена. 

18.09.2017 Истец направил в адрес Ответчика письмо № 05506  с приложением отчетной и исполнительной документации (Акты (форма КС-2), Справки (форма КС-3), Журналы учета выполненных работ, Счет, Счет-фактура) для приемки и оплаты выполненных работ на сумму 2 407 850,87 (два миллиона четыреста семь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 87 копеек) рублей, в том числе НДС в размере 18%. Ответ на указанное письмо до настоящего времени Ответчиком не предоставлен, подписанные экземпляры документации в адрес Истца не возращены, при этом срок для предоставления письменных замечаний, установленный пунктом 12.1.3 Договора, истек. Учитывая изложенное, результат работ считается принятым со стороны Ответчика и подлежит оплате в соответствии с условиями Договора.

В нарушение пунктов 4.3., 12.1.3 Договора вышеуказанные результаты работ до настоящего времени не оплачены Ответчиком.

08.11.2017ФГУП «ГВСУ № 12» письмом № 35/3-7659  проинформировало ООО «Би.Си.Си.» об остановке работ в связи с расторжением Государственного контракта № 101-ГП/12 от 10.10.2012 с ФГУП Центр «Звездный», в рамках которого был заключен Договор между Истцом и Ответчиком. Кроме того, Истцу предписывалось передать отчетную документацию в части выполненных, но не сданных работ, передать исполнительную документацию и строительную площадку.

На письмо ФГУП «ГВСУ № 12» № 35/3-7659 от 08.11.2017 ООО «Би.Си.Си.» направило ответное письмо № 07634 от 18.12.2017, в котором проинформировало Ответчика о готовности передать строительную площадку, а также о наличии задолженности по оплате выполненных работ и поставленного оборудования. Письмо № 07634 от 18.12.2017 получено ФГУП «ГВСУ № 12» 18.12.2017 с присвоением входящего № 9841.

10.01.2018ООО «Би.Си.Си.» в очередной раз обратилось с письмом № 00035  к ФГУП «ГВСУ № 12» с требованием оплаты выполненных работ и поставленного оборудования. Ответ на указанное обращение Ответчик не предоставил.

08.10.2018 Истец направил итоговое претензионное письмо № 07614  с требованиями оплатить выполненные работы (стоимостью 6 291 722,85 рубля) и закупленное оборудование (стоимостью 258 007 рублей) общей стоимостью 6 549 729,85 (шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч семьсот двадцать девять рублей восемьдесят пять копеек) рублей, в том числе НДС в размере 18%.

Однако законные требования ООО «Би.Си.Си.» не удовлетворены ФГУП «ГВСУ № 12» в добровольном порядке, письмо № 07614 от 08.10.2018 оставлено без ответа, при этом замечаний к качеству, объемам и срокам выполнения работ от Ответчика не поступило.

Общая сумма задолженности ФГУП «ГВСУ №12» по оплате выполненных работ составляет 6 291 722,85 рубля, в том числе НДС 18%. и складывается из:

3 883 871,98 рублей задолженность по двусторонне подписанным Актам (форма КС-2) и

2 407 850,87 рублей задолженность на основании Актов (форма КС-2), направленных письмом № 05506 от 18.09.2017.

Согласно статье 711  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Кодекс), если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Федерального государственного унитарного  предприятия "Главное военно-строительное управление №12"  в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Би.Си.Си."  6 291 722 руб.85 коп. задолженности,  55 749 руб. в возмещение расходов по госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный  апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко