Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

19 марта 2019 годаДело № А56-138294/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

:САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 112" (адрес:  Россия 190000, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул АКАДЕМИКА БАЙКОВА 25/1/А, ОГРН:  1037808001065);

к :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО" (адрес:  Россия 195197, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт КОНДРАТЬЕВСКИЙ 21/ЛИТЕР А; Россия 197374, Санкт-Петербург, Савушкина 140, пом 181, ОГРН:  1117847434517; 1117847434517);

о взыскании 162 651,32 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по контракту от 28.12.2016 № 0372200119816000140-0156849-01 за период с 29.03.2017 по 14.10.2017,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО" в пользу Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 112" 162 651,32 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по контракту от 28.12.2016 № 0372200119816000140-0156849-01 за период с 29.03.2017 по 14.10.2017, 5880 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины.

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Сурков А. А.