1710/2020-21835(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-14105/2019 

от 16 марта 2020 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью "РСК СпецСБ" (ОГРН  

<

***>) в течение 60 календарных дней со дня вступления настоящего решения в  законную силу выполнить за свой счет гарантийные обязательства по контракту № 11 на  выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ГБОУ АО АСШИ № 2 по  адресу: 

<

...> от 24.08.2016, а именно: выполнить  работы по устранению недостатков металлочерепицы, в том числе заменить листы  металлочерепицы, имеющие толщину менее 0,5 мм; заменить листы металлочерепицы,  имеющие нарушение целостности металлического листа или наличие сквозных отверстий  либо наличие прорезей; устранить зазор между листами металлочерепицы; установить  нахлест листов из расчета: нахлест профиля вдоль ската не менее 250 мм, нахлест  профиля поперек ската на один гофр; заменить лист темного цвета на соответствующий  кровельному покрытию, выполнив конструктивно верное крепление листа; выполнить  работы по замене обрешетки и нижней ендовы, в том числе выполнить сплошную  деревянную обрешетку под нижнюю ендову (в местах примыкания основного склона  кровли и слухового окна) по 1,5 метра в каждую; установить нижние ендовы достаточной  ширины; произвести замену деревянной обрешетки, пришедшей в негодность вследствие  некачественно выполненной работы; выполнить работы по устранению конструктивно  неверного крепления листов металлочерепицы, в том числе неверное крепление листов  заменить на верное крепление листов в соответствии с «Инструкцией по монтажу «МП  Монтеррей»; не допускать вкручивания саморезов лишь в металлочерепичное  покрытие; выполнить обрешетку с необходимым шагом и закрепить  металлочерепичное покрытие надлежащим образом; выполнить работы по укладыванию  уплотнителя универсальной ендовы в местах стыка планок нижней ендовы и  металлочерепицы, в том числе в местах стыка планок нижней ендовы и металлочерепицы  поместить уплотнитель универсальный; выполнить работы по укладыванию уплотнителя  универсального конька кровли, в том числе уложить уплотнитель универсального конька  кровли; выполнить работы по установлению планок примыкания, в том числе  вставленный в штробу край планки герметизировать с помощью герметизирующей ленты,  установить планки примыкания в соответствии с технологией; выполнить работы по  устранению обнажения арматуры защитной стяжки утеплителя, в том числе устранить  обнажение арматуры защитной стяжки утеплителя; выполнить работы по устранению  недостатков крепления элементов покрытия парапета или их длины, в том числе дополнительно  укрепить элементы покрытия парапета из расчета шаг дюбелей 600 мм и менее, применить  

элементы покрытия парапета достаточной длины; выполнить работы по устранению  недостатков крепления снегозадержателей или их длины, в том числе выполнить крепление  системы снегозадержателей к силовой обрешетке скатной кровли посредством кровельных  саморезов (по древесине) с заходом их в древесину на глубину не менее 40 мм; выполнить  

работы по устранению протечки кровли в местах примыканий основных скатов кровли и  слуховых окон; выполнить работы по устранению протечки кровли в местах  снегозадержателей; выполнить работы по устранению протечки кровли в местах крышных  проходок вентиляции; выполнить работы по устранению протечки в местах  канализационных стоков.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РСК СпецСБ" (ОГРН  

<

***>) в пользу государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения Архангельской области "Архангельская санаторная школа-интернат № 2"  (ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.А. Козлова