Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-53267/2024

27 октября 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  25 сентября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  27 октября 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шулаевой В.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТЕХСТРОЙ" (адрес:  Россия 188640, ВСЕВОЛОЖСК, Всеволожский  район Ленинградская область, ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПР-КТ, Д. 41, ОФИС 3.6,, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРСТ СЕВЕРО-ЗАПАД" (адрес:  Россия 197110, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛ БОЛЬШАЯ ФИО1 24, СТР. 1, ОФ. ПОМ. 197-Н., КОМ. 8, ОГРН:  );

о взыскании,

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 11.10.2023);

- от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕХСТРОЙ» (далее – Общество «ЛЕНТЕХСТРОЙ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Арбитражный суд) с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ФЕРСТ СЕВЕРО-ЗАПАД» (далее – Общество «ФЕРСТ СЕВЕРО-ЗАПАД») о взыскании по договору от 14.05.2021 № 87/ЛТС-21 на выполнение комплекса работ по окраске подпорных бетонных стен благоустройства на объекте многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным объектом гаражного назначения. Корпус 2 (2-й этап строительства) (Корпус 212, корпус 312), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок кадастровый номер земельного участка: 78:34:0004017:1689. (далее – Договор): 216 200 руб. неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ, 270 646,01 руб. неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по изготовлению материала/поставке материала,  82 350 руб. неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по нанесению материалов, 1 666 952,88 руб. неустойки за нарушение обязанности, предусмотренной п. 6.17. договора.  

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)  не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Арбитражный суд, заслушав представителя истца, изучив и оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил следующее.

Общества «ЛЕНТЕХСТРОЙ» (подрядчик) и «ФЕРСТ СЕВЕРО-ЗАПАД» (субподрядчик) заключили Договор.

Ориентировочная цена на момент подписания договора - 2 162 066 руб. (пункт 3.1 Договора).

Согласно п. 2.1. Договора конечный срок выполнения работ по Договору 30.07.2021

Согласно Приложению № 2 к Договору (График производства работ), работы по изготовлению материала/поставки материала должны были быть выполнены до 02.07.2021.

Согласно Приложению № 2 к Договору (График производства работ), работы по нанесению материалов должны были быть выполнены до 30.08.2021.

Как указал истец, по состоянию на 15.03.2024 работы в полном объеме по договору не выполнены.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение конечного срока выполнения Работ Субподрядчик по правилам указанного пункта уплачивает штрафную неустойку в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора.

Согласно п. 9.10 Договора при нарушении Субподрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.17 настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение начального и промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных договором, Субподрядчик обязан уплатить штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

В претензии от 15.03.2024 подрядчик потребовал от субподрядчика уплатить штрафные санкции за просрочку выполнения работ.

Поскольку Общество «ФЕРСТ СЕВЕРО-ЗАПАД» оставило названную претензию без удовлетворения, Общество «ЛЕНТЕХСТРОЙ» обратилось в арбитражный суд с указанным иском.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение конечного срока выполнения Работ Субподрядчик по правилам указанного пункта уплачивает штрафную неустойку в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора.

Согласно п. 9.10 Договора при нарушении Субподрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.17 настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

Согласно п. 9.2. Договора за нарушение начального и промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных договором, Субподрядчик обязан уплатить штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

Факт невыполнения ответчиком работ по Договору в установленный срок подтверждается представленными истцом и исследованными судом доказательствами.

Проверив представленный истцом расчет неустоек, суд, признал его верным, таким образом, требование о взыскании неустоек надлежит удовлетворить.

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Каких-либо возражений относительно заявленных требований ответчик не представил.

В силу закрепленного в части 2 статьи 9 АПК РФ принципа состязательности арбитражного судопроизводства, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФЕРСТ СЕВЕРО-ЗАПАД" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛЕНТЕХСТРОЙ" 216 200 руб. неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ, 270 646,01 руб. неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по изготовлению материала/поставке материала,  82 350 руб. неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по нанесению материалов, 1 666 952,88 руб. неустойки за нарушение обязанности, предусмотренной п. 6.17. договора, 34 181 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сурков А. А.