Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-811/2021

17 мая 2021 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Инкиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального  казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных  систем» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 628412, Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра, 

<

...>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Все инструменты Север» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес: 628406, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) об обязании устранить недостатки и взыскании  80 595 рублей 64 копеек,  

без участия представителей сторон, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации  административных зданий и инженерных систем» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Все инструменты Север»  в течение 30 календарных дней с момента вступления настоящего решения в законную  силу безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному  контракту № МК-30-18 от 07.06.2018 на объекте МБДОУ № 28 «Калинка»,  расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, а именно:  

- в спальне и игровой зоне групповой ячейки устранить отставание линолеума от  поверхности пола путем выполнения следующих видов работ:  

а) разборка плинтуса пластикового с сохранением материала;  

б) демонтаж металлической пластины в местах примыкания линолеумного  пола к дверной коробке с сохранением материала;  

в) разборка покрытия пола из линолеума полукоммерческого  износоустойчивого по всей поверхности пола с сохранением материала;  

г) устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого  износоустойчивого с оклейкой по всей площади, со свариванием в стыках;  

д) устройство плинтуса пластикового и металлической пластины в местах  примыкания линолеумного пола к дверной коробке;  

- в спортивном зале закрепить элементы плинтуса; - в музыкальном зале заменить ручку, замок дверного полотна. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Все инструменты Север»  в пользу муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации  административных зданий и инженерных систем» 80 595 рублей 64 копейки - сумму  штрафа, а также 9 223 рубля 83 копейки – судебные расходы по уплате государственной  пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Все инструменты север»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 17 копеек.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной  жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд  кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что  в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного  судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со  дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с  уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья Е.В. Инкина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 20.10.2020 11:50:38

Кому выдана Инкина Евгения Владимировна