Арбитражный суд Мурманской области

ул. Академика Книповича, д.20, г. Мурманск, 183038

http://murmansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город Мурманск                                                                             дело № А42-2528/2024

«15» мая 2024 года

Резолютивная часть решения вынесена и оглашена 14.05.2024.

Мотивированное решение изготовлено 15.05.2024.

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Новиковой О.О.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Галаганом А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Россети Северо Запад» (196247, 

<

...>, лит. А, пом. 16Н, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в лице Мурманского филиала (184355, 

<

...>)

к дачному некоммерческому товариществу «Поляна» (184381, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о расторжении договора от 15.10.2009 № 50-02/71

при участии в судебном заседании представителей:

истца – ФИО1, доверенность от 28.03.2024 № 73 24, паспорт, копия диплома;

ответчика – не явился, извещен.

установил:

публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к дачному некоммерческому товариществу «Поляна» о расторжении договора от 15.10.2009 № 50-02/71 об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада».

Ответчик  извещен о месте и времени рассмотрения дела, однако в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Представитель истца поддержал требование.

Как следует из представленных доказательств, 15.10.2009 между ОАО «МРСК  Северо-Запада» (сетевая организация) и ДНТ «Поляна» (заявитель) заключен договор № 50-02/71, во исполнение которого сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства заявителя. Присоединяемый объект, точки присоединения указаны в п.1.1. Заявитель обязался оплатить технологическое присоединение, выполнить согласованные мероприятия технологического присоединения.

В соответствии с п. 1.5 Договора и дополнительного соглашения № 4 от 03.03.2014 г. срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 63 месяца со дня заключения настоящего договора и установлен до 15.01.2015 включительно.

В соответствии с п. 5.1 технических условий, с учетом изменений, принятых в новой редакции дополнительного соглашения № 3 от 11.03.2013 к Договору, предусмотрено, что срок действий технических условий установлен на 2 года и действуют до 26.03.2013 г.

С 23.08.2021 фирменное наименование ПАО «МРСК Северо-Запада» изменено на ПАО «Россети-Северо-Запад».

Ответчик не выполнил мероприятия технологического присоединения, поэтому в претензии от 15.10.2018 № МР2/4/06-02/8149 общество «Россети Северо-Запад» предложило ответчику расторгнуть договор, а впоследствии обратилось в суд.

В соответствии с абзацем 15 пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе, по урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства.

Порядок и процедура технологического присоединения, правила заключения, исполнения договора об осуществлении технологического присоединения урегулированы Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

Согласно пункту 6 Правил № 861 и статье 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами № 861. Указанный договор является публичным.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено этим кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в случаях, предусмотренных кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Условие о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению в относится к существенным условиям договора (пункт 16 Правил № 861).

Как предусмотрено пунктом 165 Правил № 861 нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Доказательства исполнения мероприятий технологического присоединения ответчик не представил, исковые требования не оспорил.

Поскольку ответчик нарушил взятые на себя обязательства, требование истца о расторжении договора заявлено правомерно, подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.  подлежат отнесению на ответчика.

Судебный акт выполнен в форме электронного документа, поэтому в соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ, он направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

В пункте 32 Постановления Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» разъяснено: судебный акт (копия судебного акта) считается полученным лицом, которому он в силу положений процессуального законодательства высылается посредством его размещения на официальном сайте суда в режиме ограниченного доступа, на следующий день после дня его размещения на указанном сайте (статьи 177, 186 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 и 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области

решил:

иск удовлетворить.

Расторгнуть договор от 15.10.2009 № 50-02/71, заключенный между публичным акционерным обществом «Россети Северо-Запад» и дачным некоммерческим товариществом «Поляна».

Взыскать с дачного некоммерческого товарищества «Поляна» в пользу публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» судебные расходы в сумме 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня принятия.

 

Судья                                                                                                              О.О. Новикова