Четвёртый арбитражный апелляционный суд

ул. Ленина 100б, Чита, 672000,    http://4aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А78-14834/2019

08 октября 2020 года

г. Чита

Резолютивная часть постановления объявлена 06 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 08 октября 2020 года.

Четвёртый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Куклина О.А., судей Капустиной Л.В., Бушуевой Е.М., при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Целлюлозно-промышленный комбинат «Полярная» на решение Арбитражного суда Забайкальского края от 01 июня 2020 года по делу №А78-14834/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью «Золотой лотос» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Целлюлозно-промышленный комбинат «Полярная» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 51 525 932,39 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО2, представитель по доверенности от 07.12.2019,

от ответчика - Син-ды О.В., представитель по доверенности от 13.01.2020,

и установил:

общество с ограниченной ответственностью «Золотой лотос» (далее – ООО «Золотой лотос») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Целлюлозно-промышленный комбинат «Полярная» (далее – ООО «ЦПК «Полярная») с требованием о взыскании задолженности в размере 51 525 932,39 руб.

Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 01.06.2020 с ООО «ЦПК «Полярная» в пользу ООО «Золотой лотос» взыскана задолженность в размере 51 525 932,39 руб. С ООО ЦПК «Полярная» в доход федерального бюджета взыскано 200 000 руб. государственной пошлины. С ООО «Золотой лотос» в доход федерального бюджета взыскано 3000 руб. государственной пошлины (отсроченной при рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер).

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить.

Как указывает заявитель жалобы, судом правильно установлен факт наличия неоплаченной задолженности. Однако, по мнению ответчика, судом не учтён пункт 12.2 договора подряда, согласно которому гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и оборудование, использованные при выполнении работ) составляет 12 месяцев с даты подписания акта приёмки законченного строительством объекта. Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий. В данном случае акт приёмки законченного строительством объекта отсутствует.

Заявитель также указывает, что судом не полностью учтён пункт 4.1 договора, в котором определён порядок оплаты выполненных работ. Как утверждает ответчик, в соответствии с договором подряда №BJX-JL-201709 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по титулу «Микрорайон Полярный» с дополнительным соглашением №1 от 30.10.2017 в общую сумму задолженности включены оставшиеся 5% от стоимости работ согласно акту о приёмке выполненных работ от 05.07.2019 на сумму 798 625 руб. Срок гарантии качества истекает 04.07.2020, соответственно и оплата 5% должна быть осуществлена 04.07.2020.

В соответствии с договором подряда №XLLS-2018-001 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по титулу «Объект капитального строительства Амазарского целлюлозного завода ООО «ЦПК «Полярная», расположенного по адресу: Забайкальский край, Могочинский район, в 8.3 км юго-восточнее пгт Амазар, так же включены оставшиеся 5% от стоимости работ согласно акту о приёмке выполненных работ от 25.08.2019 №1 на сумму 655 111 руб., срок гарантии качества истекает 24.08.2020, соответственно оплата 5% должна быть осуществлена 24.08.2020.

Истец отзыв на апелляционную жалобу не представил.

Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Изучив материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции установил следующее: 01.08.2017 между ООО «ЦПК «Полярная» (заказчиком) и ООО «Золотой Лотос» (подрядчиком) заключён договор подряда №BJX-JL-201708 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по титулу «Лесопильный завод в пос. Амазар», расположенный по адресу: 

<

...>, с дополнительным оглашением №1 от 30.12.2017.

Согласно данному договору подрядчик обязался выполнить комплекс работ, а именно: ремонт кровли, внутреннюю и наружную отделку основного склада ООО «ЦПК «Полярная», наружную отделку здания русского общежития, наружную отделку гостиницы, наружную и внутреннюю отделку общежития №5, устройство здания проходной, устройство помещения для хранения аккумуляторов РММ, изготовление и устройство контейнеров для твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО), благоустройство территории въезда и устройство наружного ограждения территории, уширение бетонных автомобильных дорог, устройство бетонных дорог и благоустройство территории и прочие работы на объекте «Лесопильный завод в пос. Амазар».

В силу пункта 2.3 договора подрядчик обязался выполнить все определённые договором строительно-монтажные и специальные работы в срок не позднее 31.12.2019.

Цена договора в соответствии с пунктом 3.1 дополнительного соглашения от 30.12.2017 составляет 61 000 000 руб. В соответствии с пунктом 4.1 договора оплата выполненных работ производится заказчиком на основании выставленного исполнителем счёта в следующем порядке:

- по строительно-монтажным работам в размере 80% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ за отчётный период;

- 15% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня подписания последнего акта о приёмке выполненных работ;

- оставшиеся 5% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня окончания срока гарантии качества сданных работ (12 месяцев).

Согласно пункту 4.2 договора расчёты по настоящему договору осуществляются платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя по курсу юаня Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на день перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств с банковского счёта заказчика на расчётный счёт исполнителя.

Из материалов дела усматривается, что истец в рамках реализации договора подряда выполнил предусмотренные им работы, сторонами были подписаны акты о приёмке выполненных работ от 18.06.2019 №03 за июнь 2019 года на сумму 2 435 912,37 руб., от 18.06.2019 №02 за июнь 2019 года на сумму 608 018,43 руб., от 18.06.2019 №01 за июнь 2019 года на сумму 12 075,72 руб., от 25.08.2017 за август 2017 года на сумму 6 250 041,85 руб., от 15.12.2017 №15 за ноябрь 2017 года на сумму 1 462 794,12 руб., от 15.12.2017 №14 за ноябрь 2017 года на сумму 607 691,44 руб., от 15.12.2017 №13 за ноябрь 2017 года на сумму 1 359 693,95 руб., от 15.12.2017 №12 за ноябрь 2017 года на сумму 184 210,07 руб., от 15.12.2017 №16 за ноябрь 2017 года на сумму 9 054 423,27 руб., от 15.12.2017 №01 за ноябрь 2017 года на сумму 2 767 325,3 руб., от 15.12.2017 №02 за ноябрь 2017 года на сумму 388 132,35 руб., от 15.12.2017 №03 за ноябрь 2017 года на сумму 430 462,04 руб., от 15.12.2017 №04 за ноябрь 2017 года на сумму 31 048,47 руб., от 15.12.2017 №05 за ноябрь 2017 года на сумму 1 165 541,14 руб., от 15.12.2017 №06 за ноябрь 2017 года на сумму 671 289,94 руб., от 15.12.2017 №07 за ноябрь 2017 года на сумму 89 247,92 руб., от 15.12.2017 №08 за ноябрь 2017 года на сумму 5 133 035,2 руб., от 15.12.2017 №09 за ноябрь 2017 года на сумму 304 573,6 руб., от 15.12.2017 №10 за ноябрь 2017 года на сумму 4 578 497,54 руб., от 15.12.2017 №11 за ноябрь 2017 года на сумму 80 104,27 руб., от 31.05.2019 №08 за май 2019 года на сумму 5 133 035,2 руб., от 31.05.2019 №10 за май 2019 года на сумму 304 573,6 руб., от 31.05.2019 №12 за май 2017 года на сумму 80 104,27 руб., от 31.05.2019 №11 за май 2019 года на сумму 4 578 497,54 руб., от 31.05.2019 №07 за май 2019 года на сумму 89 247,92 руб., от 31.05.2019 №06 за май 2019 года на сумму 671 289,94 руб., от 31.05.2019 №05 за май 2019 года на сумму 1 165 541,14 руб., от 31.05.2019 №04 за май 2019 года на сумму 31 048,47 руб., от 31.05.2019 №03 за май 2019 года на сумму 430 462,04 руб., от 31.05.2019 №02 за май 2019 года на сумму 388 132,35 руб., от 31.05.2019 №01 за май 2019 года на сумму 2 767 325,3 руб., от 31.05.2019 №18 за май 2019 года на сумму 9 054 423,27 руб., от 31.05.2019 №13 за май 2017 года на сумму 184 210,07 руб., от 31.05.2019 №14 за май 2019 года на сумму 1 359 593,95 руб., от 31.05.2019 №16 за май 2019 года на сумму 607 691,44 руб., от 31.05.2019 №17 за май 2019 года на сумму 1 462 794,12 руб., от 31.05.2019 №09 за май 2019 года на сумму 22 859 185 руб., от 31.05.2019 №15 за май 2019 года на сумму 6 250 042 руб.

То есть по договору №BJX-JL-201708 истцом выполнены, а ответчиком приняты работы на общую сумму 95 031 316,61 руб.

Ответчик встречные обязательства по оплате в полном объёме не выполнил, произвёл частичную оплату. Истец признаёт оплату в размере 32 387 112,18 руб., хотя ответчик подтвердил оплату лишь на 27 646 409,98 руб. С учётом позиции истца задолженность составляет 62 644 204,43 руб. Претензия истца с требованием об оплате работ на сумму 28 086 292,91 руб. оставлена ответчиком без удовлетворения.

01.09.2017 между ООО «ЦПК «Полярная» (заказчиком) и ООО «Золотой Лотос» (исполнителем) заключён договор подряда №BJX-JL-201709 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по титулу «Микрорайон Полярный» с дополнительным соглашением №1 от 30.10.2017.

Согласно данному договору подрядчик обязался выполнить комплекс работ, а именно: наружную отделку здания №4 объекта «Микрорайон полярный», расположенного по адресу: 

<

...>, а заказчик обязался принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном договором.

В силу пункта 2.3 договора подрядчик обязался выполнить все определённые договором строительно-монтажные и специальные работы в срок не позднее 31.12.2019.

В соответствии с пунктом 4.1 договора оплата выполненных работ должна производиться заказчиком на основании выставленного исполнителем счёта в следующем порядке:

- по строительно-монтажным работам в размере 80% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ за отчётный период;

- 15% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня подписания последнего акта о приёмке выполненных работ;

- оставшиеся 5 % от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня окончания срока гарантии качества сданных работ (12 месяцев).

Согласно пункту 4.2 договора расчёты осуществляются платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт субподрядчика по курсу юаня ЦБ РФ на день перечисления денежных средств на расчётный счёт субподрядчика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств с банковского счёта генерального подрядчика на расчётный счёт субподрядчика.

Пунктом 3.1 дополнительного соглашения №1 от 30.10.2017 стороны согласовали стоимость договора в размере 1 000 000 руб.

Согласно материалам дела истец в рамках реализации названного договора подряда выполнил предусмотренные им работы, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ от 05.07.2019 на сумму 798 625 руб.

Ответчик свои обязательства по оплате не выполнил. Претензия истца об оплате работ оставлена ответчиком без удовлетворения.

01.08.2017 между ООО «ЦПК «Полярная» (заказчиком) и ООО «Золотой Лотос» (исполнителем) заключён договор подряда №BJX-JL-201710 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по титулу «Лесопильный завод в пос. Амазар», расположенный по адресу: 

<

...>, с дополнительным соглашением №1 от 30.10.2017.

В соответствии с пунктом 1.1 данного договора подрядчик обязался выполнить комплекс работ, а именно: ремонт и расширение существующей пилорамы, разборка фундаментов под оборудование, замена грунтов, устройство бетонного покрытия на объекте «Лесопильный завод в пос. Амазар».

Заказчик обязался принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном договором.

В силу пункта 2.3 договора подрядчик обязался выполнить все определённые договором строительно-монтажные и специальные работы в срок не позднее 31.12.2019.

В соответствии с пунктом 4.1 договора оплата выполненных работ должна производиться заказчиком на основании выставленного исполнителем счёта в следующем порядке:

- по строительно-монтажным работам в размере 80% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ за отчётный период;

- 15% от стоимости работ, указанных в актах о приемке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня подписания последнего акта о приёмке выполненных работ;

- оставшиеся 5% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня окончания срока гарантии качества сданных работ (12 месяцев).

Согласно пункту 4.2 договора расчёты осуществляются платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт субподрядчика по курсу юаня ЦБ РФ на день перечисления денежных средств на расчётный счёт субподрядчика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств с банковского счёта генерального подрядчика на расчётный счёт субподрядчика.

Пунктом 3.1 дополнительного соглашения №1 от 30.10.2017 стороны согласовали стоимость договора в размере 11 000 000 руб.

Истец в рамках реализации названного договора подряда выполнил предусмотренные им работы, сторонами подписаны акты о приёмке выполненных работ от 31.05.2019 за май 2019 года на сумму 4 597 382,94 руб., от 13.09.2018 №1 на сумму 5 948 386,25 руб., итого 10 545 769,19 руб.

Истец утверждает, что ответчик свои обязательства по оплате работ по договору №BJX-JL-201710 не выполнил, оставив претензию без удовлетворения. Однако заявитель жалобы представил в дело платёжное поручение №194 от 25.01.2019, которым в счёт оплаты по указанному договору истцу перечислено 4 740 702,20 руб. То есть фактически задолженность ответчика по договору №BJX-JL-201710 подтверждается на сумму 5 805 066,99 руб.

10.09.2017 между ООО «ЦПК «Полярная» (заказчиком) и ООО «Золотой Лотос» (исполнителем) заключён договор подряда №BJX-JL-201711 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по муниципальным объектам городского поселения «Амазарское», расположенным по адресу: Забайкальский край, Могочинский район, городское поселение «Амазарское», с дополнительным соглашением от 30.10.2017 №1.

Согласно данному договору подрядчик обязался выполнить комплекс работ, а именно: устройство 2-х беседок для отдыха на берегу реки Амазар, устройство бетонного покрытия территории памятника павшим в годы Великой Отечественной войны, строительство гаража для школьного автобуса и прочие работы на муниципальных объектах городского поселения «Амазарское», расположенного по адресу: Забайкальский край, Могочинский район, городское поселение «Амазарское», а заказчик обязался принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном договором.

В силу пункта 2.3 договора подрядчик обязался выполнить все определённые договором строительно-монтажные и специальные работы в срок не позднее 31.10.2017.

В соответствии с пунктом 4.1 договора оплата выполненных работ должна производиться заказчиком на основании выставленного исполнителем счёта в следующем порядке:

- по строительно-монтажным работам в размере 80% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ за отчётный период;

- 15% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня подписания последнего акта о приёмке выполненных работ;

- оставшиеся 5 % от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня окончания срока гарантии качества сданных работ (12 месяцев).

Согласно пункту 4.2 договора расчёты осуществляются платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт субподрядчика по курсу юаня ЦБ РФ на день перечисления денежных средств на расчётный счёт субподрядчика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств с банковского счёта генерального подрядчика на расчётный счёт субподрядчика.

Пунктом 3.1 дополнительного соглашения №1 от 30.10.2017 стороны согласовали срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 договора, не позднее 31.10.2019 и стоимость договора – 3 000 000 руб.

Истец в рамках реализации названного договора подряда выполнил предусмотренные им работы, сторонами подписаны акты о приёмке выполненных работ от 15.12.2017 на сумму 963 123 руб., от 31.05.2019 №2 на сумму 1 376 482 руб., итого 2 339 605 руб.

Ответчик произвёл частичную оплату в размере 1 871 684 руб. Оставшуюся сумму долга 467 921 руб. не оплатил. Претензия истца об оплате работ оставлена ответчиком без удовлетворения.

01.03.2018 между ООО «ЦПК «Полярная» (заказчиком) и ООО «Золотой Логос» (исполнителем) заключён договор подряда №XLLS-2018-001 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по титулу «Объект капитального строительства Амазарского целлюлозного завода ООО «ЦПК «Полярная», расположенного по адресу: Забайкальский край, Могочинский район, в 8,3 км юго-восточнее пгт Амазар.

Согласно данному договору подрядчик обязался выполнить комплекс работ, а именно: устройство ограждения территории Амазарского целлюлозного завода, строительство временного гаража для автомобилей РММ и прочих вспомогательных видов работ, а заказчик обязался принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном договором.

В силу пункта 2.3 договора подрядчик обязался выполнить все определённые договором строительно-монтажные и специальные работы в срок не позднее 31.12.2019.

В пункте 3.1 договора стороны согласовали стоимость договора – 20 000 000 руб.

В соответствии с пунктом 4.1 договора оплата выполненных работ должна производиться заказчиком на основании выставленного исполнителем счёта в следующем порядке:

- по строительно-монтажным работам в размере 80% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течении 5 банковских дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ за отчётный период;

- 15% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня подписания последнего акта о приёмке выполненных работ;

- оставшиеся 5% от стоимости работ, указанных в актах о приёмке выполненных работ, выплачиваются в течение 5 банковских дней со дня окончания срока гарантии качества сданных работ (12 месяцев).

Согласно пункту 4.2 договора расчёты по настоящему договору осуществляются платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт субподрядчика по курсу юаня ЦБ РФ на день перечисления денежных средств на расчётный счёт субподрядчика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств с банковского счёта генерального подрядчика на расчётный счёт субподрядчика.

Истец в рамках реализации названного договора подряда выполнил предусмотренные им работы, сторонами подписаны акты о приёмке выполненных работ от 18.06.2019 №1 на сумму 3 969 683,14 руб., от 18.06.2019 №2 на сумму 504 938,32 руб., от 25.08.2019 №1 на сумму 655 111 руб., от 05.07.2019 №2 на сумму 1 789 148,33 руб., от 31.05.2019 №1 на сумму 5 041 467,50 руб., всего на общую сумму 11 960 498,29 руб.

Ответчик свои обязательства по оплате в полном объёме не выполнил, произвёл частичную оплату в размере 333 174 руб. Оставшуюся часть задолженности в сумме 11 627 324,29 руб. не оплатил. Претензия истца с требованием об оплате работ оставлена ответчиком без удовлетворения.

Таким образом, материалами дела с учётом актов приёмки выполненных работ и представленных ответчиком в дело платёжных поручений подтверждается общий размер задолженности последнего перед истцом в сумме 81 343 141,71 руб. Истцом в рамках настоящего дела предъявлены ответчику требования на сумму 51 525 932,39 руб.

Оценив представленные в дело доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд апелляционной инстанции пришёл к следующим выводам: правоотношения сторон вытекают из договоров подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Как уже отмечено выше, материалами дела подтверждается факт выполнения истцом по заданию ответчика работ на общую сумму 120 675 814,09 руб.

В соответствии с требованиями статей 309 и 711 ГК РФ ответчик обязан полностью оплатить выполненные истцом и принятые без замечаний работы. Указанные обязательства заявитель жалобы исполнил частично. Материалами дела подтверждается оплата на сумму 34 591 970,18 руб. Кроме того, по договору №BJX-JL-201708 истец признаёт неподтверждённую платёжными поручениями оплату на сумму 4 740 702,20 руб.

То есть установленный судом апелляционной инстанции из материалов дела размер задолженности составляет 81 343 141,71 руб. Как уже указано выше, истец предъявляет ответчику к оплате только 51 525 932,39 руб. основного долга.

Изложенные ответчиком в апелляционной жалобе доводы о том, что истец неправомерно предъявил ему 5% от цены договоров, оплата которых была предусмотрена в течение 5 банковских дней со дня окончания срока гарантии качества сданных работ (12 месяцев), суд апелляционной инстанции оценивает критически, поскольку выявленная судом разница между подтверждённым объёмом задолженности и ценой иска многократно превышает 5%, о которых говорит ответчик.

Кроме того, в настоящее время срок оплаты данных 5% уже наступил, однако заявитель жалобы задолженность перед истцом так и не оплатил.

Таким образом, основания для удовлетворения иска на сумму 51 525 932,39 руб. имеются.

Учитывая наличие очень существенной разницы между подтверждённым материалами дела объёмом задолженности и ценой иска, суд апелляционной инстанции в целях исключения возможности создания сторонами фиктивной кредиторской задолженности ответчика исследовал вопросы о реальности хозяйственных операций и о наличии признаков аффилированности сторон.

Реальность хозяйственных операций подтвердилась истребованными судом апелляционной инстанции у ответчика платёжными поручениями, подтверждающими фактическое перечисление оплаты по указанным выше договорам подряда.

Доказательств аффилированности истца и ответчика суд не выявил.

Следовательно, никаких оснований для отказа истцу в удовлетворении его требований не усматривается.

Таким образом, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

Руководствуясь статьями 268 – 271 АПК РФ, Четвёртый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 01 июня 2020 года по делу №А78-14834/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение 2-х месяцев с даты принятия.

Председательствующий                                                         О.А. Куклин

Судьи                                                                                      Л.В. Капустина

                                                                                                 Е.М. Бушуева