АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041 Россия, Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 5

тел. (4872) 250-800, E-mail: info@tula.arbitr.ru, http://www.tula.arbitr.ru

Р Е Ш Е Н И Е

город Тула                                Дело № А68-11299/2023

Резолютивная часть решения принята 07 декабря 2023 года

Решение изготовлено в полном объеме 14 декабря 2023 года

Арбитражный суд Тульской области,  в составе судьи Чигинской Н.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в заседании дело по исковому заявлению ООО «СвязьСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН1028600601831) к ООО «ИГНИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 239 247 523 руб. 78 коп.,

при участии в заседании: от истца  – ФИО2, доверенность, диплом;

       от ответчика  – ФИО3, доверенность, диплом

УСТАНОВИЛ:

ООО «СвязьСтройМонтаж» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к ООО «ИГНИС» о взыскании долга в сумме 239 247 523 руб. 78 коп. по договору № ПГС-ССМ ДП 03/02/22 от 03.03.2022. 

Изучив материалы дела, выслушав мнение сторон, суд установил, что ООО «ПРОМГАЗСЕТИ» (Генподрядчик - ответчик) и ООО «СвязьСтройМонтаж» (Субподрядчик- истец) заключили договор № ПГС-ССМ ДП 03/02/22 от 03.03.2022, на основании п. 1.1 которого  «СвязьСтройМонтаж» (Субподрядчик) обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: Наружные сети газоснабжения от ГРП 2 ОЭЗ ППТ «Узловая» I этап (далее по тексту - работы, объект) в соответствии с проектной и рабочей документацией (Приложение № 1 к договору), техническим заданием (Приложение № 4 к договору), в сроки, установленные графиком выполнения строительно-монтажные работ (Приложение № 2 к договору), а Генподрядчик - принять и оплатить работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями договора.

Пунктом 1.3 договора предусмотрено, что результатом выполненной работы является построенный объект капитального строительства в отношении которого подписан акт приемки законченного строительством объекта газораспределения.

Генподрядчик обязуется обеспечить контроль за осуществлением субподрядчиком работ и приемку в эксплуатацию объекта, а также принять и оплатить надлежащим образом выполненные субподрядчиком работы.

Дата начала работ – дата заключения договора, дата окончания работ – не позднее 22 мая 2023 года в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (п. 3.5 договора).

Согласно п. 2.4 договора оплата за выполненные работы производится Генподрядчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств в размере суммы выполненных работ по каждому этапу выполнения работ, предусмотренному графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к договору), на расчетный счет Субподрядчика после подписания Генподрядчиком акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (Приложение № 7 к договору), на основании акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (Приложение № 7 к договору), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленного на основе сметы договора (Приложение №1 к договору), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета-фактуры, выставленных Субподрядчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента поступления оплаты по контракту от 31.01.2022 №1266000000521000003.

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе, их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения этапов работ на основании сметы договора, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ, условиями договора, в соответствии с ГК РФ.

Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, является акт сдачи-приемки этапа выполненных работ (по форме приложения № 7), подписанный в установленном договором порядке (п. 2.4.1).

Пунктом 5.3.12 договора предусмотрено, что Субподрядчик обязан известить Генподрядчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Генподрядчиком, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения работ Генподрядчиком в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Генподрядчика Субподрядчик, обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генподрядчика», а затем восстановить ее за свой счет. 

Каждую рабочую пятницу Субподрядчик в силу п. 5.3.19 обязан в течение всего срока выполнения работ предоставлять фотоотчет на электронную почту Генподрядчика, а также ежедневно направлять ежедневную сводку по объемам выполненных работ (п. 5.3.20).

Пунктом 5.3.31 предусмотрено, что Субподрядчик обязан передать Генподрядчику исполнительную; документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения, заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям, оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетические (или) получения заключения федерального государственного экологического надзора и (или) получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федераций в области, охраны окружающей среды), и (иди) подписания акта приемки законченного строительством объекта газораспределения.

Субподрядчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с  даты подписания Генподрядчиком акта приемки законченного строительством объекта газораспределения обязан освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федераций в области обращения с отходами производства и потребления и направить Генподрядчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям договора (п. 5.3.32 договора).

Письмом от 10.10.2022 № 101022-1 ответчик требовал от истца немедленно выйти на площадку и приступить к выполнению работ

Истец по электронной почте с письмом от 17.01.2023 № 11-11-16 направил ответчику документы о выполнении работ, сканы которых последний подписал и направил в адрес истца.

20.01.2023 письмом № 200123-1 ответчик уведомил истца о том, что сканы документов были подписаны ошибочно, выполнение работ не подтвердил, напротив указал, что субподрядчик на стройплощадку так и не вышел, оригиналы документов сторонами подписаны не были, в связи с чем, генподрядчик утратил интерес к исполнению заключенного договора.

Ответчик работы не оплатил, в связи с чем, истец направил ответчику претензию от 25.08.2023 № 11-11-418 с требованием оплатить выполненные работы в сумме 239 247 523 руб. 78 коп.

Ответчик в ответе от 28.08.2023 № 280823-1 на претензию подтвердил факт получения от истца по электронной почте 17.01.2023 пакета документов о выполнении работ по договору, однако указал, что акты были подписаны ошибочно и отозваны письмом от 20.01.203 № 200123-1. Ответчик также ссылается на то, что субподрядчик на стройплощадку не вышел, к выполнению работ не приступил.

Поскольку работы не оплачены, истец обратился в суд с настоящим иском.

Истец в заседаниях поддержал свое требование.

Ответчик возражал, настаивая на том, что работы истец не выполнял.

Суд считает, что требование не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Следовательно, основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата заказчику.

Проверяя доводы ответчика о неисполнении истцом своих обязательств, суд установил, что в силу пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Пунктом 7.4 договора предусмотрено, что при окончании; отдельных этапов работ, подлежащих проверке и приемки по договору, Субподрядчик обязан письменно уведомить Генподрядчика об их завершении.

Генподрядчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней (включая проведение экспертизы) со дня получения от Субподрядчика уведомления о завершении этапа работ либо уведомления о завершении строительства объекта и прилагаемых документов, указанных в пунктах 7.4 или 7.12 договора:

осуществляет осмотр выполненных работ при участии Субподрядчика;

осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной документации;

подписывает представленные акты сдачи-приемки этапа выполненных работ или акты сдачи-приемки последнего этапа выполненных работ и акты приемки законченного строительством объекта сети газораспределения, либо направляет Субподрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи н доставки корреспонденции) мотивированный отказ (Приложение № 8 к договору) с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации и с указанием сроков их устранения.

Между тем, судом установлено, что Субподрядчик не уведомлял Генподрядчика о завершении ни этапов работ, ни окончания выполнения работ, соответственно, ответчик в приемке работ не мог участвовать.

Более того, суд истребовал у истца исполнительную документацию, однако в заседании представитель субподрядчика пояснил, что она у него отсутствует, в то время, как договором предусмотрено, что работы должны быть выполнены из материалов субподрядчика, соответственно документы, подтверждающие закупку материалов, их транспортировку к месту выполнения работ должны быть у истца.

Одновременно ответчиком представлены документы о выполнении этих работ непосредственно самим ответчиком.

Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

В силу п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах суд считает, что истец не доказал факт выполнения работ, поэтому его требование не может быть удовлетворено.

Госпошлина по иску составляет 200 000 руб. Истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины. Поскольку суд отказал истцу в удовлетворении требования, то госпошлину в сумме 200 000 руб. суд взыскивает с истца в доход бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                                                  Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тульской области.

Судья              Н.Е. Чигинская