АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                                      Дело № А65-34048/2023 

Дата принятия решения –  06 марта 2024 года.

Дата объявления резолютивной части –  22 февраля 2024 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Держава-Энергопромстрой", г.Самара, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Вента", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании заключить дополнительное соглашение,

с участием:

от истца  – ФИО2, доверенность от 30.07.2023г.,

от ответчика  – ФИО3, доверенность от 25.07.2023г.,

установил:

Истец - Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Энергопромстрой",  - обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью "Вента", г.Казань  об обязании заключить дополнительное соглашение.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал, дал пояснения.

Ответчик высказал возражения по мотивам, изложенным в письменном отзыве.

Исследовав материалы дела, суд не находит правовых оснований для удовлетворения исковых требований по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что между сторонами заключен договор субподряда 05/04/2022-1 от 04.04.2022.

  Согласно п.1.1 договора Подрядчик (ответчик) обязуется по заданию Подрядчика (истец) и в соответствии с утвержденной проектной документацией построить объект: Реконструкция оросительной системы ООО А/ф "Чистопольская" у с Галактионово Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, включая все строительно-монтажные работы (далее - «Работ»), согласно проектной документации, и сдать результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его а порядке, предусмотренном Договором.

В пункте 1.2. Договора субподряда указано, что Цена договора включает в себя всерасходы Субподрядчика и учитывает содержание, объем и сложность работ,предусмотренных настоящим Договором и определена сметным расчетом. Согласно п.3.1, Общая цена всех Работ, материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору (далее - Цена договора), является твердой и составляет 23 529 351 (двадцать три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч триста пятьдесят один) рубль, в том числе НДС 20% за весь Объект, в соответствии проектно-сметной документацией (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

Превышение субподрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные Подрядчиком (соответствующим дополнительным соглашением), оплачиваются Субподрядчиком за свой счет. Возможные допущенные Субподрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определение объемов работ, количества материалов, иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения Цены договора.

Пунктом 3.2 установлено, что  Цена выполняемых работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все расходы Субподрядчика, в том числе прямо не упомянутых, без изменения цены. Стороны пришли к соглашению, что в случае необходимости в дополнительных работах, по инициативе Подрядчика, цена может увеличиться ровно на стоимость дополнительных работ. Данные изменения будут отражаться в Дополнительных соглашениях.

Исковые требования мотивированы тем, что после составления окончательного локального сметного расчета истец подготовил акт о приемке выполненных работ за отчетный период исполнения работ с 01.08.2022-31.08.2022 на сумму 59 416 107, 49 рублей, включая НДС. 

Согласно Дополнительному соглашению №2 от 4.07.2023г., п.1.2. договора субподряда № 05/04/22-1 от 05.04.2022 года дополнить следующими словами:

После передачи от Заказчика Субподрядчику проектной документации в полном объеме, а также сводного сметного расчета или локальной сметы на строительство, а также после оплаты  субподрядчику основного объема выполненных работ — Субподрядчик вправе произвести инвентаризацию проекта, инвентаризацию полного цикла работ соответствующих технологии строительного производства   с учетом ГОСТ, ПУЭ.СНиП , а Подрядчик обязан принять установленные изменения и увеличение работ, при представлении актов КС2 и КСЗ подписать их или высказать обоснованные возражения по актам, при принятии работ произвести оплату указанных работ

Субподрядчик вправе с учетом вышеприведенного абзаца вправе   пересчитать смету на строительство объекта, с тем   чтобы она включала в себя фактические выполняемые субподрядчиком физические объемы работ. Измененная смета, ИТД направляется Подрядчику, в порядке установленном договором субподряда для согласования , и Подрядчик , после получения измененной сметы в течении пяти рабочих дней принимает смету.

Статьями 307 – 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. 

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов (абз. 1 п. 6 ст. 709 ГК РФ).

Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается.

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором (часть 1 статьи 450 ГК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или договором.

В силу части 1 статьи 451 ГК РФ основанием для изменения договора является существенное изменение обстоятельств.

При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

По смыслу части 2 статьи 451 ГК РФ если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор, может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Для применения данного нормативного положения существенное изменение обстоятельств, позволяющее корректировать условия договора, предполагает собой наличие объективных причин, не зависящих от воли участников соответствующих правоотношений.

Лицо, требующее изменения действующего договора, должно доказать наличие существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, а также совокупность перечисленных в пунктах 1 - 4 части 2 статьи 451 ГК РФ.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

С учетом изложенного, требования истца об обязании заключить дополнительное соглашение не может быть удовлетворено судом. 

Расходы по уплате госпошлины согласно ст. 110 АПК РФ относятся на истца.

 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

В иске отказать.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

 

Председательствующий судья                                                                     Ю.Н. Галеева