100236_6060423  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А60-51330/2016

31 января 2017 года

г. Екатеринбург

 

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью СТРОЙОТДЕЛ  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца с момента  вступления в законную силу решения суда по настоящему делу безвозмездно  устранить недостатки в работах, выполненных по договорам № 262/2014-ГК/Д  от 04.12.2014 г., № 263/2014-ГК/Д от 04.12.2014 г. в квартирах в жилом доме по  адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, уд. Дзержинского, 24  следующим способом:  

- в квартире № 3 произвести очистку стен до кирпича (блока), обеспечить  просушку, провести обработку составом «антиплесень», отделочные работы  (штукатурка, шпатлевка, окраска или оклейка обоев). Осуществить демонтаж  подоконной доски, утеплить швы оконного блока, установить подоконную  доску по ГОСТ с утеплением и герметизацией примыкания к оконному блоку.  

- произвести малярные работы примыкания подоконной доски к стене. 

- в квартире № 11 произвести очистку отслаивающейся штукатурки,  огрунтовку, восстановление штукатурного слоя, с последующей окраской.  Произвести очистку стен до кирпича (блока), обеспечить просушку, провести  обработку составом «антиплесень», отделочные работы (штукатурка,  шпатлевка, окраска или оклейка обоев), произвести очистку вентиляционных  каналов.  

- в квартире № 35 произвести очистку стен от старой краски, после чего  произвести огрунтовку, шпатлевку, окраску.  

- в квартире № 42 осуществить демонтаж подоконной доски, утеплить  монтажные швы оконного блока, установить подоконную доску по ГОСТу с  утеплением и герметизацией примыкания к оконному блоку. Произвести  малярные работы примыкания подоконной доски к стене.  

- в квартире 51 произвести очистку стен до кирпича (блока), обеспечить  просушку, провести обработку составом «антиплесень», отделочные работы  (штукатурка, шпатлевка, окраска или оклейка обоев).  

- в квартире 55 произвести демонтаж плинтуса, утеплить швы  примыкания балконного блока, при необходимости произвести  восстановительные малярные работы, установить плинтус. В кухне  переустановить дверь.  

- в квартире 58 произвести очистку стен до кирпича (блока), обеспечить  просушку, провести обработку составом «антиплесень», отделочные работы  (штукатурка, шпатлевка, окраска или оклейка обоев).  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СТРОЙОТДЕЛ  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.  

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня  принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная  жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,  размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»