РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-45722/25-110-395 

16.06.2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 21.05.2025

Решение в полном объеме изготовлено 16.06.2025

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булаховой М.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "КАПСТРОЙ" (109428, Г.МОСКВА, УЛ. ЗАРАЙСКАЯ, Д. 21, ПОМ/ОФИС 207.4/0103, ОГРН: 1187746104479) к обществу с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (109428, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д. 22, К. 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩ./КОМ. 9/XV/21, ОГРН: 1167746557087) о взыскании 86 746 074,69 рублей,

при участии:

от истца – ФИО1 по дов. от 23.04.2025,

от ответчика- не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КАПСТРОЙ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" о взыскании 63 594 567 руб. 60 коп. задолженности по договору субподряда № 01/23-ОСК от 15.03.2023 г., 23 151 507 руб. 09 коп. неустойки.

Ответчик в заседание не явился, спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123, 156 АПК РФ, иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

 Заслушав представителя истца, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Как усматривается из материалов дела, между ООО «ОСК» (Заказчик) - Ответчиком и ООО «Капстрой» (Субподрядчик) - Истцом был заключен Договор субподряда № 01/23-ОСК от «15» марта 2023 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от 12.12.2024 г. (далее по тексту - Договор).

Согласно пункту 1.1. Договора Субподрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить работу по устройству чаши захоронения и вывоз образующихся при выполнении работ отходов (далее - «работы»), виды, объем которых определены договором, приложениями к нему, которые, после их подписания Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, на объекте: «Комплекс по переработке и размещению отходов в Солнечногорском муниципальном районе (городском округе Солнечногорск) Московской области», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0050626:2636 (2 этап)», а Заказчик обязуется принять выполненные работы.

Пункт 1.3. Договора устанавливает, что срок выполнения работ до 31.12.2025 г. (с учетом изменений срока выполнения ДС № 2 от 12.12.2024 г.).

В соответствии с пунктом 2.1. Договора цена работ указывается в Локальных сметных расчетах (приложение к Договору) и составляет 877 316 082, 00 рублей (восемьсот семьдесят семь миллионов триста шестнадцать тысяч восемьдесят два рубля 00 копеек), включая НДС 20% в сумме 146 219 347,00 рублей.

В соответствии с пунктом 2.2. Договора оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств, с расчетного счета Заказчика на счет Субподрядчика, в следующем порядке:

2.2.1. На основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, в течение 3 (трех) банковских дней, с момента подписания соответствующих документов (КС-2, КС-3), Заказчик оплачивает выполненные работы.

При этом п. 3.1. Договора установлено, что сдача-приемка выполненных работ производится Субподрядчиком поэтапно, в зависимости от выполнения Субподрядчиком определенного этапа работ. По мере выполнения работ Субподрядчик обязуется передавать Заказчику два экземпляра акта приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и два экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, счет-фактуру, счет на оплату, а также полный комплект исполнительной документации в отношении выполненного объема работ. При этом все работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены не позднее последнего дня срока, указанного в п. 1.3. Договора.

В обоснование своего требования истец сослался на те обстоятельства, что им надлежащим образом была выполнена часть работ, предусмотренных Договором, на сумму 111 594 567,60 рублей, при этом, ответчик работы не оплатил.

Выполнение работ подтверждается подписанными с обеих сторон Актом приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 от 28.06.2024 г., и Справкой о стоимости выполненных работ По унифицированной форме КС-3 от 28.06.2024 за период выполнения работ с 12.04.2023 по 28.06.2024 г.

Также между сторонами подписана счет-фактура № 4 от 28.06.2024 (по форме УПД) на сумму 111 594 567,60 рублей.

Между Сторонами подписан Акт сверки взаимных расчетов за период с 15.03.2023 по 31.12.2024 по состоянию на 31.12.2024г., который подтверждает наличие задолженности у Ответчика перед Истцом в размере 63 594 567,60 рублей.

Ответчик произвел частично оплату стоимости выполненных работ 17.12.2024 г. на сумму 48 000 000,00 рублей, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2024г.

Таким образом, задолженность ответчика составляет: 111 594 567,60 - 48 000 000,00 = 63 594 567,60 рублей

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный двором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить е строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 740 ГК РФ).

Из. п. 1 ст. 746 ГК РФ следует, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии со статьей 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, безосновательный односторонний отказ от подписания акта недопустим.

В соответствии с п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Ответчик доказательств погашения задолженности не представил.

Таким образом, требование о взыскании 63 594 567 руб. 60 коп. подлежит удовлетворению.

Пунктом 6.3. Договора предусмотрено, что Заказчик, в случае нарушения своих обязательств по оплате выполненных работ (срока оплаты работ), несет ответственностью в виде пени в размере 0,1 % от стоимости не оплаченных работ, за каждый день просрочки.

Стороны подписали КС 2 и КС 3 - 28.06.2024, оплатить Ответчик в соответствии с п. 2.2. Договора должен был не позднее 03.07.2024 г.

Истцом представлен расчет:

Расчёт процентов по задолженности, возникшей с 04.07.2024 по 26.02.2025

Задолженность

Период просрочки

i

Формула Неустойка

с

по дней

111 594 567,60

04.07.2024

17.12.2024 167

111 594 567,60 x 167 x0.1%

18 636 292,79 р.

-45 000 000,00

17.12.2024

Оплата задолженности

66 594 567,60

18.12.2024

17.12.2024 0 66 594 567,60 х 0 х 0.1%

0,00 р.

-3 000 000,00

17.12.2024

Оплата задолженности

63 594 567,60

18.12.2024

26.02.2025 ! 71

63 594 567,60 х 71 х 0.1%

4 515 214,30 р.

Итого:

23 151 507,09 руб.

Сумма основного долга: 63 594 567,60 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 23 151 507,09 руб.

Размер неустойки составил 23 151 507 руб. 09 коп.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ( 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "КАПСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>) 63 594 567 руб. 60 коп. задолженности , 23 151 507 руб. 09 коп. неустойки, 908 730 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко