АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Дело №А27-13435/2023

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

именем Российской Федерации

22 апреля 2024 г.                                                                                                   г. Кемерово

Резолютивная часть решения объявлена 8 апреля 2024 г.

Решение в полном объеме изготовлено 22 апреля 2024 г.

          Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Куликовой Т.Н, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Балдиной И.В.,   рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТС-Спецстрой", г. Новокузнецк, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> 

к министерству строительства Кузбасса, г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> 

об увеличении цены государственного контракта №21/038 от 17.05.2021,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, государственное бюджетное учреждение "Главное строительное управление Кузбасса (ИНН: 

<

***>),   

при участии: от истца (онлайн) – ФИО1, доверенность от 01.06.2023, паспорт, диплом; 

от ответчика – ФИО2 доверенность от 18.12.2023 г., паспорт, диплом.

от третьего лица - ФИО3, доверенность от 20.11.2023, паспорт, диплом.

у с т а н о в и л :

общество с ограниченной ответственностью "ТС-Спецстрой" обратилось в суд с иском к министерству строительства Кузбасса об увеличении цены государственного контракта №21/038 от 17.05.2021.

Исковые требования мотивированы  существенным удорожанием стоимости строительных ресурсов, реализацией истцом мер поддержки в соответствии с Постановлением Правительства от 09.08.2021 №1315.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, заявив об их изменении в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятых судом к рассмотрению.

Представитель ответчика возразил в отношении предъявленных требований по основаниям, изложенным в представленном ранее отзыве, в том числе указала на несоблюдение совокупности условий, предусмотренных Постановлением Правительства от 09.08.2021 №1315; неверность арифметических расчётов.

Представитель третьего лица поддержал свою позицию, изложенную ранее в письменных пояснениях.

Заслушав представителей участвующих в деле лиц, изучив представленные в дело доказательства, суд установил следующее.

Между Министерством строительства Кузбасса, (далее - Заказчик) и ООО «ТС- СпецСтрой» (далее - Подрядчик) заключен Государственный контракт № 21/038 на выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства от «17» мая 2021 года.

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения №10 от 04.07.2022г. «Цена контракта (работ) составляет 361 995 804 (триста шестьдесят один миллион девятьсот девяноста пять тысяч восемьсот четыре) рубля 20 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее -НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов 60 332 634 (шестьдесят миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот тридцать четыре) рубля 03 копейки»

В связи с существенным удорожанием стоимости строительных ресурсов ООО «ТС-СпецСтрой» обратилось к Заказчику - Министерству строительства Кузбасса с предложением увеличить стоимость Контракта на сумму, не превышающую 30% от цены государственного контракта, согласно Постановлению №1315. В ответ на предложение Заказчик потребовал предоставить ООО «ТС-СпецСтрой» в адрес Минстроя Кузбасса предложение об изменении существенного условия контракта (цены контракта) в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение (ответ приложен к исковому заявлению).

После выполнения работы по конъюнктурному анализу, составлению сводных сметных расчетов, сбору прайс-листов ООО «ТС-СпецСтрой» обратилось к заказчику с обосновывающим предложением увеличить стоимость Контракта (ответ приложен к исковому заявлению).

Заказчик подписал сводный сметный расчет стоимости строительства, конъюнктурный анализ и прайс-листы (приложены к исковому заявлению). 

Также Заказчиком было направлено письмо о плановом финансировании объекта за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №461 (приложен к исковому заявлению).

В связи с удорожанием стоимости строительных ресурсов, существенно изменилась стоимость заключённого контракта, в подтверждение чего представлено  положительное заключение государственной экспертизы № 42-1-1-2-001565-2023 от 18.01.2023г. 

С целью поддержки заказчиков и подрядных организаций в сложившихся экономических условиях в связи с ростом стоимости строительных ресурсов в 2021 году постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. N 1812 и от 31 декабря 2021 г. N 2594) (далее - Постановление N 1315) установлена возможность изменять цену действующего контракта (не более чем на 30%) стоимостью более 1 млн. руб., заключенного в соответствии с Законом N 44-ФЗ для обеспечения федеральных нужд до 1 января 2022 г., предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в связи с ростом цен на строительные ресурсы, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа. 

Таким образом, после двустороннего волеизлияния сторон контракта о повышении его цены на основании Постановления №1315 была пройдена государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости, которая получила положительное заключение. Цена контракта составила 427 489 264.49 руб. (четыреста двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят четыре рубля 49 копеек), в т.ч. НДС (20%) 71 248 210.75 руб. (семьдесят один миллион двести сорок восемь тысяч двести десять рублей 75 копеек).

На основании вышеизложенного, ООО «ТС-СпецСтрой» было направлено дополнительное соглашение об изменении цены контракта на 427 489 264,49 руб. (приложен к исковому заявлению).

На указанное предложение ответчик направил отказ от увеличения стоимости контракта №МС-01/2667 от 05.06.2023г. (ответ приложен к исковому заявлению)

Истец ссылается, что в результате отказа Заказчика увеличить цену контракта ООО «ТС-СпецСтрой» лишен финансирования для окончательного завершения работ по контракту, на основании чего Подрядчиком в адрес Заказчика было направлено уведомление о приостановке исполнения обязательств по Государственному контракту №21/038 от 15.05.2021г. (приложен к исковому заявлению).

Полагая, что отказ Заказчика увеличить цену контракта (письмо от 05.06.2023г. исх. №МС-01/2667) с учетом предварительно проделанной Сторонами совместной работой направленной на увеличение цены контракта, является недобросовестным поведением, истец обратился с настоящим исковым заявлением в арбитражный суд.

По общему принципу, изложенному в пункте 1 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства, одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

Согласно пункту 6 статьи 709 ГК РФ подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

Частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ установлено, что при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

Постановлением N 1315 установлены особенности изменения существенных условий контракта, заключенного в соответствии с Законом N 44-ФЗ, для обеспечения федеральных нужд в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы.

Так, согласно подпункту "а" пункта 2 Постановления N 1315 при исполнении контракта допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Закона N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к указанному Постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

- изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

- предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

- размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (в редакции настоящего постановления);

- изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

- контракт заключен до 31.12.2022 и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

Из материалов дела следует, что на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 42-1-1-3-045710-2021 от 17.08.2021г. (Приложение к исковому заявлению №2), положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости №42-1-1-2-075012-2021 от 08.12.2021г. (Приложение №3) стоимость контракта составила 361 995 804 (триста шестьдесят один миллион девятьсот девяноста пять тысяч восемьсот четыре) рубля 20 копеек с учетом НДС 20%, на основании чего  сторонами были подписаны следующие дополнительные соглашения в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств:

1.         Дополнительное соглашение №8 от 24.12.2021г. на сумму 270 808 108,15руб. (в данное соглашение не включены комплексы: восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений, вырубка деревьев, подготовительные работы, полы, внутренняя отделка, технологическое оборудование, испытание свай, вертикальная планировка, затраты на технологическое присоединение к сетям связи);

2.         Дополнительное соглашение №9 от 20.05.2022г. на сумму 325 857 244, 07руб. (в данное соглашение не включены комплексы: вертикальная планировка, затраты на технологическое присоединение к сетям связи);

3.         Дополнительное соглашение №10 от 04.07.2022г. на сумму 362 995 804,20 руб. (данное соглашение предусматривает все комплексы работ, предусмотренные проектом и сметой, прошедшей государственную экспертизу (Приложение к исковому заявлению №3)).

Из материалов дела также усматривается, что с марта 2022г. стороны согласовывали повышение цены контракта с 361 995 804, 20 руб. до 427 489 264,49 руб. по основанию - из-за непредвиденных обстоятельств, согласно Постановления Правительства №1315, с учетом положений 4.65.1 ст. 112 44-ФЗ, согласно которой установлено, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (Приложение №3 к исковому заявлению).

Истец получил от заказчика письменно подтвержденное согласования повышения цены контракта, в подтверждение чего представлены следующие приложениями к исковому заявлению:

1 Положительное заключение госэкспертизы (Приложение №1);

2. Ответ Минстроя на увеличение цены контракта (Приложение №2);

3.         Письмо об увеличении цены контракта с обоснованием от 26.09.2022 (Приложение №3);

4.         Сметный расчет стоимости строительства (Приложение №4);

5.         Конъюнктурный анализ (Приложение №5);

6.         Прайс-листы (Приложение №6);

7.         Письмо от Минстроя о финансировании объекта (Приложение №7);

8.         Увеличение цены ГК (Приложение №8).

18.01.2023г. получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, согласно которой стоимость контракта составляет 427 489 264,49 руб.

Сметный расчет составлен согласно методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр (ред. от 14.06.2022) "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены», о чем указано в Заключении на стр. 5, раздел 3.2.2.

Физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения, предусмотренные проектной документацией (Приложение к исковому заявлению №2),  получившее положительное заключение государственной экспертизы - не изменялись. 

Данное обстоятельство подтверждено положительным заключением государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости на стр. 5 раздел 4.1.1. (Приложение к исковому заявлению №3).

При таких обстоятельствах, факт увеличения сметной стоимости Государственного контракта №21/08 от 17.05.2021г. подтверждается выводами Государственной экспертизы.

Выводы, содержащиеся в заключении эксперта, мотивированы. Оснований ставить под сомнение указанное заключение не имеется. Эксперт обладает специальными познаниями в области строительства и сметных расчетов. Стороны выводы государственной экспертизы не оспаривали.

Доводы ответчика о том, что цена контракта уже была неоднократно изменена, подлежат отклонению как не свидетельствующие  о повторном увеличении   стоимости спорных работ/материалов.

Так, согласно п. 1.1. Контракта, Подрядчик в установленные сроки, согласно Контракту, обязуется выполнить работы по инженерным изысканиям, проектированию, строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район» (далее - работы, Объект), подготовку отчетов о выполнении инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение иных действий Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, в порядке и сроки, установленные Контрактом, получить заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Инженерные изыскания включают в себя: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.

Таким образом, предметом контракта одновременно являются работы по проектированию и строительству. 

Соответственно, после выполнения работ по проектированию цена контракта изменяется согласно проекта на основании приказа Министров России от 30 марта 2020 г. № 175/пр., также разделом 13 Контракта предусмотрено изменение цены Контракта после подготовки проектной документации и выполнением инженерных изысканий, а также получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а именно п. 13.4 Контракта.

Таким образом, цена контракта изменялась только согласно проекту, путем подписания дополнительных  соглашений №9,№10 и смет к ним на основании п. 13.4. Контракта.

В этой связи, с марта 2022г. стороны согласовывали повышение цены контракта с 361 995 804, 20 руб. до 427 489 264,49 руб. по совершенно иному основанию – вследствие  существенного удорожания строительных ресурсов, согласно Постановления Правительства №1315.

Доводы ответчика о том, что в настоящее время контракт  исполнен, поскольку все работы со стороны подрядчика выполнены, подлежат отклонению исходя из следующего.

Согласно п.1, ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1)         приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 

2)         оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3)         взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Между тем, ответчиком не оспорено, что на сегодняшний день приемка отдельных видов работ Заказчиком не окончена, расчеты по контракту не завершены.

В этой связи, обязательства по контракту не исполнены на день рассмотрения требований, о чем также свидетельствует статус контракта в ЕИС на 06.06.2023г. «на исполнении» (Приложение к исковому заявлению №11). 

При таких обстоятельствах, по убеждению арбитражного суда, совокупность условий Постановления N 1315 в спорных правоотношениях  выполняется.

Основанием для принятия Постановления N 1315, Приказа Минстроя России от 21.07.2021 N 500/пр послужил факт существенного возрастания суммарной стоимости строительства в связи с ростом стоимости строительных ресурсов поставки подрядчика по всей стране.

При таких обстоятельствах увеличение цены контракта в соответствии с Постановлением N 1315 представляет собой единственную возможность компенсировать подрядчику убытки, возникшие в результате существенного возрастания суммарной стоимости строительства, обусловленного действием неблагоприятных экономических факторов.

В соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Постановления N 1315 размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном Методикой составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр (далее - Методика N 841/пр).

Обоснование изменения цены контракта осуществляется согласно порядку, установленному Методикой составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр (в редакции приказов Минстроя России от 21.07.2021 N 500/пр и от 07.10.2021 N 728/пр) (далее - Методика N 841/пр), согласно которой также установлена возможность заказчика пересчитать смету контракта по выполненным и принятым заказчиком работам в 2021 году.

Согласно абз. 3 подпункта "а" пункта 2 Постановления N 1315, устанавливает, что размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Из приведенной нормы следует, что в отношении же контрактов, цена которых составляет или превышает 100 млн. руб., размер увеличения цены, определяется по результатам государственной экспертизы.

Как указано выше, истцом в материалы дела представлено положительное заключение повторной государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости контракта.

В силу пункта 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной (при этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора);

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В частности, согласно пункту 1 статьи 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть изменен судом по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, по требованию заинтересованной стороны при наличии условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 451 ГК РФ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что указанные подрядчиком обстоятельства отвечают признакам существенного изменения обстоятельств в целях изменения условий спорного контракта, установленных статьей 451 ГК РФ.

В ходе судебного разбирательства, истцом требования изменены, просил увеличить цену контракта (работ) на сумму, изменив условие Государственного контракта № 21/038 на выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства от «17» мая 2021 года, изложив пункт 3.1. государственного контракта в следующей редакции:

«3.1. Цена контракта (работ) составляет 409 080 569,09 руб. (четыреста девять миллионов восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 09 копеек), в т.ч. НДС (20%) 68 180 094,85 руб. (шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят тысяч девяноста четыре рубля 49 копеек).

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, компенсации издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, все затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, указанного в пункте 1.1. Контракта, включая сопутствующие расходы, необходимые для их выполнения (охрана, содержание, коммунальные расходы и т.п.), расходы на выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, возникшие у Подрядчика в рамках исполнения Контракта, связанных с выполнением обязательств по контракту.

При этом, стоимость работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации, составляет 16 654 698 рублей 65 копеек.».

Утвердить смету контракта, согласно следующей редакции сметы, сумма которой составляет 409 080 569,09 руб. (четыреста девять миллионов восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 09 копеек), в т.ч. НДС (20%) 68 180 094,85 руб. (шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят тысяч девяноста четыре рубля 49 копеек):

Детский сад на 190 мест, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, микрорайон 14 (наименование объекта)

№ п/п

Номер сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящихся к соответствующим конструктивным решения (элементам), комплексам (видам) работ

Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ

Единица измерения

Количество

(объем

работ)

Всего

1

2

2

3

4

 

 

1 этап

 

 

1

 

Выполнение инженерных изысканий, проектирования

комплекс

1

13878 915,54

 

2 этап

 

 

5

02-01-01И2 (п. 15-19)

Подсыпка щебня под сваебойный агрегат

комплекс

1

223 625,64

6

02-01-01И2 (п. 20-31)

Сваи

комплекс

1

25 570092,05

7

02-01-01И2 (п. 32-80)

Устройство ростверка

комплекс

1

8 800 392,16

8

02-01-01И2 (п. 81-123)

Каркас (колонны, диафрагмы, балки) ниже 0,000

комплекс

1

5 642 097,47

9

02-01-01И2 (п. 124.1-172.1)

Каркас (колонны, диафрагмы, балки) выше 0,000 до 3,650

комплекс

1

7 661 013,61

10

02-01-01И2 (п. 124.2-172.2)

Каркас (колонны, диафрагмы, балки) выше 3,650 до 7,400

комплекс

1

7 583 573,16

11

02-01-01И2 (п. 124.3-172.3)

Каркас (колонны, диафрагмы, балки) выше 7,400

комплекс

1

676 096,61

12

02-01-01И2 (п. 173-252)

Стены и перегородки подвала

комплекс

1

4 855 243,19

13

02-01-01И2 (п. 253.1-286.1)

Стены (кирпичная кладка стен, утепление и оштукатуривание металлических балок, примыканий стен к балкам и стойкам) 1 этаж (183,6м3)

комплекс

1

4 647 149,34

14

02-01-01И2 (п. 253.2-286.2)

Стены (кирпичная кладка стен, утепление и оштукатуривание металлических балок, примыканий стен к балкам и стойкам) 2 этаж (167,56м3)

комплекс

1

3 926 023,40

15

02-01-01И2 (п. 253.3-286.3)

Стены (кирпичная кладка стен, утепление и оштукатуривание металлических балок, примыканий стен к балкам и стойкам) над кровлей (171,1м3)

комплекс

1

1 676 408,07

16

02-01-01И2 (п. 287-291)

Крепление водонагревателей

комплекс

1

2 760,77

17

02-01-01И2 (п. 292-298)

Лифт (лист КЖ 8 ) (монолитные сердечники и перемычки)

комплекс

1

24 476,70

18

02-01-01И2 (п. 299-309)

Крыльцо по оси Е/1 (лист КЖ 8)

комплекс

1

27 440,35

19

02-01-01И2 (п. 310-321)

Парапет (КЖ-1 лист23)

комплекс

1

590 310,52

20

02-01-01И2 (п. 322-348)

Перекрытие на отм. - 0.300

комплекс

1

6 089 246,56

21

02-01-01И2 (п. 349.1-385.1)

Перекрытия на отм. +3,650

комплекс

1

7 402 308,94

22

02-01-01И2 (п. 349.2-385.2)

Перекрытия на отм. +7,402

комплекс

1

7 462 416,43

23

02-01-01И2 (п. 386-393)

Перекрытие на отм. +2,730 (тамбур)

комплекс

1

45 153,00

24

02-01-01И2 (п. 394-399)

Перекрытие на отм. +10,380 (2 шт.)

комплекс

1

194 304,15

25

02-01-01И2 (п. 400.1-476.1)

Перегородки (1 этаж)

комплекс

1

2 727 149,26

26

02-01-01И2 (п. 400.2-476.2)

Перегородки (2 этаж)

комплекс

1

2 362 205,80

27

02-01-01И2 (п. 400.3-476.3)

Перегородки (алюминиевые перегородки)

комплекс

1

273 927,50

28

02-01-01И2 (п. 477- -577); 02-01-01 изм.3

Кровля

комплекс

1

10 472954,06

29

02-01-01И2 (п. 578-640)

Лестницы Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6

комплекс

1

2 377 004,51

30

02-01-01И2 (п. 641-674)

Окна

комплекс

1

11226 700,39

31

02-01-01И2 (п. 675-713)

Двери

комплекс

1

4 588 747,68

32

02-01-01И2 (п. 714-728)

Полы. Первый этаж. тип 1

комплекс

1

1 539 319,49

33

02-01-01И2 (п. 729-743)

Полы. Первый этаж. Тип 2

комплекс

1

2 283 516,43

34

02-01-01И2 (п. 744-762)

Полы. Первый этаж. Тип 3

комплекс

1

577 837,50

35

02-01-01И2 (п. 763-779)

Полы. Первый этаж. Тип 4

комплекс

1

811 453,28

36

02-01-01И2 (п. 780-797)

Полы. Первый этаж. Тип 5

комплекс

i

454 933,14

37

02-01-01И2 (п. 798-814)

Полы. Первый этаж. Тип 6

комплекс

1

361 726,96

38

02-01-01И2 (п. 815-829)

Полы. Первый этаж. Тип 7

комплекс

1

100 589,79

39

02-01-01И2 (п. 830-841)

Полы. Первый этаж. Тип 8

комплекс

1

21 834,18

40

02-01-01И2 (п. 842-856)

Полы. Первый этаж. Тип 9

комплекс

1

18 425,37

41

02-01-01И2 (п. 857-871)

Полы. Второй этаж. Тип 10

комплекс

1

4 168 624,09

42

02-01-01И2 (п. 872-883)

Полы. Второй этаж. Тип 11

комплекс

1

343 837,97

43

02-01-01И2 (п. 884-900)

Полы. Второй этаж. Тип 12

комплекс

1

191 310,38

44

02-01-01И2 (п. 901-915)

Полы. Второй этаж. Тип 13

комплекс

1

1 177 734,89

45

02-01-01И2 (п. 916-930)

Полы. Второй этаж. Тип 14

комплекс

1

278 045,12

46

02-01-01И2 (п. 931-942)

Полы. Второй этаж. Тип 15

комплекс

1

41 293,32

47

02-01-01И2 (п. 943-944)

Полы. Подвал. Тип 16

комплекс

1

1 936 277,67

48

02-01-01И2 (п. 945-957)

Полы. Подвал. Тип 17

комплекс

1

171 616,48

48.1

02-01-01И2 (п. 947-948;955-957)

Полы. Подвал. Тип 17 (гидроизоляция)

комплекс

1

216 203,25

49

02-01-01И2 (п. 958-964)

Полы. Лестничные клетки. Тип 19

комплекс

1

155 356,56

50

02-01-01И2 (п. 965-969)

Полы. Лестничные клетки. Тип 20

комплекс

1

428 819,79

51

02-01-01И2 (п. 970-976)

Полы. Лестничные клетки. Тип 21

комплекс

1

226 035,32

52

02-01-01И2 (п. 977-993)

Полы. Лестничные клетки. Тип 22

комплекс

1

247 331,27

53

02-01-01И2 (п. 994-1003)

Полы. Плинтус

комплекс

1

801 717,83

54

02-01-01И2 (п. 1004-1012)

Закладные детали, бортик из бетона, компенсаторы

комплекс

1

65 688,92

55

02-01-01И2 (п. 1013-1026)

Внутренняя отделка. Потолок подвала

комплекс

1

3 247 179,33

56

02-01-01И2 (п. 1027-1064)

Внутренняя отделка. Потолки 1,2 этажи

комплекс

1

3 100 658,01

57

02-01-01И2 (п. 1065-1085)

Внутренняя отделка. Стены подвала

комплекс

1

347 272,37

58

02-01-01И2 (п. 1086-1141)

Внутренняя отделка. Стены 1,2 этажей

комплекс

1

7 525 150,57

59

02-01-01И2 (п. 1142-1156)

Наружная отделка (вент.фасад с облицовкой керамогранитом)

комплекс

1

15 673 926,57

60

02-01-01И2 (п. 1157-1198)

Шахта лифта

комплекс

1

120 408,85

61

02-01-01И2 (п. 1199-1243)

Крыльцо К-1 с пандусом

комплекс

1

656 703,80

62

02-01-01И2 (п. 1244-1290)

Крыльца К-2, К7, К9, К10

комплекс

1

438 140,11

63

02-01-01И2 (п. 1291-1334)

Крыльца К3, К4, К5, К8

комплекс

1

1 163 652,63

64

02-01-01И2 (п. 1335-1377)

Крыльцо К6

комплекс

1

222 427,93

65

02-01-01И2 (п. 1378-1423)

Козырек крыльца К-1

комплекс

i

732 457,35

66

02-01-01И2 (п. 1424-1457)

Козырьки крылец К-2, К-10

комплекс

i

333 493,47

67

02-01-01И2 (п. 1458-1491)

Козырьки крылец № К3, К5, К7, К9

комплекс

1

1 209 295,05

68

02-01-01И2 (п. 1492-1528)

Козырьки крыльц К-4, К-8

комплекс

1

1 190 932,42

69

02-01-01И2 (п. 1529-1584)

Козырек крыльца К-6

комплекс

1

416 844,50

70

02-01-01И2 (п. 1585-1645)

Спуски в подвал №1, 2

комплекс

1

612 795,35

71

02-01-01И2 (п. 1646-1659)

Козырьки спусков в подвал №1, 2

комплекс

1

223 741,22

72

02-01-01И2 (п. 1660-1685)

Приямки П-1 (8шт.), П-2(1шт.)

комплекс

1

576 150,84

73

02-01-01И2 (п. 1686-1695)

Навесы над приямками

комплекс

1

116 413,33

74

02-01-01И2 (п. 1696-1715)

Переходные мостики в подвале

комплекс

1

73 680,59

75

02-01-01И2 (п. 1716-1719)

Поручни для МГ в санузлах

комплекс

1

19 668,06

76

02-01-01И2 (п. 1720-1721)

Ограждение отопительных приборов

комплекс

1

499 330,25

76.1

02-01-01И2 (п. 1722-1727)

Узел обшивки труб отопления. Обшивка огнестойким МДФ

комплекс

1

184 040,76

77

02-01-01И2 (п. 1728-1730)

Опоры сетей ВК

комплекс

1

52 126,05

78

02-01-01И2 (п. 1731-1741)

Дорожка теплотрассы

комплекс

1

39 636,46

79

02-01-01И2 (п. 1742-1757)

Дренажные приямки ПР1 (4шт)

комплекс

1

29 367,57

80

02-01-01И2 (п. 1758-1794)

Воздухозаборная шахта В1

комплекс

1

103 192,17

81

02-01-02

Лифты

комплекс

1

3 037 948,67

82

02-01-03И

Водоснабжение и канализация

комплекс

1

5 113 524,85

83

02-01-04И

Вентиляция

комплекс

1

7 485 612,90

84

02-01-05И

Отопление, теплоснабжение калориферов,ИТП

комплекс

1

6 747 900,29

85

02-01-06И

Электроосвещение

комплекс

1

4 269 949,18

86

02-01-07И

Электрооборудование

комплекс

1

2 559 870,31

87

02-01-08И

Сети связи

комплекс

1

1 141 335,00

88

02-01-09И2

Охранно-пожарная сигнализация

комплекс

1

2 128 702,98

89

02-01-10И

Система контроля и управления доступом

комплекс

1

535 610,06

90

02-01-11

Технологическое оборудование

комплекс

1

19 691 803,79

91

ЛС 05-01-01

Проезды в границах участка

комплекс

1

6 389 971,22

92

ЛС 05-01-02

Проезды за границей участка

комплекс

1

1 366 553,02

93

ЛС 06-01-01И

Сети водоснабжения

комплекс

1

482 905,62

94

ЛС 06- 02-01И

Сети канализации

комплекс

1

1 217 304,70

95

ЛС 06- 03-01И

Тепловые сети

комплекс

1

2 348 975,16

97

ЛС 07-02-01

Вертикальная планировка

комплекс

1

34 965 738,15

98

ЛС 07- 03-01, 07-03-01изм.

Тротуары (в границах участка)

комплекс

1

13 322 446,43

99

ЛС 07- 03-02

Тротуары (за границей участка)

комплекс

1

513 587,47

100

ЛС 07- 04-01И

Малые архитектурные формы

комплекс

1

12 491 864,38

101

ЛС 07- 05-01И

Озеленение (в границах участка)

комплекс

1

2 451 169,74

102

ЛС 07- 05-02И

Озеленение (за границей участка)

комплекс

1

682 706,90

103

ЛС 07- 06-01

Организация дорожного движения

комплекс

1

19 619,05

104

ЛС 07-07-01

Ограждение территории детского сада

комплекс

1

4 814 484,59

105

ЛС 08-01-01И

Наружное освещение

комплекс

1

1 516 558,78

106

ЛС 09-01-01

Пусконаладочные работы на лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 2 остановки

комплекс

1

465 109,94

107

ЛС09-02-01И

Пусконаладочные работы по вентиляции

комплекс

1

428 623,33

108

ЛС09-03-01

Пусконаладочные работы по вентиляции

комплекс

1

67 511,39

110

Договор №103-21

Испытание свай

комплекс

1

112 261,63

111

Данные Ростелеком

Затраты на технологическое присоединение в сетям связи (1 квартал 2021г. К=8,54)

комплекс

1

268 709,44

 

 

 

112

ЛС 02-01-11доп.1

Дополнительное оснащение

комплекс

1

7 726 163,80

 

Цена контракта без НДС

 

340900474,24

 

НДС 20%

 

68180 094,85

 

Цена контракта с НДС

 

409080569,09

Указанная выше смета со стороны ответчика и третьего лица не оспорена, о неверно произведённом истцом расчете, несоответствии законодательству,  не заявлено.

В этой связи, оснований не принимать данную смету суд не усматривает.

Иные доводы участвующих в деле лиц, касающиеся рассматриваемого спора, не влияют на существо принимаемого судом решения и не опровергают основного вывода суда.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объёме.

Руководствуясь   статьями  110, 167, 171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить.

Увеличить цену контракта (работ) на сумму, изменив условие Государственного контракта № 21/038 на выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства от «17» мая 2021 года, изложив пункт 3.1. государственного контракта в следующей редакции:

«3.1. Цена контракта (работ) составляет 409 080 569,09 руб. (четыреста девять миллионов восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 09 копеек), в т.ч. НДС (20%) 68 180 094,85 руб. (шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят тысяч девяноста четыре рубля 49 копеек).

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, компенсации издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, все затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, указанного в пункте 1.1. Контракта, включая сопутствующие расходы, необходимые для их выполнения (охрана, содержание, коммунальные расходы и т.п.), расходы на выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, возникшие у Подрядчика в рамках исполнения Контракта, связанных с выполнением обязательств по контракту.

При этом, стоимость работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации, составляет 16 654 698 рублей 65 копеек.».

Утвердить смету контракта, согласно следующей редакции сметы, сумма которой составляет 409 080 569,09 руб. (четыреста девять миллионов восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 09 копеек), в т.ч. НДС (20%) 68 180 094,85 руб. (шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят тысяч девяноста четыре рубля 49 копеек):

Детский сад на 190 мест, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, микрорайон 14 (наименование объекта)

№ п/п

Номер сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящихся к соответствующим конструктивным решения (элементам), комплексам (видам) работ

Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ

Единица измерения

Количество

(объем

работ)

Всего

1

2

2

3

4

 

 

1 этап

 

 

1

 

Выполнение инженерных изысканий, проектирования

комплекс

1

13 878 915,54

 

2 этап

 

 

5

02-01-01И2 (п. 15-19)

Подсыпка щебня под сваебойный агрегат

комплекс

1

223 625,64

6

02-01-01И2 (п. 20-31)

Сваи

комплекс

1

25 570 092,05

7

02-01-01И2 (п. 32-80)

Устройство ростверка

комплекс

1

8 800 392,16

8

02-01-01И2 (п. 81-123)

Каркас (колонны, диафрагмы, балки) ниже 0,000

комплекс

1

5 642 097,47

9

02-01-01И2 (п. 124.1-172.1)

Каркас (колонны, диафрагмы, балки) выше 0,000 до 3,650

комплекс

1

7 661 013,61

10

02-01-01И2 (п. 124.2-172.2)

Каркас (колонны, диафрагмы, балки) выше 3,650 до 7,400

комплекс

1

7 583 573,16

11

02-01-01И2 (п. 124.3-172.3)

Каркас (колонны, диафрагмы, балки) выше 7,400

комплекс

1

676 096,61

12

02-01-01И2 (п. 173-252)

Стены и перегородки подвала

комплекс

1

4 855 243,19

13

02-01-01И2 (п. 253.1-286.1)

Стены (кирпичная кладка стен, утепление и оштукатуривание металлических балок, примыканий стен к балкам и стойкам) 1 этаж (183,6м3)

комплекс

1

4 647 149,34

14

02-01-01И2 (п. 253.2-286.2)

Стены (кирпичная кладка стен, утепление и оштукатуривание металлических балок, примыканий стен к балкам и стойкам) 2 этаж (167,56м3)

комплекс

1

3 926 023,40

15

02-01-01И2 (п. 253.3-286.3)

Стены (кирпичная кладка стен, утепление и оштукатуривание металлических балок, примыканий стен к балкам и стойкам) над кровлей (171,1м3)

комплекс

1

1 676 408,07

16

02-01-01И2 (п. 287-291)

Крепление водонагревателей

комплекс

1

2 760,77

17

02-01-01И2 (п. 292-298)

Лифт (лист КЖ 8 ) (монолитные сердечники и перемычки)

комплекс

1

24 476,70

18

02-01-01И2 (п. 299-309)

Крыльцо по оси Е/1 (лист КЖ 8)

комплекс

1

27 440,35

19

02-01-01И2 (п. 310-321)

Парапет (КЖ-1 лист23)

комплекс

1

590 310,52

20

02-01-01И2 (п. 322-348)

Перекрытие на отм. - 0.300

комплекс

1

6 089 246,56

21

02-01-01И2 (п. 349.1-385.1)

Перекрытия на отм. +3,650

комплекс

1

7 402 308,94

22

02-01-01И2 (п. 349.2-385.2)

Перекрытия на отм. +7,402

комплекс

1

7 462 416,43

23

02-01-01И2 (п. 386-393)

Перекрытие на отм. +2,730 (тамбур)

комплекс

1

45 153,00

24

02-01-01И2 (п. 394-399)

Перекрытие на отм. +10,380 (2 шт.)

комплекс

1

194 304,15

25

02-01-01И2 (п. 400.1-476.1)

Перегородки (1 этаж)

комплекс

1

2 727 149,26

26

02-01-01И2 (п. 400.2-476.2)

Перегородки (2 этаж)

комплекс

1

2 362 205,80

27

02-01-01И2 (п. 400.3-476.3)

Перегородки (алюминиевые перегородки)

комплекс

1

273 927,50

28

02-01-01И2 (п. 477- -577); 02-01-01 изм.3

Кровля

комплекс

1

10 472 954,06

29

02-01-01И2 (п. 578-640)

Лестницы Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6

комплекс

1

2 377 004,51

30

02-01-01И2 (п. 641-674)

Окна

комплекс

1

11 226 700,39

31

02-01-01И2 (п. 675-713)

Двери

комплекс

1

4 588 747,68

32

02-01-01И2 (п. 714-728)

Полы. Первый этаж. тип 1

комплекс

1

1 539 319,49

33

02-01-01И2 (п. 729-743)

Полы. Первый этаж. Тип 2

комплекс

1

2 283 516,43

34

02-01-01И2 (п. 744-762)

Полы. Первый этаж. Тип 3

комплекс

1

577 837,50

35

02-01-01И2 (п. 763-779)

Полы. Первый этаж. Тип 4

комплекс

1

811 453,28

36

02-01-01И2 (п. 780-797)

Полы. Первый этаж. Тип 5

комплекс

i

454 933,14

37

02-01-01И2 (п. 798-814)

Полы. Первый этаж. Тип 6

комплекс

1

361 726,96

38

02-01-01И2 (п. 815-829)

Полы. Первый этаж. Тип 7

комплекс

1

100 589,79

39

02-01-01И2 (п. 830-841)

Полы. Первый этаж. Тип 8

комплекс

1

21 834,18

40

02-01-01И2 (п. 842-856)

Полы. Первый этаж. Тип 9

комплекс

1

18 425,37

41

02-01-01И2 (п. 857-871)

Полы. Второй этаж. Тип 10

комплекс

1

4 168 624,09

42

02-01-01И2 (п. 872-883)

Полы. Второй этаж. Тип 11

комплекс

1

343 837,97

43

02-01-01И2 (п. 884-900)

Полы. Второй этаж. Тип 12

комплекс

1

191 310,38

44

02-01-01И2 (п. 901-915)

Полы. Второй этаж. Тип 13

комплекс

1

1 177 734,89

45

02-01-01И2 (п. 916-930)

Полы. Второй этаж. Тип 14

комплекс

1

278 045,12

46

02-01-01И2 (п. 931-942)

Полы. Второй этаж. Тип 15

комплекс

1

41 293,32

47

02-01-01И2 (п. 943-944)

Полы. Подвал. Тип 16

комплекс

1

1 936 277,67

48

02-01-01И2 (п. 945-957)

Полы. Подвал. Тип 17

комплекс

1

171 616,48

48.1

02-01-01И2 (п. 947-948;955-957)

Полы. Подвал. Тип 17 (гидроизоляция)

комплекс

1

216 203,25

49

02-01-01И2 (п. 958-964)

Полы. Лестничные клетки. Тип 19

комплекс

1

155 356,56

50

02-01-01И2 (п. 965-969)

Полы. Лестничные клетки. Тип 20

комплекс

1

428 819,79

51

02-01-01И2 (п. 970-976)

Полы. Лестничные клетки. Тип 21

комплекс

1

226 035,32

52

02-01-01И2 (п. 977-993)

Полы. Лестничные клетки. Тип 22

комплекс

1

247 331,27

53

02-01-01И2 (п. 994-1003)

Полы. Плинтус

комплекс

1

801 717,83

54

02-01-01И2 (п. 1004-1012)

Закладные детали, бортик из бетона, компенсаторы

комплекс

1

65 688,92

55

02-01-01И2 (п. 1013-1026)

Внутренняя отделка. Потолок подвала

комплекс

1

3 247 179,33

56

02-01-01И2 (п. 1027-1064)

Внутренняя отделка. Потолки 1,2 этажи

комплекс

1

3 100 658,01

57

02-01-01И2 (п. 1065-1085)

Внутренняя отделка. Стены подвала

комплекс

1

347 272,37

58

02-01-01И2 (п. 1086-1141)

Внутренняя отделка. Стены 1,2 этажей

комплекс

1

7 525 150,57

59

02-01-01И2 (п. 1142-1156)

Наружная отделка (вент.фасад с облицовкой керамогранитом)

комплекс

1

15 673 926,57

60

02-01-01И2 (п. 1157-1198)

Шахта лифта

комплекс

1

120 408,85

61

02-01-01И2 (п. 1199-1243)

Крыльцо К-1 с пандусом

комплекс

1

656 703,80

62

02-01-01И2 (п. 1244-1290)

Крыльца К-2, К7, К9, К10

комплекс

1

438 140,11

63

02-01-01И2 (п. 1291-1334)

Крыльца К3, К4, К5, К8

комплекс

1

1 163 652,63

64

02-01-01И2 (п. 1335-1377)

Крыльцо К6

комплекс

1

222 427,93

65

02-01-01И2 (п. 1378-1423)

Козырек крыльца К-1

комплекс

i

732 457,35

66

02-01-01И2 (п. 1424-1457)

Козырьки крылец К-2, К-10

комплекс

i

333 493,47

67

02-01-01И2 (п. 1458-1491)

Козырьки крылец № К3, К5, К7, К9

комплекс

1

1 209 295,05

68

02-01-01И2 (п. 1492-1528)

Козырьки крыльц К-4, К-8

комплекс

1

1 190 932,42

69

02-01-01И2 (п. 1529-1584)

Козырек крыльца К-6

комплекс

1

416 844,50

70

02-01-01И2 (п. 1585-1645)

Спуски в подвал №1, 2

комплекс

1

612 795,35

71

02-01-01И2 (п. 1646-1659)

Козырьки спусков в подвал №1, 2

комплекс

1

223 741,22

72

02-01-01И2 (п. 1660-1685)

Приямки П-1 (8шт.), П-2(1шт.)

комплекс

1

576 150,84

73

02-01-01И2 (п. 1686-1695)

Навесы над приямками

комплекс

1

116 413,33

74

02-01-01И2 (п. 1696-1715)

Переходные мостики в подвале

комплекс

1

73 680,59

75

02-01-01И2 (п. 1716-1719)

Поручни для МГ в санузлах

комплекс

1

19 668,06

76

02-01-01И2 (п. 1720-1721)

Ограждение отопительных приборов

комплекс

1

499 330,25

76.1

02-01-01И2 (п. 1722-1727)

Узел обшивки труб отопления. Обшивка огнестойким МДФ

комплекс

1

184 040,76

77

02-01-01И2 (п. 1728-1730)

Опоры сетей ВК

комплекс

1

52 126,05

78

02-01-01И2 (п. 1731-1741)

Дорожка теплотрассы

комплекс

1

39 636,46

79

02-01-01И2 (п. 1742-1757)

Дренажные приямки ПР1 (4шт)

комплекс

1

29 367,57

80

02-01-01И2 (п. 1758-1794)

Воздухозаборная шахта В1

комплекс

1

103 192,17

81

02-01-02

Лифты

комплекс

1

3 037 948,67

82

02-01-03И

Водоснабжение и канализация

комплекс

1

5 113 524,85

83

02-01-04И

Вентиляция

комплекс

1

7 485 612,90

84

02-01-05И

Отопление, теплоснабжение калориферов,ИТП

комплекс

1

6 747 900,29

85

02-01-06И

Электроосвещение

комплекс

1

4 269 949,18

86

02-01-07И

Электрооборудование

комплекс

1

2 559 870,31

87

02-01-08И

Сети связи

комплекс

1

1 141 335,00

88

02-01-09И2

Охранно-пожарная сигнализация

комплекс

1

2 128 702,98

89

02-01-10И

Система контроля и управления доступом

комплекс

1

535 610,06

90

02-01-11

Технологическое оборудование

комплекс

1

19 691 803,79

91

ЛС 05-01-01

Проезды в границах участка

комплекс

1

6 389 971,22

92

ЛС 05-01-02

Проезды за границей участка

комплекс

1

1 366 553,02

93

ЛС 06-01-01И

Сети водоснабжения

комплекс

1

482 905,62

94

ЛС 06- 02-01И

Сети канализации

комплекс

1

1 217 304,70

95

ЛС 06- 03-01И

Тепловые сети

комплекс

1

2 348 975,16

97

ЛС 07-02-01

Вертикальная планировка

комплекс

1

34 965 738,15

98

ЛС 07- 03-01, 07-03-01изм.

Тротуары (в границах участка)

комплекс

1

13 322 446,43

99

ЛС 07- 03-02

Тротуары (за границей участка)

комплекс

1

513 587,47

100

ЛС 07- 04-01И

Малые архитектурные формы

комплекс

1

12 491 864,38

101

ЛС 07- 05-01И

Озеленение (в границах участка)

комплекс

1

2 451 169,74

102

ЛС 07- 05-02И

Озеленение (за границей участка)

комплекс

1

682 706,90

103

ЛС 07- 06-01

Организация дорожного движения

комплекс

1

19 619,05

104

ЛС 07-07-01

Ограждение территории детского сада

комплекс

1

4 814 484,59

105

ЛС 08-01-01И

Наружное освещение

комплекс

1

1 516 558,78

106

ЛС 09-01-01

Пусконаладочные работы на лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 2 остановки

комплекс

1

465 109,94

107

ЛС09-02-01И

Пусконаладочные работы по вентиляции

комплекс

1

428 623,33

108

ЛС09-03-01

Пусконаладочные работы по вентиляции

комплекс

1

67 511,39

110

Договор №103-21

Испытание свай

комплекс

1

112 261,63

111

Данные Ростелеком

Затраты на технологическое присоединение в сетям связи (1 квартал 2021г. К=8,54)

комплекс

1

268 709,44

 

 

 

112

ЛС 02-01-11доп.1

Дополнительное оснащение

комплекс

1

7 726 163,80

 

Цена контракта без НДС

 

340 900 474,24

 

НДС 20%

 

68 180 094,85

 

Цена контракта с НДС

 

409 080 569,09

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья                                                                                               Т.Н. Куликова