АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-10016/18

05 октября 2018 года

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   «28»  сентября  2018   года

Полный текст решения изготовлен            «05»  октября 2018   года

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента социального развития г. Азова ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>

к Обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕЙМА" ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> об обязании передать исполнительную документацию (уточненные требования)

 

при участии:

от истца: представители ФИО2 по доверенности № 12/04 от 11.01.2018, ФИО3 по доверенности №12/23 от 26.03.2018

от ответчика: представитель не явился, извещён

от третьего лица: представитель не явился 

 

установил:

Департамент  социального развития г. Азова обратился в  суд с заявлением  об обязании  общества  с ограниченной ответственностью "ЛЕЙМА" передать Департаменту социального развития г. Азова  в течении 30 дней с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу исполнительную документацию по муниципальному контракту №41от 30.08.2016 исполнительную документацию на выполненные работы по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», 

<

...> (1-й этап строительства)»:

1. По локальной смете № 01-01 «Демонтаж»: Демонтаж административного блока; Демонтаж модульного блока-раздевалки для спортсменов и тренеров; Демонтаж санитарно-бытовой пристройки; Демонтаж гаражей; Демонтаж туалетов; Демонтаж беседки; Демонтаж резервуара для воды; Демонтаж щитовой; Демонтаж насосной; Демонтаж ограждения резервуара; Демонтаж флагштоков; Демонтаж навеса для трибуны; Демонтаж трибуны; Демонтаж вышки для оператора; Демонтаж ограждения спортивного комплекса; Демонтаж ограждения беговых дорожек из труб; Демонтаж забора между спортивными площадками внутри стадиона; Демонтаж ограждения скейтпарка; Демонтаж навесов и площадок с металлоломом; Демонтаж электротехнического оборудования - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы демонтажа конструкций;

2. По локальной смете № 01-02 «Снос и пересадка зеленых насаждений»: снос зеленых насаждений; пересадка деревьев - порубочные листы, исполнительные схемы благоустройства, перечетная ведомость зеленых насаждений;

3. По локальной смете № 01-03 «Разборка существующих покрытий» - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы;

4. По локальной смете № 02-01-01 «Общестроительные работы. Физкультурно-оздоровительный комплекс»: Земляные работы; Фундламенты; Каркас ниже отм.0.000; Стены; Лестницы; Перегородки; Окна; Двери; Полы; Внутренние отделочные работы; Каркас выше отм.О.ООО; Стены; Перегородки; Лестницы; Шахты лифтов; Кровля; Окна; Витражи; Двери; Полы; Внутренние отделочные работы; Наружная отделка; Разные работы (короб на радиаторы, крышная венткамера, конструкции крепления дымовой трубы, лестница, водосточная система, приямки, узлы герметизации); Подиум - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы демонтажа конструкций, акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта, исполнительные схемы расположения пунктов ГРО, исполнительная съемка выемки грунта котлована, акт осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты, акт разбивки осей капитального строительства на местности, исполнительная схема закрепления осей ФОК, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты, документы о качестве бетонной смеси, акты отбора бетонной смеси, исполнительная съемка гидроизоляции стен;

5. По локальной смете № 02-01-13 «Усиление грунтов основания под ФОК армоэлементами» - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, рабочие чертежи, документы о качестве бетонной смеси, акты отбора бетонной смеси, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

6. По локальной смете № 02-02-02 «Дренаж. Ливневая канализация. Спортивное ядро»: Земляные работы (футбольное поле в натуральной траве, зона безопасности, беговые дорожки и сектора); Система дренажа и линейного водоотвода; Система ливневой канализации; Устройство круглых сборных железобетонных колодцев - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, исполнительные съемки, исполнительная съемка выемки грунта, паспорта на материалы, паспорта качества, сертификаты;

7. По локальной смете № 04-01 «Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВт. Наружное освещение. Вынос сетей наружного освещения»: Общестроительные работы; Монтажные работы; Материалы не учтенные ценником; Оборудование - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ведомости и акты испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

8. По локальной смете № 06-01 «Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения»: Земляные работы; Строительные работы; Трубопроводы -акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ведомости и акты испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

9. По локальной смете № 06-02 «Дождевая канализация»: Земляные работы; Строительные работы; Трубопроводы - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ведомости и акты испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

10. По локальной смете № 07-04 «Дорожные покрытия в границах участка реконструируемой тренировочной площадки»: Устройство покрытий; Укладка плитки тактильной - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ведомости и акты испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

11. По локальной смете № 07-05 «Дорожное благоустройство в границах благоустраиваемой территории» - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

12. По локальной смете № 07-09 «Ограждение территории стадиона»: Земляные работы, Фундаменты, Ограждение - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, рабочие чертежи, документы о качестве бетонной смеси, акты отбора бетонной смеси, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

13. По локальной смете № 02-02-04 «Усиление грунтов основания под мачты освещения армоэлементами» - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, рабочие чертежи, документы о качестве бетонной смеси, акты отбора бетонной смеси, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты.

Представитель истца исковые требования поддержал, огласил доводы, изложенные в исковом заявлении. Просил суд удовлетворить исковые требования в полном объёме с учётом принятых уточнённых исковых требований.

Ответчик явку представителя в суд не обеспечил, извещен надлежащим образом о рассмотрении дела в порядке статьи 123 АПК РФ. Из отзыва ответчика следует, что всю документацию ответчик передавал на проверку третьему лицу.

Третье лицо явку представителя в суд не обеспечило, направило 28.09.2018 дополнения к пояснениям, а также ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии. Из отзыва и пояснений следует, что ответчиком действительно передавались документы на проверку, однако, исполнительная документация была возвращена ответчику для устранения замечаний.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствии извещенного ответчика и третьего лица.

Изучив материалы дела, выслушав позицию истца, суд установил, что 30.08.2016  между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 41, по условиям которого подрядчик на свой риск обязуется выполнить по заданию заказчика с использованием своих материалов, а заказчик принять и оплатить выполненные работы по объекту «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», 

<

...> (1-й этап строительства)» (долее - Объект), согласно утвержденной проектно-сметной документации на условиях настоящего контракта. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются графиком производства работ, составляющим неотъемлемую часть Контракта (приложение №2) (пункты 1.1,1.2 контракта).

Согласно пункту 2.1 контракта, стоимость выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта составляет 357 686 630 руб., в том числе НДС 54 562 367,29 руб.

В силу пункта 3.16 контракта, в соответствии с Графиком производства работ по контракту (Приложение 2), вместе с письменным извещением подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ, подрядчик передает заказчику: один экземпляр исполнительной документации (оригинал) и один экземпляр заверенной копии; в установленном порядке оформленную документацию, предусмотренную подпунктами 5-9 пункта 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ; иную документацию, необходимую для ввода объекта в эксплуатацию по требованию Заказчика.

В силу пункта 4.1 контракта, сроки выполнения работ: начало выполнения работ - со дня заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 20.08.2017. Возможно досрочное выполнение работ, в соответствии с Графиком производства работ по контракту (Приложение №2).

Согласно пункту 5.1.20 контракта, на подрядчика возложена обязанность  в  течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Формы КС-11 передать заказчику по акту приема передачи комплект исполнительной технической документации, чертежи, сертификаты на материалы и изделия, объект и вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

В 2016 году работы по контракту  освоены на сумму 61 229 181,49 руб.  и оплачены заказчиком, согласно актам выполненных работ (КС-2) №№ 1-5 от 25.11.2016, №  6-8 от 28.11.2016, №№ 9-10 от 12.12.2016, № 11 от 16.12.2016, №№ 12-14 от 20.12.2016.

В 2017  г. заключено дополнительное соглашение № 7 к контракту от 02.03.2017, в котором  отражены оставшаяся сумма и откорректирован График производства работ на 2017 год.

В обоснование иска истцом указано, что в  конце I квартала 2017 года  выявлено отставание и не освоение средств подрядчиком согласно Графику производства работ.

Организацией, осуществляющей строительный контроль за реконструкцией объекта,  составлены протоколы о нарушении сроков работ (№ 001 от 02.03.207, № 002 от 05.06.2017, № 003 от 11.07.2017).

В 2017 году работы по контракту  освоены на сумму 35 108 266,31 руб.,  оплачены согласно актам выполненных работ (КС-2) №№ 15-17 от 03.03.2017, №№ 18-24 от 25.04.2017, № 25 от 30.04.2017.

ООО «Лейма» за  период действия контракта  выполнены работы и оплачены заказчиком сумму 96 337 447,80 руб.

04.07.2017 Департаментом социального развития г. Азова  принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, который  расторгнут с 22.07.2017, то есть через десять дней, с даты надлежащего уведомления подрядчика.

Однако,  со стороны подрядчика  после расторжения контракта обязательство по передаче исполнительной документации по незавершенному объекту строительства в силу пункта 5.1.20 контракта не исполнено.

Изложенное послужило основанием обращения истца в суд с рассматриваемым иском в суд.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования  подлежат удовлетворению  по следующим основаниям.

Оценив правоотношения сторон в рамках указанного контракта, суд пришел к выводу о том, что они подлежат регулированию в соответствии с положениями   Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ).

В силу части 1 статьи 1 Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее - контракт);

4) особенностей исполнения контрактов;

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок).

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона, контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

В пункте 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации дается понятие государственного или муниципального контракта, как договора, заключенного органом государственной власти или органом местного самоуправления от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования с физическими или юридическими лицами в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, предусмотренных в расходах соответствующего бюджета.

Согласно статье 746 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному контракту государственным заказчиком выступают государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная соответствующим государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами, а подрядчиком - юридическое лицо или гражданин.

В соответствии со статьями  702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить работы в порядке, предусмотренном договором.

Пунктом 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Истец в иске ссылается на обязанность ответчика передать исполнительную документацию в силу пункта 5.1.20 контракта.

Ответчик с иском не согласен, ссылается на то, что в акте приема-передачи объемов выполненных работ по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», 

<

...> (1-й этап строительства)» указано, что исполнительная документация передана субподрядчиком ООО «Сфера» в адрес АНО «Арена-2018».  Организация, осуществляющая строительной контроль (АНО «Арена-2018),  подтверждает соответствие представленных подрядчиком к приемки работ, указанных в оформленных подрядчиком актах КС-2 и соответствие порядка оформления исполнительной документации на указанные объемы работ требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также соответствие указанной в документации работ, материалов, оборудование и иных затрат, соответствие расценок в представленных подрядчиком  форм КС-2. Выполненные работы приняты истцом без замечаний согласно актам приемки выполненных работ (ф.КС-2), после проверки строительного контроля на основании п. 3.2.1. муниципального контракта от 30.09.2016 № 41. Таким образом, по мнению ответчика, исполнительная документация предъявляется подрядчиком заказчику в момент сдачи-приемки выполненных работ, подписанием актов КС-2 заказчик подтвердил соответствие и наличие у него исполнительной документации по текущему этапу работ.

Рассмотрев доводы ответчика, суд пришел к следующему выводу.

Статьей 726 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

   Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

            Исполнительная документация представляет собой документы и материалы, подтверждающие соответствие выполненных работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения техническим регламентам (нормам и правилам) и проектной документации, полученные и оформленные при осуществлении строительства, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Исполнительная документация, оформленная соответствующим образом, является документом построенного здания или сооружения, облегчающим процесс эксплуатации, отражающим техническое состояние, дающим четкое представление об ответственных производителях работ по любому из видов выполненных работ.

Согласно пункту 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, состав и порядок ведения исполнительной документации может устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно пункту 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

Согласно пункту 5.1.20 контракта, на подрядчика возложена обязанность в  течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Формы КС-11 передать заказчику по акту приема передачи комплект исполнительной технической документации, чертежи, сертификаты на материалы и изделия, объект и вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 утверждены требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Также и СНиП 3.01.04-87 определен перечень проектной и исполнительной документации, подлежащей передаче.

В обоснование иска истцом указано, что в  отсутствии указанных документов , заказчик не может воспользоваться результатом выполненных ответчиком работ и отсутствие таких документов будет препятствовать дальнейшей эксплуатации построенного объекта, в связи с этим на подрядчика и возлагается обязанность по ее предоставлению.

С учетом нормативного закрепления обязанности подрядчика передать исполнительную документацию заказчику, отраженную также в условиях муниципального контракта от 30.09.2016 № 41, ООО «Лейма» неправомерно ссылается на отсутствие и невозможность передать комплект исполнительной документации на выполненные работы.

Акты приемки выполненных работ по Форме КС-2 не содержат указаний на наличие и передачу исполнительной документации по указанным в них и выполненным работам.

Таким образом, ответчик обязан передать исполнительную документацию на выполненные работы в адрес заказчика.

Подрядчик указывает на отсутствие подписанного между заказчиком и подрядчиком акта КС-11 как основание также  не предоставления исполнительной документации.

Указанный довод не может быть принят судом, поскольку акт  КС-11 не мог быть подписан в связи с не завершением строительного объекта.

При этом, как указано выше, в отсутствие исполнительной документации может препятствовать дальнейшей эксплуатации построенного объекта.

Подрядчиком нарушен п. 5.1.20, с учетом того, что п.2.4 в цену контракта учтены затраты на стоимость разработки и подготовки исполнительной документации.

Пункт 3 Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 утверждены требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Раскрывая понятие исполнительной документация указывает на то, что на представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Департамент социального развития г. Азова просит суд обязать ответчика передать исполнительную документацию на выполненные работы по контракту в сумме 96 337 447, 80 рублей, а не на весь объект реконструкции.

Кроме того, согласно пояснениям третьего лица, произведена проверка исполнительной документации, предоставленной ответчиком, и с замечаниями возвращена в адрес ООО «Лейма». До настоящего времени в адрес АНО «Арена-2018» откорректированная исполнительная документация от ООО «Лейма» не поступала. Третьим лицом представлены в материалы дела реестры исполнительной документации.  На данных реестрах имеются отметки о принятии замечаний для исправления, число, дата и подпись ответственного лица, который сдавал эти документы третьему лицу на проверку.

Доказательств передачи откорректированной документации ответчиком не представлено.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Таким образом, на ответчика  возлагается обязанность передать истцу истребуемую исполнительную документацию.

   При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению  на  ответчика со взысканием в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171,  176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ЛЕЙМА" ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> передать Департаменту социального развития г. Азова ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> в течении 30 дней с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу исполнительную документацию по муниципальному контракту №41от 30.08.2016 исполнительную документацию на выполненные работы по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», 

<

...> (1-й этап строительства)»:

1. По локальной смете № 01-01 «Демонтаж»: Демонтаж административного блока; Демонтаж модульного блока-раздевалки для спортсменов и тренеров; Демонтаж санитарно-бытовой пристройки; Демонтаж гаражей; Демонтаж туалетов; Демонтаж беседки; Демонтаж резервуара для воды; Демонтаж щитовой; Демонтаж насосной; Демонтаж ограждения резервуара; Демонтаж флагштоков; Демонтаж навеса для трибуны; Демонтаж трибуны; Демонтаж вышки для оператора; Демонтаж ограждения спортивного комплекса; Демонтаж ограждения беговых дорожек из труб; Демонтаж забора между спортивными площадками внутри стадиона; Демонтаж ограждения скейтпарка; Демонтаж навесов и площадок с металлоломом; Демонтаж электротехнического оборудования - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы демонтажа конструкций;

2. По локальной смете № 01-02 «Снос и пересадка зеленых насаждений»: снос зеленых насаждений; пересадка деревьев - порубочные листы, исполнительные схемы благоустройства, перечетная ведомость зеленых насаждений;

3. По локальной смете № 01-03 «Разборка существующих покрытий» - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы;

4. По локальной смете № 02-01-01 «Общестроительные работы. Физкультурно-оздоровительный комплекс»: Земляные работы; Фундламенты; Каркас ниже отм.0.000; Стены; Лестницы; Перегородки; Окна; Двери; Полы; Внутренние отделочные работы; Каркас выше отм.О.ООО; Стены; Перегородки; Лестницы; Шахты лифтов; Кровля; Окна; Витражи; Двери; Полы; Внутренние отделочные работы; Наружная отделка; Разные работы (короб на радиаторы, крышная венткамера, конструкции крепления дымовой трубы, лестница, водосточная система, приямки, узлы герметизации); Подиум - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы демонтажа конструкций, акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта, исполнительные схемы расположения пунктов ГРО, исполнительная съемка выемки грунта котлована, акт осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты, акт разбивки осей капитального строительства на местности, исполнительная схема закрепления осей ФОК, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты, документы о качестве бетонной смеси, акты отбора бетонной смеси, исполнительная съемка гидроизоляции стен;

5. По локальной смете № 02-01-13 «Усиление грунтов основания под ФОК армоэлементами» - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, рабочие чертежи, документы о качестве бетонной смеси, акты отбора бетонной смеси, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

6. По локальной смете № 02-02-02 «Дренаж. Ливневая канализация. Спортивное ядро»: Земляные работы (футбольное поле в натуральной траве, зона безопасности, беговые дорожки и сектора); Система дренажа и линейного водоотвода; Система ливневой канализации; Устройство круглых сборных железобетонных колодцев - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, исполнительные съемки, исполнительная съемка выемки грунта, паспорта на материалы, паспорта качества, сертификаты;

7. По локальной смете № 04-01 «Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВт. Наружное освещение. Вынос сетей наружного освещения»: Общестроительные работы; Монтажные работы; Материалы не учтенные ценником; Оборудование - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ведомости и акты испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

8. По локальной смете № 06-01 «Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения»: Земляные работы; Строительные работы; Трубопроводы -акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ведомости и акты испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

9. По локальной смете № 06-02 «Дождевая канализация»: Земляные работы; Строительные работы; Трубопроводы - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ведомости и акты испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

10. По локальной смете № 07-04 «Дорожные покрытия в границах участка реконструируемой тренировочной площадки»: Устройство покрытий; Укладка плитки тактильной - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ведомости и акты испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

11. По локальной смете № 07-05 «Дорожное благоустройство в границах благоустраиваемой территории» - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

12. По локальной смете № 07-09 «Ограждение территории стадиона»: Земляные работы, Фундаменты, Ограждение - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, рабочие чертежи, документы о качестве бетонной смеси, акты отбора бетонной смеси, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;

13. По локальной смете № 02-02-04 «Усиление грунтов основания под мачты освещения армоэлементами» - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, рабочие чертежи, документы о качестве бетонной смеси, акты отбора бетонной смеси, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛЕЙМА" ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               Д.Г. Танова