АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8 (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8 (4842) 599-457 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-10441/2022

19 июня 2024 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А.,  

руководствуясь ст.ст. 108, 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Стройтек" в течение  1 (одного) месяца с момента вступления в силу решения суда устранить недостатки  выполненных работ по договору от 31.12.2019 № 203750000011900137/6-ЭА/20-с в  многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>,  в соответствии с заключением эксперта от 29.12.2023 № 37/23-ЭЗ, а именно:  

- увеличить количество кровельных саморезов до 6 шт. на 1 кв.м. в соответствии с  РД лист 3 и п. 7.3.10 СП 70.1333.2012;  

- изменить расположение продольных ходовых деревянных мостиков (трапов) в  соответствии с проектным решением лист 3 для возможности их использования по  назначению (п. 3 выводов);  

- устранить недостаток устройства ендовы в соответствии с п. 7.12  СП 17.13330.2017 произвести монтаж гладких листов ендовы на фальцевое соединение  (п. 4 выводов);  

- обустроить отверстия – продухи чердачного помещения холодной крыши в  районе карниза и в коньковой части в соответствии с п. 4.5 СП 17.13330.2017;  

- добавить ряды снегозадержания в соответствии с п. 6 выводов эксперта от  29.12.2023 № 37/23-ЭЗ;  

- устранить разрушения штукатурных и окрасочных слоев в местах протечек на  карнизной части фасада;  

- переустроить люки-лазы с полным открытием в соответствии с п. 15 выводов  эксперта от 29.12.2023 № 37/23-ЭЗ;  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтек" в пользу Фонда  капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 6 000 руб. расходов на  уплату государственной пошлины.  

Присудить Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской  области за счет общества с ограниченной ответственностью "Стройтек" 1 000 руб.  судебной неустойки за каждый день просрочки в случае невыполнения вступившего в  силу решения.  

Отказать в удовлетворении заявления о присуждении судебной неустойки в  остальной части.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области  индивидуальному предпринимателю ФИО1 210 000 руб.,  внесенных обществом с ограниченной ответственностью "Стройтек" по платежному  поручению от 23.05.2023 № 353, 29.05.2023 № 360.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья Е.А. Пашкова