Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-88303/23

23 мая 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пашкевич Т.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Фонда капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к ООО «МУЛЬТИСИСТЕМА» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании долга и неустойки по договору № 1409-К от  14.07.2017, судебной неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать ООО «Мультисистема» в месячный срок после вступления в силу  решения Арбитражного суда Московской области безвозмездно устранить  недостатки работ, выполненные по Договору от 14.07.2017 № 1409-К,  указанные в Рекламационном акте от 21.06.2022, на объекте по адресу:  Московская область, г.о. Пушкинский, 

<

...>, а  именно: отсутствует нижний металлический фартук в узле примыкания кровли  ко всем вентиляционным каналам; срыв металлического зонта вследствие  ненадлежащего крепления над квартирой № 6.  

Взыскать с ООО «Мультисистема» в пользу Фонда капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов неустойку за нарушение сроков  устранения недостатков работ, определенных в Рекламационном акте от  21.06.2022, в размере 295 790,07 руб. за период с 12.07.2022 по 12.10.2023.  

Взыскать с ООО «Мультисистема» в пользу Фонда капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов неустойку за нарушение сроков  устранения недостатков работ, определенных в Рекламационном акте от  21.06.2022, с 13.10.2023 по дату фактического исполнения обязательства по  

устранению недостатков (дефектов) капитального ремонта, начисленную на  сумму 645829 рублей 85 копеек, исходя из 1/130 ключевой ставки  Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки.  

Взыскать с ООО «Мультисистема» судебную неустойку в размере 1 000  руб. за каждый день в случае просрочки исполнения решения Арбитражного  суда Московской области, начисленную по истечении месячного срока после  вступления решения суда в законную силу.  

Взыскать с ООО «Мультисистема» в пользу Фонда капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов судебные расходы в виде уплаты  государственной пошлины в размере 14 916 руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный  суд в месячный срок со дня принятия решения.  

Судья Е.В. Дубровская