АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

<

...>, тел. 

<

***>, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-4157/2025

г. Салехард

21 октября 2025 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Осиповой Ю.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Анисимовым А.Г, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о понуждении организовать проведение работ по капитальному ремонту инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения МКД,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехнологии» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), муниципального казённого учреждения «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольЮгра» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), Ассоциации саморегулируемая организация "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), Администрации Надымского района (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), Департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1 по доверенности № 36 от 26.12.2024, 

от ответчика – ФИО2 по доверенности № 24 от 07.11.2024, ФИО3 по доверенности № 21 от 07.11.2024  

от ООО «ЭнергоТехнологии» – ФИО4 по доверенности № 11 от 25.04.2025,  

от Администрации Надымского района – ФИО5 по доверенности № 89-174-1/01-08/6774 от 11.07.2025,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

Обязать некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение 3 месяцев после вступления решения суда в законную силу организовать проведение работ по капитальному ремонту инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: ЯНАО, 

<

...>, которые не были произведены по договору подряда КР № 17КР-2023 от 18.04.2023, с приобретением необходимых материалов, а именно согласно пунктам 137, 203,204, 206-213, 216, 219, 220, 223-225 акта № 1 изменения (выверки) объемов выполненных работ от 06.10.2023:  

1) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 – 1 423,89 м.;  

2) Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм. – 658 соединений;  

3) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм. (Система В1+Система В2) – 609,76 м.;  

4) Трубы из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 1.6 Мпа, размер 40 мм. – 626,16 м.;  

5) Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 40х25х40 мм. – 202 шт.; 

6) Компенсатор петлевой из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40 мм. – 90 шт.;  

7) Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм. – 856 соединений;  

8) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм. (Система Т4+Система Т3, Т4 (полотенцесушители) + Система В1, Т3 (поквартирная разводка) – 924 м.;  

9) Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм. – 74 шт.;  

10) Трубы из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 1.6 Мпа, размер 25 мм. – 947,81 м.;  

11) Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм. – 208 шт.; 

12) Компенсатор петлевой из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25 мм. – 198 шт.;  

13) Установка воздухоотводчиков – 40 шт.; 

14) Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр = 1,0 Мпа, Тmax = 120 град С, D =15 мм. – 40 шт.;  

15) Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 150 мм. трубками – 610,28 м.;  

16) Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 42 мм., толщина 13 мм. – 305,14 м.;  

17) Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 25 мм., толщина 13 мм. – 305,14 м.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 50 000 рублей.  

В случае неисполнения судебного решения взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком  

автономном округе» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.  

2. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

3. В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

4. Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

5. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Ю.Г. Осипова

Судья