10410_6131309  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-25781/19

21 октября 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью "Ростовстрой" ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> к  муниципальному казенному учреждению "УКС" ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>  об обязании (уточненные требования)  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать муниципальное казенное учреждение "Управление капитального  строительства города Ростова-на-Дону" ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>  заключить с обществом с ограниченной ответственностью "Ростовстрой" ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> дополнительное соглашение к Муниципальному  контракту № 16 от 16.10.2017 в части внесения в контракт дополнительных работ по  наблюдению за осадками оснований фундаментов зданий и сооружений (геодезический  мониторинг" и увеличения цены контракта, изложив его в следующей редакции:  

 1.1. Пункт 1.2 контракта изложить в редакции: 

«1.2. Стоимость выполнения работ (цена Контракта) в соответствии с условиями  настоящего Контракта составляет 814 730 928,00 (Восемьсот четырнадцать миллионов  семьсот тридцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рубля 00 копеек, в том числе НДС».  

, 1.2. Пункт 2.4 раздела 2 контракта дополнить абзацем пятнадцатым в редакции:  

«на проведение работ по наблюдению за осадками оснований фундаментов зданий  и сооружений (геодезический мониторинг);».  

Абзацы пятнадцатый и шестнадцатый пункта 2.4 раздела 2 контракта считать  абзацами шестнадцатым и семнадцатым соответственно.  

1.3. Приложение № 1 «График производства работ» дополнить строкой 37  «Проведение работ по геодезическому мониторингу» с отражением работ в период с  февраля 2018 года по май 2019 года:  

Итоговую стоимость работ за 2018 года указать 664 070 240 рублей, за 2019 год - 39 531 707 рублей. 

1.4. Приложение № 2 к Контракту «Протокол согласования договорной цены»  дополнить строками 64-65 в редакции:  

«64. Геодезический мониторинг. Общая сметная стоимость - 8 048 085 руб. 65. Всего: Общая сметная стоимость - 814 730 928 руб.». 

Взыскать с муниципального казенного учреждения "УКС" ОГРН 

<

***>  ИНН 6164268488в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ростовстрой"  ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> судебные расходы по уплате государственной  пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Д.Г. Танова