АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-3136/2018

г. Магадан

11 мая 2021 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи В.А. Лушникова,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Магаданского  областного государственного казенного учреждения «Управление эксплуатации и  строительства дорожно-транспортного комплекса» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес: 685000, 

<

...> Магаданки, д. 15)  

к обществу с ограниченной ответственностью «МостоСтроительная Компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 129110, 

<

...>, этаж 1, пом. I А, офис 2; почтовый адрес: 685000, 

<

...>)  

о взыскании 653 715 рублей 62 копеек, об обязании выполнить работы, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, – общество с ограниченной ответственностью «Тенькинская дорожная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, 

<

...>),  

при участии в заседании: 

от истца – ФИО2, ведущий юрисконсульт отдела правовой работы и закупок,  доверенность от 01.03.2021 № 06; ФИО3, доверенность от 08.02.2021;  

от ответчика – ФИО4, доверенность от 11.01.2021 № 01; от третьего лица – ФИО5, доверенность от 07.10.2019, 

 руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167 – 170, частью 1 статьи 171, статьями 174,  176, частью 1 статьи 180, статьей 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Принять признание иска ответчиком в части требования о выполнении работ по  устранению просадки переходных плит на сопряжениях в начале и в конце моста и  разрушения деформационных швов на опорах № 1 и № 3 на объекте «Строительство  мостового перехода через р. Дэкдэкэн на км 367+668 автомобильной дороги «Палатка –  Кулу – Нексикан» в Магаданской области».  

2. Иск удовлетворить полностью. 

3. Обязать ответчика, общество с ограниченной ответственностью  «МостоСтроительная Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в течение  одного месяца со дня вступления решения в законную силу выполнить в рамках  гарантийных обязательств по государственному контракту от 23.05.2016   № 0347200001416000375 в интересах истца, Магаданского областного государственного  казенного учреждения «Управление эксплуатации и строительства дорожно- транспортного комплекса» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), работы по  устранению следующих дефектов, указанных в приложении № 4 к акту приемочной  комиссии от 17.10.2017 и акте от 16.08.2018 № 02/08-2018, на объекте «Строительство  мостового перехода через р. Дэкдэкэн на км 367+668 автомобильной дороги «Палатка –  Кулу – Нексикан» в Магаданской области»:  

– просадка переходных плит на сопряжениях в начале и в конце моста;  – разрушение деформационных швов на опорах № 1 и № 3;  

– размыв левобережной дамбы в 150 м вверх по руслу реки с образованием  дополнительного притока, выработанного потоком воды из основного русла;  

– подмыв грунтов насыпи и обрушение откоса земляного полотна (магаданская  сторона) с просадкой железобетонных плит укрепления насыпи площадью 140 кв. м;  

– сползание обочины, барьерного ограждения, образование ряда трещин шириной  30 – 40 мм слева на подъезде к мосту;  

– разрушение конструкции бетонного растекателя водоотводного сооружения;  

– просадка конуса с образованием пустот под плитами укрепления, ригелем, зазор  раскрытием 150 мм;  

– потеки на внешней стороне шкафной стенки, ригеля на опоре № 1; 

– сползание обочины слева в конце моста в месте расположения информационного  знака, раскрытие трещины до 40 мм;  

– разрушение конструкции берегоукрепительного сооружения конуса, осадка  конуса, укрепленного железобетонными плитами, с образованием пустот под ригелем;  

– образование пустот под переходными плитами, под ригелем; 

– изменение положения (смещение) и визуальная деформация резиновых опорных  частей);  

– отсутствие температурного зазора между плитой шкафной стенки и торцами  балок пролетного строения на опоре № 1 (начало моста);  

– нарушение продольных и поперечных уклонов переходных плит на сопряжении  моста с насыпью: начало моста – продольные: ось – 68 ‰, ось правой проезжей части –  60 ‰, ось левой проезжей части – 60 ‰ (против проекта 6 ‰), поперечные: левая – 22 ‰,  правая – 42 ‰ (против проекта 30 ‰); конец моста – продольные: ось – 48 ‰, ось правой  проезжей части – 42 ‰, ось левой проезжей части – 42 ‰ (против проекта 6 ‰),  поперечные: левая – 34 ‰, правая – 30 ‰ (против проекта 30 ‰).  

4. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью  «МостоСтроительная Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу  истца, Магаданского областного государственного казенного учреждения «Управление  эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), штраф за ненадлежащее выполнение обязательств по  государственному контракту от 23.05.2016 № 0347200001416000375 в размере 653 715  рублей 62 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 22 074 рублей  00 копеек, а всего – 675 789 рублей 62 копейки.  

5. Бухгалтерии Арбитражного суда Магаданской области возвратить обществу с  ограниченной ответственностью «МостоСтроительная Компания» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), с депозитного счета суда денежные средства в размере 400 000 рублей  00 копеек по реквизитам, которые будут указаны получателем.  

6. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

7. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Магаданской  области.  

8. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.   

Судья В.А. Лушников 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.09.2020 2:07:58

Кому выдана Лушников Виктор Анатольевич