АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-25816/2024

г. Нижний Новгород                                                                                 01 апреля 2025 года

            Резолютивная часть решения оглашена 25.03.2025.

            Решение в полном объеме изготовлено 01.04.2025.

            Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

            судьи Погорелко Дениса Игоревича (шифр дела 36-544), 

            при ведении протокола секретарем судебного заседания Чекушкиным Антоном Владимировичем,

            рассмотрев на открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о расторжении муниципальных контрактов и взыскании 1 272 000,00 рублей,

            в отсутствие представителей сторон,            

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области 16.08.2024 обратилось общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город» (далее - ООО НИИ «Земля и город», истец) с исковым заявлением к Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (далее - Администрация, ответчик) о взыскании 1 272 000,00 рублей.

            Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 04.09.2024 вышеуказанное исковое заявление было принято арбитражным судом к производству и назначено к рассмотрению на предварительном судебном заседании 22.10.2024 с возможностью непосредственного перехода к рассмотрению дела по существу.

            Определением Арбитражного суда Нижегородской области от  22.10.2024 предварительное судебное заседание было отложено до 20.01.2025.

            Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 20.01.2025 предварительное судебное заседание судебное заседание было завершено и на 25.03.2025 назначено судебное заседание по рассмотрению дела по существу.

            Стороны, извещенные надлежащим образом, на судебное заседание не явились.

            Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

            Между Администрацией (Муниципальный заказчик) и ООО НИИ «Земля и город» (Исполнитель) 16.07.2019 были заключены следующие муниципальные контракты:

            - №78-ОК на подготовку проектов о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области;

            - №79-ОК на подготовку проектов о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Кочергинский сельсовет»Балахнинского муниципального района Нижегородской области;

            - 81-ОК на подготовку проектов о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Шеляуховский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

            Условия вышеуказанных Муниципальных контрактов идентичны.

            Так, стоимость работ, предусмотренных каждым Муниципальным контрактом, составляет 424 000,00 рублей (пункт 3.1 Муниципальных контрактов).

            Срок выполнения работ, предусмотренный пунктом 2.3.2 Муниципальных контрактов - до 01.11.2020, в том числе:

            - 1 этап (в течение 90 дней) - подготовка проектов; проведение кадастровых работ по разделу земельных участков, пересекающих границы населенных пунктов; устранение кадастровых, реестровых ошибок;

            - 2 этап (до 01.11.2020) - согласование результатов (отчетных материалов) с Правительством Нижегородской области; согласование с Правительством Российской Федерации; защита проектов на публичных слушаниях; утверждение генерального плана Правительством Нижегородской области и правил землепользования и застройки сельским советом муниципального образования; постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон; устранение ошибок и замечаний, возникших в ходе согласований с Правительством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации (при необходимости), а также при постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон.

            Пунктом 6.2.3 Муниципальных контрактов предусмотрено, что по результатам выполнения работ Исполнитель обязан представить Заказчику:

            - материалы проектов внесенных изменений в генеральные планы муниципальных образований, согласованные и утвержденные Правительством Нижегородской области и согласованные с Правительством Российской Федерации;

            - материалы проектов внесенных изменений в правила землепользования и застройки, утвержденные сельским советом соответствующего муниципального образования;

            - сведения о постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон муниципальных образований.

            Так, результаты работ по 1 этапу были направлены в адрес Администрации Балахнинского муниципального района 01.11.2019 письмом от 28.10.2019 исх. № 1831-КЭ/2019-035-037. 

            В рамках выполнения работ 2 этапа ООО НИИ «Земля и город» осуществлялось сопровождение проектов в процедурах согласования и публичных слушаний, были подготовлены сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон. 

            Проведение процедур согласования и публичных слушаний в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечивалось Администрацией. 

            Проекты генеральных планов были согласованы с Правительством Российской Федерации в мае 2020, что подтверждается: 

            1) сводным заключением Минэкономразвития России от 20 мая 2020 года №16031-ОТ/Д27 и о согласии с проектом генерального плана Коневского сельского поселения Балахнинского муниципального района Нижегородской области; 

            2) сводным заключением Минэкономразвития России от 22 мая 2020 года №16296-ОТ/Д27 и о согласии с проектом генерального плана Шеляуховского сельского поселения Балахнинского муниципального района Нижегородской области; 

            3) сводным заключением Минэкономразвития России от 22 мая 2020 года №16346-ОТ/Д27 и о согласии с проектом генерального плана Кочергинского сельского поселения Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

            В ходе согласования проектов генеральных планов от ряда органов исполнительной власти Нижегородской области поступили замечания, что послужило основанием для создания согласительных комиссий. Заседания согласительных комиссий были проведены 16 сентября 2020 года. По итогам согласительных совещаний были приняты решения согласовать проекты генеральных планов с учетом внесенных в них изменений и при условии доработки по замечаниям органов исполнительной власти Нижегородской области.

            Публичные слушания были проведены Администрацией Балахнинского муниципального района в декабре 2020 года (заключения о результатах публичных слушаний комиссии по землепользованию и застройке от 27 января 2021 года). По результатам публичных слушаний были приняты решения об одобрении проектов генеральных планов. 

            Таким образом, в конце 2020 года необходимые согласования были получены, публичные слушания проведены. От ООО НИИ «Земля и город» требовалось доработать проекты генеральных планов по замечаниям, обозначенным в протоколах заседаний согласительной комиссии от 16 сентября 2020 года (опубликованным Заказчиком в ФГИС ТП 07 декабря 2020 года).

            Результатом работ 2 этапа является утверждение генеральных планов Правительством Нижегородской области, правил землепользования и застройки – сельскими советами, а также постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон, которые устанавливаются утвержденными генеральным планом и правилами землепользования и застройки. 

            Однако в ходе исполнения Муниципальных контрактов по независящим от сторон причинам существенным образом изменились обстоятельства, из которых они исходили при заключении указанных Муниципальных контрактов.

            Так, Законом Нижегородской области от 29 апреля 2020 года № 31-З «О преобразовании муниципальных образований Балахнинского муниципального района Нижегородской области» (далее – Закон №31-З), Балахнинский муниципальный район Нижегородской области, а также городские поселения город Балахна, рабочий поселок Большое Козино, рабочий поселок Гидроторф, рабочий поселок Малое Козино, сельские поселения Коневский сельсовет, Кочергинский сельсовет, Шеляуховский сельсовет Балахнинского муниципального района Нижегородской области утратили статус муниципальных образований в связи с вновь образованным муниципальным образованием – Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области.

            Переходный период, определенный Законом №31-З, в течение которого муниципальные правовые акты по вопросам местного значения могли быть приняты органами местного самоуправления поселений, истек 31 декабря 2020 года.

            Таким образом, в настоящее время отсутствует возможность утвердить проекты, подготовленные в отношении сельских поселений: Коневский сельсовет, Кочергинский сельсовет, Шеляуховский сельсовет Балахнинского муниципального района Нижегородской области в порядке, установленном Муниципальными контрактами.

            О сложностях, которые могли возникнуть на стадии утверждения проектов, ООО НИИ «Земля и город» предупреждало Администрацию письмом от 01 февраля 2021 года исх.№0118-Э/2019-035-037. Вопросы, касающиеся дальнейшего исполнения Муниципальных контрактов, обсуждались представителями Администрации, Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и ООО НИИ «Земля и город», в том числе на совещаниях 27 января 2021 года (инициировано ООО НИИ «Земля и город» письмами от 21 января 2021 года исх.№0053-Э/2019-035-037, исх.№0054-Э/2019-035-037), 03 марта 2021 года.

            Так в письме от 01 февраля 2021 года исх.№0118-Э/2019-035-037 ООО НИИ «Земля и город» было предложено Администрации проанализировать вопросы о внесении изменений в условия контрактов с целью приведения их предметов в соответствие с Законом №31-З либо о расторжении Муниципальных контрактов.

            18 марта 2021 года были заключены дополнительные соглашения к Муниципальным контрактам о замене Заказчика на правопреемника – Администрацию Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

            Относительно изменения существенных условий Муниципальных контрактов или их расторжения в связи с изменившимися обстоятельствами соглашения между сторонами достигнуто не было, официальной позиции по данному вопросу Администрация не предоставила.

            Вместе с тем на совещаниях ООО НИИ «Земля и город» было предложено доработать проекты по замечаниям согласующих органов с условием последующей приемки и оплаты выполненных по Муниципальным контрактам работ.

            Проекты генеральных планов были доработаны ООО НИИ «Земля и город» и направлены в адрес Администрации с письмом от 14 апреля 2021 года исх.№0570-Э/2019-035-037.

            Затем в 2021 – 2022 годах ООО НИИ «Земля и город» неоднократно вносило дополнительные корректировки в проекты по новым замечаниям Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области (далее – Министерство), а также иных органов исполнительной власти Нижегородской области. Администрация направляла материалы на проверку в Министерство, замечания Министерства пересылала ООО НИИ «Земля и город». Последняя отправка ООО НИИ «Земля и город» откорректированных материалов по замечаниям и предложениям Министерства состоялась в конце февраля 2022 года (сопроводительное письмо от 22 февраля 2022 года исх.№0245-Э/2019-035-037).

            С февраля 2022 года подготовленные к утверждению материалы проектов находятся у Администрации В адрес ООО НИИ «Земля и город» замечания больше не направлялись.

            02 сентября 2022 года состоялось совещание, инициированное Администрацией, с участием представителей Заказчика и Исполнителя, на котором вновь обсуждались вопросы, связанные с расторжением Муниципальных контрактов и оплатой выполненных работ. На данном совещании окончательное решение принято не было.

            В письмах от 12 октября 2022 года №исх-103-483537/22, от 11 января 2023 года №10-01/2471 Администрация просила представить ей счета на оплату и документы, определяющие объем выполненных работ. Соответствующие документы и разъясняющая информация Исполнителем были предоставлены Заказчику.

            В письме от 26 октября 2022 года исх.№2063-КЭ/2019-035-037 ООО НИИ «Земля и город» сообщило, что он не имеет возможности предоставить Администрации утвержденные проекты и сведения о поставленных на кадастровый учет границах по независящим от него причинам. При этом работы по Муниципальным контрактам выполнены ООО НИИ «Земля и город» в полном объеме, отсутствие утвержденных проектов не является следствием недоработок, допущенных со стороны Исполнителя. Также ООО НИИ «Земля и город» указало, что в случае, если задолженность будет погашена Администрацией ранее 20 декабря 2022 года, то ООО НИИ «Земля и город» со своей стороны готово предоставить Заказчику скидку на оплату выполненных работ в размере 10% по каждому из Муниципальных контрактов. С этой целью в адрес Заказчика были направлены акты сдачи-приемки выполненных работ и счета на оплату со скидкой.

            В письме от 11 января 2023 года №10-01/2471 содержался запрос исполняющего обязанности начальника управления архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации Балахнинского муниципального округа ФИО1 о предоставлении актов для оплаты по Муниципальным контрактам. Письмом от 12 января 2023 года исх.№ 0019-КЭ/2019-035-037 в адрес Заказчика были направлены акты и счета со скорректированной датой – от 11 января 2023 года и также предусматривающие скидку 10%.

            В течение последующих 5 месяцев Заказчик приемку и оплату выполненных работ не произвел. Однако, 13 июня 2023 года ООО НИИ «Земля и город» были получены претензии Администрации от 09 июня 2023 года №исх-103-297208/23, №исх-103-297200/23 и №исх-103-297184/23, в которых содержалось требование об уплате пеней за просрочку выполнения работ по Муниципальным контрактам. В претензиях также было указано, что в случае непредоставления Заказчику до 19 июня 2023 года результата оказания услуг по Муниципальным контрактам в полном объеме, Администрация оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием о расторжении Муниципальных контрактов в связи с существенными нарушениями их условий со стороны Исполнителя.

            В ответе на претензию от 21 июня 2023 года исх.№ 0906-КЭ/2019-035-037 ООО НИИ «Земля и город» еще раз было отмечено, что материалы проектов, подготовленные к утверждению, находятся у Заказчика с февраля 2022 года, и что утверждение проектов – это не зона ответственности разработчика. Также в ответе на претензию ООО НИИ «Земля и город» сообщило об имеющихся претензиях у Исполнителя к Заказчику, напомнило о причинах задержек, возникших по вине Заказчика на стадиях согласования проектов генеральных планов и вновь предложило обсудить сложившуюся ситуацию и возможные выходы из нее, в том числе возможность расторжения Муниципальных контрактов по соглашению сторон.

            В устной беседе специалисты Заказчика пообещали организовать встречу с главой Администрации Балахнинского муниципального округа и уведомить Исполнителя о дате и времени ее проведения. Вместо такой встречи Заказчик разместил в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) решения об одностороннем отказе от исполнения Муниципальных контрактов (решения от 06 июля 2023 года №исх-103-346294/23, №исх-103-346291/23, №исх-103-346279/23 (далее – Решения)).

            В качестве основания для принятия Решений Заказчик указал, что претензионным письмом от 09 июня 2023 года он сообщил Исполнителю о необходимости в срок до 19 июня 2023 года предоставить Заказчику результат оказания услуги по Муниципальным контрактам в полном объеме. В связи с тем, что по состоянию на 21 июня 2023 года результат оказания услуги в полном объеме не был предоставлен Заказчику, сославшись на пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципальных контрактов.

            В ответе на Решения Заказчика ООО НИИ «Земля и город» сообщило о неправомерности таких действий, об отсутствии оснований для принятия Решений (письмо от 12 июля 2023 года исх.№1064-ЛЭ/2019-035-037). Вместе с ответом ООО НИИ «Земля и город» направило Администрации материалы проектов на материальных носителях, а также проекты соглашений о расторжении Муниципальных контрактов.

            17 июля 2023 года Заказчик разместил в ЕИС уведомление №исх-103-365584/23 об отмене решений об одностороннем отказе от исполнения Муниципальных контрактов.

            Письмом от 26 сентября 2023 года исх.№1508-Э/2019-035-037 на имя первого заместителя главы Администрации Балахнинского муниципального округа ООО НИИ «Земля и город» напомнило о том, что Заказчик не уведомил Исполнителя о результатах рассмотрения соглашений о расторжении Муниципальных контрактов.

            ООО НИИ «Земля и город» полагает, что работы, предусмотренные Муниципальными контрактами, были выполнены им в полном объеме.

            Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО НИИ «Земля и город» в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим исковым заявлением.

            Из имеющегося в материалах дела отзыва следует, что Администрация против удовлетворения заявленного требования возражает.

            ООО НИИ «Земля и город», в свою очередь, представлены контраргументы на возражения Администрации.

            Изучив и оценив представленные в материалы настоящего дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к следующему выводу. 

            В статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

            Согласно статьям 309, 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и ненадлежащее исполнение недопустимы.

            В соответствии с частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

            В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

            По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд  подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

            Согласно статье 726 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором, либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

            В соответствии с частью 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации  существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

            В силу пункта 2 части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

            Согласно части 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут судом.

            Частью 3 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

            В обоснование своих возражений Администрация указывает, что приемка и оплата выполненных ООО НИИ «Земля и город» работ не может быть осуществлена в связи с тем, что Муниципальные контракты не были исполнены в срок и не исполнены до настоящего времени.

            Под исполнением Муниципальных контрактов Администрация понимает предоставление ей утвержденных в установленном законом порядке проектов генеральных планов и проектов правил землепользования и застройки территорий сельских поселений: Коневский сельсовет, Кочергинский сельсовет, Шеляуховский сельсовет.

            Утверждение проектов – это процедура, которая совершается законодательно уполномоченным органом, а не разработчиком проекта. Препятствием для утверждения проектов генеральных планов и проектов правил землепользования и застройки территорий сельских поселений: Коневский сельсовет, Кочергинский сельсовет, Шеляуховский сельсовет являются не действия (бездействие) истца, а независящие от него обстоятельства, в том числе преобразование указанных сельских поселений в Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области Законом №31-З.

            Кроме того, выполнение работ в срок, установленный Муниципальными контрактами, стало невозможным из-за упущений Заказчика.

            Задержка выполнения работ была вызвана тем, что до начала процедуры согласования и во время ее проведения Администрацией не были разрешены вопросы, связанные с приведением в соответствие сведений единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) и государственного лесного реестра (далее – ГЛР) с учетом применения Федерального закона от 29.07.2017 №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель», что подтверждается письмом ООО НИИ «Земля и город» от 05 февраля 2020 года исх.№0156-Э/2019-035-037 и письмом Администрации от 27 ноября 2020 года №исх.-103-540838/20, из-за чего в ходе работы согласительной комиссии остался не урегулированным вопрос с Департаментом лесного хозяйства Нижегородской области по исключению из ГЛР сведений о пересечении земельных участков, которые согласно сведениям ЕГРН, расположены в границах населенных пунктов муниципальных образований.

            Также со значительной задержкой Администрацией были проведены публичные слушания по проектам, а именно 24, 28 и 29 декабря 2020 года, спустя почти год с момента получения от ООО НИИ «Земля и город» материалов, в объеме, достаточном для назначения публичных слушаний (были переданы Администрации с письмом от 23 января 2020 года исх.№0098-КЭ/2019-035-037).

            В соответствии с частью 2 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

            С истечением 2020 года завершился и переходный период, установленный Законом № 31-З. 

            Однако Заказчик своими действиями давал основание полагать, что, несмотря на истечение переходного периода, проекты, подготовленные в отношении сельских поселений, будут утверждены, а выполненные Исполнителем работы - оплачены.

            Материалы проектов были переданы Заказчику в полном объеме за исключением актов уполномоченных органов об утверждении проектов. Мотивированных замечаний по полученным материалам Заказчик в адрес Исполнителя не направлял.

            Недостижение цели контракта в виде утверждения проектов, при полном выполнении объема работ по подготовке проектов, не может служить основанием для отказа в оплате стоимости цены контракта.

            При таких обстоятельствах, исходя из вышеизложенного, арбитражный суд находит исковые требования ООО НИИ «Земля и город» законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

            Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

            Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

расторгнуть муниципальные контракты от 16.07.2019 №78-ОК, №79-ОК и №81-ОК, заключенные между Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (ранее - Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области) и обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Взыскать с Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 272 000,00 рублей стоимости выполненных работ по муниципальным контрактам от 16.07.2019 №78-ОК, №79-ОК и №81-ОК (424 000,00 рублей по каждому Муниципальному контракту), а также 43 720,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение  может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Волго-Вятского  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                          Д.И.Погорелко