АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-21027/2021 

Дата принятия решения –  12 октября 2021 года.

Дата объявления резолютивной части –  11 октября 2021 года.

Судья Арбитражного суда Республики Татарстан З.Н. Хамитов, при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по заявлению

Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Татарстан, г.Казань (Ростехнадзор) (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Акционерному обществу "ТГК-16", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о рассмотрении протокола об административном правонарушении от 23.08.2021г. №43-10-2021-1551 и иные материалы административного дела №43-10-2021-1551 и привлечения АО «ТГК-16» к административной ответственности по ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора – ПАО «Нижнекамскнефтехим».

При участии:

От заявителя – ФИО2, представитель по доверенности от 21.12.2020г., ФИО3, представитель по доверенности от 25.12.2020г.,

От ответчика –  ФИО4, представитель по доверенности от 11.01.2021г.,

От третьего лица – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  по Республике Татарстан, г.Казань ( далее Ростехнадзор) (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее Управление) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к  Акционерному обществу "ТГК-16", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о рассмотрении протокола об административном правонарушении от 23.08.2021г. №43-10-2021-1551 и иных материалов административного дела №43-10-2021-1551 и привлечения АО «ТГК-16» к административной ответственности о ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора – ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В судебном заседании представители Заявителя поддержали требования в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении и письменных пояснениях.

Представитель Ответчика заявленные требования не признал, само предписание не оспаривал, представил отзыв, дополнение к отзыву.

Третье лицо о дате судебного заседания извещено, явку своего представителя не обеспечило.

Как следует из материалов дела, на основании решения Управления от 26.07.2021 № Р-290-105 в период  с 29.07.2021 по 09.08.2021 Управлением проведена внеплановая выездная проверка объекта капитального строительства «Строительство ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Указанное решение принято  на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с истечением срока исполнения АО «ТГК-16» ранее выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований от 30.04.2021  № 43-10-2021-133 (срок устранения до 12.07.2021). 

Техническим заказчиком объекта капитального строительства на основании договора от 30.05.2017 № 13-984/2017 является АО «ТГК-16».

Результаты проверки зафиксированы в акте проверки от 09.08.2021 № 43-10-2021-243.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Управлением выявлены факты невыполнения АО «ТГК-16» в установленный срок ранее выданного предписания от 30.04.2021 № 43-10-2021-133, а именно:

- в срок до 12.07.2021 АО «ТГК-16» не устранены нарушения обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности, указанные в пунктах 1-5 предписания от 30.04.2021 № 43-10-2021-133.

С учетом изложенного, государственным инспектором Межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями  и котлонадзора Управления ФИО3 составлен протокол об административном правонарушении от 23.08.2021 № 43-10-2021-1551 в отношении АО «ТГК-16»  по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ, ответчик о дате составления протокола надлежащим образом извещен.

На основании абзаца 4 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ Управление обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о привлечении АО «ТГК-16» к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Суд, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, заслушав представителей сторон, считает, что заявление подлежит удовлетворению  по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе  об административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в том числе  об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм,  о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным  в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры  по их соблюдению.

В соответствии с частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

Как установлено из материалов дела, на основании решения и.о. заместителя руководителя Управления от 26.07.2021 № Р-290-105 в период с 29.07.2021 по 09.08.2021 Управлением проведена внеплановая выездная проверка объекта капитального строительства «Строительство ПГУ-ТЭС  для ПАО «Нижнекамскнефтехим», по результатам которой составлен акт проверки  от 09.08.2021 № 43-10-2021-243.

В ходе проведения контрольных мероприятий Управлением установлено, что Обществом в срок до 12.07.2021 не устранены нарушения обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности, указанные в пунктах 1-5 предписания от 30.04.2021 № 43-10-2021-133, а именно:

1. В нарушение проекта по осям А-Б уменьшена длина здания установки подготовки газообразного топлива (ЗУПГТ) по проекту 112500 мм, фактически длина составляет 106500 мм. По осям В-Г увеличена длина ЗУПГТ на 12000 мм, так по проекту длина составляет 60000 мм, по факту 72000 мм.

2. В нарушение проекта в здании вместо предусмотренной проектом несущей балки сечением I40Ш1 применялась балка сечением I35Ш1.

3. При бетонировании фундаментов здания установки подготовки газообразного топлива (ЗУПГТ) Фм1-Фм8 применялся бетон класса прочности В20 вместо предусмотренного проектом бетона класса прочности В25.

4. В нарушение проектной документации в титуле ЗУПГТ, который прошел положительную государственную экспертизу 16-1-1-3-032951-2019 от 25.11.2019, на линии трубопровода сингаза установлен не проектный выпрямитель.

5. Производятся работы, не предусмотренные проектной документацией, которые прошли положительную государственную экспертизу 16-1-1-3-032951-2019 от 25.11.2019, а именно:

- произведено изменение расположение опор, добавлен фундамент под лестницу, изменена конструкция изделия МН 1;

- изменена конструкция колонны;

- добавлены опоры;

- изменен объем бетона в спецификации на 7л, что в свою очередь подтверждается актами АОСР, ИТД.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении Общества протокола об административном правонарушении по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ от 23.08.2021 № 43-10-2021-1551.

О составлении протокола от 23.08.2021 № 43-10-2021-1551 Общество надлежащим образом извещено, что подтверждается уведомлением от 16.08.2021 № 246 (получено 16.08.2021 вх. № 2519).

На составление протокола от 23.08.2021 № 43-10-2021-1551 законный представитель АО «ТГК-16» не явился, явку своего представителя не обеспечил.

Поскольку предписание от 30.04.2021 № 43-10-2021-133 Обществом в установленный срок (до 12.07.2021) не исполнено, суд считает, что в его действиях содержится состав вменяемого административного правонарушения.

В соответствии с пунктом 22 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТГК-16» заключен договор от 30.05.2017 № 13-984/2017 на выполнение функций технического заказчика (далее – Договор от 30.05.2017 № 13-984/2017).

Согласно пункту 1.2 Договора от 30.05.2017 № 13-984/2017 технический заказчик – юридическое лицо, действующее на профессиональной основе, которое уполномочено Заказчиком и от имени Заказчика выступать во взаимоотношения с Генеральным подрядчиком (его субподрядчиками), уполномоченными государственными органами и учреждениями в целях реализации Проекта и оказывающее Заказчику Услуги, согласно разделам 2, 3, 5-9 настоящего Договора. 

Пунктом 2.1 Договора от 30.05.2017 № 13-984/2017 установлено, что технический заказчик профессионально занимается эксплуатацией генерирующих мощностей, обладает профессиональными знаниями в области энергетики, имеет опыт реализации проектов строительства генерирующих мощностей, а Заказчик намерен осуществить строительство генерирующего Объекта на условиях строительства «под ключ» и, в связи с этим, Заказчик намерен привлечь Технического заказчика на оказание услуг в основном по вопросам:

- принятия технически и экономически обоснованных проектных решений;

- технически и экономически обоснованного выбора основного и вспомогательного генерирующего оборудования;

- решения организационных вопросов, связанных с получением необходимых разрешений и согласований как на этапе проектирования, строительства, пуско-наладки Объекта, так и на этапе начала коммерческой деятельности Объекта;

- контроль за исполнением Генподрядчиком своих обязательств.

В соответствии с пунктом 2.3.14 Договора от 30.05.2017 № 13-984/2017 в рамках реализации Проекта Технический заказчик обязуется обеспечить контроль за исполнением Генподрядчиком своих обязательств по Договору Генподряда.

Согласно пункту 3.1 Договора от 30.05.2017 № 13-984/2017 в целях создания Объекта Технический заказчик обеспечивает самостоятельно, а в случаях, предусмотренных Договором – совместно с Заказчиком – контроль за осуществлением Генподрядчиком всего комплекса Работ, предусмотренных Договором Генподряда (в том числе соответствие Работ Техническим требованиям, Проектной документации, строительным и техническим нормам и правилам РФ), с надлежащим качеством и в установленные договором сроки.

Для этого Технический заказчик осуществляет технический надзор и строительный контроль за проектированием и строительством Объекта (контроль за качеством проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, сроками их выполнения, применения соответствующих материалов и оборудования). Осуществляет контроль за выполнением этапов строительства в порядке, предусмотренном Договором Генподряда между Генподрядчиком и Заказчиком, с целью определения готовности этапа Работ и определения возможности продолжения финансирования по Договору Генподряда (пункт 3.1.1 Договора от 30.05.2017 № 13-984/2017).

В соответствии с пунктом 3.1.8 Договора от 30.05.2017 № 13-984/2017 Технический заказчик осуществляет проверку Проектной документации, организует внесение необходимых изменений и исправлений в Проектную документацию и предоставляет Проектную документацию на согласование (утверждение) Заказчику и обеспечивает контроль и сопровождение в проведении Генподрядчиком государственной экспертизы проектной документации по Объекту.

Согласно пункту 7.1 Договора от 30.05.2017 № 13-984/2017 в рамках мероприятий по строительству Объекта Технический заказчик обязуется обеспечить:

- надзор за исполнением Генподрядчиком предписаний органов государственного строительного контроля (пункт 7.1.2);

- осуществление строительного контроля от лица Заказчика за ходом выполняемых работ (пункт 7.1.4);

- контроль ведения Генподрядчиком исполнительной документации по Объекту (пункт 7.1.14);

- контроль устранения Генподрядчиком выявленных недостатков, составления актов об устранении выявленных недостатков (пункт 7.1.15);

- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (скрытые работы) (пункт 7.1.16).

В соответствии с пунктом 7.4 Договора от 30.05.2017 № 13-984/2017 Технический заказчик обязуется в возможно короткий срок известить Руководителя Проекта и, до получения от него соответствующих указаний, приостановить выполнение работ по созданию Объекта, при не зависящих от Технического заказчика обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок, предусмотренный настоящим Договором.

Таким образом, условиями Договора от 30.05.2017 № 13-984/2017 определены функции АО «ТГК-16» как Технического заказчика, в числе которых осуществление строительного контроля за проектированием и строительством Объекта, организация внесений необходимых изменений и исправлений в Проектную документацию, с последующим контролем и сопровождением в проведении Генподрядчиком государственной экспертизы проектной документации по Объекту, надзор за исполнением предписаний органов государственного строительного контроля, а также приостановление работ в случае наличия угрозы прочностным характеристикам результатов выполняемых работ.

Общество, являясь Техническим заказчиком, обязано осуществлять контроль за исполнением предписаний органов государственного строительного надзора и не допускать нарушений требований проектной документации и строительных норм со стороны Генподрядчика. Кроме того, в случае наличия угрозы прочностных характеристик объекта капитального строительства Общество обязано приостановить работы на указанном объекте.

Довод Ответчика о том, что Общество не может исполнить предписание от 30.04.2021 № 43-10-2021-133, так как не осуществляет строительно-монтажные работы на Объекте, подлежит отклонению Судом по следующим основаниям.

Согласно пункту 22 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Частью 7 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ установлено, что отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с настоящим Кодексом, в том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3.1.8 Договора от 30.05.2017 № 13-984/2017 Технический заказчик осуществляет проверку Проектной документации, организует внесение необходимых изменений и исправлений в Проектную документацию и предоставляет Проектную документацию на согласование (утверждение) Заказчику и обеспечивает контроль и сопровождение в проведении Генподрядчиком государственной экспертизы проектной документации по Объекту.

Перечисленные в ранее выданном предписании от 30.04.2021 № 43-10-2021-133 и протоколе от 23.08.2021 № 43-10-2021-1551 нарушения свидетельствуют об отступлении от проектных значений зданий и сооружений, затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства.

В этой связи, с учетом приведенных выше правовых норм и положений договора, прекращение и устранение выявленных нарушений сводится к совершению Обществом одного из следующих действий:

- привести уже построенный объект в соответствие с разработанной проектной документацией, получившей положительное заключение от ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

- внести изменения в проектную документацию путем организации процедуры по внесению указанных изменений, обеспечению контроля и сопровождения в проведении государственной экспертизы проектной документации по Объекту.

При этом следует учесть, что отсутствие конкретизации возлагаемых обязанностей не свидетельствует о неисполнимости предписания, поскольку способ устранения нарушений обязательных требований юридическое лицо должно определять самостоятельно. 

Указание в предписании конкретного способа устранения нарушений может затрагивать права и законные интересы Общества, поскольку не предоставляет последнему возможность самостоятельно избрать способы устранения нарушений, указанных в предписании. 

Хозяйствующий субъект может выбрать более эффективный и дешевый способ устранения нарушения или принять иные меры, которые административный орган не сможет и не должен предусмотреть. В случае указания порядка действий, Управление будет обязано контролировать не только результат, но и порядок действий хозяйствующего субъекта, так как ответственность установлена только за неисполнение предписания, а не за отступление от указания органа по ходу его исполнения. 

Необходимо отметить, что по аналогичным нарушениям Общество привлекалось к административной ответственности по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства) с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 300 000 рублей (постановление от 07.09.2020 № 43-09-2020-1589). 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.12.2020 по делу № А65-22586/2020, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2021 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 22.07.2021, сумма административного штрафа по постановлению от 07.09.2020 № 43-09-2020-1589 снижена до 100 000 рублей.

Кроме того, по подобным нарушениям Общество привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 9.5 КоАП РФ (продолжение работ до составления актов об устранении выявленных органом государственного строительного надзора недостатков при строительстве объекта) с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей (решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.05.2021 по делу № А65-5132/2021).

В рамках дел № А65-22586/2020, № А65-5132/2021 Общество заявляло, что изменения проектной документации вместе с обосновывающими расчетами были направлены для прохождения главгосэкспертизы. 

В рамках настоящего дела Общество также утверждает, что изменения в проектную документацию находятся на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Данное обстоятельство свидетельствует о том, что на протяжении длительного периода времени (с сентября 2020 года) строительство объекта ведется с отступлениями от требований проектной документации, что указывает на отсутствие надлежащего строительного контроля со стороны технического заказчика – АО «ТГК-16».

Таким образом, исследовав и оценив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Ответчика состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ. 

В рассматриваемом случае, оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая отсутствие отягчающих вину обстоятельств, Суд считает возможным назначить Обществу минимальный штраф, предусмотренный частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 202-206 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Заявление удовлетворить.

Привлечь Акционерное общество «ТГК-16», г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Исполнительный документ на принудительное взыскание выдать по истечению 60 дней со дня вступления решения в законную силу, при отсутствии уведомления суда о его добровольном исполнении. 

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан, а также в кассационном и надзорном порядке в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Реквизиты на оплату штрафа: 

ИНН 

<

***>, КПП 165501001, УФК по РТ Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

р/с 

<

***> Отделение - НБ Республика Татарстан, БИК 019205400, ОКТМО 92644000, КБК 498 1 16 01191 01 0005 140.

Судья Хамитов З.Н.