АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000

http://pskov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А52-6506/2024

город Псков

26 февраля 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена 13 февраля 2025 года.

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Рутковской А.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ВИКИНГИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 180004, 

<

...>) 

к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 196247, 

<

...>, лит.А, пом.16Н; Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад», адрес: 180000, 

<

...>)

об обязании осуществить технологическое присоединение объекта, о взыскании 134766 руб. 67 коп. неустойки, а также судебной неустойки в размере 5000 руб. за каждый день с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения решения суда по день его фактического исполнения 

при участии в заседании:

от истца: ФИО2 - представитель по доверенности; 

от ответчика: ФИО3 - представитель по доверенности;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ВИКИНГИ» (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад»  (далее – ответчик, сетевая организация) об обязании в течение двух месяцев с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов энергопринимающих устройств Общества согласно типовым условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.10.2021; о взыскании с сетевой организации 134766 руб. 67 коп. неустойки за период с 26.04.2022 по 13.02.2025; о взыскании с сетевой организации  судебной неустойки в размере 5000 рублей в случае неисполнения решения суда в части технологического присоединения к электрическим сетям за каждый день просрочки исполнения (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом протокольным определением от 13.02.2024 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)).

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении, с учетом заявленного уточнения. Просил удовлетворить иск в полном объеме. 

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в отзыве на иск. Не возражая против удовлетворения исковых требований о возложении обязанности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям вышеуказанного объекта, обратил внимание, что истцом в полном объеме оплата по заключенному договору не проведена. Признал просрочку исполнения обязательства по договору со стороны сетевой организации, которые допущены из - за роста стоимости материально – технических ресурсов, нарушения цепочек поставок материалов и оборудования, повышенного спроса у заводов изготовителей, коротких сроков на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, наличия в зимний период аварийных работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, большого объема работ по договору (замена 2 трансформаторов 400 кВА на трансформаторы 630 кВА). Также обратил внимание на значительную величину кредитной нагрузки на сетевую организацию. С учетом изложенного просил увеличить срок исполнения договора до 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу, а также снизить размер судебной неустойки до 500 руб. в день.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

08.10.2021 Общество обратилось к сетевой организации с заявкой на присоединение энергопринимающих устройств, а именно объекта недвижимости, расположенного по адресу: 180017, 

<

...>, максимальной мощностью  до 150 кВт при напряжении 0,4 кВ.

Согласно пункту 1 типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения (далее - типовые условия договора) сетевая организация принимает на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства/объектов по производству электрической энергии; далее - электроустановки) заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электроустановок, регулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение.

В соответствии с пунктом 2 типовых условий договора наименование и местонахождение электроустановок заявителя, технические характеристики осуществляемого технологического присоединения, срок действия технических условий, перечень мероприятий по технологическому присоединению, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению указываются в Технических условиях (далее - ТУ).

Технические условия, размещаются сетевой организацией одновременно с размещением настоящих типовых условий договора и счета на оплату технологического присоединения в личном кабинете заявителя (пункт 3 типовых условий договора).

В силу пункта 4 типовых условий договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящим типовым условиям договора, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения электроустановок заявителя к электрическим сетям; по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий в соответствии с техническими условиями не позднее срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, указанного в технических условиях, составить и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического присоединения.

На основании пункта 6 типовых условий договора заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в размере и в сроки, указанные в счете на оплату услуг по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 8 типовых условий договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и подлежит указанию в счете на оплату технологического присоединения.

Согласно пункту 9 типовых условий договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке и в сроки, указанные в счете на оплату технологического присоединения.

В силу пункта 11 типовых условий договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

Пунктом 19 типовых условий договора установлено, что договор об осуществлении технологического присоединения электроустановок заявителя к электрическим сетям сетевой организации считается заключенным со дня оплаты заявителем счета, выставленного в личном кабинете заявителя.

В соответствии с выставленным сетевой организацией счетом и графиком оплаты размер платы за технологическое присоединение составил 116870 руб. 82 коп. При этом из выставленного сетевой организацией графика оплаты следует, что платежи в сумме 17530 руб. 62 коп., 35061 руб. 25 коп. производятся заявителем со дня выставления счета на аванс и с даты заключения договора, платежи в остальной части производятся после фактического присоединения объектов потребителя к электрическим сетям.   

Истцом обязательства по оплате технологического присоединения исполнены в соответствии с графиком платежей в сумме 17530 руб. 62 коп. и в сумме 35061 руб. 25 коп., что подтверждается представленными в материалы дела копиями платежных поручений № 456 от 25.10.2021, № 557 от 21.12.2021.

С учетом условий пункта 19 типовых условий договора, а также графика оплаты услуг по технологическому присоединению, даты внесения первого платежа по выставленному счету 25.10.2021 между истцом (заявитель по договору) и ответчиком заключен договор № СПБ80-25951/21-001 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор) и выданы технические условия № СПБ80-25951/21-001 (далее – Технические условия).

Согласно пункту 13 Технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Однако по истечении 6 месяцев со дня заключения Договора, то есть до 25.04.2022, ответчик взятые на себя обязательства по Договору не исполнил, при этом продлил в одностороннем порядке срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия технических условий первоначально до 01.07.2023 и до 25.10.2023 соответственно, а затем до 30.06.2025, уведомив об этом истца письмами. Продление срока ответчик мотивировал необходимостью поиска и принятия решений по импортозамещению используемой компонентной базы, а также значительным увеличением количества заявок на технологическое присоединение и объемов работ по ранее заключенным договорам.

Неисполнение сетевой организацией обязательств по Договору ответчиком явилось основанием для обращения Общества в суд с настоящим иском. 

Оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), арбитражный суд считает заявленные требования обоснованными по праву и подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

На основании пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу пункта 2 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

В соответствии со статьей 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 – 419 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

Согласно пункту 1 статьи 422  ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В силу пункта 1 статьи 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло - и энергоснабжения.

Применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон №35-ФЗ) и Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правилах недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правилах недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее – Правила №861).

Пунктом 1 статьи 26 Закона №35-ФЗ предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Правила №861  регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (технологическое присоединение) и определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (договор технологического присоединения).

В силу названного правового подхода заключенный сторонами договор технологического присоединения не может быть квалифицирован ни как договор оказания услуг, ни как смешанный договор, включающий в себя элементы договора возмездного оказания услуг и подряда. Настоящий договор по своей правовой природе является договором технологического присоединения. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Из характера обязательств сторон по договору технологического присоединения  следует, что к правоотношениям по такому договору применимы как нормы глав 37, 39 ГК РФ, так и общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ), при этом необходимо учесть следующее.  

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе требований о возможности воздействия систем противоаварийной и режимной автоматики на энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

По условиям пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

На основании пункта 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

К договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702-729), если это не противоречит статьям 779-782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (статья 783 ГК РФ).

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В силу статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств в обоснование своих требований и возражений лежит на той стороне, которая на эти обстоятельства ссылается. В соответствии со статьями 9, 41 названного Кодекса риск наступления негативных последствий совершения или несовершения лицом, участвующим в деле, процессуальных действий и неисполнения процессуальных обязанностей несет это лицо.

С учетом того, что Договор сторонами заключен 25.10.2021, установленный пунктом 13 Технических условий срок выполнений мероприятий по технологическому подключению истекал 25.04.2022 (с учетом требований статьи 193 ГК РФ). Однако как в уставленный срок, так и за его пределами, в том числе на дату вынесения судом решения по настоящему делу, ответчиком обязательства по технологическому присоединению не исполнены, в то время как договорные обязательства по оплате истцом исполнены полностью в соответствии графиком оплаты услуг. При этом Договор сторонами не расторгнут и является действующим. 

Ответчиком факт неисполнения обязательств по Договору не оспаривался. 

Статья 12 ГК РФ предусматривает защиту гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

С учетом установленного и на основании статей 12, 309, 310 ГК РФ, суд приходит к выводу об отсутствии обстоятельств, препятствующих ответчику в выполнении обязательств по договору, и наличии оснований для понуждения сетевой организации к выполнению обязательства в натуре.

Доводы ответчика о том, что невыполнение обязательств по Договору обусловлено ростом стоимости материально – технических ресурсов, нарушением цепочек поставок материалов и оборудования, повышенным спросом у заводов изготовителей, коротких сроков на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, наличием в зимний период аварийных работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, большым объемом работ по договору (замена 2 трансформаторов 400 кВА на трансформаторы 630 кВА), значительной величиной кредитной нагрузки на сетевую организацию, судом не принимаются, поскольку не свидетельствуют о возможности неисполнения договорных обязательств.

Судом также отклоняются доводы ответчика о том, что истцом в полном объеме оплата по заключенному договору не проведена, поскольку Обществом обязательства по оплате технологического присоединения исполнены в полном объеме в соответствии с графиком платежей в сумме 17530 руб. 62 коп. и в сумме 35061 руб. 25 коп., что подтверждается представленными в материалы дела копиями платежных поручений № 456 от 25.10.2021, № 557 от 21.12.2021. Платежи в остальной части согласно графику платежей производятся после фактического присоединения объектов потребителя к электрическим сетям, то есть после исполнения сетевой организацией своих обязательств по Договору, которые не исполнены.  

В соответствии со статьей 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. 

Истцом при обращении в суд с иском испрашивался двухмесячный срок со дня вступления  решения в законную силу для исполнения ответчиком обязательств по договору. 

Изучив обстоятельства дела, руководствуясь принципом разумности, учитывая объем необходимых подлежащих выполнению работ, принимая во внимание специфику выполнения работ, пояснения ответчика о том, что в целях исполнения обязательств по договору необходимо осуществить замену двух трансформаторов 400 кВА на трансформаторы 630 кВА, учитывая наличие в зимний период аварийных работ обеспечиваемых силами сетевой организации, а также ряд иных мероприятий, необходимых для выполнения условий Договора, суд считает, что установление испрашиваемого истцом срока в рассматриваемом случае является достаточным, который в том числе будет приходится на более благоприятный для проведения работ период времени года. В связи с изложенным, а также соблюдая баланс интересов сторон, суд считает целесообразным установить срок для исполнения Обществом обязательств по Договору в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения по настоящему делу, что не нарушает права истца, а также предоставляет возможность ответчику использовать для добровольного выполнения мероприятий по Договору период до вступления решения суда в законную силу. 

При этом судом отклоняются доводы ответчика о необходимости установления шестимесячного срока для осуществления мероприятий по технологическому присоединению со дня вступления решения суда в законную силу, поскольку с момента заключения Договора до момента вынесения настоящего времени, то есть на протяжении более чем 3 лет, с учетом наличия иных заявок на технологическое присоединения и иных обстоятельств, у сетевой организации имелось достаточно времени для выполнения комплекса работ в целях обеспечения выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта истца. Доказательств, свидетельствующих об обратном, ответчиком не представлено. По мнению суда, установление более длительного срока повлечет нарушение прав и законных интересов истца надлежащим образом исполнившим свои договорные обязательства и обоснованно ожидающего встречного предоставления от ответчика, которое с учетом условий Договора должно было быть обеспечено не позднее 25.04.2022, то есть более 2 лет назад. 

Таким образом, суд обязывает сетевую организацию в течение двух месяцев с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов энергопринимающих устройств Общества согласно типовым условиям Договора.

В связи с неисполнением ответчиком договорных обязательств истцом заявлена к взысканию неустойка, исчисленная на основании абзаца 2 пункта 14 Договора, за период с 26.04.2022 по 13.02.2025 (с учетом заявленного уточнения исковых требований).

Пунктом 1 статьи 329 ГК РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой. 

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу пункта 14 Договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки (кроме заявителей технологическое присоединение электроустановок которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

Факт невыполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен судом и не оспаривается ответчиком, а потому требование истца о взыскании неустойки заявлено обоснованно.

Расчет неустойки проверен судом, признан правильным. Ответчиком расчет и сумма пеней не оспорены, ходатайство о снижении неустойки на основании статьи 333 ГК РФ не заявлено, судом оснований для ее снижения не установлено. 

Таким образом, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 134766 руб. 67 коп. неустойки за период с 26.04.2022 по 13.02.2025.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика судебной неустойки в размере 5000 руб. 00 коп. на случай неисполнения решения суда за каждый день просрочки исполнения в части технологического присоединения к электрическим сетям. 

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановления Пленума №7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 постановления Пленума №7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства. Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. 

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Определяя размер судебной неустойки, суд исходит из следующего.

Законодатель не урегулировал вопрос размера взыскания судебной неустойки при ее взыскании в соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

При таких обстоятельствах суд исходит из того, что взыскиваемая в пользу кредитора денежная сумма должна отвечать принципам справедливости и соразмерности. Основной целью взыскания денежных средств за неисполнение судебного акта является побуждение к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию с учетом принципов справедливости и соразмерности, а не обогащение взыскателя.

Ответчик в своем отзыве полагает, что заявленный истцом размер судебной неустойки на случай неисполнения решения суда в размере 5000 руб. 00 коп. в день является завышенным и ходатайствовал о ее снижении.

Исходя из обстоятельств дела, учитывая объем предстоящих мероприятий, степень затруднительности исполнения судебного акта, сопоставляя соразмерность заявленной к взысканию неустойки последствиям возможного нарушения обязательств, в целях соблюдения баланса интересов сторон, суд считает возможным уменьшить размер истребуемой истцом судебной неустойки до 1000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта с момента истечения установленного решением суда срока его исполнения до дня фактического исполнения судебного акта. По мнению суда, данная сумма не будет способствовать обогащению заявителя, который не преследует цели взыскания денежных средств, в то же время будет являться достаточным стимулом для сетевой организации для исполнения решения суда по настоящему делу в установленные сроки, в связи с чем, в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки в остальной части следует отказать. 

Принимая во внимание результат разрешения спора, в соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины в сумме 60000 руб. 00 коп. подлежат отнесению на ответчика и взысканию в пользу истца. В связи с тем, что при увеличении истцом периода и размера заявленной к взысканию неустойки государственная пошлина Обществом не уплачивалась, с сетевой организации в доход федерального бюджета надлежит взыскать 1738 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

обязать публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение двух месяцев с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «ВИКИНГИ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) согласно типовым условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.10.2021.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВИКИНГИ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 134766 руб. 67 коп. неустойки за период с 26.04.2022 по 13.02.2025.

В случае неисполнения решения суда в части технологического присоединения к электрическим сетям взыскать с публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВИКИНГИ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 1000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании судебной неустойки отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВИКИНГИ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 60000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1738 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

На решение в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.

Судья                                                                                                             А.Г.Рутковская