Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-9311/2018

09 октября 2019 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гуляевой А. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения "Служба  государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Профстрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), при участии третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего  общества с ограниченной ответственностью «Профстрой» ФИО2,  об устранении недостатков выполненных работ.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Профстрой" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в месячный срок со дня вступления в силу судебного акта по  настоящему делу безвозмездно устранить на объекте «Создание комплекса обеспечивающей  инфраструктуры туристских кластеров в Республики Саха (Якутия) Туристско- рекреационный кластер «Северная мозаика» недостатки (дефекты) по государственному  контракту № 0116200007917000318 от 28.04.2017, а именно:  

3.3 

Провести гидравлические испытания противопожарных  

емкостей 

мЗ 

2*50,0  

4. Площадка № 5 

4.2 

Провести ревизию болтовых соединений установленной КТП-400,  

выполнить пусконаладочные работы, в том числе по  фотоэлементному включению освещения автодороги  

- 

- 

4.3 

Провести гидравлические испытания противопожарных емкостей  

в количестве 2*50,0 мЗ 

мЗ 

2*50,0  

5. Площадка № 6 

5.2 

Провести ревизию болтовых соединений установленной КТП-400,  

выполнить пусконаладочные работы, в том числе по  фотоэлементному включению освещения автодороги  

- 

- 

5.3 

Провести гидравлические испытания противопожарных  

емкостей 

мЗ 

2*100,0  

7. Сети ливневой канализации. Пруд - накопитель 

7.4 

Провести пусконаладочные работы станции нефтеочистки, 

проверка комплексной работоспособности пруда - накопителя 

шт. 

1 

7.6 

Осуществить очистку песколовки пруда накопителя  

- 

- 

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Профстрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения  "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) расходы по госпошлине в размере 6 000 рублей и расходы по экспертизе в  размере 54 000 рублей.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную  силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Судья А. В. Гуляева