9/2018-180461(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

Дело № А43-26331/2017 

г.Нижний Новгород 24 сентября 2018 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

обязать ООО "ТСК НН" в двухмесячный срок со дня вступления решения суда по делу   № А43-26331/2017 в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ,  выполненных по договору генерального подряда от 25.09.2014 № 5, а именно:  

- произвести работы по устройству слоя звукоизоляции из пенополистирола в  конструкции полов помещений квартир 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по  адресу: Нижегородская область, Кстовский район, пос. Селекционной станции, д. 17а, в  соответствии с проектной документацией путем выполнения следующего перечня и  объема работ:  

1. Снятие плинтусов пластиковых – 180,0м. 

2. Снятие линолеума на теплоизолирующей основе, уложенного насухо – 1592,1  м2.  

3. Демонтаж стяжки толщиной 40 мм из цементно-песчаного раствора М200  армированной сеткой с ячейкой 250*250 мм – 1592,1 м2.  

4. Снятие полиэтиленовой пленки – 1592,1 м2. 

5. устройство звукоизоляции из пенополистирола ПСБ-С-М25 толщиной 30мм –  1592,1 м2.  

6. Укладка полиэтиленовой пленки 200мк – 1592,1 м2.  

7. Устройство стяжки толщиной 40мм из цементно-песчаного раствора М200  армированной сеткой 4Вр-I с ячейкой 250*250мм – 1592,1 м2.  

8. Укладка линолеума па теплоизолирующей основе (б/у) на клеящей мастике или  клее -1592,1 м2.  

 9.Установка плинтусов пластиковых (б/у) – 180,0 м. 10. Очистка помещений от строительного мусора – 152,84 т. 

11. Затаривание строительного мусора в мешки – 152,84 т.  12. Погрузка строительного мусора в автотранспорт – 152,84 т.  

13. Перевозка строительного мусора автотранспортом на расстояние до 30км –  152,84 т.  

- произвести работы по устройству кровли 5-ти этажного многоквартирного жилого  дома с помещениями общественного назначения, расположенного по адресу:  Нижегородская область, Кстовский район, пос. Селекционной станции, дом 17а. в  соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов,  путём выполнения следующего перечня и объема работ:  

1. Изготовление и установка ветровых связей из обрезных досок сечением  

50*150мм - 0,17 мЗ. 

2. Изготовление и установка в конструкции стропильной системы стяжек из  

обрезных досок сечением 50*200мм – 1,05 м3. 

3. Демонтаж металлического кровельного ограждения (за вычетом уже  

отсутствующего) -59,0 м.п. 

4. Демонтаж кровельного покрытия из металлочерепицы – 623,0 м2.  

5. Демонтаж обрешетки с прозорами из обрезных досок сечением 32*100мм – 623,0  

м2. 

6. Демонтаж гидроизоляционной пленки типа «Антикон» - 623,0 м2.  

7. Устройство ГИДРОИЗОЛЯЦИИ из гидроизоляционной пленки типа «Антикон»623,0 м2  

8. Устройство контробрешетки из бруса 50*50мм – 55,0 м2.  

9. Устройство oбрешетки с прозорами 350мм из обрезных ДОСОК сечением  

32*100мм – 623,0 м2 

10. Устройство кровельного покрытия средней СЛОЖНОСТИ из металлочерепицы  

– 623,0 м2: 

- планка конька плоская длиной 150*150*2000 34 шт.  - планка ендовы нижней длиной 298*298*2000 10 шт.  - планка ендовы верхней длиной 76*76*2000 10 шт.  - планка торцевая 95*120*2000 19 шт.  - планка карнизная 100*69*2000 45 шт.  

- планка примыканий к выпускам вентканалов и слуховых окон, нижняя  

250*122*2000 24 шт. 

- планка примыканий к выпускам вентканалов и слуховых окон, верхняя  

250*147*2000 24 шт. 

- планка для снегозадержателя длиной 2,0м 40 шт. (80.4/2)  11.Устройство металлического кровельного ограждения – 80,4 м.п.  

12. Установка отливов оконных металлических общей длиной 2,0м шириной до  

0,15м – 0,3 м2 

13. Устройство наружных оконных откосов из пластиковых элементов уголкового  

сечения 25*25мм. – 5,0 м.п. 14. Очистка чердачного помещения от строительного мусора. – 11,5 т 

15. Погрузка строительного мусора в автотранспорт - 11,5 т.  

16. Перевозка строительного мусора авиатранспортом на расстояние до 30км. -  

11.5т. 

 Взыскать с ООО "ТСК НН" в пользу ООО "Промреестр" 6000 рублей расходов по  

уплате государственной пошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  

принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  

жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  

суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  

через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия  

решения. 

Судья Н.В. Тряскова