Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва

«03» февраля 2020 года                                                                             Дело № А41-104121/19

           

Резолютивная часть решения

 объявлена 27 января 2020  года 

            Полный текст решения изготовлен 03 февраля 2020 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску ООО "СУ-55" к ООО "ЛП УК" о взыскании 2 576 000 руб. 31 коп.

При участии в судебном заседании – представителя истца, согласно протоколу

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. 

                                                             Р Е Ш И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «СУ-55» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ЛП УК» о взыскании:

- по Договору № СУ 11/1-2018 от 01.11.2018 г. 371 363,35 руб. (триста семьдесят одна тысяча триста шестьдесят три рубля 35 копеек), в том числе: задолженность  за выполненные работы   189471,10 руб.  (сто  восемьдесят девять  тысяч четыреста семьдесят один рубль 10 копеек) и неустойку в размере 181 892,25 руб. (сто восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто два рубля 25 копеек).

- по Договору № СУ11/2-2018 от 01.11.2018 г. 371 294,23 руб. (триста семьдесят одна тысяча двести девяносто четыре рубля 23 копейки), в том числе: задолженность за выполненные работы  189 435,83 руб. (сто восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать пять рублей 83 копейки) и неустойку в размере 181 858,40 руб. (сто восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь рублей 40 копеек).

- по Договору № СУ 11/3-2018 от 01.11.2018 г. 371 225,14 руб. (триста семьдесят одна тысяча двести двадцать пять рублей 14 копеек), в том числе: задолженность за выполненные работы  189 400,57 руб. (сто восемьдесят девять тысяч четыреста рублей 57 копеек) и неустойку в размере 181 824,56 руб. (сто восемьдесят одна тысяча восемьсот двадцать четыре рубля 56 копеек).

- по Договору № СУ11/9-2018 от 01.11.2018 г. 365 855,91 руб. (триста шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 91 копейка), в том числе: задолженность за выполненные работы   186 661,18 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 18 копеек) и неустойку в размере 179 194,73 руб. (сто семьдесят девять тысяч сто девяносто четыре рубля 73 копейки).

- по Договору № СУ11/10-2018 от 01.11.2018 г. 365 234,24 руб. (триста шестьдесят пять тысяч двести тридцать четыре рубля 24 копейки), в том числе: задолженность за выполненные работы  186 344,00 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч триста сорок четыре рубля 00 копеек) и неустойку в размере 178 890,24 руб. (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 24 копейки).

- по Договору № СУ11/11-2018 от 01.11.2018 г. 366 351,58 руб. (триста шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один рубль 58 копеек), в том числе: задолженность за выполненные работы   186 914,07 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать рублей 07 копеек) и неустойку в размере 179 437,51 руб. (сто семьдесят девять тысяч четыреста тридцать семь рублей 51 копейка).

- по Договору № СУ11/12-2018 от 01.11.2018 г. 364 675,86 руб. (триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят пять рублей 86 копеек), в том числе: задолженность за выполненные работы  186 059,11 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч пятьдесят девять рублей 11 копеек) и неустойку в размере 178 616,75 руб. (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот шестнадцать рублей 75 копеек).

В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ по договорам  №№ СУ 11/1-2018 от 01.11.2018 г., СУ11/2-2018 от 01.11.2018 г., СУ 11/3-2018 от 01.11.2018 г., СУ11/9-2018 от 01.11.2018 г., СУ11/10-2018 от 01.11.2018 г., СУ11/11-2018 от 01.11.2018 г., СУ11/12-2018 от 01.11.2018 г., в связи с чем, образовалась взыскиваемая задолженность. Иск заявлен на основании ст. ст. 309, 310, 330 702, 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Ответчик,  отзыв по существу иска не представил.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. Дело рассмотрено в соответствии со ст.ст. 121-124, 153, 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя ответчика, извещенного надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела.

Суд счел настоящее дело достаточно подготовленным для рассмотрения по существу в судебном заседании 27.01.2020, и в отсутствие поступивших возражений со стороны истца и ответчика, завершил предварительное судебное заседание и перешел к стадии рассмотрения иска по существу по правилам части 4 статьи 137 АПК РФ (Согласно разъяснениям, данным в пункте 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»).

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей сторон, присутствовавших в судебном заседании, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, арбитражный суд установил следующее.

01.11.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «Лосино-Петровская Управляющая компания» (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СУ-55» (далее - Подрядчик) заключены:

Договор № СУ 11/1-2018, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его: ремонт подъезда жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, подъезд № 1. Объем работы, стоимость работ и используемых материалов в соответствии с п. 1.1.1. Договора согласован сторонами в локальной смете (приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 2.1. Договора цена подлежащей выполнению работы по Договору составляет 189 471 рубль 10 копеек, включая НДС 18%: 28 902 рубля 37 копеек.

Договор № СУ 11/2-2018, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его: ремонт подъезда жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, подъезд № 2. Объем работы, стоимость работ и используемых материалов в соответствии с п. 1.1.1. Договора согласован сторонами в локальной смете (приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 2.1. Договора цена подлежащей выполнению работы по Договору составляет 189 435 рублей 83 копейки, включая НДС 18 %: 28 896 рублей 99 копеек.

Договор № СУ 11/3-2018, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его: ремонт подъезда жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, подъезд № 3. Объем работы, стоимость работ и используемых материалов в соответствии с п. 1.1.1. Договора согласован сторонами в локальной смете (приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 2.1. Договора цена подлежащей выполнению работы по Договору составляет 189 400, включая НДС 18 %: 28 891 руб. 61 копейка.

Договор № СУ 11/9-2018, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его: ремонт подъезда жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, подъезд № 1. Объем работы, стоимость работ и используемых материалов в соответствии с п. 1.1.1. Договора согласован сторонами в локальной смете (приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 2.1. Договора цена подлежащей выполнению работы по Договору составляет 186 661 рубль 18 копеек, включая НДС 18 %: 28 473 рубля 74 копейки.

Договор № СУ11/10-2018, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его: ремонт подъезда жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, подъезд № 2. Объем работы, стоимость работ и используемых материалов в соответствии с п. 1.1.1. Договора согласован сторонами в локальной смете (приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 2.1. Договора цена подлежащей выполнению работы по Договору составляет 186 344 рубля 00 копеек, включая НДС 18 %: 28 425 рублей 36 копеек.

Договор № СУП/11-2018, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его: ремонт подъезда жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, подъезд № 3. Объем работы, стоимость работ и используемых материалов в соответствии с п. 1.1.1. Договора согласован сторонами в локальной смете (приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 2.1. Договора цена подлежащей выполнению работы по Договору составляет 186 914 рублей 07 копеек, включая НДС 18 %: 28 512 рублей 32 копейки.

Договор № СУ 11/12-2018, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его: ремонт подъезда жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, подъезд № 4. Объем работы, стоимость работ и используемых материалов в соответствии с п. 1.1.1. Договора согласован сторонами в локальной смете (приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 2.1. Договора цена подлежащей выполнению работы по Договору составляет 186 059 рублей 11 копеек, включая НДС 18 %: 28 381 рубль 90 копеек.

Согласно п. 2.2. Договоров оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по перечислению денежных средств считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В силу п. 2.3. Договоров расчет по договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ по Договору. 

Как усматривается из материалов дела, акты выполненных работ подписаны сторонами 28.11.2018, соответственно оплата работ должна быть произведена Заказчиком не позднее 05.12.2018. Однако по настоящий момент обязательство, предусмотренное пунктами 2.2, 2.3. Договоров по оплате выполненных работ не исполнено.

Претензии Истца №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 от 21.10.2019 были направлены Ответчику с требованием оплатить образовавшиеся задолженности.

Поскольку оплаты от ответчика не поступило, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Из статьи 310 ГК РФ следует, что односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.

Статьей 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда, одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Как предусмотрено положениями п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Из установленных судом обстоятельств следует, что истцом были выполнены работы, обусловленные договорами, что подтверждается актами выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ от 28.02.2017, подписанных ответчиком без замечаний. Вместе с тем, до настоящего времени выполненные работы в полном объеме не оплачены.  

В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений. 

 Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая изложенные обстоятельства, принимая во внимание, что ответчик не представил доказательств оплаты долга в указанном размере, требований о назначении судебной экспертизы с целью проверки объема и качества выполненных работ в судебном заседании ответчик не заявлял, суд считает требования истца о взыскании задолженности обоснованными, документально подтверждёнными и подлежащими удовлетворению.

Также истцом заявлено о взыскании неустойки в размере 28 157 руб. 20 коп. за период с 16.03.2017 по 30.08.2017.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 5.2.1 Договоров за нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик по письменному требованию Подрядчика оплачивает неустойку Подрядчику в размере 0,3% стоимости работ, установленной в п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

Материалами дела доказано ненадлежащее исполнение ответчиком денежных обязательств по спорным договорам. Заявленный ко взысканию размер неустойки судом проверен и признан верным.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "ЛП УК" в пользу ООО "СУ-55":

- по Договору № СУ 11/1-2018 от 01.11.2018 г. 371 363,35 руб. (триста семьдесят одна тысяча триста шестьдесят три рубля 35 копеек), в том числе: задолженность  за выполненные работы   189471,10 руб.  (сто  восемьдесят девять  тысяч четыреста семьдесят один рубль 10 копеек) и неустойку в размере 181 892,25 руб. (сто восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто два рубля 25 копеек).

- по Договору № СУ11/2-2018 от 01.11.2018 г. 371 294,23 руб. (триста семьдесят одна тысяча двести девяносто четыре рубля 23 копейки), в том числе: задолженность за выполненные работы  189 435,83 руб. (сто восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать пять рублей 83 копейки) и неустойку в размере 181 858,40 руб. (сто восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь рублей 40 копеек).

- по Договору № СУ 11/3-2018 от 01.11.2018 г. 371 225,14 руб. (триста семьдесят одна тысяча двести двадцать пять рублей 14 копеек), в том числе: задолженность за выполненные работы  189 400,57 руб. (сто восемьдесят девять тысяч четыреста рублей 57 копеек) и неустойку в размере 181 824,56 руб. (сто восемьдесят одна тысяча восемьсот двадцать четыре рубля 56 копеек).

- по Договору № СУ11/9-2018 от 01.11.2018 г. 365 855,91 руб. (триста шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 91 копейка), в том числе: задолженность за выполненные работы   186 661,18 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 18 копеек) и неустойку в размере 179 194,73 руб. (сто семьдесят девять тысяч сто девяносто четыре рубля 73 копейки).

- по Договору № СУ11/10-2018 от 01.11.2018 г. 365 234,24 руб. (триста шестьдесят пять тысяч двести тридцать четыре рубля 24 копейки), в том числе: задолженность за выполненные работы  186 344,00 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч триста сорок четыре рубля 00 копеек) и неустойку в размере 178 890,24 руб. (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 24 копейки).

- по Договору № СУ11/11-2018 от 01.11.2018 г. 366 351,58 руб. (триста шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один рубль 58 копеек), в том числе: задолженность за выполненные работы   186 914,07 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать рублей 07 копеек) и неустойку в размере 179 437,51 руб. (сто семьдесят девять тысяч четыреста тридцать семь рублей 51 копейка).

- по Договору № СУ11/12-2018 от 01.11.2018 г. 364 675,86 руб. (триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят пять рублей 86 копеек), в том числе: задолженность за выполненные работы  186 059,11 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч пятьдесят девять рублей 11 копеек) и неустойку в размере 178 616,75 руб. (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот шестнадцать рублей 75 копеек).

- расходы по уплате государственной пошлины 35 880 (тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

  СУДЬЯ                                                                                              Т. В. СОРОЧЕНКОВА