358/2023-114969(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  21 июня 2023 года А46-22244/2022  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Голдыревой В.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению бюджетного учреждения  Омской области «Омскоблстройзаказчик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Лидер» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить выявленные замечания,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора, бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский  областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), временного управляющего общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «Лидер» ФИО1 (ИНН 

<

***>,  191021, г. Санкт-Петербург, а/я 99 «СОКОЛОВ»),  

в судебном заседании приняли участие:  

от истца - ФИО2 по доверенности от 22.12.2022 № 63 (паспорт гражданина РФ,  диплом),  

от ответчика - не явились, извещены, от третьих лиц - не явились, извещены; 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования бюджетного учреждения Омской области  «Омскоблстройзаказчик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Лидер»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 10 рабочих дней с момента вступления  решения суда в законную силу устранить следующие недостатки выполненных работ по  государственному контракту от 07.03.2019 № Ф.2019.78156:  

- устранить в коридоре пятого этажа трещины на стенах и вспучивание штукатурного  слоя;  

- устранить в выставочном зале № 407 трещины на стене; 

- устранить в помещении № 311 в наливном полу трещины;  

- устранить в туалетной комнате пятого этажа на потолке растрескивание, вспучивание,  замачивание и изменение цвета лакокрасочного покрытия;  

- устранить в помещении № 405 трещины и осыпание лакокрасочного покрытия и  штукатурки на стыке потолка и стены;  

- устранить в помещении № 504 трещины и осыпание лакокрасочного покрытия,  штукатурки на стыке потолка и стены, на стыке стен;  

- устранить в помещении № 504 течь воды через потолочный светильник и восстановить  целость лакокрасочного покрытия;  

- устранить в помещении № 306 трещины и осыпание лакокрасочного покрытия,  осыпание штукатурки на стыке потолка и стен;  

- устранить в помещении № 509 трещины, изменение цвета, осыпание лакокрасочного  

покрытия, осыпание штукатурки на стыке потолка и стен по периметру помещения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Лидер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу бюджетного учреждения Омской  области «Омскоблстройзаказчик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб.  расходов на оплату государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в  порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа  (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления  в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда:  http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Е.А. Чекурда 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 21.03.2023 4:11:00Кому выдана Чекурда Евгений Андреевич