АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-19140/19

23 июля 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Абдулиной С.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Администрации Крымского  сельского поселения (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Новострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об обязании, взыскании 1998511,04 руб.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Новострой" в месячный срок  

со дня вступления решения в законную силу устранить недостатки работ по  

муниципальному контракту от 26.05.2017 № 0158300016117000001-0106174-01, а именно:  в холле первого этажа (помещение № 30) устранить провисание подвесного  

потолка (3 плиты); в малом зале (помещение № 13, 1этаж): 

по правой стене от входа устранить трещину и вздутие штукатурки и краски;  заменить 2-ой витринный стеклопакет, два нижних стекла (вход № 3);  

заменить сломанный подоконник (3-й от входа в фойе);  заделать пустоты под входным витражом;  

на лестнице (помещение № 1) - заменить 4 плитки, имеющие сколы; 

в помещении № 12, 2 этаж - устранить следы краски на потолке и вентиляционных  

решетках либо заменить на новые; 

в операторской (помещение № 14, 2 этаж) установить заглушку на  

распределительную коробку; 

в подвале: смонтировать ранее снятые для гарантийного ремонта (либо замены)  

приточные вентиляционные системы п-1 (airned-m7), п-2 (airned 50-25) и п6 (airned 50-25),  

заделать проемы не заделаны; 

в подвале устранить провисание лотков под прокладку электрических сетей;  в подвале качественно выполнить отделку откосов в вентиляционной;  

в подсобной и комнате хранения (помещения 8,9) заделать проемы под  

вентиляцию; 

в коридоре второго этажа (помещение № 10) заменить поврежденные потолочные  панели армстронг 3 шт.;  

в большом зале (помещение № 31,1 этаж) качественно выполнить примыкание  вентиляционных систем, исключающие попадание влаги на потолок в местах установки  вентиляции;  

в большом зале (помещение № 31, 1 этаж) заменить разрушенные 20 плит  армстронг;  

в большом зале (помещение № 31, 1 этаж) устранить неравномерность в  окраске стен (перекрасить зал);  

в тамбуре (помещение № 36, 1 этаж) отрегулировать двери; 

в тамбуре (помещение № 36, 1 этаж) заменить поврежденные 2 подоконника (3 и 5  справа от входа);  

в тамбуре (помещение № 36, 1 этаж) установить фрамуга в месте прохода  вентиляции;  

в тамбуре (помещение № 36, 1 этаж) выполнить заделку пустот под дверьми; 

в тамбуре (помещение № 36, 1 этаж) установить заглушки на электрических  коробках;  

по всем помещениям закрепить розетки; 

по всему зданию качественно выполнить крепление труб отопления;  по всему зданию перекрасить трубы;  

очистить наружные стены по всему фасаду здания от отслаивающейся и вздутой  декоративной штукатурки, заштукатурить фасад здания снова и покрасить;  

демонтировать и уложить заново отпавшую керамическую плитку и плитку, под  которой образовались пустоты по цоколю здания;  

демонтировать и уложить заново отпавшую керамическую плитку и плитку, под  которой образовались пустоты на всех ступеньках, расположенных на улице на входах в  здание.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Новострой" в месячный срок  со дня вступления решения в законную силу передать Администрации Крымского  сельского поселения документы:  

исполнительную документацию и паспорта по монтажу слаботочного  оборудования;  

акты на скрытые общестроительные работы; 

акты на огнезащитные покрытия деревянных конструкций с лицензией от  организаций, непосредственно выполняющих работы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новострой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации Крымского сельского  поселения (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 799404,42 руб. штрафа.  

В остальной части в удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новострой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 25194 руб.  государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Абдулина С. В.