Р Е Ш Е Н И Е

21.11.2017г.                                              Дело № А40-134918/17-91-1179

г. Москва                                                                              

Решение принято путем подписания резолютивной части решения 30.10.2017 г.

Мотивированное решение по заявлению составлено 21.11.2017г.

Судья Шудашова Я.Е.

без вызова сторон,

в порядке упрощенного производства

рассмотрел дело по иску 

ЗАО «ТК «Металлист» 

к АО «Атомэнергопроект» о взыскании в размере 1 777 028, 08 руб. по договору от 28.10.2015г. №650//08108/378 ДС15-50.

                                                                    У с та н о в и л:

Иск заявлен ЗАО «ТК «Металлист»  к АО «Атомэнергопроект» о взыскании в размере 1 777 028, 08 руб. по договору от 28.10.2015г. №650//08108/378 ДС15-50.

Ответчик по требованиям возражал, представил письменный отзыв.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела, документами, пришёл к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

28 октября 2015 года между Закрытым акционерным обществом «Торговая Компания «Металлист» (Истец) и Акционерным обществом «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект») (Ответчик) был заключен договор подряда №650//08108/378 ДС15-50.

В соответствии с п. 2.1. Договора, Ответчик поручил, а Истец принял на себя обязательство по выполнению комплекса строительно-монтажных работ на объекте: «00USV Инженерно-бытовой   корпус»   Нововоронежской   АЭС-2,   и   сдачи   результата   работ

Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязался принять качественно выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями договора.

Генподрядчик принял на себя обязательства оплатить работ по Договору осуществляется Генподрядчиком за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы после сдачи исполнительной и отчетной документации (п.4.2 Договора).

Пунктом 4.5. вышеуказанного договора предусмотрено, что основанием для оплаты выполненных Работ являются следующие подписанные Сторонами документы:

- по выполненным строительно-монтажным работам - Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, реестр актов выполненных работ по объектам, Сводный реестр актов выполненных работ.

ЗАО «ТК «Металлист» выполнил работы на общую сумму 1 777 028,08 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ КС-2 №2 на сумму 1 425 251,20 руб., справкой о стоимости выполненных работ КС-3 №2 от 21.03.2017г. на сумму 1 425 251,20 руб., реестром актов о приемке выполненных работ за март, журналами учета выполненных работ КС-ба №1, №2; КС-2 №3 на сумму 351 776,88 руб., справкой о стоимости выполненных работ КС-3 №3 от 31.03.2017г. на сумму 351 776,88 руб., реестром актов о приемке выполненных работ за март, журналами учета выполненных работ КС-ба №1, сводным реестром актов выполненных работ.

Указанные документы (черновики) прошли процедуру визирования прохождения форм первичной учетной документации, предусмотренной в п.2.1. Регламента прохождения документов на период строительства.

Выполненные работы приняты Кураторами Заказчика и Генподрядчика, подписаны акты скрытых работ и реестр актов, подтверждены объемы выполненных работ подписями кураторов на КС-2, исполнительная документация сдана в полном объеме.

Письмами исх. №425 от 22.03.2017 г., №547 от 05.04.2017 г. ЗАО «ТК «Металлист» направил на подпись акты выполненных работ (чистовики).

06.04.2017 года АО «Атомэнергопроект» направило письмо «Об оформлении выполненных работ» исх. №02-240/7638/246-16.22 с указанием на отсутствие оснований для подписания представленных первичных документов по вышеуказанным договорам ввиду непринятия выполненных работ за декабрь 2016-февраль 2017 г. у АО «Атомэнергопроект» АО «Концерн «Росэнергоатом».

10.05.2017 года (исх. №953, исх.957) ЗАО «ТК «Металлист» направило претензию в адрес АО «Атомэнергопроект», в котором указывало на необоснованность замечаний и отказа от подписания актов, поскольку все необходимые документы были переданы, и необходимость исполнить обязанность по подписанию Актов выполненных работ и оплате стоимости фактически выполненных работ в размере 1 777 028,08 рублей.

Срок рассмотрения претензии - 30 рабочих дней, следующих за датой ее получения.

28.06.2017 года АО «Атомэнергопроект» направило ответ на претензию (№157/2017-Прет, №165/2017-Прет), в котором повторно указало на отсутствие оснований для ее удовлетворения, поскольку договор подряда с ЗАО «ТК «Металлист» заключен во исполнение договора №08108/378 от 15.08.2008г. между АО «Концерн «Росэнергоатом» и АО «Атомэнергопроект». 

Порядок сдачи-приемки фактически выполненных работ предусмотрен статьей 19 Договора.

В соответствии с п. 19.2 Договора сдача-приемка выполненных работ за текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по: журналу учета выполненных работ (форма КС-6) и Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), которые предоставляются Генподрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом.

Генподрядчик обязан направить Подрядчику подписанные Журнал и Акт, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

В случае получения отказа, Подрядчик обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ (п. 19.3 Договора).

Таким образом, отказ в подписании актов выполненных работ по мотиву непринятия работ Заказчиком не предусмотрен условиями Договора и противоречит нормам Гражданскою кодекса РФ.

Данный отказ возможен только в случае наличия замечаний по выполненным работам (по объему, качеству, срокам) со стороны Генподрядчика.

Указание АО «Атомэнергопроект» на отсутствие финансирования со стороны Заказчика не являются мотивированными причинами отказа от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)

Ссылки ответчика на п.4.7 Договора, согласно которому срок оплаты выполненных Подрядчиком работ обусловлен условием - «не ранее получения средств от Заказчика», также противоречит Гражданскому кодексу и нормам права, поскольку согласование наступления срока оплаты работ под отлагательным условием (ст. 157 Гражданского кодекса Российской Федерации) нарушает права истца на получение оплаты за выполненные работы.

ЗАО «ТК «Металлист», не являясь стороной по договору от 15.08.2008г. №08108/378, заключенному между ответчиком и АО «Концерн «Росэнергоатом», не имеет права требовать оплаты работ от АО «Концерн «Росэнергоатом» ни на основании указанного договора, ни на основании договора №650//08108/378 ДС15-50 от 28.10.2015 г., стороной по которому АО «Концерн «Росэнергоатом» не является и который не создает для него обязанностей по оплате выполненных ЗАО «ТК «Металлист» работ.

Поскольку работы выполнены, акты приемки выполненных работ оформлены и направлены подрядчиком в адрес ответчика, а последний, получив названные акты, от их подписания отказался, каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполненных работ и представленной документации не направил, что свидетельствует об уклонении от приемки работ, оплата работ не произведена, полагаем разумным взыскать с ответчика стоимость выполненных работ по договору подряда.

Претензионный порядок разрешения спора соблюден.

В силу положений ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются согласно требованиям ст. 310 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" даны разъяснения о том, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии с пунктом 6 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Соответственно, отказ в подписании актов без предъявления претензий по их качеству, по причине, отличной от ненадлежащего выполнения работ, является необоснованным.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 711 и пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса, а также разъяснениями Президиума Высшего арбитражного суда РФ в пункте 9 информационного письма от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», оплата Генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ Заказчиком Генеральному подрядчику.

Соответственно, обязательства Генерального подрядчика (АО «Атомэнергопроект») перед Подрядчиком (ЗАО «ТК «Металлист»), в том числе по оплате выполненных работ, должны   исполняться   независимо   от   исполнения   Заказчиком   (АО   «Концерн «Росэнергоатом») своих обязательств (включая обязательство Заказчика по приемке выполненных работ) перед Генеральным подрядчиком.

Доказательств оплаты выполненных истцом работ, ответчиком не представлено (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), доводы отзыва обоснованными не признаются, поскольку работы истцом были выполнены, отказ от исполнения обязательства по их оплате, противоречит условиям  заключенного сторонами договора и законодательству.

Таким образом, суд приходит  к выводу о наличии у ответчика задолженности в заявленной истцом сумме, требования подлежат удовлетворению в полном объёме. 

Расходы по уплате госпошлины подлежат распределению в порядке статей 110, 112 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307,309,310,314,965 ГК РФ, ст.ст. 101-103,110,167-171, 226-229   АПК РФ, суд               

  

Р Е Ш И Л :

1). В ходатайстве ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - АО «Концерн Росэнергоатом» - отказать, в отсутствие оснований ст. 51 АПК РФ.

2). Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"(107996, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, д/р 19.08.2008) в пользу ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛИСТ" (394077, 

<

...>, ОГРН1073668008040, ИНН 

<

***>, д/р 29.10.2007) задолженность в размере 1 777 028 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч двадцать восемь) руб. 08 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 30 770 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

                  С У Д Ь Я                                                                    Шудашова Я. Е.