Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело №А40-105684/20-138-803

г. Москва

19 марта 2021 года

Резолютивная часть решения изготовлена 16 марта 2021 года 

Решение в полном объеме изготовлено 19 марта 2021 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего: судьи Ивановой Е.В. 

при ведении протокола помощником судьи Сербул К.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Новый город - Инвест +" (625014, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Саморегулируемой организации "Межрегиональное объединение проектных организаций "Ассоциация оборонстрой проект" (109428 Москва город улица Институтская 2-я д.6, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании убытков   

при участии:  

согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "Новый город – Инвест" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Саморегулируемой организации "Межрегиональное объединение проектных организаций "Ассоциация оборонстрой проект" о взыскании убытков в размере 44 273 616, 00 руб. (с учётом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ). 

В судебное заседание не явился представитель Ответчика, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со ст. ст. 121, 123 АПК РФ. Дело слушалось в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Истец поддерживает требования иска в полном объеме.

Рассмотрев уточненные заявленные требования, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований истец указал, что Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская автодорожная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Новый город-Инвест+» (625014, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 15.04.2019 (резолютивная часть решения объявлена 08.04.2019) при банкротстве ООО «Новый город - Инвест+» применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), ООО «Новый город Инвест+» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год (до 08.04.2020), конкурсным управляющим ООО «Новый город Инвест+» утвержден ФИО1.

27.07.2012 г. между ООО «Новый город-Инвест+» и ООО «Тюменьмегапроект» был заключен Договор №15/1,2 на разработку проектной документации от 27.06.2012 г.

В соответствии с п. 1.1 Договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать проектную документацию на объект «Многоэтажный жилой дом переменной этажности с нежилыми помещениями и отдельно стоящим паркингом по адресу: 

<

...>, строения 1,2,3,4».

Право Подрядчика осуществлять работы, предусмотренные Договором подтверждается Свидетельством о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-01-0265-7202132644-201 от 04.10.2010 г. на выполнение проектных работ.

По Акту сдачи-приемки выполненных работ от 14.10.2012 г. Подрядчик передал Заказчику проектно-сметную. документацию на объект по адресу: 

<

...>, строения 1,2,3,4».

15.04.2013 г. на основании указанного проекта Администрацией г. Тюмени ООО' «Новый город-Инвест+» было выдано Разрешение на строительство №RU72304000-110-рс. 

Однако, как указывает Истец, в процессе строительства жилого дома была выявлена неравномерная осадка железобетонной плиты и крен наземной части здания, в связи с чем произошло отклонение жилого дома от вертикальной оси.

04.06.2016г. Ленинский районным судом г. Тюмени по делу №2-4015/2016 по иску ФИО2 к ООО "Новый город-Инвест+" о расторжении договора долевого участия в строительстве и взыскании денежных средств назначена экспертиза, по результатам которой было установлено, что выполненный объект соответствует решениям, заложенным в проектной и рабочей документации; все решения, принятые в проектной и рабочей документации, кроме решений по устройству фундаментного основания, соответствуют строительным и градостроительным нормам; решения, принятые в отношении фундаментного основания, не обеспечивают требований строительных норм. Принятое фундаментное основание не обеспечивает достаточной несущей способности. В качестве .фундаментного основания для данного объекта капитального строительства, следовало применить фундаментную монолитную плиту на свайном основании; здание находится в ограниченно работоспособном состоянии, имеются крены наземной части здания, вызванные неравномерными осадками; в отношении обследуемого, объекта капитального строительства необходимо выполнить комплекс мероприятий по выравниванию крена здания и дальнейшего усиления основания фундаментов. Если, же такого рода мероприятия связаны с неравномерными расходами и затратами, то объект капитального строительства рекомендуется демонтировать, ввод в эксплуатацию данного объекта капитального строительства в текущем состоянии категорически запрещается.

В соответствии с п.6.1 Договора №15/12 на разработку проектной документации от 27.06.2012 г., заключенным между ООО «Новый город-Инвест+» и ООО «Тюменьмегапроект», за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

По арбитражному делу №А70-4112/2017 было назначено проведение судебной строительно-технической экспертизы, проведение которой было поручено АО «Институт Тюменьгражданпроект». АО «Институт Тюменьгражданпроект» проводило повторную экспертизу, первоначальную судебную экспертизу проводило на основании Определения Арбитражного суда Тюменской области от 04 июля 2017г. о назначении судебной, экспертизы по делу №А70-4112/20170 00 «Региональный центр строительных исследований «Артель».

При этом, как указывает Истец, выводы ООО «Региональный центр строительных исследований «Артель» и АО «Институт Тюменьгражданпроект» являются схожими,

Как следует из Экспертного заключения судебной строительно-технической экспертизы по делу №А70-4112/2017 от 16.10.2017 г. ООО «Региональный центр строительных исследований «Артель»:

При ответе на вопрос 1. Соответствует ли нормам ГОСТов, СНиПов, требованиям строительных и градостроительных норм и правил, другим обязательным требованиям проектная документация, разработанная и выполненная ООО «Тюменьмегапроект» в рамках выполнения обществом обязательств по договору N 15/12 на разработку проектной документации от 27.06.2012 года, включая решения отраженные проектной организацией в проектной документации в отношении фундаментного основания здания, его типа, а также указанных нагрузок, передаваемых на фундаментную плиту по итогам строительства объекта?

Истец указывает, что в ходе анализа проектной документации зафиксировано, что техническим заданием на проектирование в качестве фундамента предусмотрена монолитная ж/б плита, усиленная сваями. В соответствии с проектом в качестве фундаментов принята монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 1000мм на естественном упругом основании из бетона класса ВЗО, F100, W6, армированная стержневой арматурой по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С диаметром стержней 16, 18, 22 и 28 мм.  Под плитой предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В6 толщиной 100мм 1>л по гравийно-песчаной подушке толщиной 200мм. В соответствии с предоставленным , расчетом среднее расчетное давление под подошвой фундамента для 14-этажной секции составляет 21,7т/м2. Для определения фактического расчетного давления под подошвой фундамента выполнен сбор нагрузок на конструкцию фундамента, по результатам которого фактическое давление от расчетной нагрузки составило 33, 41 Л; т/м2, что на 11,71т/м больше проектного давления. По результатам произведенного расчета максимальная осадка фундаментов 14-этажных секций составляет 36,39 см, 9-этажных секций - 21,8 см, что не соответствует требованиям Приложения Д Таблица Д.1 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»: Для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими стенами из кирпичной кладки с армированием максимальные или средние осадки не должны превышать 18 см.

По мнению Истца, данный факт  свидетельствует о некачественном выполнении работ по разработке проектной документации ООО «Тюменьмегапроект» в рамках выполнения обществом обязательств по договору N 15/12 на разработку проектной документации от 27.06.2012 года.

Тем самым просрочка ввода объекта в эксплуатацию ООО «Новый город - Инвест+» возникла по вине третьих лиц, а именно проектной организации. Должник был вынужден проводить мероприятия по укреплению фундамента для ввода жилого дома, не считая иных убытков, возникших у Должника в связи с поддержанием энергоснабжения, охраны объекта, а также иных расходов.

Возникновение убытков у Должника в связи с недостатками работ при проектировании напрямую указывает об отсутствии вины самого Должника.

В свою очередь последующий ввод объекта в эксплуатацию был связан исключительно с заключением Должником иных Договор на устранение недостатков работ, а также с иными мероприятиями, необходимыми для укрепления фундамента и устранения наклона дома. В противном случае объект так бы и не был введен в эксплуатацию.

Вместе с тем, в результате допущенных проектной организацией нарушений возник как вопрос невозможности ввода в эксплуатацию объекта, так и впоследствии вопрос об устранении недостатков. Однако все указанные обстоятельства были причиной возникновения необходимости оплаты работ, просрочке исполнения обязательств перед контрагентами, в том числе взысканию с ООО «Новый-город Инвест+» неустоек, штрафов по договорам долевого участия, заключенным с дольщиками, а в конечном счете введению в отношении Истца процедуры банкротства. 

На текущий момент реестр требований кредиторов составляет 42 093 616,53 руб.

Возникновение требований кредиторов Истец связывает исключительно с допущенными нарушениями проектной организацией и именно данную сумму истец считает как косвенные убытки. 

Кроме того, истец указывает на наличие прямых убытков в размере 2 180 000 руб., возникшие в связи с оплатой ООО «ГЕОФОНД+» за разработку проектной документации для устранения крена дома и за работы по устранению крена дома. 

С учетом принятия нового закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» созданы строительные саморегулируемые организаций (далее - СРО), формирующие компенсационный фонд (далее - КФ), одна из целей которого является - выплата компенсаций за качество выполненных работ участников СРО.

18.02.2019 г. ООО «Тюменьмегапроект» исключено из ЕГРЮЛ.

САО «ВСК» была произведена страховая выплата в размере 5 000 000руб. 00 коп.

28.05.2020 г. в адрес Ответчика была направлена претензия, которая оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд.

Вместе с тем, суд не может согласиться с доводами Истца, в связи со следующими обстоятельствами.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем взыскания убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

На основании пункта 1 статьи 399 ГК РФ по общим правилам до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

В пункте 53 постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ" разъяснено, что при разрешении споров, связанных с применением субсидиарной ответственности, необходимо иметь в виду, что предусмотренный пунктом 1 статьи 399 ГК РФ предварительного обращения кредитора к основному должнику может считаться соблюденным, если кредитор предъявил последнему письменное требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо не получил ответа на свое требование в разумный срок.

В соответствии с абзацем третьим пункта 35 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" при субсидиарном характере ответственности поручителя (статья 399 ГК РФ) для предъявления требования к нему кредитору достаточно доказать, что должник отказался исполнить обязательство, обеспеченное поручительством, либо не ответил в разумный срок на предложение исполнить обязательство.

Между тем, истец не обосновал причинно-следственную связь включения в сумму убытков весь реестр требований кредиторов (в частности, согласно выписки из реестра – требования УФНС по Тюменской области по оплате страховых взносов, недоимки и пени; требования Правового союза защиты прав потребителей по оплате штрафа, а также иных юридических лиц). Кроме того, суд учитывает, что истец указывая на возмещение ему 5 000 000 руб. страховой организацией тем не менее не учитывает ее и не вычитает ее из суммы заявленных в настоящем деле убытков. 

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства осуществляется лицом, выполнившим такие работы. Субсидиарную ответственность за причинение указанного вреда несет саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией (статья 60 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 8 Закона о некоммерческих организациях некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона (общественных благ).

В силу положений частей 14 и 15 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра СРО средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения СРО, членом которого являлась такая СРО, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности СРО по обязательствам членов такой организации, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно статьями 60 и 60.1 указанного Кодекса. Национальное объединение СРО обязано разместить средства компенсационных фондов СРО, указанные в части 14 указанной статьи, в соответствии с требованиями, установленными статьей 55.16.1 Кодекса.

Из части 17 статьи 55.16 ГрК РФ следует, что порядок взаимодействия Национального объединения СРО и СРО в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 указанной статьи, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Согласно части 6 статьи 55.16.1 ГрК РФ права на средства компенсационных фондов СРО, размещенные на специальных банковских счетах, принадлежат владельцу счетов. При исключении СРО из государственного реестра СРО права на средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств переходят к Национальному объединению СРО, членом которого являлась такая СРО. В этом случае кредитная организация по требованию такого Национального объединения СРО, направленному в порядке и по форме, которые установлены Правительством Российской Федерации, переводит средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) такой некоммерческой организации на специальный банковский счет (счета) такого Национального объединения СРО.

В связи с исключением сведений об Ответчике из государственного реестра саморегулируемых организаций на специальный банковский счет НОПРИЗ в порядке части 6 статьи 55.16.1 ГрК РФ зачислены денежные средств компенсационных фондов ответчика в размере 16 916 744, 01 рублей в соответствии с Приказом Минстроя РФ №643/пр от 08.09.2015г. 

Указанная информация размещена на информационном портале НОПРИЗ в сети Интернет и является общедоступной. 

Таким образом, зачисленные средства компенсационных фондов у Ассоциации (ответчика) отсутствуют.

Эти средства могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности саморегулируемой организации по обязательствам членов такой организации, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно ст. ст. 60 и 60.1 Градостроительного кодекса РФ.

Как установлено выше, ст. 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает субсидиарную ответственность СРО в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом СРО его договорных обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, а также по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения договора.

Если же сведения о СРО исключены из госреестра, то обязательства по выплате в соответствии и в пределах установленных нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации будет нести соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций. Если член той СРО, сведения о которой исключены из реестра, стал членом другой СРО и в эту "другую" СРО Национальное объединение СРО перечислило средства компенсационного фонда исключенной СРО, то выплату будет производить эта "другая" СРО.

Тот же порядок установлен и в отношении исполнения гарантийных обязательств: в случае исключения сведений о СРО из госреестра СРО исполнение гарантийных обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного подряда осуществляется соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, у суда не имеется оснований для удовлетворения требований иска.

Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Новый город - Инвест +" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) госпошлину в размере 200 000 руб. 00 коп. в доход федерального бюджета. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. 

Судья                                                                              Е.В. Иванова