АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-14336/2017

город Кемерово

13 марта 2018года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Переваловой О.И. при ведении  протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Ашванян  М.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального  казенного учреждения «Отдел капитального строительства Главного управления  Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области», г. Кемерово, ОГРН  1034205007748  

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Строй-Инвест», г.  Новосибирск, ОГРН 1125476121825  

об обязании выполнить работы, предоставить акт приемки законченного строительством  объекта (форма № КС-11, № КС-14), акт о разборке временных зданий, сооружений ( № КС- 9), взыскании 2179217,75руб. пени, 1 057 500 руб. штрафа (с учетом принятого судом  ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации)  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

Иск удовлетворить. 

Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Строй- Инвест» в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу  выполнить по объекту «Исправительная колония № 41 (г. Юрга, ул. Окрайная, 1,  Кемеровская область), следующие работы:  

1. Устройство фундамента крыльца; 1.1. Устройство каркаса крыльца; 1.2. Устройство ограждения крыльца; 1.3. Покрытие полов технологического здания флюатом; 

1.4. Устройство металлического каркаса (представить документы о контроле качества  сварных швов (в соответствии с требованиями п.3.23 СП 70.13330.2012 Несущие и  ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением  N1);  

1.5. Устройство системы внутреннего отопления; 1.6. Устройство охранно-пожарной сигнализации; 

2. Благоустройство (выполнить работы по озеленению, (газон) завершить работы по  устройству щебеночного покрытия – в районе въезда с площадки);  

3. КНС (канализационная насосная станция); 

4. Ограждение территории (выполнить работы по установке ворот, установке пролета  слева и пролета справа от места установки ворот);  

5. Наружное освещение; 

6. Гидравлическое испытание противопожарных резервуаров;  

7. Наружные сети К 2, в соответствии с условиями государственного контракта № 5  генерального подряда на строительство объекта от 10.08.2016.  

 Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Строй-Инвест»  в течение трех месяцев 15 календарных дней с момента вступления решения в законную  силу передать Федеральному казенному учреждению «Отдел капитального строительства  Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской  области» исполнительную документацию на полный комплекс выполненных работ,  включая техническую документацию (журналы, чертежи схемы, акты и др.), а также  сертификаты и регистрационные удостоверения на оборудование, материалы и изделия  необходимых и достаточных для ввода объекта в эксплуатацию.  

 Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Строй-Инвест»  в течение трех месяцев 15 календарных дней с момента вступления решения в законную  силу предоставить Федеральному казенному учреждению «Отдел капитального  строительства Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по  Кемеровской области» акты приемки объекта (межотраслевые формы № КС-11, № КС-14,  утвержденные постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100), акт о разборке  временных зданий, сооружений (унифицированная форма КС-9, утвержденная  постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100).  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Строй-Инвест» в пользу Федерального казенного учреждения «Отдел капитального  строительства Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по  Кемеровской области» 2179217,75руб. пени, 1057500руб. штрафа, 70000руб. расходов,  связанных с проведением экспертизы, всего 3306717,75руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Строй-Инвест» в доход федерального бюджета 45184руб. государственной пошлины за  рассмотрение иска.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Судья О.И. Перевалова